394/2023-164380(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

  ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  05 сентября 2023 года А46-10187/2023  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Малыгиной Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в  

открытом судебном заседании исковое заявление Администрации Исилькульского городского  

поселения Исилькульского муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

1055525023180) к управляющей компании общества с ограниченной ответственностью «Дом- 

уют» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об устранении недостатков выполненных  

работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, 

руководствуясь статьями 110, 137, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

исковые требования Администрации Исилькульского городского поселения  

Исилькульского муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

1055525023180) удовлетворить. 

Обязать управляющую компанию общества с ограниченной ответственностью «Дом- 

уют» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30 календарных дней с момента  

вступления решения суда в законную силу, устранить выявленные недостатки работ,  

выполненных по муниципальному контракту № 2020.000030 от 29.12.2020, № 2021.000031 от  

11.01.2021, а именно: 

- по муниципальному контракту № 2020.000030 от 29.12.2020:  

1. Дефекты металлических ограждений (AКC обработка, разрыв отдельных сварных  

швов); 

2. Просадки покрытия в местах пролегания водопропускных труб;  3. Локальные участки отсутствия бетонного замка на бордюрных камнях;  

4. Поперечные трещины в бордюрных камнях; 

5. Перепады по продольному профилю тротуара (плитка повсеместно уложена выше  

установленных бордюрных камней); 

6. Величины зазоров между уложенными в массиве тротуара плитками;  7. Следы разрушения отдельных плиток тротуарных (углы);  

8. Величины поперечной и продольной ровности покрытия.  - по муниципальному контракту № 2021.000031 от 11.01.2021:  1. Наличие строительного мусора на обочине;  

2. Просадки покрытия в местах пролегания водопропускных труб;  3. Локальные участки отсутствия бетонного замка на бордюрных камнях;  

4. Поперечные трещины в бордюрных камнях; 

5. Перепады по продольному профилю тротуара (плитка повсеместно уложена выше  

установленных бордюрных камней); 

6. Величины зазоров между уложенными в массиве тротуара плитками;  7. Следы разрушения отдельных плиток тротуарных (углы);  

8. Величины поперечной и продольной ровности покрытия;  9. Эрозия (шелушение) отдельных тротуарных плиток;  

10. Перепады по высоте относительно друг друга отдельных тротуарных плит; 11. На отдельных участках установлены бордюрные камни длиной менее 1 метра; 

12. Отсутствие единой горизонтальной и вертикальной плоскости, отсутствие уклонов,  

заполнения швов ж/б водоотводных лотков, заполнения пазух, отсутствие бетонной  

подготовки.  

Взыскать с управляющей компании общества с ограниченной ответственностью «Дом- уют» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу федерального бюджета 6 000 руб.  государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и  может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и  подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177  (статьей 186) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение  (определение), выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа  не позднее следующего дня после дня его принятия (вынесения).  

По ходатайству указанных лиц копии решения (определения) на бумажном носителе  могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены  им под расписку.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Е.В. Малыгина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 21.03.2023 3:07:00Кому выдана Малыгина Елена Витальевна