АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

  РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А76-1204/2016

19 сентября 2017 года

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Мосягина Е.А. при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  первоначальному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «ПромСтрой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, к  обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонолитподряд», ОГРН  

<

***>, г. Рязань, о взыскании 5 814 241 руб. 28 коп., встречному  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Спецмонолитподряд», ОГРН 

<

***>, г. Рязань, к обществу с  ограниченной ответственностью «ПромСтрой», ОГРН 

<

***>, г.  Челябинск, о признании недействительным одностороннего отказа, при участии  в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора, - общества с ограниченной ответственностью  «Строительство и управление 7», временного управляющего общества с  ограниченной ответственностью «ПромСтрой» ФИО2, общества с ограниченной ответственностью «Гринфлайт»,  ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, при участии в судебном заседании  представителя ООО «ПромСтрой» – ФИО3, паспорт, доверенность  от 09.01.2017,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «СпецМонолитПодряд», ОГРН 

<

***>, г. Рязань, в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ПромСтрой», ОГРН 

<

***>, г.  Челябинск, убытки в размере 273 873 руб. 28 коп., неустойку в размере 5 424 368  руб. 00 коп., штраф за период с 31.08.2015 по 24.12.2015 в размере 116 000 руб.,  производить начисление штрафа за непредставление исполнительной  документации в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки, начиная с  25.12.2015 по день фактического исполнения обязательства, расходы по уплате  государственной пошлины в размере 52 071 руб.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью  «СпецМонолитПодряд», ОГРН 

<

***>, г. Рязань, предоставить обществу  с ограниченной ответственностью «ПромСтрой», ОГРН 

<

***>, г.  

Челябинск, исполнительную документацию на выполненные работы,  которая включает в себя акты освидетельствования скрытых работ, паспорта на  сопутствующие материалы, изделия и оборудование, сертификаты соответствия  и санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы,  журнал авторского надзора, общий журнал и специальный журнал по  выполняемым работам.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «СпецМонолитПодряд», ОГРН 

<

***>, г. Рязань, в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

По встречному иску: 

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «СпецМонолитПодряд» отказать.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через  Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья Е.А. Мосягина 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно  на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru