Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-8322/2019

г. Хабаровск

01 августа 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 июля 2019 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «ДВ-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 680013, 

<

...>)

к Администрации сельского поселения «Поселок токи» Ванинского муниципального района Хабаровского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 682851, 

<

...>)

о  взыскании 2 980 009 руб. 99 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – не явились,

от ответчика – не явились,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Строй» (далее – истец, ООО «ДВ-Строй») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Администрации сельского поселения «Поселок токи» Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – ответчик, Администрация сельского поселения «Поселок токи») о  взыскании 2 980 009 руб. 99 коп. задолженности по оплате выполненных работ по ремонту автомобильной дороги по ул. 60 лет Октября по муниципальному контракту № 18 32709003809270901001 0007 000 4211 244 от 10.09.2018. 

Определением суда от 20.05.2019 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А73-8322/2019, назначено предварительное судебное заседание на 24.06.2019 в 11 часов 20 минут. 

Определением от 24.06.2019 дело назначено к судебному разбирательству на 18.07.2019 в 12 часов 00 минут.

В судебном заседании 18.07.2019 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) был объявлен перерыв до 12 часов 00 минут 23.07.2019, информация о котором размещена в открытом доступе на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание явку своих представителей не обеспечили, извещены о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с требованиями статей 121-123 АПК РФ.

На основании части 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном заседании в отсутствие истца и ответчика.

Ответчиком 23.07.2019 представлено в суд ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения Арбитражным судом Хабаровского края искового заявления Администрации сельского поселения «Поселок токи» Ванинского муниципального района Хабаровского края к ООО «ДВ-Строй» о расторжении муниципального контракта № 18 32709003809270901001 0007 000 4211 244 от 10.09.2018 и взыскании уплаченного аванса, штрафных санкций, а также расходов на проведение строительно-технического исследования в общей сумме 1 682 002 руб. 03 коп.

Ходатайство Администрации сельского поселения «Поселок токи» о приостановлении производства по делу судом рассмотрено и отклонено, поскольку не имеется оснований для приостановления производства по настоящему делу, учитывая, что исковое заявление Администрации сельского поселения «Поселок токи» к ООО «ДВ-Строй» о расторжении муниципального контракта Арбитражным судом Хабаровского края по состоянию на 23.07.2019 не принято к производству. 

Согласно представленному отзыву на иск, ответчики иск не признает, просит в иске отказать в полном объёме, ссылается выполнение на заключение специалиста № 118-ст/18 от 16.11.2018 в соответствии с которым, выполненные ООО «ДВ-Строй» работы на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. 65 лет Октября» в п. Токи не соответствуют условиям контракта, имеют недостатки и подлежат полной переделке.

Истец представил возражения на отзыв ответчика, в которых полагает доводы ответчика несостоятельными, поскольку работы были приняты и акт формы КС-2 подписан заказчиком без замечаний; настаивает на удовлетворении иска.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между Администрацией сельского поселения «Поселок токи» Ванинского муниципального района Хабаровского края (Заказчик) и ООО «ДВ-Строй» (Подрядчик) был заключен муниципальному контракту № 18 32709003809270901001 0007 000 4211 244 от 10.09.2018 «закупка работ «Ремонт автомобильной дороги по ул. 65 лет Октября» (далее – контракт), по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. 65 лет Октября» (далее – работы, объект) в объёме, указанном в ведомости объемов работ (приложение 1), техническим заданием (приложение 2), показателями, установленными Заказчиком для определения соответствия эквивалентности используемого для производства работ товара (приложение 3), являющимися неотъемлемыми частями контракта, в сроки, указанные в пункте 5.1 контракта (пункт 1.1 контракта).

Адрес производства работ: Хабаровский край, Ванинский район, п. Токи – автомобильная дорога ул. 65 лет Октября (пункт 1.2 контракта).

В целях надлежащего исполнения контракта допускается производство работ с поставкой товара, качество которого, технические характеристики и функциональные свойства являются улучшенными по сравнению с материалами, указанными в контракте. Цена, в этом случае, не может превышать цену, определенную контрактом (пункт 1.3 контракта).

Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет 3 980 001 руб. 99 коп. и указана в сметной документации (приложение 1) с учетом коэффициента снижения по результатам электронного аукциона.

Цена контракта включает в себя стоимость работ в полном объеме, с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на транспортировку рабочих, стоимость использованных материалов, инструментов, оборудования, их доставку и разгрузку (пункт 2.2 контракта).

Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (пункт 3.1 контракта).

В соответствии с пунктом 3.2 контракта оплата производится двумя этапами:

- перечисление аванса в размере 1 000 002 руб. 00 коп., в срок до 25 сентября;

- перечисление оставшейся суммы с учетом коэффициента снижения по результатам электронного аукциона, после проверки актов КС-2, КС-3, Министерством промышленности и транспорта Хабаровского края, приемки выполненных работ, подписания всеми уполномоченными лицами сторон актов, указанных в пункте 3.1 контракта.

Оплата производится в течение 15 дней после подписания уполномоченными лицами сторон актов, указанных в пункте 3.1 контракта и доведения финансовых лимитов по результатам проверки Министерством промышленности и транспорта Хабаровского края.

Согласно пункту 4.1.7 контракта Заказчик вправе для проверки соответствия качества выполняемых работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Сроки выполнения работ определены в пункте 5.1 контракта: 

- начало выполнения работ – с даты подписания контракта;

- окончание работ – по 31 октября 2018 года.

Условия выполнения работ: в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение 1), техническим заданием (приложение 2), показателями, установленными Заказчиком для определения соответствия эквивалентности используемого для производства работ товара (приложение 3) (пункт 5.2 контракта).

Согласно пункту 6.1 контракта, по окончании выполнения работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ и представить Заказчику в срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ два экземпляра отчетной и исполнительной документации, включающей:

- документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения работ по контракту;

- акт о приемке выполненных работ (формы № КС-2) с учетом коэффициента снижения по результатам;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3).

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписывается представителями Подрядчика и приемочной комиссией Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Подрядчика и Заказчика. В случае, если акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Заказчика, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) считается неподписанным, а работы непринятыми (пункт 6.5 контракта).

Акты КС-2, КС-3 направляются для осуществления проверки в Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края (пункт 6.6 контракта).

В случае обнаружения Заказчиком по результатам проверки или при проведении приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором   фиксируется  перечень  недостатков  (дефектов)  и  сроки  их  устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и свой счет в сроки, указанные в акте (пункт 6.7 контракта). 

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (пункт 6.8 контракта).

Как следует из материалов дела, Заказчик перечислил Подрядчику аванс по муниципальному контракту № 18 32709003809270901001 0007 000 4211 244 от 10.09.2018 в размере 1 000 002 руб. 00 коп.

ООО «ДВ-Строй» выполнило работы по контракту и с сопроводительным письмом от 02.11.2018 исх.№ б/н направило Заказчику (получено 06.11.2018 за вх. № 1210/1-18) на рассмотрение и утверждение документацию на выполненные работы: акт о приемке выполненных работ формы КС-2 (2 экз.), справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (2 экз.), локальный сметный расчет (2 экз.), счет № 124 от 01.11.2018 (2 экз.), счет-фактуру № 124 от 01.11.2018 (2 экз.), паспорт-накладную на асфальтобетонную смесь (16 шт.), паспорта качества на отсев и щебень (копии) (3 шт.).

Администрация сельского поселения «Поселок токи» подписала акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 01.11.2018 № 1 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 01.11.2018 № 1 на сумму 3 980 001 руб. 99 коп. без замечаний.

Вместе с тем, в ходе выполнения работ по контракту Администрация сельского поселения «Поселок токи» письмами № 564/1-18 от 23.10.2018, № 564/1-18 от 24.10.2018 сообщала Подрядчику о несоответствии толщины щебеночного слоя и асфальтового покрытия ведомости объемов работ, просила привести в соответствие толщину асфальтового покрытия.

ООО «ДВ-Строй» гарантировало Заказчику выполнить работы по отсыпке обочин дороги и укладке асфальтобетонной смеси в количестве 7 м2 по ул. 65 лет Октября по контракту в срок до 30.11.2018 (письмо от 12.11.2018).

В целях проверки соответствия качества выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. 65 лет Октября» в рамках контракта № 18 32709003809270901001 0007 000 4211 244 от 10.09.2018 Администрация сельского поселения «Поселок токи» по результатам конкурсной процедуры заключила с ООО «Хабаровское бюро экспертизы и оценки» контракт № 118-ст/18 т 22.10.2018 на оказание услуг по проведению строительно-технического исследования. 

Письмом № 577/1-18 от 29.10.2018 Администрация сельского поселения «Поселок токи» просила ООО «ДВ-Строй» направить представителя 30.10.2018 в 10 часов 00 минут для выпиловки 2-х кусков асфальтового покрытия в целях проведения экспертизы выполненных работ.

По результатам проведенного исследования специалистом ООО «Хабаровское бюро экспертизы и оценки» ФИО2 подготовлено заключение специалиста от 16.11.2018 № 118-ст/18, согласно которому работы выполнены с нарушением технологии производства работ, качества, технического задания Заказчика и с использованием асфальтобетонной смеси, не соответствующей нормативным требованиям для выполнения покрытия автомобильных дорог. Нарушены требования нормативных документов: п. 12.5.3 СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»; п. 5.31 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с изменением № 1)»; ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». Работы на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. 65 лет Октября» в п. Токи подлежат полной переделке.

Подрядчик не устранил недостатки выполненных работ по контракту.

Администрация сельского поселения «Поселок токи» окончательный расчет за выполненные ООО «ДВ-Строй» работы не произвела.

Общество «ДВ-Строй» претензией без даты и без номера, врученной Заказчику 06.03.2019 за вх. № 276/1-18, требовало незамедлительно погасить задолженность в размере 2 980 009 руб. 99 коп.

Администрация сельского поселения «Поселок токи» письмом № 194/1-18 от 19.03.2019 отклонила претензию Подрядчика, сославшись на ненадлежащее выполнение работ согласно заключению специалиста от 22.10.2018 № 118-ст/18.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «ДВ-Строй» в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассматриваемые правоотношения сторон возникли из контракта на выполнение работ для муниципальных нужд и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств, а также нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 2 указанной статьи договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711, 746 ГК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

В подтверждение факта выполнения работ по муниципальному контракту № 18 32709003809270901001 0007 000 4211 244 от 10.09.2018 на общую сумму 3 980 001 руб. 99 коп. истцом представлены в материалы дела акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 01.11.2018 № 1 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 01.11.2018 № 1. 

Акт формы КС-2 и справка формы КС-3 подписаны обеими сторонами без возражений.    

Истец просит взыскать долг по оплате выполненных работ по контракту в размере 2 980 009 руб. 99 коп. Однако задолженность по контракту составляет 2 979 999 руб. 99 коп. (3 980 001 руб. 99 коп. - 1 000 002 руб. 00 коп.).  

Возражая на иск, ответчик ссылается на то, что работы выполнены истцом с существенными недостатками и требуют полной переделки. В обоснование наличия недостатков (дефектов) в результате выполненных ООО «ДВ-Строй» работ Администрация сельского поселения «Поселок токи» представила в материалы дела заключение специалиста № 118-ст/18 от 16.11.2018, выполненное специалистом Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровское бюро экспертизы и оценки» ФИО2 на основании муниципального контракта от 22.10.2018 № 118-ст/18 по оказанию услуг на проведение строительно-технического исследования, заключенного в соответствии с требованиями части 4 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. 

Согласно указанному заключению специалиста № 118-ст/18 от 16.11.2018, в ходе проведения обследования автомобильной дороги по ул. 65 лет Октября в п. Токи, выявлены следующие дефекты покрытия: неровности и впадины в дорожном покрытии глубиной до 32 мм, местами в углублениях стоит вода. На протяжении всего покрытия обнаружены фрагментарно волны (гребенки), т.е. чередование впадин и выступов на дорожном покрытии в продольном направлении по отношению к оси автомобильной дороги. Обнаружены трещины в покрытии, откалывание, рыхлость и отсутствие уплотнения нового покрытия по краю дороги.

Все выявленные недостатки, в том числе отсутствие требуемого уклона, неровности и впадины,  в  которых скапливается  вода от осадков,  приводит к быстрому разрушению асфальтобетонного покрытия и значительному сокращению срока его службы.

Как следует из заключения № 118-ст/18 от 16.11.2018, Подрядчиком предоставлены паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь (16 шт.), в которых полностью отсутствует требуемая информация: вид и тип смеси, адрес укладки и пр.

Согласно приложению № 2 к муниципальному контракту № 18 32709003809270901001 0007 000 4211 244, Подрядчиком при выполнении работ должны быть соблюдены следующие требования:

1. требования к укладке основания: щебень укладывается в 1 слой с уплотнением, щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм; уплотнение.

2. требования к асфальтобетонной смеси: покрытие должно быть выполнено 2-х слойное: 

- горячая асфальтобетонная пористая крупнозернистая смесь, Марки II, тип В – 1 слой, толщиной 4 см;

- горячая асфальтобетонная пористая крупнозернистая смесь, Марки II, тип В – 1 слой, толщиной 4 см.

Согласно локальному сметному расчёту (приложение к контракту), в составе работ было предусмотрено: 

- пункт 1 сметы - снятие всего старого асфальтобетонного покрытия общим объёмом 167 м3 шириной 6 см на площади 2700 м2;

- пункт 3 сметы - устройство подстилающего слоя щебеночного - 270 м3. При общей площади покрытия 2700 м2 на объекте, толщина подстилающего слоя из щебня должна составлять 10 см;

- пункты 4-6 сметы - устройство двуслойного асфальтобетонного покрытия: один слой (пункт 4) толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси горячей для пористого асфальтобетона щебеночного и гравийного, марка: II. Второй слой (пункты 5, 6) должен быть выполнен из асфальтобетонной смеси горячей для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистого, песчаного, марки: II, тип А. Согласно смете толщина общая 2-х слоёв должна быть 6 см.

Фактически выполнено:

- старое асфальтобетонное покрытие полностью не снималось, о чём свидетельствует результат 2-х вырубок образцов покрытия;

- подстилающий слой из щебня не выполнен полностью, о чём свидетельствует результат 2-х вырубок  и  акт  освидетельствования  скрытых  работ № 1   от  24.09.2018,  подписанный комиссионно стороной Заказчика. Подготовка под новое покрытие отсутствует, о чём свидетельствуют дефекты, обнаруженные при обследовании и перечисленные выше в заключении;

- новое асфальтобетонное покрытие выполнено полностью на площади 2700 м2 толщиной неравномерной от 3,5 см до 5 см. Толщина значительно меньше требуемой. Асфальтобетон по результатам лабораторных испытаний образцов, не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013 и СП 78.13330.2012 п. 12.5.3 и не соответствует техническому заданию - приложениям № 2 и № 3  к муниципальному контракту № 18 32709003809270901001 0007 000 4211 244 от 10.09.2018.

По результатам исследования специалист пришел к выводу, что работы выполнены с нарушением технологии производства работ, качества, технического задания Заказчика и с использованием асфальтобетонной смеси, не соответствующей нормативным требованиям для выполнения покрытия автомобильных дорог. Нарушены требования нормативных документов: п. 12.5.3 СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»; п. 5.31 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с изменением № 1)»; ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимер-асфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». Работы на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. 65 лет Октября» в п. Токи подлежат полной переделке.

Истец полагает возражения ответчика и заключение специалиста № 118-ст/18 от 16.11.2018 необоснованными, ссылается на то, что акт формы КС-2 подписан Администрацией сельского поселения «Поселок токи» без замечаний, в связи с чем выполненные работы подлежат оплате.

Между тем, исходя из разъяснений, данных в пунктах 12 и 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», наличие актов выполненных работ, подписанных без замечаний, не лишает Заказчика права представить свои возражения относительно объема, стоимости и качества выполненных работ.

Возражения истца судом отклоняются как несостоятельные. 

Не соглашаясь с выводами заключения специалиста № 118-ст/18 от 16.11.2018, истец не представил доказательства, опровергающие данные выводы, ходатайство о назначении судебной строительно-технической экспертизы истец не заявил.

Заключение специалиста № 118-ст/18 от 16.11.2018 суд принимает в качестве надлежащего доказательства по делу.

На основании пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Пунктом 1 статьи 722 ГК РФ определено, что в случае, когда для результата работы предусмотрен гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 Кодекса).

Пунктами 1, 2 статьи 755 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. По общему правилу подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если только не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации.

Данные нормы регулируют обязательства сторон по качеству исполнения подрядных работ и гарантируют заказчику соответствие результата работ его обоснованным ожиданиям как одну из целей договора подряда.     

По смыслу статьи 711 ГК РФ работа подлежит оплате при условии, что она выполнена надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 6 статьи 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Принимая во внимание выводы заключения специалиста № 118-ст/18 от 16.11.2018, оснований для оплаты спорных работ не имеется.

На основании изложенного в удовлетворении искового требования  о взыскании основного долга в размере 2 980 009 руб. 99 коп. следует отказать.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску в соответствии с правилами части 1 статьи 110 АПК РФ относятся на истца.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                    Д.Л. Малашкин