ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 162286/23-67-1341

г. Москва

26 сентября 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 12 сентября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 26 сентября 2023 года

 

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РЕНОВАЦИИ" (123056, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, 2-Я БРЕСТСКАЯ УЛ., Д. 19/18, СТР. 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.12.2014, ИНН: 

<

***>) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛГА" (400078, РОССИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД Г.О., ВОЛГОГРАД Г., ВОЛГОГРАД Г., ИМ ФИО2 ПРКТ, Д. 67, ОФИС 212В, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.09.2019, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании 4 695 919,84 руб.

при участии:

от истца: ФИО3, дов. от 22.05.2023г.

от ответчика: неявка, извещен

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РЕНОВАЦИИ"  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛГА" (далее – ответчик) о взыскании неотработанного аванса по договору от 27.12.2021 №2021/12/27/МО-ОЗ3/СУБ в размере 3 766 657 руб. 01 коп., неустойки в размере 921 523 руб. 12 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.07.2023 по 17.07.2023 в размере 7 739 руб. 71 коп. с продолжением начисления по дату фактической оплаты задолженности.

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих обязательств по договору строительного подряда в установленные сроки.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, отзыв не представил.

Принимая во внимание надлежащее извещение сторон о времени и месте судебного заседания, отсутствие возражений на переход к рассмотрению дела по существу, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 года № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» завершил предварительное заседание и перешел к рассмотрению дела в судебном заседании в первой инстанции.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, между Обществом с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВСК «Волга» (далее – Подрядчик) заключен Договор подряда на выполнение строительно-монтажных № 2021/12/27/МО-ОЗ3/СУБ от 27.12.2021 г.

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 2.1. Договора, Подрядчик на основании Ведомости объемов работ (Приложение № 1 к Договору) принимает на себя обязательства по реконструкции существующих тепловых сетей в 

<

...>.

Стоимость работ, выполняемых в рамках Договора, составляет 9 215 231,24 (Девять миллионов двести пятнадцать тысяч двести тридцать один) рубль 24 копейки, без НДС (п. 3.1. Договора). 

В соответствии с п. 3.2. Договора, оплата договорной цены производится Заказчиком в следующем порядке:

- Аванс в размере 2 766 657,01 (Два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 01 копейка, без НДС перечисляется Заказчиком после подписания Договора в течение 10 (десяти) банковских дней;

- Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком Работы, принятые Заказчиком без претензий и замечаний к качеству их выполнения, (включая соответствие выполненных Работ условиям Договора), либо после устранения Подрядчиком выявленных недостатков осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Заказчиком без претензий и замечаний к качеству выполненных Работ Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), с обязательным предоставлением исполнительной документации от Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется с пропорциональным зачётом ранее выплаченного аванса на основании выставленного счета Подрядчиком.

Заказчик в рамках Договора оплатил Подрядчику в качестве аванса 3 766 657,01 (Три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 01 копейка, без НДС, по следующим платежным поручениям:

- № 19648 от 31.12.2021 г. на сумму 2 766 657,01 руб., без НДС;

- № 14795 от 10.10.2022 г. на сумму 1 000 000,00 руб., без НДС;

Согласно п 4.1. Договора работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало выполнения работ – с момента получения Подрядчиком аванса;

- окончание выполнения работ- 28.02.2022 г. 

В соответствии с п. 8.2. Договора, Подрядчик обязан приступить к производству работ и выполнять работы в соответствии с условиями Договора.

Согласно п. 8.9, Подрядчик обязан подготовить в полном объеме комплект исполнительной документации и передать Заказчику.

Совместно с Заказчиком осуществить сдачу работ строительному надзору с подготовкой полного комплекта исполнительной документации (п. 8.10. Договора).

Подрядчик за 5 (пять) дней до окончания работ направляет Заказчику подписанные со своей стороны следующие документы (п. 10.1. Договора):

- акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 в 4-х экземплярах;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 4-х экземплярах;

- счет на оплату, 1 экз.;

- счет-фактура. Оформленная в соответствии с требованиями НК РФ, 1 экз.;

- акт приема-передачи неиспользованного давальческого материала по форме, предусмотренной Приложением № 6.1. к настоящему Договору, в 4-х экз.;

- отчет об использовании давальческого материала по форме, предусмотренной Приложением № 6.2. к Договору, в 4-х экз.;

- комплект исполнительной документации на объём работ, указанный в актах сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, в 3-х экз. 

По состоянию на 17.07.2023 г. Подрядчиком работы не сданы. 

Сумма неотработанного аванса составляет 3 766 657,01 (Три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 01 копейка.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 №49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в установленный договором срок на сумму перечисленных денежных средств, установленный факт расторжения договора подряда и отсутствие правовых оснований для удержания ответчиком денежных средств, требования истца о взыскании неотработанного аванса по договору от 27.12.2021 №2021/12/27/МО-ОЗ3/СУБ в размере 3 766 657 руб. 01 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки в размере 921 523 руб. 12 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

В соответствии с 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 14.2. Договора, в случае нарушения Подрядчиком срока завершения работ, а также промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе по письменному требованию потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,3 % от стоимости невыполненных в срок работ Подрядчиком по Договору. Общий размер пени не может превышать 10 % (Десять) процентов от стоимости по настоящему Договору. 

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, а также период её начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании неустойки в размере 921 523 руб. 12 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлено требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.07.2023 по 17.07.2023 в размере 7 739 руб. 71 коп. с продолжением начисления по дату фактической оплаты задолженности.

В силу п. 2 ст. 1107 на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Представленный истцом расчет подлежащих взысканию процентов, а также период их начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

В соответствии с п.48 Постановления Пленума Верховного суда от 24 марта 2016 г. № 7 сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.07.2023 по 17.07.2023 в размере 7 739 руб. 71 коп., а так же процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 18.07.2023 по дату фактического исполнения обязательств, начисляемых на сумму долга в размере 3 766 657 руб. 01 коп.  подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛГА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РЕНОВАЦИИ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неосновательное обогащение в размере 3 766 657 руб. (три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 01 копейка) 01 коп., пени за просрочку исполнения обязательств в размере 921 523 руб. (девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот двадцать три рубля 12 копеек) 12 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 08.07.2023г. в размере 7 739 руб. (семь тысяч семьсот тридцать девять рублей 71 копейка) 71 коп. с продолжением начисления процентов по дату фактического исполнения обязательств, а также расходы по оплате госпошлины в размере 46 480 (сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек) руб. 00 коп

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                            В.Г. Джиоев