Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-48409/2019

05 июля 2019 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сергеева О.Н.,

рассмотрев дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ЭВС" (адрес:  Россия 195253, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, дор САЛТЫКОВСКАЯ 18/ЛИТЕРА А/ПОМЕЩЕНИЕ 11Н, ОГРН:  1077847631256);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "КВАРС" (адрес:  Россия 192007, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт ЛИГОВСКИЙ 144/А/3Н, ОГРН:  1027807972279);

о взыскании 479523,16

установил:

ООО "ЭВС" предъявило иск о взыскании с ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "КВАРС" 479 523 руб. 16 коп. неустойки в связи с несвоевременной оплатой долга по договору подряда №60-16 от 08.11.16.

Ответчик иск отклонил, ссылаясь на п.27.17 договора.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании ст. ст. 226-229 АПК РФ.

Судом установлено:

Между ООО «ЭВС» и ООО «СМНУ «КВАРС» был заключен Договор подряда №60-16 от 08.11.2016 г. на выполнение комплекса работ на объектах по сооружению энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2, включая строительно-монтажные работы, в соответствии с которым Истец является субподрядчиком, а Ответчик - подрядчиком.

Согласно пунктам 4.1-4.10 Договора оплата работ производится в следующем порядке: подрядчик не позднее 5 дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) перечисляет 25% от стоимости выполненных работ (пункт 3.1 Договора) на расчетный счет истца. Оставшаяся сумма перечисляется субподрядчику в течение 10 дней с момента оплаты за соответствующие работы подрядчику от генподрядчика, но не позднее 90 дней с даты подписания актов по формам КС-2, КС-3.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.05.18 по делу №А56-70633/2017 с ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "КВАРС" взыскано в пользу ООО "ЭВС" 2 951 428 руб. 83 коп. задолженности по оплате выполненных по договору работ. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.

Ответчик исполнил решение суда 01.08.18.

Согласно п. 27.16 Договора, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в следующих случаях и размерах: по окончании календарного года при просрочке исполнения Подрядчиком обязательств по оплате фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ, услуг, предусмотренных Договором, при условии получения соответствующих денежных средств от Генподрядчика - 0,05% от просроченной суммы оплаты фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ, услуг за каждый календарный день просрочки.

Таким образом, исходя из условий Договора, Истец начислил Ответчику неустойку в размере 479 523 руб. 16 коп. из расчета на 01.08.18.

Ссылка ответчика в отзыве на п. 27.17 договора неправомерна, поскольку согласно буквальному его толкованию, штрафные санкции не применяются к подрядчику - ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "КВАРС" если от субподрядчика - ООО "ЭВС" в течение 10 дней после даты платежа, предусмотренной договором, не поступило письменной претензии о несвоевременной оплате, то есть только в случае добровольной оплаты работ в установленной договором срок и отсутствие письменной претензии в течении 10 дней после оплаты, штрафные санкции не применяются. В данном случае оплата произведена по решению суда, таким образом, первое и второе условие ( добровольность, срок, предусмотренной договором), подрядчиком не соблюдены.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "КВАРС" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭВС" 479 523 руб. 16 коп. неустойки по состоянию на 01.08.18 по договору №60-16 от 08.11.16, а также 12 590 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине. 

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия.

Судья Сергеева О.Н.