АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-7442/2017

г. Ярославль

11 июля 2017 года

Резолютивная часть решения оглашена  04 июля 2017 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Систеровой Н.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Веремьёвым И.М.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Карат - СТ" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  Управлению строительства Администрации городского округа город Рыбинск,

(ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>),  Администрации городского округа город Рыбинск (ИНН   

<

***>, ОГРН   

<

***>)

о   взыскании   1184724,06  руб.

при участии

от истца – ФИО1 по доверенности от 25.05.2015 г.;

от ответчика (1) – не явился;

от ответчика (2) – не явился. 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Карат - СТ" обратилось в суд с иском к Управлению строительства Администрации городского округа город Рыбинск, Администрации городского округа город Рыбинск о   взыскании   1184724.06  руб. неустойки за период с 23.09.2014 г. по 28.02.2017 г.,

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. 

Ответчик (1) и ответчик (2) в судебное заседание не явились, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом. 

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчиков.

Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, суд установил следующее.

Между ООО "ЛЕСЛА" /Застройщик/ и УС администрации ГО г. Рыбинск /Муниципальный заказчик/ на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 11.10.2013 заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирных малоэтажных жилых домов (муниципальный контракт № 0171300002313000018 - 0048519-01) от 25.10.2013, в соответствии с п.п. 1.1, 3.1, 3.3 которого,  предметом настоящего договора является участие Муниципального заказчика в долевом строительстве многоквартирных малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского округа г. Рыбинска Ярославской области, расположенных в г. Рыбинске Ярославской области по адресу Братская ул., 

<

...> общая стоимость участия в долевом строительстве (стоимость квартир) на момент заключения договора в текущих ценах с НДС составляет 14 070 940,00 руб.; Муниципальный заказчик обязуется оплатить стоимость квартир, указанную в п. 3.1 договора (муниципального контракта) в следующем порядке: оплата осуществляется в российских рублях в безналичной форме, оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Застройщика, перечисление денежных средств осуществляется поэтапно.

Между ООО "ЛЕСЛА" /Застройщик/ и УС администрации ГО г. Рыбинск /Муниципальный заказчик/ на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 11.10.2013 заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирных малоэтажных жилых домов (муниципальный контракт № 0171300002313000026 - 0048519-01) от 25.10.2013, в соответствии с п.п. 1.1, 3.1, 3.3 которого предметом настоящего договора является участие Муниципального заказчика в долевом строительстве многоквартирных малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского округа г. Рыбинска Ярославской области, расположенных в г. Рыбинске Ярославской области по адресу Больничная ул., д. 13;  общая стоимость участия в долевом строительстве (стоимость квартир) на момент заключения договора в текущих ценах с НДС составляет 11 897 600,00 руб.; Муниципальный заказчик обязуется оплатить стоимость квартир, указанную в п. 3.1 договора (муниципального контракта) в следующем порядке: оплата осуществляется в российских рублях в безналичной форме, оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Застройщика, перечисление денежных средств осуществляется поэтапно.

Между ООО "ЛЕСЛА" /Застройщик/ и УС администрации ГО г. Рыбинск /Муниципальный заказчик/ на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 11.10.2013 заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирных малоэтажных жилых домов (муниципальный контракт № 0171300002313000030 - 0048519-01) от 25.10.2013, в соответствии с п.п. 1.1, 3.1, 3.3 которого предметом настоящего договора является участие Муниципального заказчика в долевом строительстве многоквартирных малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского округа г. Рыбинска Ярославской области, расположенных в г. Рыбинске Ярославской области по адресу Братская ул., 

<

...>; общая стоимость участия в долевом строительстве (стоимость квартир) на момент заключения договора в текущих ценах с НДС составляет 10 914 020,00 руб.; Муниципальный заказчик обязуется оплатить стоимость квартир, указанную в п. 3.1 договора (муниципального контракта) в следующем порядке: оплата осуществляется в российских рублях в безналичной форме, оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Застройщика, перечисление денежных средств осуществляется поэтапно.

14.05.2015 между  ООО "ЛЕСЛА" /Цедент/ и ООО "Карат - СТ" /Цессионарий/ заключен договор уступки права требования (цессии) № 1/15, согласно которому Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) к УС администрации ГО г. Рыбинск суммы задолженности 4 549 480,00 руб., в том числе НДС 18%, вытекающие из договора участия в долевом строительстве многоквартирных малоэтажных жилых домов (муниципальный контракт № 0171300002313000018 - 0048519-01) от 25.10.2013, договора участия в долевом строительстве многоквартирных малоэтажных жилых домов (муниципальный контракт № 0171300002313000026 - 0048519-01) от 25.10.2013, договора участия в долевом строительстве многоквартирных малоэтажных жилых домов (муниципальный контракт № 0171300002313000030 - 0048519-01) от 25.10.2013.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 06.11.2015 г. по делу № 11764/2015 с  Управления строительства администрации городского округа город Рыбинск в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Карат - СТ" было взыскано 4 549 480,00 руб.  задолженности.

Несвоевременная оплата задолженности, послужила основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Оценивая сложившуюся правовую ситуацию, суд пришел к следующему выводу.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно ст. 382 Гражданского кодекса РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования). Для перехода к другому лицу прав кредитора согласие должника не требуется.

В силу ч. 2 ст. 384 Гражданского кодекса РФ право требования по денежному обязательству может перейти к другому лицу в части, если иное не предусмотрено законом.

Согласно ст.388 Гражданского кодекса РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору; не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

Согласно п.1  ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Факт несвоевременной оплаты задолженности подтвержден материалами дела. 

С учетом изложенного исковые требования по взысканию неустойки в сумме  1041806,28 руб. за период с 23.09.2014 г. по 28.02.2017 г., являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 

Расходы по оплате государственной пошлины суд в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика (1). 

Так же истец заявил требование о взыскании пени и госпошлины в порядке субсидиарной ответственности с Администрации городского округа город Рыбинск.

Согласно Положению об Управлении строительства (утверждено решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 № 155) Управление строительства является отраслевым (функциональным органом Администрации, обладающим правами юридического лица.

В силу ч.4 ст. 123.22 Гражданского кодекса РФ казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества.

В соответствии с п. 1.4 Положения об Управлении строительства Управление является муниципальным казенным учреждением.

Как следует из п. 1.11 Положения об Управлении строительства Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Администрация городского округа город Рыбинск – собственник соответствующего имущества.

В соответствии с п. 1 ст. 399 Гражданского кодекса РФ до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иным правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Согласно п. 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» при разрешении споров, связанных с применением субсидиарной ответственности, необходимо иметь в виду, что предусмотренный пунктом 1 статьи 399 порядок предварительного обращения кредитора к основному должнику может считаться соблюденным, если кредитор предъявил последнему письменное требование и получил отказ должника в его удовлетворении либо не получил ответа на свое требование в разумный срок.

Предъявление требования к основному должнику подтверждено направлением уведомления об уступке прав от 14.05.2015, претензией от 24.03.2017, которые оставлены без ответа.

Учитывая изложенное, требования истца подлежат удовлетворению в порядке субсидиарной ответственности с администрации городского округа город Рыбинск.

Руководствуясь статьями 12, 309, 310, 330, 382, 388, 702, 711, Гражданского кодекса, статьями 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  Управления строительства Администрации городского округа город Рыбинск (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Карат - СТ"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 1041806,28 руб. неустойку за период с 23.09.2014 г. по 28.02.2017 г., 19559,47 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины. 

При недостаточности или отсутствии у Управления строительства Администрации городского округа город Рыбинск (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) денежных средств в сумме 1041806,28 руб. неустойки за период с 23.09.2014 г. по 28.02.2017 г., 19559,47 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины, взыскать их в порядке субсидиарной ответственности с  Администрации городского округа город Рыбинск (ИНН   

<

***>, ОГРН   

<

***>) за счет казны.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить Обществу   ограниченной ответственностью "Карат - СТ"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) из федерального бюджета 5287,53 руб. госпошлины по платежному поручению № 211 от 12.05.2017 г.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Систерова Н.А.