АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  РЕШЕНИЕ  (резолютивная часть) г. Волгоград Дело № А12-39016/2017 

«19» февраля 2018 года  

 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Смагоринской Екатерины  Борисовны, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению публичного акционерного общества «Волгоградоблэлектро» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 400075, 

<

...>) к обществу  с ограниченной ответственностью «Волжскстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 400038, г. Волгоград, 

<

...>) о  понуждении исполнить обязательства и взыскании денежных средств,  

 при участии в судебном заседании: 

 от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 07.12.2016 № 369, ФИО3, представитель по доверенности от 20.12.2017 № 680,  

 от ответчика – ФИО4 представитель по доверенности от 08.02.2018, 

 руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,   

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Волжскстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 400038, г. Волгоград, 

<

...>) исполнить гарантийные обязательства по устранению  выявленных дефектов в рамках договора подряда № 53-03/2015 от 24.03.2015 на  выполнение работ по «Реконструкции систем водоснабженния, отопления и вентиляции и  выполнение отделочных работ административного здания Суровиикинского филиала  ОАО «Волгоградоблэлектро» в 

<

...>», в срок, не  превышающий 30 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу,  путем устранения недостатков работ, выразившихся в:  

 1. Самопроизвольно лопнувшем стеклопакете в помещении № 8 второго этажа  административного здания площадью – 1,2 кв.м.,  

 2. Неплотно прилегающих створках оконных блоков (20 шт.) в помещениях № 3,5,8,9  первого этажа, помещениях №№ 2-9 второго этажа, лестничной клетке между первым и  вторым этажами административного здания площадью 24,15 кв. м.,  

 3. Течи воды в оконных блоках на подоконники (20 шт.) в помещениях № 3,5,8,9  первого этажа, помещениях №№ 2-9 второго этажа, лестничной клетке между первым и  вторым этажами административного здания,  

 4. Щелях в примыканиях оконных блоков (20 шт.) в помещениях № 3,5,8,9 первого  этажа, помещениях №№ 2-9 второго этажа, лестничной клетке между первым и вторым  этажами административного здания,  

 5. Трещинах на лестничной площадке в плинтусах и ступеньках в помещении № 11  

первого этажа и помещениях № 11 второго этажа административного здания площадью 7  кв. м.,  

 6. Трещинах в плитке оконных откосов, щелях в плитке у петель оконных блоков,  щели между подоконником и стеной в туалетной комнате помещений №№ 4а, 4б, 10а, 10б  первого этажа административного здания,  

 7. Щелях до 1 см в дверях входной группы, трещинах дверной коробки входной двери  помещения № 6 первого этажа административного здания,  

 8. Отставании плитки на крыльце главного входа, разрушении швов между плитками  помещений №№ 12,13 первого этажа административного здания на площади 2,5 кв.м.,  

 9. Отваливании плитки на цоколе административного здания на площади 0,2 кв. м.,  

 10. Разрушение верхнего слоя бетонной отмостки вокруг административного здания на  площади 34 кв.м.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волжскстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 400038, г. Волгоград, 

<

...>) в пользу публичного акционерного общества  «Волгоградоблэлектро» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 400075, 

<

...>) неустойку,  начисленную по пункту 7.3 договора подряда № 5303/2015 от 24.03.2015 в размере 494 144 руб. 47 коп. за период с 23.05.2015 по  16.12.2015.  

 В удовлетворении остальной части требований отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волжскстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 400038, г. Волгоград, 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 3 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в порядке, установленном Арбитражным  процессуальным кодексом Российской Федерации через Арбитражный суд Волгоградской  области.  

 Решение в полном объеме будет изготовлено не позднее 26.02.2018. 

 Судья Е.Б. Смагоринская