АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2024 года

Дело № А33-24183/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 10 декабря 2024 года.

В полном объеме решение изготовлено 19 декабря 2024 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Нечаевой И.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Декор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сибирьэнергоинжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности,

с привлечением третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ИНН 

<

***>),

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 09.01.2024, представлен диплом о высшем юридическом образовании, личность удостоверена паспортом,

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 11.12.2023, представлен диплом о высшем юридическом образовании, личность удостоверена паспортом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Наказновой С.А.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Декор» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сибирьэнергоинжиниринг» (далее – ответчик) о взыскании гарантийного удержания по договорам подряда от 14.06.2019 №769ГК-НК, от 07.10.2019 №1117ГК-НК, от 25.02.2021 №99ГК-НК в размере 6 202 547 руб. 25 коп.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 08.08.224 возбуждено производство по делу.

Определением от 05.09.2024 судебное заседание отложено на 03.10.2024, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».

Протокольным определением от 03.10.2024 судебное заседание отложено на 17.10.2024.

Протокольным определением от 17.10.2024 судебное заседание отложено на 10.12.2024.

В судебное заседание 10.12.2024 явились представители истца, ответчика.

АО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» явку представителя в судебное заседание 10.12.2024 не обеспечило, извещено надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителя третьего лица.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика не спорил с суммой долга.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

14 июня 2019 года между ответчиком (подрядчик) и истцом (субподрядчик) заключен договор подряда №796ГН-НК (договор №796ГН-НК), по условиям которого подрядчик поручает, я субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить в сроки, предусмотренные договором (приложение № 2 к договору) строительно-монтажные работы в соответствии о техническим заданием (приложение № 1 к договору), а также иные работы па основании дополнительных соглашений к договору.

Цена договора составляет - 50 000 000 руб., в том числе НДС (20%) – 8 333 333 руб. 33 коп. (пункт 5.1. договора №796ГН-НК).

Сумма гарантийных удержаний по договору №796ГН-НК 2 283 513 руб. 16 коп.

Как следует из пунктов 6.1. договора №796ГН-НК подрядчик вправе производить выплату авансовых платежей в размере до 10% (десяти процентов) от цены договора, указанной в п. 5.1. договора. 

Решение о выплате авансового платежа принимается подрядчиком на основании запроса субподрядчика. В случае принятия решения подрядчиком о выплате части авансового платежа субподрядчик предоставляет счет на сумму авансового платежа оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае выплаты авансовых платежей, зачет таких авансовых платежей будет производиться из сумм платежей, причитающихся субподрядчику в полном объеме при первом закрытии работ по актам о приемке выполненных работ.

Не позднее 5 календарных дней от даты получения авансового платежа субподрядчик обязан выставить б адрес Подрядчика счета-фактуры на суммы полученных авансовых платежей в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.

Субподрядчик обязан расходовать авансовые средства целевым образом на нужды проекта и ежемесячно, в срок до 15 числа месяца» следующего за отчетным, предоставлять отчеты подрядчику о целевом расходовании денежных средств, полученных по договору в качестве аванса, с обязательным предоставлением первичной документации.

В соответствии с пунктом 6.3. договора №796ГН-НК субподрядчик вправе в любое время предоставить подрядчику Банковскую гарантию исполнения обязательств по договору взамен обеспечения в виде гарантийного удержания, предусмотренного п. 6.7 договора (10 % от стоимости соответствующих обязательств, удерживаемых до окончания гарантийного периода), на сумму, эквивалентную сумме гарантийного удержания. Срок действия банковской гарантии исполнения обязательств по договору должен истекать не ранее даты истечения гарантийного периода плюс 60 дней.

Пунктом 6.6. договора №796ГН-НК предусмотрено, что оплата работ на строительной площадке осуществляется банковским переводом: 

- стоимость работ на строительной площадке с учетом зачета авансов в соответствии с п. 6.1. договора оплачивается по факту выполнения работ (ежемесячно, на. основании подписанных обеими сторонами актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), а также актов смонтированного оборудования (в случае монтажа оборудования) с позиционными ценами (за исключением случаев монтажа оборудования поставки подрядчика) пропорционально фактически выполненному объему работ;

- 10 % стоимости Работ на строительной площадке (в т.ч. стоимости смонтированного оборудования) оплачивается в течение «60 (шестидесяти) календарных дней после окончания гарантийного периода и подписания сторонами акта об окончании Гарантийного периода в случае не предоставления субподрядчиком банковской гарантии исполнения обязательств по договору.

В пункте 6.7. договора №796ГН-НК сторонами согласовано, что оплата выполненных работ, указанных в пункте 6.6. договора производится подрядчиком с отсрочкой до 60 календарных дней с даты подписания подрядчиком соответствующих актов и иных документов, подтверждающих выполнение субподрядчиком соответствующих обязательств и поступления от субподрядчика соответствующих документов (актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, акта о завершении работ по договору, акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, акта об окончании гарантийного периода, счетов, счетов-фактур), на реквизиты субподрядчика определенные статьей 25 договора и указанные в счете на оплату.

25 февраля 2021 года между ООО «Декор» (субподрядчик) и ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (подрядчик) заключен договор № 99ГК-НК на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту «ТЭЦ-2. Реконструкция (замена) оборудования энергоблоков ст. № 1 и ст. № 2» шифр ТЭЦ-2-ЭН-1 (договор № 99ГК-НК, согласно пункту 2.1. которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить в сроки, предусмотренные Договором (приложение № 2 к: договору) комплекс работ по нанесению антикоррозийной защиты металлоконструкций временного тамбура ТО по Объекту «ТЭЦ-2. Реконструкция (замена) Оборудования энергоблока ст. № 1» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и приложениями к нему. 

Сумма гарантийных удержаний по договору № 99ГК-НК 66 702 руб. 99 коп.

В силу п. 6.1.2. договора № 99ГК-НК/ТЭЦ-2(1) оплата 10 % стоимости работ на строительной площадке осуществляется в течение 65 календарных дней после окончания гарантийного срока и подписания сторонами акта об окончании гарантийного периода в соответствии с п. 12.12 договора.

07 октября 2019 года между ООО «Декор» (субподрядчик) и ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (подрядчик) заключен договор № 1117ГК-НК на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту «ТЭЦ-2. Реконструкция (замена) оборудования энергоблоков ст. № 1 и ст. № 2» шифр ТЭЦ-2-ЭН-1 (договор № 1117ГК-НК), согласно пункту 2.1. которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить в сроки, предусмотренные договором и графиком реализации договора (приложение № 2 к договору) строительно-монтажные работы (СМР) по подготовке поверхности и нанесению огнезащитного покрытия на металлоконструкции каркаса Главного корпуса, пристройки ЗРУ 110кВ и переходной галереи в рамках 1-й очереди реконструкции Норильской, ТЭЦ-2 в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к договору). 

Сумма гарантийных удержаний по договору№ 1117ГК-НК 3 852 331 руб. 10 коп.

В соответствии с п. 12.12. договоров №№ 796ГК-НК, 1117ГК-НК, 99ГК-НК/ТЭЦ-2 (I), по окончании гарантийного периода и при отсутствии не устраненных замечаний подрядчика в гарантийный период, стороны подписывают акт об окончании гарантийного периода в 2 (двух) экземплярах.

Согласно п. 1.7. договоров с№№ 796ГК-НК, 1117ГК-НК, 99ГК-НК/ТЭЦ-2 (I) гарантийный период (гарантийный срок) -период времени, в течение которого Субподрядчик гарантирует Подрядчику соответствие результата Работ требованиям Договора, в том числе условиям о качестве Работ, Проекта и Технической документации Нормативно-правовым и нормативно-техническим актам, достижение и сохранение Результатом Работ указанных в Технической документации показателей и возможность эксплуатации Результата Работ в соответствие с Договором на протяжении Гарантийного срока. Начало Гарантийного периода исчисляется с даты подписания Заказчиком АО «Силовые машины» и Конечным Заказчиком ПАО «ГМК «Норильский никель» Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) и составляет 2 (два) года.

Как следует из иска, в соответствии с условиями договора работы субподрядчиком надлежащим образом выполнены, сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3.

По Договору № 99ГК-НК/ТЭЦ-2 (I) ООО «Декор» выполнены, а ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» приняты работы стоимостью 694 886 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%, что подтверждается подписанной сторонами справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 28.02.2021№ 1. 

По договору субподряда № 796ГК-НК ООО «Декор» были выполнены, а ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» приняты работы стоимостью 22 835 131 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 20%, что подтверждается подписанным сторонами дополнительным соглашением от 05.08.2021 № 6 к договору № 796ГК-НК. 

По договору субподряда № 1117ГК-НК ООО «Декор» были выполнены, а ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» приняты работы стоимостью 40 068 748 руб. 55 коп., в т.ч. НДС 20%, что подтверждается подписанным сторонами дополнительным соглашением от 05.08.2021 № 3 к договору № 1117ГК-НК. 

В письме от 04.02.2022 №СИБЭИ/КВ-01-09/5-100 о выплате гарантийных удержаний по договорам №№ 796ПС-НК, №1117ГК-НК, № 1529ГК-НК, № 1880ГК-НК, 99ГК-НК ответчик сообщил, что выплата по гарантийным удержаниям будет произведена после подписания актов приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией и получения денежных средств от заказчика – АО «Силовые машины».

Истец направлял письма о возврате гарантийных удержаний от 10.03.2023 исх. №40, от 23.12.2022 исх. №179, от 12.12.2022 №173.

Согласно письму ответчика от 08.06.2023 №СИБЭИ/ЕВ-01-09/5-521 по договорам первого этапа срок гарантийного периода начался с мая 2022 года. Таким образом, гарантийный период окончен в мае 2024 года.

Истец 11.07.2024 направил повторную претензию №106 через электронную почту. Отправка через электронный адрес установлена сторонами как источник направления юридически-значимых писем. 

Требования истца ответчиком добровольно не исполнены.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договорам истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 6 202 547 руб. 25 коп. гарантийного удержания.

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв.

03 октября 2024 года сторонами подписаны акты об окончании гарантийного по договорам №№ 1117ГК-НК, 99ГК-НК/ТЭЦ-2(1), 769ГК-НК. Срок оплаты гарантийного удержания по договору № 769ГКНК составляет 02.12.2024, по договору № 1117ГК-НК – 09.12.2024, по договору № 99ГК-НК/ТЭЦ-2(1)– 09.12.2024.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 123 Конституции Российской Федерации, статьям 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Кодексом.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право и создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Заключенные между сторонами договоры являются договорами подряда, отношения по которому регулируются параграфами 1, 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 722 ГК РФ, в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК РФ). Перечень возможных способов обеспечения исполнения обязательств является открытым (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора, поэтому стороны вправе предусмотреть в договоре и такой способ обеспечения исполнения обязательств, как гарантийное удержание (пункты 1, 2 статьи 1, подпункт 1 пункта 1 статьи 8, статья 421 ГК РФ).

Из указанного принципа следует право сторон по своему усмотрению определить порядок уплаты всей или части стоимости при ненаступлении какого-либо обстоятельства в течение определенного срока после передачи результата работ (например, оплата производится, если в гарантийный период не будут выявлены скрытые недостатки переданного объекта), что согласно сложившейся практике деловых отношений именуется гарантийным удержанием. Такой порядок оплаты с экономической точки зрения выполняет обеспечительную функцию, является относительно распространенным в обороте и не противоречит пункту 2 статьи 746 ГК РФ (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2013 № 4030/13, определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2017 № 304-ЭС17-1977).

Гарантийное удержание представляет собой договорное условие о возможности удержания заказчиком части стоимости работ для покрытия возможных расходов, вызванных ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств в отношении качества работ. Поскольку гарантийное удержание законодательством не предусмотрено, стороны при включении данного условия в договор должны согласовать размер, порядок удержания при оплате работ; в договоре также могут быть согласованы порядок и срок возврата гарантийного удержания (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.12.2021 № 305-ЭС21-14922 по делу № А40-94432/2020).

Иными словами, гарантийное удержание представляет собой часть денежной суммы, которая причитается к выплате одной стороне договора за предоставленное ею исполнение и удерживается ее контрагентом в качестве способа обеспечения исполнения обязательств. Если свои обязательства такая сторона договора выполняет в полном объеме, сумма гарантийного удержания подлежит перечислению в сроки, установленные таким договором.

В соответствии с пунктом 6.3. договора №796ГН-НК субподрядчик вправе в любое время предоставить подрядчику Банковскую гарантию исполнения обязательств по договору взамен обеспечения в виде гарантийного удержания, предусмотренного п. 6.7 договора (10 % от стоимости соответствующих обязательств, удерживаемых до окончания гарантийного периода), на сумму, эквивалентную сумме гарантийного удержания. Срок действия банковской гарантии исполнения обязательств по договору должен истекать не ранее даты истечения гарантийного периода плюс 60 дней.

Пунктом 6.6. договора №796ГН-НК предусмотрено, что оплата работ на строительной площадке осуществляется банковским переводом: 

- стоимость работ на строительной площадке с учетом зачета авансов в соответствии с п. 6.1. договора оплачивается по факту выполнения работ (ежемесячно, на. основании подписанных обеими сторонами актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), а также актов смонтированного оборудования (в случае монтажа оборудования) с позиционными ценами (за исключением случаев монтажа оборудования поставки подрядчика) пропорционально фактически выполненному объему работ;

- 10 % стоимости Работ на строительной площадке (в т.ч. стоимости смонтированного оборудования) оплачивается в течение «60 (шестидесяти) календарных дней после окончания гарантийного периода и подписания сторонами акта об окончании Гарантийного периода в случае не предоставления субподрядчиком банковской гарантии исполнения обязательств по договору.

В силу п. 6.1.2. договора № 99ГК-НК/ТЭЦ-2(1) оплата 10 % стоимости работ на строительной площадке осуществляется в течение 65 календарных дней после окончания гарантийного срока и подписания сторонами акта об окончании гарантийного периода в соответствии с п. 12.12 договора.

В соответствии с п. 12.12. договоров №№ 796ГК-НК, 1117ГК-НК, 99ГК-НК/ТЭЦ-2 (I), по окончании гарантийного периода и при отсутствии не устраненных замечаний подрядчика в гарантийный период, стороны подписывают акт об окончании гарантийного периода в 2 (двух) экземплярах.

Согласно п. 1.7. договоров с№№ 796ГК-НК, 1117ГК-НК, 99ГК-НК/ТЭЦ-2 (I) гарантийный период (гарантийный срок) -период времени, в течение которого Субподрядчик гарантирует Подрядчику соответствие результата Работ требованиям Договора, в том числе условиям о качестве Работ, Проекта и Технической документации Нормативно-правовым и нормативно-техническим актам, достижение и сохранение Результатом Работ указанных в Технической документации показателей и возможность эксплуатации Результата Работ в соответствие с Договором на протяжении Гарантийного срока. Начало Гарантийного периода исчисляется с даты подписания Заказчиком АО «Силовые машины» и Конечным Заказчиком ПАО «ГМК «Норильский никель» Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) и составляет 2 (два) года.

Факт выполнения истцом обязательств по договорам подтверждается подписанными сторонами актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат. У ответчика отсутствуют замечания по выполненным истцом работам.

03 октября 2024 года сторонами подписаны акты об окончании гарантийного по договорам №№ 1117ГК-НК, 99ГК-НК/ТЭЦ-2(1), 769ГК-НК. Срок оплаты гарантийного удержания по договору № 769ГКНК составляет 02.12.2024, по договору № 1117ГК-НК – 09.12.2024, по договору № 99ГК-НК/ТЭЦ-2(1)– 09.12.2024.

В судебном заседании 10.12.2024 представитель ответчика подтвердил, что вся сумма долга является гарантийным удержанием по спорным договорам. Также представитель ответчика подтвердил наступление срока для его оплаты.

С учетом подписанных актов у ответчика возникла обязанность по возврату гарантийного удержания. Задолженность составляет 6 202 547 руб. 25 коп.

Суд отмечает, что обязательства подрядчика перед субподрядчиком должны выполняться вне зависимости от исполнения заказчиком своих обязательств (включая обязательство по возврату гарантийного удержания) перед подрядчиком (п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

Расчет суммы гарантийного удержания судом проверен, признан верным, правильность расчета подрядчиком не опровергнута

При изложенных обстоятельствах суд удовлетворяет требование истца о взыскании с ответчика 6 202 547 руб. 25 коп. задолженности.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворённых требований.

Расходы истца по уплате государственной пошлины распределены судом с учетом положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и результата рассмотрения настоящего спора и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сибирьэнергоинжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Декор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 202 547 руб. 25 коп. задолженности, взыскать 54 013 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

И.С. Нечаева