2141/2022-266609(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-15621/2022

г. Казань

21 октября 2022 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  председательствующего судьи Абульхановой Г.Ф., руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169,  170,171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «БРИАР», г. Казань устранить в  течение 10 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 121  комбинированного вида» Кировского района г. Казани по адресу: 

<

...>. недостатки выполненных работ, а именно:  

 2 этаж 

 

№ группы 

 

Место расположения 

 

Замечания 

 

Кабинет заведующей 

 

Входная дверь 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Методический  кабинет  

 

Входная дверь 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Туалет 

администрации  

 

Входная дверь 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

14 

 

Входная дверь в группу 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в спальню 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в группу 

 

Устранить неисправность дверной ручки и замка  

 

12 

 

Входная дверь в группу 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

13 

 

Входная дверь в группу 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь на кухню группы  

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в спальню 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

11 

 

Запасной вход в группу 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Запасной вход в группу 

 

Устранить неисправность дверной ручки и замка  

 

Входная дверь в туалет, через спальню 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в туалет, через группу 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в спальню, через группу  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в группу, через раздевалку  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в группу 

Неисправность дверной ручки и замка 

 

9 

 

Входная дверь в спальню группы  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в группу через раздевалку  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

10 

 

Входная дверь в группу 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь на кухню группы  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в туалет, через группу  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

8 

 

Входная дверь в группу 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в группу через раздевалку  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

1 этаж 

 

№ группы 

 

Место расположения 

Замечания 

 

1 

 

Входная дверь в группу через раздевалку  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

2 

 

Входная дверь в группу 

Устранить неисправность дверной ручки и замка-  

 

Входная дверь в спальню, через группу  

Устранить неисправность дверной ручки и замка  

 

Входная дверь в группу через раздевалку  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

3 

 

Входная дверь в раздевалку группы  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в группу через раздевалку  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

,. 

 

Входная дверь в спальню группы  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

4 

 

Входная дверь в раздевалку группы  

Устранить отслоение внешнего полотна дверй  

 

Входная дверь в группу, после раздевалки  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в группу, после раздевалки  

Устранить неисправность дверной ручки и замка  

 

Входная дверь в спальню 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

7 

 

Входная дверь в группу, после раздевалки  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в группу 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в спальню 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь на кухню группы  

Устранить отслоение внешнего полотна двере  

 

Входная дверь в туалет, через группы  

Устранить отслоение внешнего полотна 

 

6 

 

Входная дверь в группу 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в группу, через раздевалку  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в группу, через раздевалку  

Устранить неисправность дверной ручки и замка  

 

Входная дверь туалета из группы  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь спальни группы  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

5 

 

Входная дверь группы 

Устранить неисправность дверной ручки и замка  

 

Входная дверь через раздевалку  

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь в спальню из группы  

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь кухни группы 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Входная дверь туалета через спальню 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

группы 

 

Входная дверь туалета из спальни группы 

 

Устранить отслоение внешнего полотна двери  

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Бриар", г. Казань в пользу  

общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания "Ак Таш",  г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 10 000 руб. за каждый месяц просорочки  при неисполнении решения суда до момента его фактического исполнения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Бриар", г.Казань в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания "Ак Таш",  г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6000 рублей.  

После вступления рещения суда в законную силу выдать обществу с ограниченной  ответственностью "Строительно-монтажная компания "Ак Таш" справку на возврат  государственной пошлины в сумме 5500 руб., уплаченной платежным поручением от  03.06.2022 № 4081.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Председательствующий судья Г.Ф. Абульханова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 2:28:53Кому выдана Абульханова Галия Фатыховна