1191_1574874  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-1489/2022

14 декабря 2022 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Радвановской Ю.А., при ведении  протокола судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы  дела по иску Индивидуального предпринимателя ФИО2 к  Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о  понуждении к совершению определенных действий и взыскании денежных средств,  

при участии представителей сторон: 

от истца – ФИО3, представитель по доверенности № 01-22 от 01.04.2022г.;  

от ответчика – ФИО4, представитель по доверенности № 752-Д от 09.09.2022г.;  

Рководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично. 

2. Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок, не превышающий один месяц с момента  вступления решения в законную силу в соответствии с договором № 460/012-4039-22 от  12.02.2020г., с учетом Дополнительного соглашения к нему № 460/012-4039-22,  осуществить фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям  энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Крым, г. Алушта, 

<

...>.  

3. Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым  «Крымэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ИП ФИО2 (ОГРНИП 315910200170752, ИНН 

<

***>) пеню за просрочку  исполнения обязательств по технологическому присоединению за период с 13.02.2021г. по  

23.01.2022г. в сумме 21 581.82 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в  сумме 7 885.00 руб..  

4. Установить денежную компенсацию на случай неисполнения пункта 2 настоящего  решения в размере 1 000.00 руб. (одна тысяча руб.) за каждый день неисполнения судебного  акта, начиная с 31 дня с момента вступления решения в законную силу.  

5. В удовлетворении оставшейся части требований отказать. 

6. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

7. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд  (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух  месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом  апелляционной инстанции.  

Судья Ю.А. Радвановская