АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-6186/2022

г.Чита

05 апреля 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Объединенные фермеры»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение тридцати дней с момента  вступления судебного акта в законную силу устранить недостатки работ на объекте -  здание детского сада с кадастровым номером 76:06:050104:368, общей площадью 405,7  кв.м., расположенное по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст.  Даурия 12 «а», приобретенное по муниципальному контракту № 1 от 24.12.2019, а  именно:  

 1. «ЛСР № 02-01-02 Общестроительные работы. Надземная часть. Раздел 5.  Кровля»  

 - установить ходовые мостики на кровле (26,2 м.) здания, расположенного по  адресу: Забайкальский край, Забайкальский край, п.ст. Даурия, здание 12 «а» (поз.88,89),  

- выполнить работы указанные в позиции 108, 109, 110, 111, лестница ЛМ (2шт.), а  именно: установить петлю накладную, задвижку накладную, ручку скобу из алюминиевого  сплава анодированная, произвести окраску масляными составами по дереву стен (слуховых  окон),  

2. «ЛСР № 07-05-01 Ограждение территории детского сада L=321 м.п.» выполнить  работы в соответствие с ПСД  

 - установить ограждение территории детского сада, сетчатое по уголкам и  металлическим столбам, высотой 2 м. (раздел 1), ворота сетчатые распашные В-1 (2.8х2) –  2 шт. (раздел 2), калитку сетчатую К-1 (0,8х2) – 2 шт. (раздел 3);  

3. Устранить дефекты на здании: 

- устранить трещины, места разрушения верхнего слоя бетонной отмостки,  просадки, сколы согласно п. 3.182 пособия по проектированию оснований зданий и  сооружений (к СНиП 2.02.01-83), а также п.6.26 СП 82.13330.2016 «Благоустройство  территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»,  

4. Входы (крыльца, пандусы) - устранить разрушение отделки (штукатурка, окраска)  боковых поверхностей крылец и пандусов, шелушение, трещины.  

5. Фасады - устранить трещины в отделочном слое, трещины над оконными и под  оконными проемами.  

- устранить разрушения отделки в уровне отмостки (цокольной части), шелушение  окрасочного слоя;  

6. Вход в тепловой пункт - устранить разрушения штукатурного слоя, трещины  

(отставание штукатурки от стен), трещины, шелушение окрасочного слоя; 7. Внутренняя отделка: 

-тамбуры: произвести регулировку притворов входных дверей в здании;   8. Помещения:  

- устранить места образования трещин в отделке, над дверными проемами здания;  - устранить следы протечки с кровли здания в спальном помещении. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Объединенные  

фермеры» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  

государственную пошлину в размере 6000 руб.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый  

арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Е.В. Гончарук 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

 Дата 17.01.2023 3:15:00

Кому выдана Гончарук Елена Владимировна