АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-6337/2022

17 января 2024 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 января 2024 года

Полный текст решения изготовлен 17 января 2024 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Ю.А. Крюкова,  при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи С.Н. Петровой,  рассмотрел в судебном заседании дело  по иску общества с ограниченной ответственностью «Ус Баэс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью «Востокэнергострой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  об обязании передать исполнительную документацию по договору от 23.08.2018 № 27/2018/2,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: АО «Сибирский химический комбинат» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Отводов составу суда не заявлено.

Общество с ограниченной ответственностью «Ус Баэс» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Востокэнергострой» (далее – ответчик) об обязании передать исполнительскую документацию и штрафа в сумме 4 750 000 руб.,

Определением суда от  19.07.2023 (резолютивная часть определения объявлена 12.07.2023) производство по делу  прекращено.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2023 определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 июля 2023 года по делу № А60-6337/2022 отменено, направлен вопрос на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

22.09.2023 дело поступило в Арбитражный суд Свердловской области.

09.01.2024 от ООО «Ус Баэс» поступило ходатайство о приостановлении производства по делу, в связи с тем, что Определением Арбитражного суда Томской области от 25.12.2023 по делу №А67-10494/2023 в отношении должника   ООО «Востокэнергострой» введена процедура банкротства – наблюдение.

Определением суда от 15.01.2024 (резолютивная часть определения объявлена 10.01.2024) выделено в отдельное производство требование  общества с ограниченной ответственностью «Ус Баэс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью «Востокэнергострой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)   о взыскании штрафа в размере 250 000 руб. с присвоением делу № А60-1075/2024.

Рассмотрев материалы дела, суд 

установил:

как следует из материалов дела, между ООО «УС БАЭС» (далее истец) и ООО «Востокэнергострой» (далее ответчик) был заключен договор подряда № 27/2018/2 от 23.08.2018, согласно которому генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях договора  выполнить  строительно-монтажные работы и  и пусконаладочные работы в рамках объекта АО «СХК»  «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного  смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах» в соответствии с заданием генподрядчика.

Согласно условиям Договора субподрядчик обязан ежемесячно передавать исполнительную документацию на выполненные работы Генподрядчику (п. 7.13 Договора).

В связи с досрочным расторжением договора по инициативе генподрядчика между сторонами возникли разногласия по объему переданной ответчиком истцу исполнительной документации на выполненные работы.

Как указывает истец, в порядке досудебного урегулирования спора, часть исполнительной документации была ему передана ответчиком, однако до настоящего времени ему не передана часть документации, в связи с чем он обратился в суд с иском об ее истребовании.

С учетом неоднократных уточнений исковых требований истец просил истребовать от ответчика следующую исполнительную документацию:   

№ 

№ ИД / № РД

Объект

Наименование работ

1

Дело № 15-02916/ВЭС Том 1 (15-02916 И7)

Сооружение 16/22

Строительные конструкции галереи

2

14-07207 И10

Здание 4

Устройство чистовой стяжки по пристройке 1-11 (пом. 20UFB10R018)

3

20-00935

Здание 4А

Устройство набетонки на отм. -2.600 в пом. 20UKS04R086

4

15-04672 И2

Наружные сети водоснабжения и канализации в районе сооружения 30

Земляные работы. Монтаж сборных железобетонных элементов колодца

5

18-01768 И1 18-01769

Здание 4. Пристройка к зданию 4 (20UDB) в осях 1-3 у ряда А.

Устройство закладных деталей, стены с отметки +7,100 до отметки +20,000

6

18-01757

Здание 4. Пристройка к зданию 4 (20UDB) в осях 1-3 у ряда А

Подкрановые пути и площадки обслуживания крана. Конструкции металлические

7

20-00319

Здание 4

Набетонки в осях 1-3 на отметках -0,300 и +5,000

8

15-00720

Здание 4

Земляные работы по устройству котлованов здания 4 и 4А

9

Смета №1

Здание 4

Дополнительные работы по заделке отверстий в перекрытиях

10

Смета №2

Здание 4

Дополнительные работы по утеплению покрытия

11

Смета №3

Здание 4

Дополнительные работы по узлам примыкания

12

Смета №5

Здание 4

Вертикальная планировка на участке между зданиями 4,4а,5.

13

14-08248

Здание 4А

Устройство кровли

14

Смета № 5

Здание 4А

Дополнительные работы по утеплению покрытия

15

14-06353

Здание 5

Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран / Устройство пароизоляции / Устройство карнизов

16

14-07823 И4

Здание 5

Конструкции металлические. Покрытие, подвесные пути и вентстаканы на кровле

17

17-01163 И1, 2

Сооружения 64/22; 22/4; 5/4а;

16/22- пешеходные галереи

Металлоконструкции эвакуационной лестницы м/о А-В/ 11-12. Конструкции металлические

18

19-00904 И1

Сооружения 64/22; 22/4; 5/4а;

16/22- пешеходные галереи

Фундаменты под опоры галереи 64/22 (22UYV), 22/4 (23UYV). Опалубка и армирование

19

15-03062

Здание 16

Железобетонные конструкции галереи и наклонного хода. Опалубка, армирование и гидроизоляция. Конструкции железобетонные.

20

16-02899

Сооружение 21

Конструкции металлические. Лестницы и ограждения.

21

15-04152

Сооружение 62

Площадка, навес и опоры под трубопроводы. Конструкции металлические. Воздухораспределительная.

22

17-01159

Сооружение 64 -холодильная станция

Металлоконструкции площадки для выносных конденсаторов. Конструкции металлические.

23

14-00855 И1

Сооружение 24Б. Резервуар 24Б/2

Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек

24

15-04378 И1, И2, И3 16-00818 И1, И2

Наружные сети водоснабжения и канализации

Наружные сети водоснабжения и канализации от здания 4А до магистральных сетей

25

15-04430

КНС - 6

Фундаментная плита под канализационную насосную станцию. Конструкции железобетонные

26

15-05941 И4

КНС - 6

Земляные работы по устройству котлована под канализационную насосную станцию нормативно-чистых вод (КНС № 6)

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражает, ссылаясь на фактическую передачу истребуемой документации истцу. В подтверждение своих возражений представил описи передачи исполнительной документации, а также просил истребовать от головного заказчика – АО  «СХК» сведения о переданной ему генподрядчиком исполнительной документации по работам, выполненным ответчиком.

По запросам суда от АО «СХК» в материалы дела поступили доказательства передачи ему истцом части исполнительной документации по работам, выполненным ответчиком.

Рассмотрев заявленные требования, изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Как следует из договора подряда №27/2018/2 от 23.08.2018г., обязанность по передаче ответчиком (субподрядчиком) истцу (генподрядчику) исполнительной документации на выполненные работы является существенным условием договора, которая прямо предусмотрена в п. 7.13 Договора.

Кроме того, п. 22.7 Договора установлена ответственность Субподрядчика за непередачу по окончании строительно-монтажных работ Генподрядчику всей исполнительно-технической документации на выполненные объемы работ в соответствии с перечнем и требованиями РД-11-02-2006 и РД 11-05-2007 о выполненных строительных и монтажных работах в виде штрафа в размере 250 000 руб.

При этом, в данном пункте договора указано, что уплата штрафа не освобождает Субподрядчика от обязанности выполнить и сдать Генподрядчику всю исполнительную документацию на выполненные объемы работ.

Состав с перечень исполнительной документации определен договором со ссылкой на требования РД-11-02-2006 и РД 11-05-2007 о выполненных строительных и монтажных работах.

Определением суда от 06.12.2022 назначено проведение технической экспертизы.

На разрешение эксперта поставлены следующие  вопросы:

1) Определить состав не переданной обществом  «Востокэнергострой» обществу «Ус Баэс» исполнительной документации, подлежащей подготовке и передаче по работам, выполненным обществом «Востокэнергострой» в рамках договора подряда от 23.08.2018 № 27/2018/2.

При ответе на поставленный вопрос эксперту необходимо принять во внимание виды и объем фактически выполненных обществом «Востокэнергострой» работ в рамках договора подряда от 23.08.2018 № 27/2018/2, подтвержденные представленными актами о приемке выполненных работ, а также учитывать как переданную исполнительную документацию, представленную в материалы дела третьим лицом – обществом  «Сибирский химический комбинат» вне зависимости от наличия доказательств фактической передачи такой документации обществом «Востокэнергострой» в адрес общества «УС Баэс» либо общества «Сибирский химический комбинат».

Согласно заключению № 151/05-2023, подготовленному экспертом АНО «Алтайский экспертно-правовой центр» ФИО1 дача заключения по поставленным на разрешение эксперта вопросам невозможна. Кроме того, эксперт отметил, что в случае предоставления сторонами дополнительных документов, а также доказательств,  подтверждающих факт согласования применения Положения Общие требования к формированию разрешительной и исполнительной документации при строительстве ОДЭК по проекту «Прорыв» Акционерного общества «Сибирский химический комбинат», провести исследование будет возможно.

Определением суда от 04.07.2023 суд предложил сторонам представить в материалы дела документы, необходимые для завершения экспертизы по делу, указанные в заключении АНО «Алтайский экспертно-правовой центр»  № 151/05-2023 (стр. 8 заключения).

Определением суда от 11.10.2023 экспертной организации АНО «Алтайский экспертно-правовой центр» направлены пояснения и дополнительные документы, поступившие от ООО «УС Баэс» в материалы дела 11.07.2023. Суд предложил  экспертной организации АНО «Алтайский экспертно-правовой центр»  представить согласие на проведение (завершение) экспертизы с учетом дополнительно представленных доказательств, обеспечить явку в судебное заседание, назначенное на 23.11.2023 (при наличии технической возможности с использованием систем веб-конференции сервиса «Мой Арбитр»).

20.11.2023 от экспертной организации поступило письмо № 365, согласно которому принимая во внимание отсутствие проектной, исполнительной документации, а также журналов производства работ или выписок из них на виды и объемы работ с привязкой к зданию, помещению по каждому пункту таблицы не переданной исполнительной документации, предоставление согласия на проведение экспертизы невозможно.

В силу положений ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

Ходатайство о назначении повторной экспертизы сторонами не заявлено (ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В ходе рассмотрения дела, судом было установлено, что часть истребуемых истцом документов ответчиком истцу переданы, что подтверждено описью переданной исполнительной документации, сопроводительными письмами, представленными ответчиком, а также сведениями, предоставленными АО «Сибирский химический завод» - являющимся основным заказчиком работ, выполненных ответчиком как субподрядчиком в рамках договора с истцом.

Так, согласно таблице переданной исполнительной документации, приобщенной к пояснениям АО «Сибирский химический завод» от 02.11.2022 указано на фактическую передачу ему генподрядчиком:

- томов 1,2,3 Дело №15-20916/ВЭС по сооружению 16/22 (строительные конструкции галереи);

-томов 5,6,8 Дело №14-07207И10 Здание 4 (Устройство чистовой стяжки по пристройке 1-11 (пом. 20UFB10R018);

-том 1 Дело 15-04672 И2 Наружные сети водоснабжения и канализации в районе сооружения 30 - Земляные работы. (Монтаж сборных железобетонных элементов колодца);

-исполнительной документации Дело №19-00904 И1 - Сооружения 64/22; 22/4; 5/4а; 16/22- пешеходные галереи (Фундаменты под опоры галереи 64/22 (22UYV), 22/4 (23UYV). Опалубка и армирование);

- том 1 Дело № 14-00855 И1 - Сооружение 24Б. Резервуар 24Б/2 (Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек);

- тома 2,5,6,8,9 – Здание 4 (Архитектурные решения).

Кроме того, переданы Генподрядчику

- сметы №1,2,3,5 по зданию №4 (Дополнительные работы по заделке отверстий в перекрытиях; Дополнительные работы по утеплению покрытия; Дополнительные работы по узлам примыкания; Вертикальная планировка на участке между зданиями 4,4а,5), а также исполнительной документации Дело 14-08248 – здание 4А (Устройство кровли), сметы №5 – здание №4А (Дополнительные работы по утеплению покрытия), подтверждается сопроводительными письмами ООО УС БАЭС исх.№521 от 12.03.2021 (позиции 5-9, 13,14); №638 от 26.04.2021 (позиции 1-3); №1226 от 14.05.2020 (позиции 16,17,22), предоставленными АО СХК актами освидетельствования скрытых работ (АОСР): ОСР № 14 от 15.01.2019 ОСР № 15 от 16.01.2019 ОСР № 17 от 12.02.2019 ОСР № 18 от 13.02.2019 ОСР № 19 от 15.02.2019 ОСР № 20 от 17.02.2019 ОСР № 25 от 04.02.2019 ОСР № 25 от 05.03.2019 ОСР № 37 от 20.04.2019 ОСР № 38 от 21.04.2019 ОСР № 39 от 22.04.2019 ОСР № 40 от 23.04.2019 ОСР № 41 от 24.04.2019 ОСР № 42 от 13.05.2019 ОСР № 43 от 14.05.2019 ОСР № 44 от 15.05.2019 ОСР № 45 от 01.06.2019 ОСР № 46 от 03.06.2019 ОСР № 47 от 07.06.2019 ОСР № 48 от 09.06.2019 ОСР № 30 от 25.03.2019 ОСР № 31 от 27.03.2019 ОСР № 32 от 28.03.2019 ОСР № 33 от 13.04.2019 ОСР № 34 от 14.04.2019 ОСР № 35 от 21.04.2019 ОСР № 36 от 21.04.2019 ОСР № 21 от 28.02.2019 ОСР № 24 от 28.02.2019 ОСР № 27 от 13.03.2019 ОСР № 28 от 13.03.2019 ОСР № 29 от 14.03.2019 ОСР № 51 от 21.08.2019 ОСР № 52 от 24.08.2019 ОСР № 52 от 28.08.2019 ОСР № 55 от 29.08.2019 ОСР № 56 от 30.08.2019 ОСР № 57 от 31.08.2019 ОСР № 58 от 01.09.2019 ОСР № 59 от 02.09.2019; реестром Дело №14-08248/ВЭС Том2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 12,13.

Таким образом, материалами дела подтверждается факт передачи истцу исполнительной документации, указанной им в п. 1,2,4,9-14,18,23 таблицы, приложенной к уточненным исковым требованиям.

Вместе с тем, ответчик не предоставил доказательства передачи истцу следующей исполнительной документации на работы, выполненные по договору №27/2018/2 от 23.08.2018:

1)    20-00935 Здание 4А Устройство набетонки на отм. -2.600 в пом 20UKS04R086 АОСР; Исполнительная схема; Документ о качестве бетонной смеси; Протокол испытания бетона;

2)      18-01768 И1 18-01769 Здание 4. Пристройка к зданию 4 (20UDB) в осях 1-3 у ряда А. Устройство закладных деталей, стены с отметки +7,100 до отметки +20,000 АОСР; Исполнительная схема (установки закладных деталей); Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений; Акт ВК; Документы о качестве;

3)    18-01757 Здание 4. Пристройка к зданию 4 (20UDB) в осях 1-3 у ряда А. Подкрановые пути и площадки обслуживания крана. Конструкции металлические АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК; Документы о качества стальных строительных конструкций; Паспорт качества; Заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений; Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений;

4)   20-00319 Здание 4 Набетонки в осях 1-3 на отметках -0,300 и +5,000 АОСР; Исполнительная схема; Документ о качестве бетонной смеси; Протокол испытания бетона;

5)   15-00720 Здание 4 Земляные работы по устройству котлованов здания 4 и 4А АОСР (обратная засыпка); Исполнительная схема; Протокол испытания уплотнения грунта;

6)   14-06353 Здание 5 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран / Устройство пароизоляции / Устройство карнизов АОСР; Исполнительная схема; Акты ВК; Паспорта; Документ о качестве продукции; Сертификаты качества;

7)  14-07823 И4 Здание 5 Конструкции металлические. Покрытие, подвесные пути и вентстаканы на кровле АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК; Документы о качества стальных строительных конструкций; Паспорт качества; Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений;

8)   17-01163 И1,2 Сооружения 64/22; 22/4; 5/4а; 16/22- пешеходные галереи Металлоконструкции эвакуационной лестницы м/о А-В/11-12. Конструкции металлические АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК; Документы о качества стальных строительных конструкций; Паспорт качества; Заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений; Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений;

9)  15-03062 Здание 16 Железобетонные конструкции галереи и наклонного хода. Опалубка, армирование и гидроизоляция. Конструкции железобетонные. АОСР (опалубки / армирование / бетонирования); Исполнительная схема; Акт ВК (прокат арматурный); Документы о качестве (проката арматурного / бетонной смеси); Заключение испытания бетона (неразрушающий контроль);

10)   16-02899 Сооружение 21 Конструкции металлические. Лестницы и ограждения. АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК; Документы о качества стальных строительных конструкций; Паспорт качества; Заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений; Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений;

11)  15-04152 Сооружение 62 Площадка, навес и опоры под трубопроводы. Конструкции металлические. Воздухораспределительная. АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК; Документы о качества стальных строительных конструкций; Паспорт качества; Заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений; Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений;

12) 17-01159 Сооружение 64 - холодильная станция Металлоконструкции площадки для выносных конденсаторов. Конструкции металлические. АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК; Документы о качества стальных строительных конструкций; Паспорт качества; Заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений; Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений;

13) 15-04378 И1,И2, И3 16-00818 И1, И2 Наружные сети водоснабжения и канализации Наружные сети водоснабжения и канализации от здания 4А до магистральных сетей АОСР (устройство котлована / устройство сборного железобетонного колодца / гидроизоляция / укладка труб / обратная засыпка); Исполнительная схема; Протокол испытания грунтов / раствора; Акты ВК; Паспорт / Паспорт качества; Сертификат качества / Сертификат соответствия;

14)   15-04430 КНС-6 Фундаментная плита под канализационную насосную станцию. Конструкции железобетонные АОСР; Исполнительная схема (монтаж фундаментных блоков); Акт ВК на использованные материалы; Документы о качестве;

15)   15-05941 И4 КНС-6 Земляные работы по устройству котлована под канализационную насосную станцию нормативно-чистых вод (КНС №6) АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК на использованные материалы.

Таким образом, в указанной части исковые требования подлежат удовлетворению.

Доводы ответчика относительного того, что передача документации, указанной в пункте 3 просительной части иска, подтверждается сопроводительным письмом ООО УС БАЭС исх. № 521 от 12.03.20 г. (позиции 13, 14), отклоняется судом, так как указанным письмом не подтверждается передача документации по объекту «Здание 4а».

Доводы ответчика относительного того, что передача документации, указанной в пункте 5, 6 просительной части иска, подтверждается сопроводительным письмом ООО УС БАЭС исх. № 2004 от 13.08.20 г. (позиция 5), сопроводительным письмом ООО УС БАЭС исх. № 521 от 12.03.21 г. (позиции 10,11, 12) отклоняется судом, так как в пункте 5  письма № 2004 указан иной номер дела, в пунктах 10.11.12 письма №521 указаны иные номера томов.

Доводы ответчика относительного того, что передача документации, указанной в пункте 7 просительной части иска, подтверждается сопроводительным письмом ООО УС БАЭС исх. № 638 от 26.04.21 г. (пункт 2 приложения), отклоняется судом, так как в пункте 2 письма № 638 указаны работы по устройству бетонной стяжки, а не набетонки.

Доводы ответчика относительного того, что работы, указанные в п. 16 просительной части иска им не выполнялись, отклоняется судом, так как выполнение работы по зданию 5 подтверждается представленными актами приема-передачи выполненных работ, приобщенными 18.03.2022 ответчиком в материалы дела, в том, числе работы, выполненные в январе 2019 года, кроме того, ссылка на частичную передачу исполнительной документации по этому зданию подтверждается письмом УС БАЭС исх. № 521 от 12.03.21 г. (кровля).

Доводы ответчика относительного того, что передача документации, указанной в пункте 17 просительной части иска, подтверждается описью исполнительной документации № 15- 05935/ВЭС/ № 19-00904/ВЭС, отклоняется судом, так как в  описи 15-05935/ВЭС/№19-00904/ВЭС нет сведений о передаче испрашиваемой исполнительной документации по работам по сооружению Металлоконструкции эвакуационной лестницы м/о А-В/ 11-12. Конструкции металлические.

Доводы ответчика относительного того, что передача документации, указанной в пункте 19 просительной части иска, подтверждается письмом от 27.09.2019 № 3042 (приобщённым АО «СХК» 12.05.20227), отклоняется судом, так как в пункте 14 указанного письма №3042 указаны другие работы по зданию 16.

Доводы ответчика относительного того, что работы, указанные в п. 21 просительной части иска им не выполнялись (по Сооружению 62), отклоняется судом, так как выполнение работы по Сооружению 62 подтверждается пунктом 2 письма от 03.07.2020, содержащим сведения о передаче работ по Сооружению 62, но по другим видам работ (площадка обслуживания и подпорные металлоконструкции).

Доводы ответчика относительного того, что передача документации, указанной в пункте 24 просительной части иска, подтверждается описью № 15-04377/ВЭС; Сопроводительное письмо ООО УС БАЭС исх. № 638 от 26.04.21 г. (поз. 3), отклоняется судом, так как в описи № 15-04377/ВЭС указаны работы по наружным сетям  водоснабжения и  канализации от здания 4 (а не 4а) до магистральных сетей, кроме того, номер дела указан иной, в п. 3 письма № 638 указаны работы «дренажная система здания 4, 4а, а не работы по водоснабжению.

Отсутствие названной документации также подтверждается ответом головного заказчика – АО «СХК».

Факт передачи иной испрашиваемой исполнительной документации подтверждается представленными ответчиком и третьим лицом описями передачи исполнительной документации и письмами истца в адрес третьего лица.

Таким образом иск подлежит частичному удовлетворению.

Согласно ч.1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку, при подаче искового заявления ООО «УС БАЭС» было заявлено ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины, то государственная пошлина в размере 6000 руб. подлежит взысканию с общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергострой»  в федеральный бюджет.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить частично.

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Востокэнергострой» (ИНН 

<

***>) передать обществу с ограниченной ответственностью «УС БАЭС» (ИНН 

<

***>) исполнительную документацию на работы, выполненные по договору № 27/2018/2 от 23.08.2018:

1)  20-00935 Здание 4А Устройство набетонки на отм. -2.600 в пом 20UKS04R086 АОСР; Исполнительная схема; Документ о качестве бетонной смеси; Протокол испытания бетона;

2)   18-01768 И1 18-01769 Здание 4. Пристройка к зданию 4 (20UDB) в осях 1-3 у ряда А. Устройство закладных деталей, стены с отметки +7,100 до отметки +20,000 АОСР; Исполнительная схема (установки закладных деталей); Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений; Акт ВК; Документы о качестве;

3) 18-01757 Здание 4. Пристройка к зданию 4 (20UDB) в осях 1-3 у ряда А. Подкрановые пути и площадки обслуживания крана. Конструкции металлические АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК; Документы о качества стальных строительных конструкций; Паспорт качества; Заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений; Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений;

4)    20-00319 Здание 4 Набетонки в осях 1-3 на отметках -0,300 и +5,000 АОСР; Исполнительная схема; Документ о качестве бетонной смеси; Протокол испытания бетона;

5)    15-00720 Здание 4 Земляные работы по устройству котлованов здания 4 и 4А АОСР (обратная засыпка); Исполнительная схема; Протокол испытания уплотнения грунта;

6)     14-06353 Здание 5 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран / Устройство пароизоляции / Устройство карнизов АОСР; Исполнительная схема; Акты ВК; Паспорта; Документ о качестве продукции; Сертификаты качества;

7)   14-07823 И4 Здание 5 Конструкции металлические. Покрытие, подвесные пути и вентстаканы на кровле АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК; Документы о качества стальных строительных конструкций; Паспорт качества; Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений;

8)   17-01163 И1,2 Сооружения 64/22; 22/4; 5/4а; 16/22- пешеходные галереи Металлоконструкции эвакуационной лестницы м/о А-В/11-12. Конструкции металлические АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК; Документы о качества стальных строительных конструкций; Паспорт качества; Заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений; Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений;

9)  15-03062 Здание 16 Железобетонные конструкции галереи и наклонного хода. Опалубка, армирование и гидроизоляция. Конструкции железобетонные. АОСР (опалубки / армирование / бетонирования); Исполнительная схема; Акт ВК (прокат арматурный); Документы о качестве (проката арматурного / бетонной смеси); Заключение испытания бетона (неразрушающий контроль);

10)  16-02899 Сооружение 21 Конструкции металлические. Лестницы и ограждения. АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК; Документы о качества стальных строительных конструкций; Паспорт качества; Заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений; Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений;

11) 15-04152 Сооружение 62 Площадка, навес и опоры под трубопроводы. Конструкции металлические. Воздухораспределительная. АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК; Документы о качества стальных строительных конструкций; Паспорт качества; Заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений; Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений;

12) 17-01159 Сооружение 64 - холодильная станция Металлоконструкции площадки для выносных конденсаторов. Конструкции металлические. АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК; Документы о качества стальных строительных конструкций; Паспорт качества; Заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений; Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений;

13) 15-04378 И1,И2, И3 16-00818 И1, И2 Наружные сети водоснабжения и канализации Наружные сети водоснабжения и канализации от здания 4А до магистральных сетей АОСР (устройство котлована / устройство сборного железобетонного колодца / гидроизоляция / укладка труб / обратная засыпка); Исполнительная схема; Протокол испытания грунтов / раствора; Акты ВК; Паспорт / Паспорт качества; Сертификат качества / Сертификат соответствия;

14) 15-04430 КНС-6 Фундаментная плита под канализационную насосную станцию. Конструкции железобетонные АОСР; Исполнительная схема (монтаж фундаментных блоков); Акт ВК на использованные материалы; Документы о качестве;

15)  15-05941 И4 КНС-6 Земляные работы по устройству котлована под канализационную насосную станцию нормативно-чистых вод (КНС №6) АОСР; Исполнительная схема; Акт ВК на использованные материалы.

3. В удовлетворении требований в остальной части отказать.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергострой» (ИНН 

<

***>) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 6000 руб.

5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

 

Судья                                                                          Ю.А. Крюков