22/2020-10237(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-12363/2019

город Саранск

26 февраля 2020 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью Агропромышленное объединение "МОКША"  

к обществу с ограниченной ответственностью "Мокша"  

об обязании безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по  договорам подряда № 1 от 24.04.2017г., № 2 от 23.10.2017г. и взыскании  расходов по проведению технического обследования в размере 65000рублей,  

при участии в заседании: от истца: ФИО2, представителя по доверенности от 03.02.2020, от ответчика: не явились, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Мокша" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 60 календарных дней со дня  

вступления в законную силу настоящего решения суда устранить недостатки в  выполненных работах по договорам подряда № 1 от 24.04.2017г., № 2 от  23.10.2017г. на строительство ремонтной мастерской, расположенной по  адресу: Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Гумны, путем  выполнения следующих восстановительных работ:  

1.1. Разработка грунта в отвал экскаватором в количестве 64 м3; 

1.2. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х метров, в  количестве 32 м3;  

1.3. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, в количестве 3,6 м3;  2.1. Устройство песчаного основания под фундаменты, в количестве 4,8 м3.  2.2. Армирование подстилающих слоев и на бетонки в количестве 0,202т.;  

2.3. Устройство бетонных оснований фундаментов в количестве 2 м3;  

2.4. Установка анкерных деталей с заделкой длиной до 1 м в количестве 0,06т.;  2.5. Устройство железобетонных фундаментов в количестве 10,1 м3.  

2.6. Засыпка траншей и котлованов в количестве 70 м3. 

2.7. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками в количестве 70 м3.  

2.8. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня в  количестве 1,3м3;  

2.9. Устройство бетонной подготовки (отмостки) в количестве 6,3 м3;  2.10. Планировка площадки ручным способом в количестве 45 м2;  

2.11. Планировка площадей бульдозером в количестве 138 м2; 

3.1. Пробивка в бетонных и каменных конструкциях полов и стен  деформационных стеновых швов, сечением до 20 см2 в количестве 32м.;  

3.2. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных  деформационных швов наружных стен прокладками на клее в один ряд, в  количестве 32м.;  

3.3. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно- известковым раствором в количестве 10 м2.;  

3.4. Заделка деформационных швов на гладких фасадах по камню и бетону  цементно-известковым раствором в количестве 4 м2.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Мокша" (ОГРН  1021300766783, ИНН 1314036970) в пользу общества с ограниченной  ответственностью Агропромышленное объединение "МОКША" (ОГРН  1101314000567, ИНН 1314001776) стоимость экспертного заключения в  размере 65000руб., расходы на оплату госпошлины в размере 6000руб.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Мокша" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ  госпошлину в сумме 2600руб.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.А. Кшняйкин Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2019 7:45:17

Кому выдана Кшняйкин Юрий Анатольевич