АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-33877/2022

02 сентября 2022 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 сентября 2022 года 

Полный текст решения изготовлен 02 сентября 2022 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.В. Артепалихиной, при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по иску АО "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ГКУ СО "УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 10 037 руб. 55 коп.,

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО2, представитель по доверенности  №171 от 05.07.2022 г.,

от ответчика: неявка, извещен надлежащим образом. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

АО "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" обратилось в суд с иском к ГКУ СО "УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ" о взыскании неустойки за нарушением ответчиком срока направления уведомления о выполнении технических условий в размере 10 037 руб. 55 коп.

От истца поступило ходатайство об уточнении периода неустойки, согласно которому просит взыскать ее за период с 22.12.2020 г. по 22.12.2021 г. в размере 10 037 руб. 55 коп.

Ходатайство судом рассмотрено и на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено.

От ответчика поступил отзыв на иск, в котором против заявленных требований возражает, ссылаясь на то, что сроки технологического присоединения были сторонами изменены, кроме того, истец сам нарушил сроки технологического присоединения и осуществлял его 281 день вместо 3.

Истец представил возражения на отзыв, в которых ранее заявленные доводы подержал.

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

между АО «Облкоммунэнерго» (далее – Сетевая организация) и ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» (далее – Заявитель) заключен Договор № 3893-2019- 12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.12.2019 года (далее – Договор). 

По условиям Договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации, а Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего Договора. 

В соответствии с пунктом 5 Договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения Договора. 

Таким образом, мероприятия по технологическому присоединению должны были быть выполнены сторонами в срок до 13.04.2020 года. 

Вышеназванные положения обязательны не только для Сетевой организации, но и для Заявителя. Перечень мероприятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, которые являются неотъемлемой частью Договора и предусматривают действия, которые необходимо совершить Сетевой организации и Заявителю в целях осуществления технологического присоединения. 

Обязанность по надлежащему выполнению мероприятий по технологическому присоединению возложена на Заявителя пунктом 8 Договора.

 Таким образом, обязанность по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в установленные Договором сроки носит двусторонний характер. 

Технологическое присоединение не может быть осуществлено исключительно сетевой организацией, без выполнения Заявителем надлежащим образом своей части мероприятий по технологическому присоединению. 

Сторонами заключено Дополнительное соглашение № 1 от 24.08.2020, которым установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 01.07.2020 г. 

24.09.2020 года стороны подписали Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 3893-2019-12 от 13.12.2019 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая компания обязуется оказать услуги по технологическому присоединению энергопринимающего устройства объекта в срок до 21.12.2020 года, при условии исполнения Договора со стороны Заявителя в надлежащем порядке.

Уведомление о выполнении мероприятий по технологическому присоединению от Заявителя в адрес сетевой организации в установленный Договором и Дополнительным соглашением срок не поступило.

Сторонами подписан Акт о выполнении технических условий от 31.01.2022 г., а также Акт об осуществлении технологического присоединения от 31.01.2022 года.

АО «Облкоммунэнерго» направляло в адрес Ответчика Уведомление о выполнении мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения. Уведомление о выполнении мероприятий по технологическому присоединению со стороны Ответчика не поступило.

Ссылаясь на указанные обстоятельства истец обратился в суд с иском о взыскании неустойки за нарушение ответчиком срока направления уведомления о выполнении технических условий.

Суд, исследовав материалы дела, оценив их в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований, исходя из следующего.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, которые являются неотъемлемой частью Договора и предусматривают действия, которые необходимо совершить Сетевой организации и Заявителю в целях осуществления технологического присоединения.

Согласно пункту 11 Технических условий заявитель осуществляет в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства Заявителя следующие мероприятия:

11.1.Строительство одноцепной ЛЭП-0,22 кВ до ВРУ-0,22 кВ объекта (тип, марку и сечение определить расчетом).

11.2.Аппарат защиты на вводе (перед счетчиком) установить в соответствии с нагрузкой (с номиналом не более 10 А), с возможностью опломбировки (рекомендована установка УЗО и ОПС).

11.3.Учет электроэнергии выполнить на границе балансовой принадлежности с установкой прибора учета класса точности 1,0 и выше. Место установки приборов учета, схемы подключения приборов учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик приборов учета, должны соответствовать требованиям ОПФРРЭЭ, утв. Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.

11.5. Монтажные работы выполнить в соответствии с проектом. При включении объекта по постоянной схеме должен быть определен ответственный за эксплуатацию электроустановки.

11.6. Представитель к осмотру электроустановку в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации и требованиями безопасности. Согласно пункту 8 Договора заявитель обязуется:

-надлежащим образом исполнитель обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

-после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, процедура присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, требования к выдаче технических условий, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий определяются Правилами утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861 (далее - Правила).

В пункте 18 Правил перечислены мероприятия по технологическому присоединению, в том числе подпункт д) проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX Правил.

Согласно разделу IX Правил в пункте 85 сказано, что для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением перечисленных документов.

Согласно пункту 16(6) Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

-Заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

-Заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

-Заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий.

Нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению влечет за собой наступление ответственности по Договору за нарушение условий Договора.

За период с 22.12.2020 по 31.01.2022 года в адрес сетевой организации от заявителя в рамках Договора № 3893-2019-12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.12.2019 года, уведомление о выполнении технических условий не поступало.

26.04.2021 года в 9:00 часов по заявке Потребителя был осуществлен выход в адрес инженера ФИО3 с целью допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, о чем составлен Акт допуска № 3893-2019-12 от 26.04.2021 года.

Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии не является Актом о выполнении технических условий.

Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии является самостоятельным документом, составляется не в рамках какого-либо Договора, а по отдельной заявке Потребителя, после проведения мероприятий по допуску в эксплуатацию прибора учета электроэнергии. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии уполномочен составлять инженер-электрик сетевой организации.

Акт о выполнении технических условий составляется в рамках Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Акт о выполнении технических условий составляется после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств комиссией сетевой организации, т.к. в технических условиях перечислен ряд мероприятий, а не только установка и ввод прибора учета. Подписывать Акт о выполнении технических условий уполномочен Начальник РКЭС сетевой организации и уполномоченный представитель заявителя.

В рамках Договора № 3893-2019-12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.12.2019 года Акт о выполнении Заявителем технических условий составлен 31.01.2022 года, подписан Начальником ПО № 3 Верхнепышминского РКЭС СВ. ФИО4 и представителем ГКУ СО «Управление автодорог» без замечаний. В этот же день 31.01.2022 года на основании Акта о выполнении технических условий сетевая организация осуществила мероприятия по технологическому присоединению объектов электроэнергетики заявителя, о чем составлен Акт об осуществлении технологического присоединения от 31.01.2022 года подписанный Начальником ПО № 3 Верхнепышминского ФИО5 ФИО4, представителем ГКУ СО «Управление автодорог», Представителем ООО «УК «РЭМП-Среднеуральск» без претензий и замечаний.

Из вышеизложенного следует, что направление Уведомления предусмотрено Договором и Правилами. Ответчик в свою очередь взятое на себя обязательство не исполнил, тем самым нарушил срок проведения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям. Нарушение срока проведения мероприятий согласно Договору и Правилам влечет за собой наступление ответственности Ответчика.

В соответствии с пунктом 17 Договора сторона Договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном порядке за год просрочки.

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 16(6) Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 года «Об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» «срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем в случае, когда заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями».

Согласно расчету истца неустойка составляет 10 037 руб. 55 коп. за период с 22.12.2020 г. по 22.12.2021 г.

Расчет судом проверен и признан верным.

Доводы ответчика судом во внимание не принимаются как противоречащие материалам дела.

В соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

На основании изложенного требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить.

2. Взыскать с ГКУ СО "УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу АО "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  10 037 руб. 55 коп. – неустойки, 2 000 руб. – в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

Судья                                                         М.В. Артепалихина