АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-4562/23

г. Уфа

29 ноября 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З. Г., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев исковое  заявление общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик  "ГЕОСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Администрации сельского  

поселения Кармановский сельсовет муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о внесении  изменений:  

1. в муниципальный контракт № 0801500001121001282 от 09.12.2021 года  следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

0 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  1 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  2 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  

3 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023».  

2. в муниципальный контракт № 0801500001121001283 от 10.12.2021 года следующего содержания: 

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  

контрактов: 

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта-не позднее 01.10.2022;  4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

3. в муниципальный контракт № 0801500001121001284 от 09.12.2021 года,  следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

4. в муниципальный контракт № 0801500001121001286 от 10.12.2021года  следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта-не позднее 01.10.2022;  4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

5. в муниципальный контракт № 0801500001121001287 от 10.12.2021 года  следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

6. в муниципальный контракт № 0801500001121001288 от 10.12.2021года  следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  

силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года.  

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

7. в муниципальный контракт № 0801500001121001299 от 10.12.2021года  следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

8. в муниципальный контракт № 0801500001121001346 от 08.12.2021 года  следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта-не позднее 01.10.2022;  4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

9. в муниципальный контракт № 0801500001121001347 от 10.12.2021 года  следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

10. в муниципальный контракт № 0101300064122000012_100903 от 09.11.2022  

года следующего содержания: 

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

11. в муниципальный контракт № 0101300064122000013_100903 от 14.11.2022  года следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в силу  с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. Внести изменения: 

1. в муниципальный контракт № 0801500001121001282 от 09.12.2021 года  следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  

контрактов: 

4 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  5 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  6 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  

7 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

2. в муниципальный контракт № 0801500001121001283 от 10.12.2021  года следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

5 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  6 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  7 этап - более 85% готовности объекта-не позднее 01.10.2022;  8 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

3. в муниципальный контракт № 0801500001121001284 от 09.12.2021  года, следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

5 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  6 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  7 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  8 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

4. в муниципальный контракт № 0801500001121001286 от  10.12.2021года следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

5 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  6 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  7 этап - более 85% готовности объекта-не позднее 01.10.2022;  8 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

5. в муниципальный контракт № 0801500001121001287 от 10.12.2021  года следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

5 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  

6 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  7 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  8 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

6. в муниципальный контракт № 0801500001121001288 от  10.12.2021года следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

5 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  6 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  7 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  8 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

7. в муниципальный контракт № 0801500001121001299 от  10.12.2021года следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

5 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  6 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  7 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  8 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

8. в муниципальный контракт № 0801500001121001346 от 08.12.2021  года следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

5 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  6 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  7 этап - более 85% готовности объекта-не позднее 01.10.2022;  8 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

9. в муниципальный контракт № 0801500001121001347 от 10.12.2021  года следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в  силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  

контрактов: 

5 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  6 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  7 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  8 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

10. в муниципальный контракт № 0101300064122000012_100903 от  09.11.2022 года следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

5 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  6 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  7 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  8 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

11. в муниципальный контракт № 0101300064122000013_100903 от  14.11.2022 года следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в силу  с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами, но не позднее 20 апреля 2023 года. 

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

5 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.06.2022;  6 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.08.2022;  7 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.10.2022;  8 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

 Взыскать с Администрации сельского поселения Кармановский сельсовет  муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Специализированный застройщик "ГЕОСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 6 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Г. Фазлыева