16_8823107 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-49207/19

09 сентября 2019 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В.,  при ведении протокола судебного заседания  

секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по иску акционерного общества «Центродорстрой» к Федеральному  агентству воздушного транспорта о внесении изменений в государственный контракт,  

третье лицо - федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация  аэропортов Домодедово»,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Внести изменения в государственный контракт от 13.12.2018 № ГК-55-14 в части  сроков выполнения работ по объекту «Реконструкция второй летной зоны аэропорта  Домодедово, II этап реализации», изложив пункт 12.1 контракта в части срока окончания  работ в следующий редакции:  

«Начальный и конечный сроки выполнения работ по контракту, а также  промежуточные сроки выполнения этапов работ определяются Календарным графиком  производства работ на объекте (Приложение № 2 к контакту). Срок выполнения работ по  Контракту установить до 13.12.2019».  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья М.В. Досова