АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-48290/2020

24 ноября 2020 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 ноября 2020 года

Полный текст решения изготовлен 24 ноября 2020 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Ю.С. Колясниковой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.О. Бронниковой, рассмотрел в судебном заседании дело №А60-48290/2020 

по  иску общества с ограниченной ответственностью производственно-техническая компания «ЭКРА-УРАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (далее – общество производственно-техническая компания «ЭКРА-УРАЛ», истец)

к обществу с ограниченной ответственностью «БЮРО ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (далее – общество «БЮРО ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ», ответчик)

о взыскании задолженности (долг и неустойка) по договору подряда,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности  от 02.02.18,

от ответчика: не явились, извещены.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Ходатайств, препятствующих рассмотрению дела, не поступало. Отводов суду не заявлено.

Общество производственно-техническая компания «ЭКРА-УРАЛ» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу «БЮРО ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ» о взыскании задолженности (долг и неустойка) по договору подряда.

Определением от 02.10.20 арбитражный суд в порядке, установленном ст. ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

26.10.20 от ответчика поступили возражения против рассмотрения дела по существу. Возражения приобщены к материалам дела.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд в предварительном судебном заседании определяет достаточность представленных доказательств и, признав дело подготовленным, в соответствии со ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству.

Определением суда от 28.10.20 судебное заседание назначено на 17.11.20.

От ответчика, извещенного надлежащим образом о начавшемся процессе, ходатайств, препятствующих рассмотрению дела, не поступало.

Истец требования иска поддержал.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Между обществом  «БЮРО ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ» (заказчик) и обществом производственно-техническая компания «ЭКРА-УРАЛ» (подрядчик) заключен Договор № 3-84/18 от 12.03.2018, согласно которому, подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика пусконаладочные работы по титулу: «Строительство главного распределительного устройства ГТЭС «Лабытнанги»», а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

Согласно п. 4.1.1. договора Ответчиком, произведен авансовые платеж в размере 15 % от стоимости работ в сумме 917 982,18 рублей (оплата № 3216 от 26.03.2018)

Как указывает истец, обществом производственно-техническая компания «ЭКРА-УРАЛ» выполнены, а ООО «НИА» приняты без замечаний работы по договору, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к ним, которые подписаны сторонами без замечаний.

Ответчиком оплачены работы на сумму 4 362 899,46 рублей (платежное поручение № 3216 от 26.03.2018 на сумму 917 982,18, № 46939 от 28.06.2018  на сумму 282 568,47 руб., № 53236 от 03.09.2018 на сумму 36 488,03 руб., № 5464 от 17.07.2019  на сумму 2 178 255,72 руб., № 9727 от 30.12.2019 на сумму 81 838,89 руб., № 9726 от 30.12.2019г. на сумму 865 766,17 руб., № 4116 от 02.07.2020 на сумму 100000 руб.).

В соответствии с п. 4.1.2. договора предусмотрено, что окончательный платеж за выполненные работы в размере 85% от стоимости работ производится Заказчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

В указанные выше сроки, оплата выполненных и принятых работ в полном объеме ответчиком произведена не была.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 992/IITK от 13.05.2020 с требованием оплатить задолженность в сумме 1 810 911,69 (Один миллион восемьсот десять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 69 копеек, а также неустойку в размере 30 174,96 (Тридцать тысяч сто семьдесят четыре) рублей 96 копеек.

04.06.2020 ответчик направил в адрес истца гарантийное письмо об оплате задолженности № 466, однако оплаты в соответствии с письмом платежи им произведены не были, а поступил лишь один платеж 02.07.2020  в сумме 100 000 рублей.

В связи с тем, что ответа на претензию не последовало, оплата не произведена, истец обратился в арбитражный суд с заявлением по настоящему делу.

Оценив фактические обстоятельства, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд полагает, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Проанализировав представленные в материалы дела документы, суд пришел к выводу, что сторонами заключен договор, который по своей правовой природе является договором подряда.

Соответственно, правоотношения сторон в данном случае регулируются § 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что сторонами  подписан договор, в котором определены работы, подлежащие выполнению, с указанием их стоимости, установлены сроки выполнения работ, определен порядок оплаты. Договор сторонами подписан, заверен печатями.

На основании изложенного суд пришел к выводу о том, что сторонами согласованы существенные условия договора подряда, а, следовательно, договор считается заключенным. Факт заключения договора сторонами не оспаривается.

Факт выполнения работ, обозначенных в договоре, подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

Указанные документы о приемке работ подписаны сторонами и заверены печатями организаций.

Указанные документы имеют ссылки на реквизиты договора, подписаны сторонами, заверены печатями организаций.   

Судом учтено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

 Доказательством сдачи подрядчиком результатов работы и приемки его заказчиком может являться акт, удостоверяющий приемку выполненных работ.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что работы выполнены истцом надлежащим образом и сданы ответчику.

Кроме того, гарантийным письмом от 04.06.20 № 466 ответчик гарантировал истцу оплату денежных средств в сроки указанные в письме.

Между сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.19, на сумму 1810911 руб. 69 коп. без возражений и замечаний.

Между тем общество «БЮРО ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ» взятые на себя обязательства в установленный договором срок не исполнило, обязанность по оплате выполненных работ в полном размере не исполнило, на момент рассмотрения дела сумма задолженности ответчика по договору, составляет 1701911 руб. 69 коп. Доказательств обратного в материалы дела не представило.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

         В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (ч. 1 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (ч. 1 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определениями суд предлагал ответчику представить письменный отзыв. Однако ответчик своим правом не воспользовался, отзыв не направил, доказательств оплаты не представил. 

Согласно ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Частью 1 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

В силу ч. 4 ст. 131, ч. 1 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам без каких-либо возражений ответчика. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку в материалы дела не представлено доказательств оплаты принятых работ, не заявлено возражений относительно их качества, суд пришел к выводу о том, что ответчик не исполнил надлежащим образом обязательство по оплате принятых работ.

На основании изложенного, учитывая, что материалами дела подтверждается наличие указанной задолженности ответчика, доказательств уплаты которой, ответчиком в материалы дела не представлено, арбитражный суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению исковые требования о взыскании 1701911 руб. 69 коп.

Также истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере 52115 руб. 55 коп. 

В соответствии с п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

На основании норм ст. 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

В соответствии с пунктом 6.2. договора за срыв сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает пени в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Представленный расчет неустойки не противоречит условиям договора  и действующему гражданскому законодательству. Расчет ответчиком не оспорен  (ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер неустойки был согласован сторонами в договоре. 

В силу п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица свободны в заключении договора. Разногласий по условию о размере пени, либо оснований её применения у ответчика при заключении договора не имелось.

Исходя из размера неустойки и расчета представленного в исковом заявлении, суд приходит к выводу, что неустойка рассчитана верно и является обоснованной.

Разногласий по условию о размере неустойки либо оснований ее применения у ответчика при заключении договора не имелось. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Зная, что договором предусмотрена ответственность за несвоевременное исполнение обязательства, ответчик в установленный договором срок работы  не выполнил. Доказательств иного материалы дела не содержат.

Судом расчет неустойки проверен и признан верным. Ответчиком расчет истца не оспорен, контррасчет не представлен.

Кроме того, суд учитывает, что со стороны ответчика в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство о снижении ее размера не заявлено, доказательства ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства не представлены. 

Уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также с принципом состязательности (ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку ответчиком не представлено суду доказательств выполнения работ в срок, суд пришел к выводу об обоснованности требования о взыскании неустойки в размере 52115 руб. 55 коп.

В силу ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку требования истца удовлетворены в полном объеме, судебные расходы по уплате государственной пошлины на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

 2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БЮРО ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью производственно-техническая компания «ЭКРА-УРАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 1701911 руб. 69 коп., неустойку в сумме 52115 руб. 55 коп., в возмещение расходов на оплату государственной пошлины денежные средства в размере 30630 руб. 

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяЮ.С. Колясникова