Именем Российской Федерации

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

300041, Россия, 

<

...>

тел./факс 

<

***>; 

 e-mail: a68.info@arbitr.ru;

http://www.tula.arbitr.ru

Р Е Ш Е Н И Е

г. Тула                                                                                                             Дело № А68-13656/2019

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 января 2020г.

Решение в полном объеме изготовлено 22 января 2020г.

 

Арбитражный суд в составе:

Судьи  Горьковой Е.В.

протокол судебного заседания вела секретарь судебного заседания Миронова И.С.

рассмотрел  в  судебном  заседании дело по иску ООО «Строительное монтажное управление «Рубеж СВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ООО «РКСервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании неустойки в размере 365 708 руб. 01 коп., расходов по оплате государственной пошлины в сумме 10 314 руб.

при участии в заседании:

от истца  – ФИО1 по доверенности от 15.11.2019г., диплом выдан 30.06.2010г. ГОУ ВПО «Тульский государственный университет» ВСА 0847021,

от ответчика – не явился, извещен,

Суд установил.

Между ООО «Строительное монтажное управление «Рубеж СВ» (Подрядчиком) и ООО «РКСервис» (Заказчиком) был заключен Договор подряда №34 от 15.01.2019 года, в соответствии с которым Заказчик поручил, а Подрядчик обязался произвести следующие работы:

- Монтажные работы голосового оповещения по проекту 161-ИОС5.1.1, стадия П, Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», Системы связи, Проектная документация. Полный перечень работ, оборудования и материалов, указан в локальной смете №34-1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора на сумму 297 599 руб. 41 коп., в том числе НДС 18% - 45 396 руб. 52 коп.;

- Монтажные работы системы контроля и управления доступом по проекту 161-СКУД, стадия Р, Реализация комплекса мероприятия по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», система контроля и управления доступом, Рабочая документация. Полный перечень работ, оборудования и материалов, указан в локальной смете №34-2, являющейся неотъемлемой частью Договора на сумму 1 637 323 руб. 96 коп., в том числе НДС 18% - 249 761 руб. 28 коп.;

- Монтажные работы системы охранного освещения периметра по проекту 161-СООП, стадия Р, Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», система охранного освещения периметра, Рабочая документация. Полный перечень работ, оборудования и материалов, указан в локальной смете №34-3, являющейся неотъемлемой частью Договора на сумму 2 954 922 руб. 51 коп., в том числе НДС 18% - 450 750 руб. 89 коп.;

Указанные работы выполнялись в зданиях ФКП «Алексинский опытный механический завод» в г.Алексин Тульской области.

Согласно п.2.1 Договора №34 от 15.01.2019 года общая стоимость по Договору определяется на основании согласованных сторонами локальных смет №34-1, №34-2, №34-3, являющихся неотъемлемой частью Договора и составляет: 4 889 845 руб. 88 коп., в том числе НДС 20% - 745 908 руб. 69 коп.

Исходя из п.2.3-2.5 Договора после подписания Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 100% стоимости оборудования и материалов и 30% стоимости монтажных работ по каждой из локальных смет на основании счетов, выставленных Подрядчиком.

Последующие расчеты по Договору могут быть выполнены частично по фактически выполненным работам на основании промежуточных актов о приемке выполненных работ, подписанных сторонами. В этом случае оплата выполненных работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней на основании счета, выставленного Подрядчиком.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней после полного окончания работ и сдачи Подрядчиком полного комплекта Исполнительной документации (исполнительные-схемы, заполненные журналы учета выполненных и общих работ, акты на скрытые работы, документы на применяемые материалы - сертификаты, документы на монтируемое оборудование - паспорта и т.п.) и подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) с оформлением справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Согласно Дополнительному соглашению №2 от 25.02.2019 года к указанному Договору, в связи с ранее установленным оборудованием в рамках выполнения работ по проекту 161-СКУД по объекту «Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», стороны договорились произвести пересчет и изменить стоимость работ по Договору; п.1.1.2, 2.1, 2.3.2 изложить в новой редакции:

«1.1.2 Монтажные работы системы контроля и управления доступом по проекту 161-СКУД, стадия Р, Реализация комплекса мероприятия по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», система контроля и управления доступом, Рабочая документация. Полный перечень работ, оборудования и материалов, указан в локальной смете №34-2-1, являющейся неотъемлемой частью Договора на сумму 690 788 руб. 12 коп., в том числе НДС 18% - 115 131 руб. 35 коп.;

2.1. Общая стоимость по Договору определяется на основании согласованных сторонами локальных смет №34-1, №34-2-1, №34-3, являющихся неотъемлемой частью Договора и составляет: 3 998 437 руб. 53 коп., в том числе НДС 20% - 666 406 руб. 25 коп.».

Согласно п.1, п.2 Дополнительного соглашения №4 от 21.03.2019 года к указанному Договору, стороны пришли к соглашению провести дополнительные работы по установке опор для системы охранного освещения периметра по проекту 161-СООП, стадия Р, Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», система охранного освещения периметра, Рабочая документация. Полный перечень работ, оборудования и материалов, указан в локальной смете №34-3-2, являющейся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения;   Определить   стоимость  дополнительных   работ, выполняемых Подрядчиком на объекте Заказчика в соответствии с локальной сметой №34-3-2 в сумме 516 470 руб. 44 коп., в том числе НДС 20% - 86 078 руб. 41 коп.

Согласно п.1, п.2 Дополнительного соглашения №5 от 21.03.2019 года к указанному Договору, стороны пришли к соглашению провести дополнительные работы по монтажу кабеля в траншее для системы охранного освещения периметра по проекту 161-СООП, стадия Р, Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», система охранного освещения периметра, Рабочая документация. Полный перечень работ, оборудования и материалов, указан в локальной смете №34-3-3, являющейся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения; Определить стоимость дополнительных работ, выполняемых Подрядчиком на объекте Заказчика в соответствии с локальной сметой №34-3-3 в сумме 75 998 руб. 53 коп., в том числе НДС 20% - 12 666 руб. 42 коп.

Согласно п.1, п.2 Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2019 года к указанному Договору, стороны пришли к соглашению провести дополнительные пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом по проекту 161-СКУД, стадия Р, Реализация комплекса мероприятия по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», система контроля и управления доступом, Рабочая документация. Полный перечень работ, оборудования и материалов, указан в локальной смете №34-2-2, являющейся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения; Определить стоимость дополнительных работ, выполняемых Подрядчиком на объекте Заказчика в соответствии с локальной сметой №34-2-2 в сумме 111 438 руб. 54 коп., в том числе НДС 20% - 18 573 руб. 09 коп.

Согласно п.1, п.2 Дополнительного соглашения №8 от 27.05.2019 года к указанному Договору, стороны пришли к соглашению в связи с отсутствием строительной готовности на объекте изменить сроки выполнения работ по Договору; п.2.6 Договора изложить в новой редакции: «срок выполнения работ определяется не позднее 13 июля 2019 года и с момента поступления авансовых платежей на расчетный счет Подрядчика до 30.04.2019 года при наличии строительной готовности объекта к выполнению монтажных работ.

Согласно п.1, п.2 Дополнительного соглашения №9 от 17.06.2019 года к указанному Договору, стороны пришли к соглашению провести дополнительные работы по монтажу кабеля в трубе гофрированной для системы охранного освещения периметра по проекту 161-СООП, стадия Р, Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», система охранного освещения периметра, Рабочая документация. Полный перечень работ, оборудования и материалов, указан в локальной смете №34-3-4, являющейся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения; Определить стоимость дополнительных работ, выполняемых Подрядчиком на объекте Заказчика в соответствии с локальной сметой №34-3-4 в сумме 66 432 руб. 73 коп., в том числе НДС 20% - 11 070 руб. 62 коп.

Согласно п.1, п.2 Дополнительного соглашения №10 от 26.06.2019 года к указанному Договору, стороны пришли к соглашению провести дополнительные работы по монтажу для системы охранного освещения периметра по проекту 161-СООП, стадия Р, Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», система охранного освещения периметра, Рабочая документация. Полный перечень работ, оборудования и материалов, указан в локальной смете №34-3-5, являющейся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения; Определить стоимость дополнительных работ, выполняемых Подрядчиком на объекте Заказчика в соответствии с локальной сметой №34-3-5 в сумме 14 320 руб. 10 коп., в том числе НДС 20% - 2 386 руб. 68 коп.

Согласно Актам приемки выполненных работ, подписанных сторонами, Подрядчиком были выполнены, а Заказчиком приняты работы на сумму 4 687 539 руб. 58 коп.

Согласно платежным поручениям №180 от 24.01.2019 года на сумму 1 459 577 руб. 49 коп., №181 от 24.01.2019 года на сумму 259 305 руб. 50 коп., №182 от 24.01.2019 года на сумму 2 287 257 руб. 80 коп., №2151 от 06.06.2019 года на сумму 516 470 руб. 44 коп., №3801 от 15.10.2019 года на сумму 1 084 229 руб. 05 коп. Заказчиком были оплачены работы на сумму 5 606 840 руб. 28 коп., из которых 27.02.2019 года Подрядчиком был осуществлен возврат излишне уплаченного аванса на сумму 919 300 руб. 70 коп. (платёжное поручение №45 от 27.02.2019 года).

Общая сумма оплаты договорных обязательств составила 4 687 539 руб. 58 коп.

Сумма основного долга в размере 1 084 229 руб. 05 коп. Ответчиком перед Истцом по Договору подряда №34 от 15.01.2019 года погашена.

Однако, Ответчиком выплаты по Договору осуществлялись с нарушением сроков, установленных п.2.3-п.2.5 Договора подряда.

Согласно п.4.2 Договора подряда за нарушение сроков оплаты по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.

Размер неустойки составил 126 349 руб. 57 коп. 

Между ООО «Строительное монтажное управление «Рубеж СВ» (Подрядчиком) и ООО «РКСервис» (Заказчиком) был заключен Договор №3 от 12.02.2019 года в соответствии с которым Заказчик поручил, а Подрядчик обязался произвести следующие работы:

- Монтажные работы голосового оповещения по проекту 161-ИОС5.1.1, стадия П, Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», Системы связи, Проектная документация. Полный перечень работ, оборудования и материалов, указан в локальной смете №3-1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора на сумму 3 417 239 руб. 42 коп., в том числе НДС 20% - 569 539 руб. 90 коп.

- Постановка и установка программного обеспечения 1C:ERP УП по проекту 161-ИОС5.1.1, стадия П, Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», Системы связи, Проектная документация. Полный перечень программного обеспечения указан в локальной смете №3-2, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора на сумму 731 901 руб. 00 коп., НДС не облагается.

Исходя из п.2.2-2.5 Договора после подписания Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик оплачивает Подрядчику аванс по 1 этапу работ, указанных в п.1.1, в размере 100% стоимости оборудования и материалов и 20% стоимости монтажных работ, что составляет - 2 628 041 руб. 66 коп., в том числе НДС 20% - 438 006 руб. 94 коп.

Аванс 100% за поставку программного обеспечения по 2 этапу в размере 731 901 руб. 00 коп. Заказчик оплачивает Подрядчику после выполнения Подрядчиком 1 этапа работ, указанных в п. 1.1, на основании счета, выставленного Подрядчиком.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней после полного окончания работ и сдачи Подрядчиком полного комплекта Исполнительной документации (исполнительные схемы, заполненные журналы учета выполненных и общих работ, акты на скрытые работы, документы на применяемые материалы - сертификаты, документы на монтируемое оборудование - паспорта и т.п.) и подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) с оформлением справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Согласно п.1, п.2 Дополнительного соглашения №1 от 27.05.2019 года к указанному Договору, стороны пришли к соглашению в связи с отсутствием строительной готовности на объекте изменить сроки выполнения работ по Договору; п.2.6 Договора изложить в новой редакции: «срок выполнения работ определяется не позднее 13 июля 2019 года и с момента поступления авансовых платежей на расчетный счет Подрядчика до 30.04.2019 года при наличии строительной готовности объекта к выполнению монтажных работ.

Согласно п.1, п.2 Дополнительного соглашения №2 от 26.06.2019 года к указанному Договору, стороны пришли к соглашению провести дополнительные работы по монтажу систем связи по проекту 161-ИОС5.1.1, стадия П, Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «Алексинский опытный механический завод», Системы связи, Проектная документация. Полный перечень работ, оборудования и материалов, указан в локальной смете №3-1-1, являющейся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения; Определить стоимость дополнительных работ, выполняемых Подрядчиком на объекте Заказчика в соответствии с локальной сметой №3-1-1 в сумме 123 358 руб. 25 коп., в том числе НДС 20% -20 559 руб. 71 коп.

Согласно Актам приемки выполненных работ, подписанных сторонами, Подрядчиком были выполнены, а Заказчиком приняты работы на сумму 3 278 157 руб. 45 коп.

Согласно платежному поручению №680 от 25.02.2019 года Заказчиком были оплачены работы на сумму 2 000 000 руб. 

Соответственно, общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом по Договору подряда №3 от 12.02.2019 года составляет 1 278 157 руб. 45 коп.

Сумма основного долга в размере 1 278 157 руб. 45 коп. Ответчиком перед Истцом по Договору подряда №3 от 12.02.2019 года погашена.

Согласно п.4.2 Договора подряда за нарушение сроков оплаты установлена неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки.

Размер неустойки составил 239 358 руб. 44 коп.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по договорам истец обратился в суд с настоящим иском (с учетом уточнения) о взыскании неустойки в размере 365 708 руб. 01 коп., расходов по оплате государственной пошлины в сумме 10 314 руб. 

Ответчик заявил ходатайство о снижении размера неустойки.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, считает, что исковое заявление подлежит удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

Согласно п.1 ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может быть обеспечено неустойкой.

В связи с тем, что обязательства по оплате ответчиком своевременно не исполнены, истец начислил неустойку в размере 0,1% от суммы Договора в общем размере 365 708 руб. 01 коп., рассчитанную в порядке п. 4.2 данных договоров.

Согласно п.4.2 Договоров подряда за нарушение сроков оплаты по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п.69 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п.71 Постановления).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.  (п.73 Постановления).

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в ст. 9 названного Кодекса, а также положений ст. 65 Кодекса, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права, в том числе и на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий несовершения им соответствующих процессуальных действий.

Ответчиком доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств, не представлено.

На основании вышеизложенного арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для снижения размера неустойки.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 314 руб. относятся на ответчика и подлежат возмещению истцу.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                                                  Р Е Ш И Л:

Исковые требования ООО «Строительное монтажное управление «Рубеж СВ» удовлетворить.

Взыскать с ООО «РКСервис» в пользу ООО «Строительное монтажное управление «Рубеж СВ» неустойку в размере  365 708 руб.01 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10 314 руб.

Возвратить ООО «Строительное монтажное управление «Рубеж СВ» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 19 573 руб. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области в месячный срок после его принятия. 

Судья              Е.В. Горькова