АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А03-20756/2016

г. Барнаул

26 июня 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 июня 2017 года.   

Решение изготовлено в полном объеме 26 июня 2017 года.

Арбитражный суд Алтайского края в  составе судьи  Пашковой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Ника», г. Заринск (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Призводственно- строительное объединение «Алтай», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 566 656 руб. 18 коп. долга,

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО2 (доверенность, паспорт),

от ответчика: не явился, извещен,

от третьих лиц: не явились, извещены,

установил:

общество  с ограниченной ответственностью «Ника» (далее – ООО «Ника», истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Призводственно- строительное объединение «Алтай» (далее – ООО ПСО «Алтай», ответчик) о взыскании 566 656 руб. 18 коп. долга.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Энергостройсервис» и ООО «Концерн АКХС».

Исковые требования обоснованы статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы ненадлежащим исполнением  обязательств по договорам субподряда №317-14 от 01.12.2014, №318-14 от 01.12.2014.

В судебном заседании истец на иске настаивал.

Ответчик и третьи лица в судебное заседание не явились, в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте его проведения.

Ответчик в отзыве на исковое заявление признал наличие задолженности по договору субподряда №317-14 от 01.12.2014 в размере 290 067 руб., по договору субподряда №318-14 от 01.12.2014 в размере 276 589 руб. 18 коп.

Заслушав пояснения истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее: 

1.) 01.12.2014 между ООО «Концерн-АКХС» (генподрядчик) и ООО «Энергостройсервис» (субподрядчик) заключен договор субподряда №317-14, по условиям которого субподрядчик обязался выполнить по заданию генподрядчика электромонтажные работы, согласно Ведомости договорной цены (Приложение №1 к настоящему договору), далее - работы, на объекте: «Многоэтажный жилой дом по Павловскому тракту, 303 в г. Барнауле (стр. №4 в квартале 2011), а Генподрядчк обязался принять выполненные субподрядчиком работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ, согласно ведомости договорной цены (Приложение №1) составляет: 4 360 311 руб. с учетом НДС. Генподрядчик для начала выполнения работ вправе предоставить субподрядчику аванс в размере до 30% от стоимости работ по настоящему договору. Субподрядчик, исходя из фактически выполненного объема работ, ежемесячно до 25 числа предоставляет генподрядчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), генподрядчик в течение пяти дней проверяет и подписывает форму КС-3 на основании формы №КС-2 при условии, что они надлежащим образом оформлены, либо направляет в адрес субподрядчика мотивированный отказ. Ежемесячно при подписывании фактически выполненных объемов работ, производится удержание 5% путем снятия субподрядных форм КС-2, КС-3. Оплата принятых 95% стоимости выполненных работ производится генподрядчиком в течение 10 банковских дней после подписания сторонами форм КС-2 и КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика, либо иным незапрещенным законодательством РФ способом. Оставшуюся часть, в размере 5% стоимости фактически выполненных работ, генподрядчик подписывает субподрядчику в формах КС-2 и КС-3 после подписания акта приема-передачи выполненных работ и сдачи исполнительной документации. Оплата 5% стоимости выполненных работ производится генподрядчиком в течение 15 банковских дней после подписания сторонами форм КС-2 и КС-3 (п.п. 2.1.1, п.2.2, 2.3 договора).

В соответствии с пунктом 5.1 договора начало выполнения работ – 01 декабря 2014 г., окончание работ – 30 июня 2015 г.

Дополнительным соглашением №1 от 01.12.2014 стороны предусмотрели выполнение субподрядчиком дополнительных электромонтажных работ, по заданию генподрядчика, согласно ведомости договорной цены (Приложение №1), в соответствии с условиями заключенного договора и настоящего дополнительного соглашения, далее работы, на объекте: «Многоэтажный жилой по Павловскому тракту, 303 в г. Барнауле (стр. №4 в квартале 2011)».

Стоимость дополнительных работ по настоящему соглашению №1, согласно ведомости договорной цены (приложение №1) составляет 3 978 014 руб. НДС в том числе. Итоговая общая стоимость работ по договору с учетом настоящего дополнительного соглашения составляет 8 338 325 руб., НДС в том числе (пункты 2.2, 2.3 дополнительного соглашения №1).

Сроки выполнения работ по дополнительному соглашению №1 с 01декабря 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

02.12.2014 между ООО «Концерн-АКХС» (генподрядчик) и ООО «Энергостройсервис» (субподрядчик) подписано дополнительное соглашение №2 к договору субподряда №317-14 от 01.12.2014, согласно которому генподрядчик  и субподрядчик договорились продлить сроки выполнения работ по дополнительному соглашению №1 от 01.12.2014 на объекте: «Многоэтажный жилой по Павловскому тракту, 303 в г. Барнауле (стр. №4 в квартале 2011)», а генподрядчик обязался принять выполненные субподрядчиком работы и оплатить в соответствии с условиями заключенного договора и настоящего дополнительного соглашения.

В соответствии с пунктом 2.1 соглашения №2 изменены сроки выполнения работ по дополнительному соглашению №1 от 01.12.2014: начало работ – 01 декабря 2014 г., окончание работ – 31 декабря 2015 г.

31.07.2015 между теми же сторонами заключено дополнительное соглашение №3, по условиям которого субподрядчик обязался по заданию генподрядчика выполнить электромонтажные работы, согласно ведомости договорной цены (Приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению) далее работы, на объекте: «Многоэтажный жилой по Павловскому тракту, 303 в г. Барнауле (стр. №4 в квартале 2011)», а генподрядчик обязался принять выполненные субподрядчиком работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего дополнительного соглашения и договора субподряда №317-14 от 01.12.2014 г.

Пунктом 2.1 соглашения №3 сторонами согласовано, что стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, согласно ведомости договорной цены, составляет 31 819 руб. 88 коп., НДС в том числе. Общая стоимость работ по договору, с учетом дополнительных соглашений, увеличится и составит 8 370 144 руб. 88 коп., НДС в том числе (пункт 2.2 соглашения).

Срок выполнения работ по настоящему дополнительному соглашению: начало работ -01 августа 2015 г., окончание работ – 30 сентября 2015 г. (пункт 3.1 соглашения №3).

07.09.2015 между ООО «Концерн-АКХС» (генподрядчик) и ООО «Энергостройсервис» (субподрядчик) заключено дополнительное соглашение №4 к договору субподряда №317-14 от 01.12.2014, предметом которого является выполнение субподрядчиком электромонтажных работ по заданию генподрядчика, согласно  ведомости договорной цены (Приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению) далее - работы, на объекте: «Многоэтажный жилой по Павловскому тракту, 303 в г. Барнауле (стр. №4 в квартале 2011)».

Стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, согласно ведомости договорной цены, составляет 76 871 руб., НДС в том числе. Общая стоимость работ по договору, с учетом дополнительных соглашений, увеличится и составит 8 447 015 руб. 98 коп., НДС в том числе (раздел 2 соглашения №4).

Срок выполнения работ по настоящему дополнительному соглашению: начало работ – 07 сентября 2015 г., окончание работ – 31 декабря 2015 г.

19.10.2015 ООО «Концерн-АКХС» (генподрядчик), ООО «Энергостройсервис» (субподрядчик) и ООО «Ника» (новый субподрядчик) заключили соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору субподряда №317-14 от 01.12.2014, в соответствии с настоящим соглашением субподрядчик передал, а новый субподрядчик принял на себя все права и обязанности по договору субподряда №317-14 от 01.12.2014, а также дополнительным соглашениям к данному договору, на выполнение работ на объекте: «Многоэтажный жилой по Павловскому тракту, 303 в г. Барнауле (стр. №4 в квартале 2011)». Остаточная стоимость работ, подлежащих выполнению новым субподрядчиком, согласно ведомости договорной цены (приложение №1 к соглашению) составляет 4 187 855 руб. 56 коп., НДС в том числе. Неисполненные субподрядчиком перед заказчиком обязательства по выплаченному авансу в размере 1 534 437 руб. 43 коп., НДС в том числе, к моменту заключения настоящего соглашения о перемене лиц в обязательстве переходят к новому субподрядчику.

29.02.2016 между ООО «Концерн-АКХС» (генподрядчик), ООО ПСО «Алтай» (новый генподрядчик) и ООО «Ника» (субподрядчик) заключено соглашение перемене лиц в обязательстве по договору субподряда №317-14 от 01.12.2014, в соответствии с которым генподрядчик передал, а новый генподрядчик принял на себя все права и обязанности по договору субподряда №317-14 от 01.12.2014, а также дополнительным соглашениям к данному договору, на выполнение работ на объекте: «Многоэтажный жилой по Павловскому тракту, 303 в г. Барнауле (стр. №4 в квартале 2011)».

Согласно пункту 2.1 соглашения от 29.02.2016 задолженность по договорным обязательствам субподрядчика перед генподрядчиком составляет 497 193 руб. 28 коп., НДС в том числе, право требования, которой переходят к новому генподрядчику.

Во исполнение условий договора субподряда №317-14 от 01.12.2014 истец выполнил работы на общую сумму 3 181 600 руб. 96 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат.

В счет оплаты долга по договору субподряда №317-14 от 01.12.2014 ответчик перечислил истцу 2 355 000 руб. по платежным поручениям №126 от 08.04.2016, №340 от 08.06.2016, №380 от 08.07.2016, №208 от 29.04.2016, №94 от 30.03.2016.

Ответчик оказал истцу услуги на общую сумму 39 340 руб. 68 коп., что подтверждается актами №36 от 29.04.2016 на сумму 28 336 руб. 92 коп., №17 от 30.04.2016 на сумму 4 582 руб. 52 коп., №54 от 30.06.2016 на сумму 3 360 руб. 64 коп., №119 от 30.09.2016 на сумму 3 060 руб. 60 коп., на которую истец уменьшил размер исковых требований.

Кроме того, истец подтвердил наличие у него переплаты в сумме 497 193 руб. 28 коп.

Таким образом, долг ответчика по оплате выполненных истцом работ по договору субподряда №317-14 от 01.12.2014 составил 290 067 руб. (3 181600,96-2355000-39340,68 – 497 193,28).

2.) 01.12.2014 между ООО «Концерн-АКХС» (генподрядчик) и ООО «Энергостройсервис» (субподрядчик) заключен договор субподряда №318-14, по условиям которого субподрядчик обязался выполнить по заданию генподрядчика электромонтажные работы, согласно Ведомости договорной цены (Приложение №1 к настоящему договору), далее работы, на объекте: «Многоэтажный жилой дом по Павловскому тракту, 305 в г. Барнауле (стр. №3 в квартале 2011), а Генподрядчик обязался принять выполненные субподрядчиком работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ, согласно ведомости договорной цены (Приложение №1) составляет: 4 539 552 руб. с учетом НДС. Генподрядчик для начала выполнения работ вправе предоставить субподрядчику аванс в размере до 30% от стоимости работ по настоящему договору. Субподрядчик, исходя из фактически выполненного объема работ, ежемесячно до 25 числа предоставляет генподрядчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), генподрядчик в течение пяти дней проверяет и подписывает форму КС-3 на основании формы №КС-2 при условии, что они надлежащим образом оформлены, либо направляет в адрес субподрядчика мотивированный отказ. Ежемесячно при подписывании фактически выполненных объемов работ, производится удержание 5% путем снятия субподрядных форм КС-2, КС-3. Оплата принятых 95% стоимости выполненных работ производится генподрядчиком в течение 10 банковских дней после подписания сторонами форм КС-2 и КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика, либо иным незапрещенным законодательством РФ способом. Оставшуюся часть, в размере 5% стоимости фактически выполненных работ, генподрядчик подписывает субподрядчику в формах КС-2 и КС-3 после подписания акта приема-передачи выполненных работ и сдачи исполнительной документации. Оплата 5% стоимости выполненных работ производится генподрядчиком в течение 15 банковских дней после подписания сторонами форм КС-2 и КС-3 (п.п. 2.1.1, п.2.2, 2.3 договора).

В соответствии с пунктом 5.1 договора начало выполнения работ – 01 декабря 2014 г., окончание работ – 30 июня 2015 г.

Дополнительным соглашением №1 от 01.12.2014 стороны предусмотрели выполнение субподрядчиком дополнительных электромонтажных работ, по заданию генподрядчика, согласно ведомости договорной цены (Приложение №1), в соответствии с условиями заключенного договора и настоящего дополнительного соглашения на объекте: «Многоэтажный жилой по Павловскому тракту, 305 в г. Барнауле (стр. №3 в квартале 2011)».

Стоимость дополнительных работ по настоящему соглашению №1, согласно ведомости договорной цены (приложение №1) составляет 3 420 968 руб. НДС в том числе. Итоговая общая стоимость работ по договору с учетом настоящего дополнительного соглашения составляет 7 960 520 руб. НДС в том числе (пункты 2.2, 2.3 дополнительного соглашения №1).

Сроки выполнения работ по дополнительному соглашению №1 с 01декабря 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

02.12.2014 между ООО «Концерн-АКХС» (генподрядчик) и ООО «Энергостройсервис» (субподрядчик) подписано дополнительное соглашение №2 к договору субподряда №318-14 от 01.12.2014, согласно которому генподрядчик  и субподрядчик договорились продлить сроки выполнения работ по дополнительному соглашению №1 от 01.12.2014 на объекте: «Многоэтажный жилой по Павловскому тракту, 305 в г. Барнауле (стр. №3 в квартале 2011)», а генподрядчик обязался принять выполненные субподрядчиком работы и оплатить в соответствии с условиями заключенного договора и настоящего дополнительного соглашения.

В соответствии с пунктом 2.1 соглашения №2 изменены сроки выполнения работ по дополнительному соглашению №1 от 01.12.2014: начало работ – 01 декабря 2014 г., окончание работ – 31 декабря 2015 г.

31.07.2015 между теми же сторонами заключено дополнительное соглашение №3, по условиям которого субподрядчик обязался по заданию генподрядчика выполнить электромонтажные работы, согласно ведомости договорной цены (Приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению) далее работы, на объекте: «Многоэтажный жилой по Павловскому тракту, 305 в г. Барнауле (стр. №3 в квартале 2011)», а генподрядчик обязался принять выполненные субподрядчиком работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего дополнительного соглашения и договора субподряда №318-14 от 01.12.2014 г.

Пунктом 2.1 соглашения №3 сторонами согласовано, что стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, согласно ведомости договорной цены, составляет 31 819 руб. 88 коп., НДС в том числе. Общая стоимость работ по договору, с учетом дополнительных соглашений, увеличится и составит 7 992 339 руб. 88 коп., НДС в том числе (пункт 2.2 соглашения).

Срок выполнения работ по настоящему дополнительному соглашению: начало работ -01 августа 2015 г., окончание работ – 30 сентября 2015 г. (пункт 3.1 соглашения №3).

07.09.2015 между ООО «Концерн-АКХС» (генподрядчик) и ООО «Энергостройсервис» (субподрядчик) заключено дополнительное соглашение №4 к договору субподряда №318-14 от 01.12.2014, предметом которого является выполнение субподрядчиком электромонтажных работ по заданию генподрядчика, согласно  ведомости договорной цены (Приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению) далее работы, на объекте: «Многоэтажный жилой по Павловскому тракту, 305 в г. Барнауле (стр. №3 в квартале 2011)».

Стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, согласно ведомости договорной цены, составляет 76 871 руб., НДС в том числе. Общая стоимость работ по договору, с учетом дополнительных соглашений, увеличится и составит 8 069 210 руб. 98 коп., НДС в том числе (раздел 2 соглашения №4).

Срок выполнения работ по настоящему дополнительному соглашению: начало работ – 07 сентября 2015 г., окончание работ – 31 декабря 2015 г.

19.10.2015 ООО «Концерн-АКХС» (генподрядчик), ООО «Энергостройсервис» (субподрядчик) и ООО «Ника» (новый субподрядчик) заключили соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору субподряда №318-14 от 01.12.2014, в соответствии с настоящим соглашением субподрядчик передал, а новый субподрядчик принял на себя все права и обязанности по договору субподряда №318-14 от 01.12.2014, а также дополнительным соглашениям к данному договору, на выполнение работ на объекте: «Многоэтажный жилой по Павловскому тракту, 305 в г. Барнауле (стр. №3 в квартале 2011)». Остаточная стоимость работ, подлежащих выполнению новым субподрядчиком, согласно ведомости договорной цены (приложение №1 к соглашению) составляет 4 126 622 руб. 12 коп., НДС в том числе. Неисполненные субподрядчиком перед заказчиком обязательства по выплаченному авансу в размере 731 883 руб. 32 коп. НДС в том числе к моменту заключения настоящего соглашения о перемене лиц в обязательстве переходят к новому субподрядчику.

04.03.2016 между ООО «Концерн-АКХС» (генподрядчик), ООО ПСО «Алтай» (новый генподрядчик) и ООО «Ника» (субподрядчик) заключено соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору субподряда №318-14 от 01.12.2014, в соответствии с которым генподрядчик передал, а новый генподрядчик принял на себя все права и обязанности по договору субподряда №318-14 от 01.12.2014, а также дополнительным соглашениям к данному договору, на выполнение работ на объекте: «Многоэтажный жилой по Павловскому тракту, 305 в г. Барнауле (стр. №3 в квартале 2011)».

Согласно пункту 2.1 соглашения от 04.03.2016 задолженность по договорным обязательствам субподрядчика перед генподрядчиком отсутствует.

Во исполнение условий договора субподряда №318-14 от 01.12.2014 истец выполнил работы на общую сумму 2 311 031 руб. 18 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат.

В счет оплаты долга по договору субподряда №318-14 от 01.12.2014 ответчик перечислил истцу 2 034 442 руб. по платежным поручениям №141 от 15.04.2016, №168 от 26.04.2016, №237 от 12.05.2016, №295 от 31.05.2016.

 Таким образом, долг ответчика по оплате выполненных истцом работ по договору субподряда №318-14 от 01.12.2014 составил 276 589 руб. 18 коп. (2 311 031,18-2034442).

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В силу статьи 384 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Отсутствие оплаты задолженности по договорам субподряда №317-14, №318-14 от 01.12.2014 в общей сумме 566 656 руб. 18 коп. явилось основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

Давая оценку спорным отношениям, суд считает, что между сторонами возникли обязательства, к которым применяются нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) – о договоре подряда.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Наличие задолженности в заявленном размере подтверждается актами о приемке оказанных услуг КС-2, справками о стоимости выполненных работ КС-3.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В силу статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик возражений по иску и доказательств оплаты долга в суд не представил.

Более того, в отзыве ответчик подтвердил наличие задолженности в заявленном истцом размере.

При таких обстоятельствах исковые требования о взыскании 566 656 руб.  долга подлежат удовлетворению в полном объеме.

Поскольку при подаче иска истцу была предоставлена отсрочка по ее уплате, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

  На основании статей 309, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137, пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края      

                                                       Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно – строительное объединение «Алтай», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ника», г. Заринск (ОГРН 

<

***>) 566 656 руб. 18 коп. долга.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно – строительное объединение «Алтай», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 14 333 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                 Е.Н. Пашкова