Арбитражный суд Липецкой области

пл. Петра Великого, д.7, г.Липецк, 398066

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №  А36-4360/2023

г.  Липецк

18 сентября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 10 сентября 2024 года

Полный текст решения изготовлен 18 сентября 2024 года

 

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Истоминой Е.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Моргачевой Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>)

к акционерному обществу Специализированный застройщик «Ремстройсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>, помещ.8, каб.2)

о взыскании 9 183 294 руб. 39 коп., 

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 (доверенность № 7 от 09.01.2024 г., сроком действия до 31.12.2024 г., копия диплома), после перерыва представитель не явился,

от ответчика: не явился,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания» (далее – истец, АО «ЛГЭК») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к акционерному обществу Специализированный застройщик «Ремстройсервис» (АО СЗ «Ремстройсервис») о взыскании 8 811 392 руб. 14 коп., в том числе 1 480 265 руб. 14 коп. - основного долга по договору № 3209/14 от 13.10.2014 г. и 7 331 127 руб. 00 коп. - неустойки за период  15.01.2021 г. по 18.04.2023 г.

Определением от 30.06.2023 исковое заявление принято к производству.

Определением от 30.10.2023 г. произведена замена судьи Канаевой А.В. на судью Истомину Е.А.

03.06.2024 г. от истца проступило ходатайство об увеличении исковых требований, в котором он просил  взыскать с ответчика задолженность в общем размере 9 183 294 руб. 39 коп., в том числе: задолженность по договору № 3209/14 от 13.10.2014 г. в размере       1 480 265 руб. 14 коп., неустойку за период с 15.01.2022 г. по 31.03.2022 г. и с 01.11.2022 г. по 03.06.2024 г. в размере 7 703 029 руб. 25 коп.

В судебное заседание 09.09.2024 г. представитель ответчика не явился, извещен надлежащим образом.

Учитывая наличие в материалах дела доказательств надлежащего извещения указанного лица о времени и месте судебного разбирательства, суд в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) рассматривает исковое заявление в отсутствие неявившегося участника процесса.

В судебном заседании представитель истца на ходатайстве об увеличении исковых требований настаивал.

Суд, руководствуясь статьей 49 АПК РФ, принял к рассмотрению увеличенные требования истца, поскольку это его право.

Представитель истца на требованиях настаивал.

В судебном заседании в соответствии со статьей 163 АПК РФ объявлен перерыв до 10.09.2024 г. Информация о перерыве размещена на официальном сайте http://kad.arbitr.ru. 

В судебное заседание после перерыва представители сторон не явились. Поскольку о движении дела указанные лица извещены надлежащим образом, судебное заседание после перерыва на основании статей 123, 156, 184 АПК РФ продолжено в отсутствие неявившихся участников процесса.

Изучив представленные доказательства, суд установил следующее.

13.10.2014 г. между ОАО «ЛГЭК» (в настоящее время - АО «ЛГЭК»)  (сетевая организация) и ФИО2 (заявитель) подписан договор № 3209/14 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Согласно п. 1. данного договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома с автопарковкой и нежилыми помещениями, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

-максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 250 (кВт);

-категория надежности – 2;

-класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0.38   (кВ);

-максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих устройств - 0 (кВт). 

При этом заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Кроме того в п. 8. договора стороны предусмотрели, что заявитель также обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на него:

мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые знергоприннмающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение  5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;                                                                                              

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Также заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

В силу п. 10. договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.12.2013 г. № 58/3 и составляет  3 102 494 руб. 35 коп. в т.ч. НДС.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 

а)         10 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

 б)        30 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

 в)        20 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

 г)        30 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

д)        10% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.

В соответствии с п. 13. договора заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя.

Ответственность сторон по данному договору установлена в п. 17., из которого следует, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

14.12.2015 г. между АО «ЛГЭК» (сторона 1), ФИО2 (сторона 2), ФИО3 (сторона 3) и ЗАО «Ремстройсервис» (в настоящее время - АО СЗ «Ремстройсервис») (сторона 4) подписано дополнительное соглашение № 1, по условиям которого сторона 2 в полном объеме передает свои права и обязанности (в том числе финансовые, указанные в п. 11. договора) заявителя технологического присоединения энергопринимающего устройства, расположенного по адресу: 

<

...> стороне 4, а сторона 4 принимает в полном объеме соответствующие права и обязанности (в том числе по исполнению мероприятий по технологическому присоединению) по договору № 3209/14 от 13.10.2014 г.

Кроме того в данном соглашении стороны также согласовали следующее:

п. 1. договора изменить и изложить в следующей редакции: «По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) многоэтажного многоквартирного здания со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой но ул. Балмочных в г. Липецке...

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 345 кВт» - далее по тексту.

п. 2. договора изменить и изложить в следующей редакции: «Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: многоэтажное многоквартирное здание со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Балмочных в г. Липецке, расположенного по адресу: 

<

...> кадастровые № 48:20:0029810:890, № 48:20:0029810:888».

п. 4. договора изменить и изложить в следующей редакции: «Технические условия № Э1375/15 от 19.11.2015 г. (Приложение № 1) являются неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения и договора от 13.10.2014 г. № 3209/14. Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения настоящего дополнительного соглашения». 

п. 10. договора изменить и изложить в следующей редакции: «Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 12.12.2014 г. № 53/1 и составляет: 7 703 029,25 рублей (Семь миллионов семьсот три тысячи двадцать девять рублей 25 копеек), в т.ч. НДС 18 % - 1 175 038,36 руб.»

п. 11. договора изменить и изложить в следующей редакции: «Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

а)         заявитель оплачивает сетевой организации разницу между стоимостью полученного от Стороны 2 аванса (1 241 300,00 руб. с НДС) и 40% платы за технологическое присоединение (3 081 211,70 руб. с НДС), а именно: 1 839 911,70 руб. с НДС, в течение 15 дней со дня заключения настоящего дополнительного соглашения;

б)         20% платы за технологическое присоединение, а именно 1 540 605,85 руб. с НДС, вносится в течение 60 дней со дня заключения настоящего дополнительного соглашения;

в)         30% платы за технологическое присоединение, а именно 2 310 908,78 руб. с НДС, вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении;

г)         10% платы за технологическое присоединение, а именно 770 302,92 руб. с НДС, вносится в течение 10 дней со дня фактического присоединения».

В дальнейшем между АО «ЛГЭК» и АО СЗ «Ремстройсервис» заключался еще ряд дополнительных соглашений к договору № 3209/14 от 13.10.2014 г., регулирующих в том числе и внесение изменений в технические условия.

29.10.2018 г. между АО «ЛГЭК» и АО СЗ «Ремстройсервис» подписано дополнительное соглашение № 5 к указанному выше договору, в котором стороны согласовали, что:

Технические условия № Э1953/18 от 15.11.2018 г. являются неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения и договора от 13.10.2014 г. №3209/14; 

п. 5. договора изменить и изложить в следующей редакции: «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению I этап до 28.12.2018 г., II этап до 30.04.2019 г.»; 

приложение № 1 от 03.06.2014 г. № Э0722-806, от 10.07.2014 г. № Э0955-14, от 15.09.2015 г. № Э1150/15, от 19.11.2015 г. № Э1375/15, от 27.10.2017 г. № Э1284/17, от 27.07.2018 г. № Э1218/18, от 04.09.2018 г. № Э1558/18, от 29.10.2018 г. № Э1953/18 «Технические условия для присоединения к электрическим сетям» - отменить.

В соответствии с п. 10. Технических условий № Э1953/18 от 15.11.2018 г. сетевая организация осуществляет:

I этап:                                                                                                                               

10.1. В центре нагрузок смонтировать ТП с силовым трансформатором напряжением 6/0.4 кВ. Мощность силового трансформатора, тип и состав оборудования - определить проектом.

10.2. От ближайшей опоры ВЛ-6 кВ «ТП-3-ТП-96» до ТП по 10.1. смонтировать КЛ-6 кВ (ориентировочная протяженность 30 метров, сечение до 100 мм2 включительно). Тип и марку кабеля — определить проектом. 

10.3. От РУ-0.4 кВ новой ТП по п. 10.1. до ВРУ-0,4 кВ объекта смонтировать 6 КЛ-0.4 кВ (ориентировочная протяженность 6x50 метров, сечение свыше 200 мм2). Тип и марку кабеля - определить проектом.

10.4. Расчетное значение токов короткого замыкания - в РУ-6/0.4 кВ новой ТП по п. 10.1. I-определить проектом. 

10.5. Требования к противоаварийной автоматике - не предусматривается.

10.6.Требования к защите от перенапряжения - выполнить защиту от перенапряжений ТП по п. 10.1. по стороне 6 и 0.4 кВ. Тип ограничителей перенапряжений — определить проектом.

10.7. Требования к защите электрической сети — тип и параметры аппаратуры зашиты в РУ-0,4 кВ новой ТП по п. 10.1. определить проектом.

10.8. УТП по п. 10.1 смонтировать заземляющее устройство в соответствии с требованиями ПУЭ.

10.9. Для обеспечения II категории надежности электроснабжения предусмотреть установку ЛГУ. Порядок работы ДГУ определить проектом.

II этап:

10.10.  Выполнить мероприятия по договору ТП № 32/14 от 15.01.14 г. (ТУ№ Э1559/18 от 11.09.18 г.  II этап)           

10.11. От РУ-0.4 кВ ТП смонтированной по п. 10.9. до ВРУ-0.4 кВ объекта смонтировать 6 КЛ-0.4 кВ (ориентировочная протяженность 6x300 метров, сечение свыше 200 мм2). Тип и марку кабеля - определить проектом. Предусмотреть проектом использование б КЛ-0,4 кВ., смонтированных по 10.3.

В свою очередь в соответствии с п. 11. Технических условий Заявитель осуществляет:

I этап:

11.1. Специфические требования к объекту - необходимость использования устройства защитного отключения (УЗО) определить проектом.

11.2. Требования к противоаварийной автоматике - не предусматривается.

11.3. Учет электроэнергии:

11.3.1. Во ВРУ-0.4 кВ объекта, квартирах и нежилых помещениях предусмотреть установку приборов учета электрической энергии с классом точности не ниже 2,0. обеспечивающих возможность дистанционного доступа к информации по питающей сети с применением цифровых протоколов, согласованных с АО «ЛГЭК».

11.3.2. Обеспечить защиту измерительных цепей и силовых цепей, находящихся до приборов учета, от несанкционированного доступа с возможностью опломбирования.

11.3.3. После монтажа провести испытание и наладку средств учета в соответствии с требованием главы 1.5 ПУЭ и методикой проверки схемы организации учета на объекте потребителя.

11.4.    Разработать и согласовать с АО «ЛГЭК» проектную документацию согласнообязательствам, предусмотренным техническими условиями.

II этап:

11.5.  Специфические требования к объекту - необходимость использования устройства защитного отключения (УЗО) определить проектом.

11.6.  Требования к противоаварийной автоматике — не предусматривается.

11.7.  Учет электроэнергии:

11.7.1. Во ВРУ-0.4 кВ объекта, квартирах и нежилых помещениях предусмотреть установку приборов учета электрической энергии с классом точности не ниже 2.0, обеспечивающих возможность дистанционного доступа к информации по питающей сети с применением цифровых протоколов, согласованных с АО «ЛГЭК».

11.7.2.  Обеспечить защиту измерительных цепей и силовых цепей, находящихся до приборов учета, от несанкционированного доступа с возможностью опломбирования.

11.7.3.  После монтажа провести испытание и наладку средств учета в соответствии с требованием главы 1.5 ПУЭ и методикой проверки схемы организации учета на объекте потребителя.

11.8. Разработать и согласовать с АО «ЛГЭК» проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.

17.01.2019 г. сторонами подписан акт № 3209/14 о выполнении технических условий.

14.03.2019 г. сторонами подписан акт об осуществлениитехнологического присоединения многоэтажного многоквартирного здания поул. Балмочных в г. Липецке (1 этап).

19.03.2020 г. инспекцией государственного строительного надзора Липецкой области составлен акт № 1 в отношении АО «ЛГЭК» о проведении программной проверки электроснабжения многоэтажного многоквартирного здания со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, в ходе которой представлена необходимая исполнительная и проектная документация, нарушений не выявлено.

15.05.2020    г. инспекцией государственного строительного надзора Липецкойобласти составлен акт № 2, которым подтвержден факт выполнения прокладкиКЛ-0,4 кВ до КТП-999 (к жилому дому по ул. Балмочных).

27.05.2019 г. территориальным органом Верхне-Донского Управления Ростехнадзора в присутствии представителя АО СЗ «Ремстройсервис» составлен акт № сЛ5/6-128 осмотра электроустановки.

29.05.2019               г. территориальным органом Верхне-Донского Управления Ростехнадзора выдано АО СЗ «Ремстройсервис» разрешение № Л5/6-128 на допуск в эксплуатацию электроустановки. 

29.05.2019 г. Департаментом градостроительства и архитектуры выдано АО СЗ «Ремстройсервис» разрешение № 48-42 701 000-8-2019 на ввод объекта в эксплуатацию.

30.12.2019 г. АО «ЛГЭК» в адрес АО СЗ «Ремстройсервис» направлены для подписания акты об осуществлении технологического присоединения и завершении 2 этапа подключения. 

Подписанный акт об осуществлении технологического в АО «ЛГЭК» не возвращен, окончательная оплата в размере 1 480 265 руб. 14 коп. не произведена.

В претензии № 299 от 04.04.2023 г. истец просил ответчика оплатить задолженность размере 1 480 265 руб. 00 коп. и неустойку в течение 10 дней.

Поскольку задолженность не оплачена, истец обратился с настоящим иском в суд.

Оценив представленные доказательства, суд полагает, что требование истца подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В силу пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Согласно пункту 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (далее - Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил № 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг, в связи с чем к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ) (определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2017 г. № 305-ЭС17-11195 по делу № А40-205546/2016).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Как следует из материалов дела, в пункте 10 договора № 3209/14 от 12.10.2014 г. о технологическом присоединении с учетом дополнительного соглашения № 1 от 14.12.2015 г. стороны согласовали размер платы и порядок расчетов за технологическое присоединение.

Так стороны определили, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 12.12.2014 г. № 53/1 и составляет: 7 703 029 руб. 25 коп., в т.ч. НДС 18 % - 1 175 038 руб. 36 коп.

Факт осуществления в рамках договора мероприятий по технологическому присоединению подтвержден представленным в дело актом № 3209/14 от 14.03.2019 г., подписанным сторонами договора без возражений.

Более того, территориальным органом Верхне-Донского Управления Ростехнадзора и Департаментом градостроительства и архитектуры АО СЗ «Ремстройсервис» выданы разрешение № Л5/6-128 на допуск в эксплуатацию электроустановки и разрешение № 48-42 701 000-8-2019 на ввод объекта в эксплуатацию.

Данные обстоятельства ответчиком не оспариваются, доказательств, опровергающих указанные факты, не представлено.

Между тем, из материалов дела следует, что при надлежащем оказании истцом услуг по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям, ответчик свои обязательства по договору № 3209/14 от 12.10.2014 г. исполнил не надлежащим образом - услуги в полном объеме не оплатил, задолженность составила  1 480 265 руб. 14 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В ходе рассмотрения дела ответчик в судебные заседания не являлся, возражений по существу заявленных требований и контррасчета задолженности, при несогласии с размером требований, не представил.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании долга в размере 1 480 265 руб. 14 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за период с 15.01.2022 г. по 31.03.2022 г. и с 01.11.2022 г. по 03.06.2024 г. в размере 7 703 029 руб. 25 коп.

В соответствии со статьями 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой; неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 г. № 5467/14; определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.02.2017 г. № 305-ЭС16-14207).

В силу абзаца третьего подпункта «в» пункта 16 Правил № 861 (в редакции, действовавшей на момент спорных правоотношений) при нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплачивается неустойка, рассчитанная как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Аналогичное положение содержится в пункте 17 заключенного сторонами договора № 3209/14 от 13.10.2014 г., из которого следует, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

Рассмотрев расчет неустойки, суд установил, что истец верно указал период ее начисления, верно рассчитал количество дней просрочки.

В силу пунктов 1, 2 статьи 333 ГК РФ, если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 АПК РФ, а также положений статьи 65 АПК РФ, каждое лицо должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Из материалов дела следует, что от ответчика ходатайства о снижении неустойки, доказательств ее несоразмерности,  контррасчета, не поступало.

Вины истца в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору не установлено. 

При таких обстоятельствах, суд признает требование истца о взыскании с ответчика неустойки за период с 15.01.2022 г. по 31.03.2022 г. и с 01.11.2022 г. по 03.06.2024 г. в размере 7 703 029 руб. 25 коп. законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В силу статьи 101 АПК РФ  судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ  судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении с иском в арбитражный суд ходатайствовал о зачете государственной пошлины в общем размере 74 067 руб. 00 коп. с суммы требований 8 811 392 руб. 14 коп., в то время, как государственная пошлина с указанной суммы составила 67 057 руб. 00 коп.

Впоследствии истец увеличил исковые требования до суммы 9 183 294 руб. 39 коп., государственная пошлина с которой составляет 68 916 руб. 47 коп.

Указанная сумма относится на ответчика и взыскивается с него в пользу истца в качестве судебных расходов.

Оставшаяся часть оплаченной государственной пошлины в размере 5 150 руб. 53 коп. возвращается истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества Специализированный застройщик «Ремстройсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>, помещ.8, каб.2) в пользу акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>) задолженность в общем размере 9 183 294 руб. 39 коп., в том числе: задолженность по договору № 3209/14 от 13.10.2014 г. в размере       1 480 265 руб. 14 коп., неустойку за период с 15.01.2022 г. по 31.03.2022 г. и с 01.11.2022 г. по 03.06.2024 г. в размере 7 703 029 руб. 25 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 68 916 руб. 47 коп.

Возвратить акционерному обществу «Липецкая городская энергетическая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 150 руб. 53

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления через Арбитражный суд Липецкой области.

 

Судья                                                                                             Е.А.Истомина