АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А74-110/2024

01 апреля 2024 г.

г. Абакан

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 марта 2024 г.  Решение в полном объеме изготовлено 01 апреля 2024 г.  

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи М.А. Лукиной, при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя  ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304190128900018) к  открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) об обязании в течении 2 (двух) месяцев со дня вступления решения в  законную силу исполнить условия договора от 19.11.2021 № 33421- 11-21/КРАС об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  энергопринимающих устройств истца, расположенных по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 19:01:140101:1209, а  именно:  

-выполнить монтаж ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем в распределительном  устройстве напряжением 10 кВ трансформаторной подстанции ТП-538 ст. Абакан;  

-выполнить монтаж вакуумного выключателя, трансформаторов тока 150/5 в  количестве 3-х шт, устройств защиты, автоматики и управления в резервной ячейке № 9  распределительного устройства напряжением 10 кВ трансформаторной подстанции ТП-299  ст. Абакан; - выполнить установку трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью  2x2000 кВА на границе с участком заявителя;  

- выполнить строительство линии электропередачи напряжением 10 кВ (КЛ-10 кВ 150  мм2, алюминий, ориентировочной протяженностью 35 метров), от монтируемой ячейки 10  кВ трансформаторной подстанции ТП-538 ст. Абакан до вновь монтируемой  трансформаторной подстанции ТП - 10/0,4 кВ.;  

- организовать учет электрической энергии, 

о взыскании договорной неустойки за период с 21.11.2023 по 28.12.2023 в размере 705  890 руб. 63 коп. по день фактического исполнения обязательств,  

о взыскании с судебного штрафа (астрент) в размере 15 000 руб., за каждый  календарный день неисполнения решения суда, начисляемые по истечении срока,  предоставленного для исполнения решения суда, по день его фактического исполнения.  

В судебном заседании приняли участие представители:  

истца – ФИО3 на основании доверенности от 27.12.2023, ФИО4 по  

доверенности от 21.06.2022 (до и после перерыва); 

ответчика - ФИО5 по доверенности от 10.11.2023 (после перерыва  

28.03.2024), ФИО6 по доверенности № ТЭ552/д от 24.08.2021 (после перерыва  

29.03.2024, посредством системы веб конференции). 

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в  арбитражный суд с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Российские  железные дороги» и к обществу с ограниченной ответственностью «Энергопромсбыт» об  

обязании ответчика в течении 2 месяцев со дня вступления решения в законную силу  исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения, от  19,11.2021 № 33421-11-21/КРАС взыскании неустойки за период с 21.11.2023 по 28.12.2023 в  размере 705 890 руб. 63 коп., взыскании судебной неустойки (астрент) в размере 15 000 руб.  за каждый календарный день неисполнения решения суда.  

В судебном заседании 27.03.2024 объявлялся перерыв до 28.03.2024 и до 29.03.2024 в  соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Представитель истца заявил отказ от исковых требований к обществу с ограниченной  ответственностью «Энергопромсбыт», о чем представил письменное ходатайство.  

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой и  апелляционной инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение  дела по существу, отказаться от иска полностью или частично.  

Арбитражный суд, оценив заявленный истцом отказ от исковых требований в части  взыскания задолженности с точки зрения его соответствия законам, иным нормативным  правовым актам, пришёл к выводу о том, что он не противоречит действующему  законодательству и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем  принимает отказ истца от исковых требований в данной части.  

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, если истец отказался от иска, и отказ принят арбитражным  судом, арбитражный суд прекращает производство по делу в указанной части.  

Представитель истца исковые требования к открытому акционерному обществу  «Российские железные дороги» поддержал в полном объёме.  

Представитель ответчика поддержал доводы, указанные в отзыве на исковое  заявление, просил применить статью 333 ГК РФ и снизить неустойку, а также снизить размер  штрафа до 100 руб. в день. Поддержал поступившее в период перерыва ходатайство о  привлечении к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора ООО «РСО-Энерго», пояснив, что данное лицо  является подрядчиком для выполнения строительно-монтажных работ по объекту истца.  

Представитель истца возражал по ходатайству ответчика о привлечении к участию  третьего лица.  

Рассмотрев ходатайство ответчика, суд не находит оснований для его удовлетворения  на основании нижеследующего.  

В соответствии с частью 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие  самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на  стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается  рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может  повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть  привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.  

Из анализа норм АПК РФ следует, что при вынесении определения арбитражный суд  должен установить характер правоотношений между лицами, участвующими в деле,  правовой интерес лица, а также может ли конечный судебный акт по делу повлиять на права  или обязанности третьего лица по отношению к одной из сторон. При установлении  обратного, арбитражный суд выносит определение об отказе в удовлетворении ходатайства о  вступлении третьего лица в дело.  

Рассмотрев ходатайство ответчика, суд приходит к выводу о том, что в соответствии  со статьей 51 АПК РФ оснований для привлечения ООО «РСО-Энерго» к участию в деле в  качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора, не имеется в связи с недоказанностью того, каким образом принятый по  делу судебный акт может повлиять на его права и обязанности по отношению к одной из  сторон настоящего спора.  

Исследовав представленные доказательства, заслушав пояснения участвующих в деле  лиц, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.  

Между истцом (заявитель) и ответчиком (сетевая организация) 19.11.2021 заключён  договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №  33421- 11-21/КРАС, по условиям которого сетевая организация принимает на себя  обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих  устройств заявителя (далее – Технологическое присоединение) в том числе по обеспечению  готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство,  реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию  отношений с третьеми лицами в случае необходимости строительства (модернизации)  такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства  (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетике), с учетом следующих  характеристик:  

 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 2500 кВт;  

 категория надежности вторая; 

 класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ;  

 максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 520  кВт.  

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 2  года со дня заключения договора (пункт 1.4 договора).  

Согласно пункту 1 технических условий, наименование энергопринимающих  устройств Заявителя – ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ.  

Согласно пункту 2 технических условий, технологическое присоединение необходимо  для электроустановки, расположенной по адресу: 

<

...>. кадастровый номер 19:01:140101:1209.  

Точки присоединения, установлены в пункте 7 технических условий. 

В соответствии с пунктом 10 технических условий сетевая организация осуществляет:  

монтаж ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем в распределительном устройстве  напряжением 10 кВ трансформаторной подстанции ТП-538 ст. Абакан, оборудованной  устройствами защиты, автоматики и управления;  

монтаж вакуумного выключателя, трансформаторов тока 150/5 в количестве 3-х шт.,  устройств защиты, автоматики и управления в резервной ячейке № 9 распределительного  устройства напряжением 10 кВ трансформаторной подстанции ТП-299 ст. Абакан;  

установку трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2x2000 кВА на  границе с участком Заявителя, в которой предусмотреть:  

- распределительное устройство 10 кВ на 8-м ячеек (2-е вводные ячейки, 2-е ячейки  силовых трансформаторов, 2-е ячейки трансформаторов напряжения, ячейка секционного  выключателя, ячейка секционного разъединителя), оборудованных устройствами защиты,  автоматики, управления;  

- распределительное устройство 0,4 кВ на 5-ть ячеек (2-е вводные ячейки, 2-е  распределительные ячейки на 4-е присоединения каждая, секционная ячейка),  оборудованных устройствами защиты;  

строительство линии электропередачи напряжением 10 кВ (КЛ-Ю кВ, 150 мм2,  алюминий, ориентировочной протяженностью 35 метров), от монтируемой ячейки 10 кВ  трансформаторной подстанции ТП-538 ст. Абакан до вновь монтируемой трансформаторной  подстанции ТП-10/0,4 к В;  

строительство линии электропередачи напряжением 10 кВ, (КЛ-10 кВ, 150 мм2,  алюминий, ориентировочной протяженностью 250 метров, из них методом горизонтально-направленного бурения ориентировочно 40 метров), от монтируемой ячейки 10 кВ  трансформаторной подсианции ТП-299 ст. Абакан до вновь монтируемой трансформаторной  подстанции ТП-10/0,4 кВ;  

организацию учёта электроэнергии в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов федеральных органов 

исполнительной власти, регламентирующих требования к учету  электроэнергии;  

 в случае необходимости отступления от технических условий, в том числе в холе  проектирования, такие отступления,подлежат внесению ь данные технические условия.  

Срок действия технических условий составляет четыре года с даты заключения  договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт  1.3 договора, пункт 12 технических условий).  

В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 договора плата за технологическое присоединение  составляет 7 430 427 руб. 50 коп.; заявитель производит оплату в течение 15 дней с момента  подписания договора.  

Платежным поручением от 26.11.2021 № 495 на сумму 7 430 427 руб. 50 коп. истец  выполнил обязательства по оплате по договору. Письмом от 10.08.2023 № 93 истец уведомил  ответчика о исполнении со своей стороны всех мероприятий по договору.  

21.11.2023 истец обратился в адрес ответчика с претензией исполнить договорные  обязательства.  

Невыполнение сетевой организацией принятых на себя обязательств по договору  послужило для истца основанием для обращения в суд с настоящим иском.  

Ответчик, возражая на иск, представил отзыв, в котором указал, что выполнение  условий не выполнено в срок, установленный договором по объективным причинам,  независящим от воли ответчика, таких как проблемы в организациях, выполняющих  строительно-монтажные работы. В случае удовлетворения требований истца об обязании  осуществить технологическое присоединение, ответчик просит установить срок для  исполнения решения суда не менее шести месяцев после вступления его в законную силу.  Ходатайствовал о снижении размера неустойки по правилам статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации, а также снизить размер судебной неустойки до 100 руб. за  каждый день неисполнения обязательства.  

Оценив представленные доказательства в их совокупности в соответствии со статьей  71 АПК РФ, арбитражный суд пришёл к следующим выводам.  

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) определен  такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре. В силу  статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют  принадлежащие им гражданские права.  

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано  совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать  имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность,  уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет  право требовать от должника исполнения его обязанности.  

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии  таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями.  

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных законом.  

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг  исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные  действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти  услуги.  

Неисполнение ответчиком обязательств, предусмотренных договором об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, послужило  основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.  

Спорные отношения сторон основаны на договоре, которые регулируются нормами  ГК РФ, нормами Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении» (далее  - Закон об электроэнергетике).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое  присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а  также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным  лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Во исполнение Закона об электроэнергетике постановлением Правительства  Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила недискриминационного  доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила  недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в  электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам  администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов  электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к  электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения, Правила № 861).  

Данные Правила определяют порядок технологического присоединения  энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого  хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют  процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой  организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия  договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,  устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для  присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия  (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством  перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и  индивидуальными предпринимателями.  

Согласно пункту 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в  отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому  присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической  возможности технологического присоединения.  

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора,  заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил № 861).  

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического  присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор  с лицами, указанными в пунктах 13(2) и 13(4) настоящих Правил, обратившимися в сетевую  организацию с заявкой на технологическое присоединение объектов микрогенерации,  принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом  основании, а также выполнить в отношении объектов микрогенерации таких лиц  мероприятия по технологическому присоединению при условии, что принадлежащие  заявителю энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии  технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации с  уровнем напряжения до 1000 В.  

В связи с указанными нормами, для сетевой организации заключение договора на  осуществление технологического присоединения носит обязательный характер, а  

устанавливаемые сроки четко регламентированы и не зависят от фактического объема  выполняемых работ.  

Процедура технологического присоединения закреплена в пункте 7 Правил № 861.  Мероприятия по технологическому присоединению, в том числе, выполнение технических  условий заявителем и сетевой организацией поименованы в пункте 18 Правил № 861.  

В силу подпункта «б» пункта 16 Правил № 861 в договоре устанавливается срок  осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который является  предельным и начинает течь с момента заключения договора об осуществлении  технологического присоединения.  

Стороны заключили договор об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям от 19.11.2021 № 33421- 11-21/КРАС  

Техническими условиями к договорам определены обязанности сторон. 

Так, разделом 10 технических условий предусмотрены обязанности сетевой  организации.  

Согласно пункту 85 Правил № 861 для проведения проверки выполнения технических  условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении  технических условий с приложением документов, поименованных в указанном пункте.  

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласован  сторонами в пункте 1.3 договора и составляет 2 года со дня заключения договора.  

Материалами дела установлено, что ответчик свои обязательства по спорному  договору в полном объеме не выполнил до настоящего момента.  

Арбитражный суд, оценив изложенные в отзыве на иск доводы ответчика, полагает их  несостоятельными, поскольку указанного рода обстоятельства представляют собой  нормальный риск предпринимательской деятельности и не могут служить основанием для  освобождения от ответственности лица, которое сознательно избрало для себя  предпринимательскую деятельность в качестве экономической.  

Заключая двусторонний возмездный договор, порядок исполнения которого  предусмотрен императивными нормами публичного права, сетевая организация, как  профессиональный участник рынка, берет на себя все риски его исполнения, исходя из  статуса сторон, а также с учетом того, что такие риски являются неотъемлемо  сопутствующими коммерческой деятельности сетевой организации в силу пункта 1 статьи 2  Гражданского кодекса Российской Федерации.  

При этом арбитражный суд учитывает, что ответчик является специализированной  организацией, длительное время оказывающей услуги по технологическому присоединению,  по передаче электроэнергии, оперативно-техническому управлению.  

Учитывая указанную специфику и осведомлённость в вопросах процедуры  технологического присоединения и сопряжённых с ним вопросов, сетевая организация могла  предусмотреть возможность возникновения проблем при исполнении договора и с учётом  этого согласовать условия договоров о сроках выполнения работ.  

При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчиком не представлено доказательств  невозможности исполнения своих обязательств в установленный договором срок, требования  истца являются обоснованными.  

Ответчик не представил доказательств осуществления мероприятий по  технологическому присоединению и создания условий возможности фактического  подключения объекта сетевой организацией, чем существенно нарушил условия договора по  сроку их выполнения.  

Исходя из фактических обстоятельств дела, исковые требования подлежат  удовлетворению, ответчик обязан исполнить условия договора от 19.11.2021 № 33421- 1121/КРАС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя ФИО2.  

Принимая во внимание длительность неисполнения обязательств по договору,  неблагоприятные последствия для истца, а также статус ответчика - сетевой организации,  суд признал разумным сроком для исполнения ответчиком возложенной на него обязанности  два месяца со дня вступления решения суда в законную силу.  

При этом арбитражный суд учитывает, что частью 1 статьи 324 АПК РФ  предусмотрена возможность отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта. При  наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, и предоставлении  подтверждающих доказательств сетевая организация вправе обратиться в арбитражный суд с  указанным заявлением.  

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере с 21.11.2023 по  28.12.2023 в размере 705 890 руб. 63 коп.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством,  банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или  договором.  

 В соответствии с пунктом 2 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности, в случае просрочки исполнения, при этом по требованию об уплате неустойки  кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Согласно пункту 4.7 договора сторона договора, нарушившая срок осуществления  мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана  уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера  платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при  нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению  заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном  настоящим абзацем порядке за год просрочки.  

Абзац 3 подпункта «в» пункта 16 Правил № 861 также предусматривает  ответственность сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими  Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: обязанность сторон договора  при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению,  предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических  условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил,  технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на  уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную  0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день  просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока  осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может  превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем  порядке, за год просрочки.  

Ответчик заявил ходатайство об уменьшении размера неустойки по статье 333  Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В силу пунктом 1, 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в  случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения  обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом,  осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при  условии заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной  договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую  деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание  неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором  необоснованной выгоды.  

В соответствии с пунктами 73, 75, 77 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды  кредитора возлагается на ответчика. При оценке соразмерности неустойки последствиям  нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать  преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование  чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия  правомерного пользования.  

В пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации», не отменённом вышеуказанным постановлением,  разъяснено, что разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения  денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации  потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России,  существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины  неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе  представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на  пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам  предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения  обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в  тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера  допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может  быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной  учетной ставки Банка России. Снижение неустойки ниже однократной учётной ставки Банка  России на основании соответствующего заявления ответчика допускается лишь в  экстраординарных случаях, когда убытки кредитора компенсируются за счет того, что  размер платы за пользование денежными средствами, предусмотренный условиями  обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит), значительно превышает обычно  взимаемые в подобных обстоятельствах проценты.  

Решение вопроса о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства производится на основании имеющихся в деле материалов и конкретных  обстоятельств дела.  

Принимая во внимание компенсационный характер гражданско-правовой  ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения  обязательства предполагается выплата кредитору такой компенсации его потерь, которая  будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.  

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан  доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса  Российской Федерации), но вправе представлять доказательства того, какие последствия  имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых  обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних  показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные  виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного  поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не  должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования  (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Снижение размера неустойки в каждом конкретном случае является одним из  предусмотренных законом правовых способов, которыми законодатель наделил суд в целях  недопущения явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. В  

этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между применяемой к  нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера  ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.  

Неустойка в силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по своей  правовой природе носит компенсационный характер и не может являться средством  извлечения прибыли и обогащения со стороны кредитора. Задача суда состоит в устранении  явной несоразмерности штрафных санкций, следовательно, суд может лишь уменьшить  размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем  указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему  внутреннему убеждению.  

Суд также учитывает, что исходя из положений гражданского законодательства  (статьи 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации) соразмерность неустойки  последствиям нарушения обязательства предполагается. При этом, заявляя о  несоразмерности неустойки, ответчик должен представить доказательства явной  несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что  возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения  обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (пункт 1 Постановления Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 "О некоторых  вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации").  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,  изложенной в определении от 21.12.2000 № 263-О, суд обязан установить баланс между  применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не  возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.  

Таким образом, явная несоразмерность заявленной неустойки последствиям  нарушения обязательства является оценочной категорией, четких критериев ее определения  применительно к тем или иным категориям дел законодательством не предусмотрено, в силу  чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, учитывая обстоятельства каждого  конкретного дела.  

К выводу о наличии или отсутствии оснований для снижения суммы неустойки  арбитражный суд приходит в каждом конкретном случае при оценке имеющихся в деле  доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,  объективном и непосредственном их исследовании (пункт 1 статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации).  

Критериями для установления несоразмерности могут быть: чрезмерно высокий  процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных  убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и  другие.  

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под  соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается  выплата кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с  нарушенным интересом.  

Нарушение ответчиком срока исполнения договорного обязательства материалами  дела подтверждено.  

Уменьшение размера неустойки является возможным только в случае доказанности  явной несоразмерности подлежащего уплате неустойки последствиям нарушения  обязательства.  

Таким образом, применяя ст. 333 ГК РФ, суд, исходя из всей совокупности  материалов дела и доводов сторон, устанавливает возможность снижения суммы неустойки,  руководствуясь принципом справедливости, но с учетом состязательности арбитражного  процесса и распределения бремени доказывания.  

Ссылки ответчика на несоразмерность размера неустойки последствиям нарушения  обязательства отклоняются судом, так как бремя доказывания несоразмерности неустойки и  необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.  

Документальных доказательств явной несоразмерности неустойки ответчик не  представил. Суд считает необходимым отметить, что в соответствии со ст. 9 АПК РФ лица,  участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения  ими процессуальных действий.  

С экономической точки зрения необоснованное уменьшение неустойки судами  позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на  нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к  неплатежам. Неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему пользоваться  чужими денежными средствами. Условия такого пользования не могут быть более  выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми  участниками оборота правомерно, так как никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения.  

С учетом изложенных разъяснений Пленума ВС РФ, отсутствием доказательств явной  несоразмерности неустойки, у суда не имеется оснований для удовлетворения ходатайства  ответчика о снижения размера неустойки.  

Размер неустойки сформирован (определен) в связи с длительным неисполнением  ответчиком обязательства по договору, то есть ответчик сам способствовал увеличению  размера неустойки, длительное время не исполняя условия договора в отсутствие  объективных препятствий.  

При этом, неустойка в размере 0,25% за каждый день просрочки установлена абзацем  3 подпункта "в" пункта 16 Правил N 861 и является законной.  

При таких обстоятельствах, в удовлетворении ходатайства ответчика о применении  положений статьи 333 ГК РФ надлежит отказать.  

Проверив расчет неустойки истца, суд признал его верным, требование в данной части  подлежит удовлетворению в заявленном размере.  

Истцом заявлено требование о начислении неустойки на сумму задолженности по  день фактического её погашения.  

В соответствии с пунктом 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств» (далее – Постановление Пленума № 7) по смыслу статьи 330 Гражданского  кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день  фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору  денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по  требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную  на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание  производится до момента фактического исполнения обязательства.  

Принимая во внимание, что ответчик на дату рассмотрения дела не исполнил  обязательство по оплате задолженности, неустойка подлежит начислению начиная с  29.12.2023, до момента фактического исполнения обязательства из расчёта 0,25% от суммы  7 430 427 руб. 70 коп. за каждый день просрочки, учитывая, что совокупный размер  неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в таком порядке за год  просрочки.  

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика судебной неустойки 15 000 руб. за  каждый календарный день неисполнения решения суда, начисляемые с момента вступления  решения в законную силу по день фактического исполнения решения суда.  

Статьей 7 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об  арбитражных судах в Российской Федерации» и частью 1 статьи 16 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что вступившие в  

законную силу судебные акты - решения, определения, постановления арбитражных судов  обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, иных  органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей  территории Российской Федерации. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение  требований арбитражных судов влекут за собой ответственность, установленную данным  Кодексом и другими федеральными законами.  

Следовательно, действующее законодательство предусматривает обязательность  исполнения судебных актов, что предполагает безусловное их исполнение.  

Согласно частям 1, 2 статьи 118 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления  их в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке,  установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими  вопросы исполнительного производства. Принудительное исполнение судебного акта  производится на основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если  иное не предусмотрено настоящим Кодексом.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской  Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по  суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом,  иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по  требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330)  на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на  основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из  незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).  

При этом оплата судебной неустойки не влечет прекращения основного  обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения  мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи  308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Исходя из пункта 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского  кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на  основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях  побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе  предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к  исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права  собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса  Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай  неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее -  судебная неустойка).  

По смыслу статей 308.3, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, судебная  неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению  обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В  данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент  правового воздействия на участников гражданского оборота.  

В пунктах 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что суд  не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о  понуждении к исполнению обязательства в натуре.  

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя)  как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства  в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства  (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).  

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее  размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на  основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником  выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского  кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение  судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.  

Таким образом, определяя размер присуждения денежных средств на случай  неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения  судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его  имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные  заслуживающие внимания обстоятельства. Денежные средства, присуждаемые истцу на  случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме,  взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно  также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна  сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).  

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат  начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в  законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для  добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).  

Арбитражный суд, исходя из общих принципов справедливости, соразмерности и  недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения и необходимости  соблюдения баланса интересов сторон, а также конкретных обстоятельств дела, полагает  возможным установить размер судебной неустойки по договору в размере 5000 руб. за  каждый календарный день неисполнения решения суда по настоящему делу, по истечении  двух месяцев с момента вступления решения в законную силу по день его фактического  исполнения.  

Государственная пошлина по делу составляет 23 118 руб., уплачена истцом при  подаче иска платежными поручениями от 26.12.2023 № 548, от 19.01.2024 № 20  

 В соответствии со статьёй 110 АПК РФ государственная пошлина относится на  ответчика, по результатам рассмотрения спора расходы истца по уплате государственной  пошлины в сумме 14 000 руб. относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в пользу  истца.  

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-171, 176, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1.Принять отказ индивидуального предпринимателя ФИО2 от иска к обществу с ограниченной ответственностью «Энергопромсбыт» и  прекратить производство по делу в указанной части.  

2. Иск удовлетворить. 

Обязать открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить  условия договора от 19.11.2021 № 33421-11-21/КРАС об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств индивидуального  предпринимателя ФИО2, расположенных по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка  19:01:140101:1209, а именно:  

-выполнить монтаж ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем в распределительном  устройстве напряжением 10 кВ трансформаторной подстанции ТП-538 ст. Абакан;  

-выполнить монтаж вакуумного выключателя, трансформаторов тока 150/5 в  количестве 3-х шт, устройств защиты, автоматики и управления в резервной ячейке № 9  

распределительного устройства напряжением 10 кВ трансформаторной подстанции ТП-299  ст. Абакан; - выполнить установку трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью  2x2000 кВА на границе с участком заявителя;  

- выполнить строительство линии электропередачи напряжением 10 кВ (КЛ-10 кВ 150  мм2, алюминий, ориентировочной протяженностью 35 метров), от монтируемой ячейки 10  кВ трансформаторной подстанции ТП-538 ст. Абакан до вновь монтируемой  трансформаторной подстанции ТП - 10/0,4 кВ.;  

- организовать учет электрической энергии. 

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в  пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 705 890  (семьсот пять тысяч восемьсот девяносто) руб. 63 коп. неустойки, а также 23 118 (двадцать  три тысячи сто восемнадцать) руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Производить начисление неустойки, начиная с 29.12.2023, до момента фактического  исполнения обязательства из расчёта 0,25% от суммы 7 430 427 руб. 70 коп. за каждый день  просрочки, учитывая, что совокупный размер неустойки не может превышать размер  неустойки, определенный в таком порядке за год просрочки.  

В случае неисполнения настоящего решения взыскать с открытого акционерного  общества «Российские железные дороги» в пользу индивидуального предпринимателя  ФИО2 судебную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) руб. за  каждый календарный день неисполнения решения суда по настоящему делу, по истечении  двух месяцев с момента вступления решения в законную силу по день его фактического  исполнения.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья М.А. Лукина