ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А56-62658/2023

16 декабря 2025 года

г. Санкт-Петербург

/тр.56

Резолютивная часть постановления объявлена 01 декабря 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме 16 декабря 2025 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе: председательствующего судьи Слоневской А.Ю.,

судей Серебровой А.Ю., Тойвонена И.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания до перерыва судебного заседания секретарем Вороной Б.И., после перерыва - ФИО1,

при участии до перерыва: от Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы»: ФИО2 по доверенности от 14.03.2025, после перерыва: от Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы»: ФИО2 по доверенности от 14.03.2025, от областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Костромской области»: ФИО3 по доверенности от 25.12.2024, посредством веб-конференции,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-24742/2025, 13АП-24518/2025) Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Костромской области» на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.08.2025 по делу № А56-62658/2023/тр.56, принятое по заявлению областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Костромской области» о включении в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Зодчий»,

заинтересованные лица: Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», ФИО4 в лице финансового управляющего ФИО5, Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится дело о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Зодчий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Санкт-Петербург, пр.Суворовский, д.61, литера А, помещ.3-Н, далее - Общество).

Решением суда от 23.08.2024 Общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО6. Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №158 от 31.08.2024.

Областное государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Костромской области» (далее - Учреждение) обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 355 879 926, 55 руб.

Определением суда от 29.01.2025 в качестве третьего лица в рамках настоящего обособленного спора привлечена Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (далее – Ассоциация).

Определением суда от 17.03.2025 к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ФИО4 в лице финансового управляющего ФИО5, Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие».

Определением суда от 20.08.2025 в реестр требований кредиторов Общества включено требование Учреждения в размере 335 151 568,70 руб. основного долга и 10 000 000,00 руб. неустойки, указанное требование отнесено в третью очередь удовлетворения требований кредиторов, с учетом требования в части неустойки в силу пункта 3 статьи 137 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) отдельно; в удовлетворении остальной части заявления отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, Учреждение и Ассоциация обратились в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

Учреждение в апелляционной жалобе просит обжалуемое определение отменить в части невключения процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 767 601,37 руб., ссылаясь на то, что в мотивировочной части определения суда от 20.08.2025 указано, что расчет процентов признан правильным и обоснованным.

Ассоциация в апелляционной жалобе просит обжалуемое определение отменить, ссылаясь на то, что представленные кредитором платежные поручения содержат указание на оплату работ, выполненных т после 10.07.2023, то есть после возбуждения дела о банкротстве Общества. Ассоциация ссылается на отсутствие обоснованного расчета суммы задолженности и оснований ее возникновения, указывает, что не представлены платежные поручения и счета на оплату, послужившие основанием для оплаты выполненных работ, поставленных товаров с указанием периодов возникновения задолженности и сроков оплаты.

Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» представила отзыв на апелляционную жалобу саморегулируемой организации, в котором указывает на наличие оснований для уменьшения размера ответственности подрядчика Общества.

Учреждение представило отзыв на апелляционную жалобу саморегулируемой организации, в котором просит апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, ссылаясь представление всей документации, копии платежных поручений по перечислению денежных средств, на основании которых определена сумма задолженности.

В судебном заседании представители Учреждения и саморегулируемой организации поддержали доводы своих апелляционных жалоб.

В судебном заседании 24.11.2025 в связи с техническим сбоем в проведении вэб-конфеенции объявлен перерыв до 01.12.2025. После перерыва судебное заседание продолжено.

Лица, участвующие в обособленном споре, уведомлены судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие неявившихся лиц согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверена апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

1. Как следует из материалов дела, Учреждением (заказчик) и Обществом (подрядчик) заключен контракт от 02.09.2022 № 62-08/22 (далее - Контракт № 62-08/22). В соответствии с пунктом 1.1 Контракта № 62-08/22 подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по строительству объекта капитального строительства: «Реконструкция ОГБУЗ «Костромская областная детская больница». Строительство лечебно-диагностического корпуса» (далее - Объект) в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта. Согласно пункту 2.1 Контракта № 62-08/22 стоимость работ составляет 1 251 000 000 руб. Пунктом 3.2.1. Контракта № 62-08/22 предусмотрена выплата аванса в размере 50% от цены каждого этапа. Перечисление последующих платежей осуществляется после полного подтверждения выполненных работ по каждому этапу на основании первичных учетных документов - документов о приемке (актов о приемке выполненных работ, или универсальных передаточных документов в случае поставки оборудования, далее по тексту - документ о приемке) на сумму перечисленного авансового платежа, в соответствии с постановлением департамента финансов Костромской области от 28.12.2018 №33. Согласно условиям Контракта № 62-08/22 заказчиком на казначейский счет подрядчика платежными поручениями перечислен аванс в размере 625 500 000,01 руб., а также 891 856,82 руб. в счет оплаты выполненных работ. Пунктом 10.1 Контракта № 62-08/22 предусмотрено обеспечение исполнения Контракта в размере 125 802 451,57 руб. Обеспечение исполнения Контракта осуществлено подрядчиком путем перечисления денежных средств на счет заказчика по платежному поручению от 31.08.2022 №372. В соответствии с пунктом 4.2 Контракта № 62-08/22 начало выполнения работ 5 сентября 2022 года, завершение - не позднее 30 сентября 2024 года Срок начала строительства Объекта, срок окончания строительства Объекта (конечный срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполнения строительно-монтажных работ.

В виду нарушения подрядчиком условий Контракта № 62-08/22 заказчиком на основании пункта 13.3 данного контракта принято решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств от 28.09.2023 № 2878 (вступило в силу 10.10.2023). На момент направления решения от 28.09.2023 № 2878 Общество не приступило к следующим видам работ, отраженным в графике выполнения строительно-монтажных работ: Плиты перекрытия, карнизные плиты, монолитные участки, Лестницы (Л1, Л2, ЛЗ, Л4, Л5), Фундамент под дизель-генераторную установку, Наружные сети электроснабжения, наружное электроосвещение, Основание башенного крана, Дизель-генераторная установка, Кровля, Электроснабжение кислородно-газификационной станции, Площадка для установки криогенных газификаторов. Монтаж лифтового оборудования, Тепломеханические решения и автоматизация, Крыльца (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Окна, двери, Вентилируемый фасад, Наружные сети водоснабжения и водоотведения, ливневая канализация, Наружные кислородные сети, Отопление, Кислородно-газификационная станция, Автоматическая система газового пожаротушения, Технологические коммуникации. Медицинские газы, Внутренние сети водоснабжения, Теплоснабжение воздухонагревателей 1-го и 2-го подогрева, Подпитка систем, Кондиционирование, Внутренние сети водоотведения, Холодоснабжение, Вентиляция, Автоматизация системы вентиляции, Сети связи, Электроснабжение, электроосвещение, Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, Пост охраны, площадка для установки мусорных контейнеров, Обеспечение доступа маломобильных групп населения в здание, Оснащение и монтаж медицинского оборудования, Охранная сигнализация. СКУД, Внутренняя отделка (полы, потолки, стены, плинтуса и отбойники, ограждения), Благоустройство территории, Пусконаладочные работы, Прочие работы и затраты, в т.ч.: Тепловизионное обследование, составление энергетического паспорта, Затраты на выполнение инвентаризационно-технических и кадастровых работ БТИ, Затраты на проведение лабораторно-инструментальных замеров ФБУЗ Центром гигиены и эпидемиологии. Частично выполнены следующие виды работ: Подготовительные, демонтажные работы, Земляные работы, Фундаменты, приямки, полы, вентшахта, крыльцо, Перекрытия над подвалом, монолитные участки, Шахты лифтов, машинные помещения № 1, № 3, рамы, Наружные и внутренние стены, перемычки. При этом частично выполненные работы проводились с замечаниями, о чем сообщалось Обществу.

В соответствии с календарным планом строительства Проекта организации строительства (проектная документация Стадия Р Лист 2, том 42-11/19-ПОС), выполнение строительно-монтажных работ по возведению здания составляет 15,5 месяцев. На дату расторжения Контракта № 62-08/22 оставшийся срок для выполнения работ в соответствии с графиком строительно-монтажных работ, указанных в данном контракте, составляет 11 месяцев 21 день. Обществом не смонтированы наружные и внутренние инженерные сети и системы, которые в свою очередь, предусматривают срок выполнения данных работ 6 месяцев в соответствии с вышеуказанным календарным планом, а также срок по выполнению работ по благоустройству территории - 3 месяца.

Кроме того, на дату расторжения Контракта № 62-08/22 не закончены работы по подвалу, что ставит под сомнение возможность своевременной поставки и монтажа медицинского оборудования, а также выполнения работ по прокладке внутренних инженерных и медицинских систем, так как проектной документацией запланировано возведение 4х этажей здания.

Таким образом, подрядчик не выполнял взятые на себя обязательства по Контракту № 62-08/22, а выполненные работы на начальном этапе произведены ненадлежащим образом. Также подрядчиком нарушены сроки выполнения отдельных этапов работ.

В ходе инспектирования объекта Учреждением установлены факты ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по Контракту № 62-08/22, отсутствие рабочих на объекте, о чем Общество уведомлялось неоднократно.

В соответствии с пунктами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 Контракта № 62-08/22 заказчиком приняты работы на сумму 23 514 906,12 руб. При этом в период производства работ по Контракту № 62-08/22 денежные средства в сумме 342 022 078,05 руб. с казначейского счета перечислены на собственные счета Общества и счета подконтрольных Обществу организаций. Основанием к перечислению денежных средств с казначейского счета явилось представление подрядчиком договоров поставки, актов выполненных работ. При этом работы, указанные в представленных актах, фактически не выполнены, материалы не поставлены. Заказчиком 04.10.2023 и 17.10.2023 подрядчику направлены требования о возврате с казначейского счета неосвоенной (неотработанной) суммы аванса в размере 260 854 872,66 руб., а также задолженности в сумме 342 022 078,55 руб., являющейся неосновательным обогащением Общества. Требования о возврате направлены подрядчику по электронной почте, указанной в Контракте согласно пункту 14.1 Контракта, а также посредством почты России.

Срок для возврата неосвоенной (неотработанной) суммы аванса в случае расторжения Контракта № 62-08/22 согласно пункту 3.12 данного контракта составляет пять рабочих дней со дня получения требования о возврате.

Платежным поручением № 246 от 07.11.2023 Общество возвратило Учреждению с казначейского счета аванс в размере 260 854 872,66 руб. Денежные средства в сумме 342 022 078,55 руб. Обществом не возвращены.

В соответствии с пунктом 10.7 Контракта № 62-08/22 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по Контракту, заказчик удерживает денежные средства в размере и в порядке, определенными в соответствии с Контрактом, о чем уведомляет подрядчика в течение десяти дней.

Денежные средства в размере 125 802 451,57 руб., являющиеся обеспечением исполнения Контракта № 62-08/22, удержаны заказчиком, о чем подрядчик уведомлен письмом от 25.10.2023 № 3147.

Таким образом, сумма задолженности Общества перед Учреждением составляет 216 219 626,48 руб.: 626 391 856,83 руб. (сумма аванса и оплаты выполненных работ) - 23 514 906,12 руб. (выполненные работы) - 125 802 451,57 руб. (обеспечение исполнения контракта) 260 854 872,66 руб. (денежные средства, возвращенные с казначейского счета).

На сумму долга Учреждением в соответствии пунктами 9.6, 9.7 Контракта № 62-08/22 начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 3 733 043,26 руб. и неустойка в размере 14 747 675,05 руб.

2. Учреждением (заказчик) и Общество (подрядчик) заключен контракт от 05.07.2022 № 46-07/22 (далее - Контракт № 46-07/22). В соответствии с пунктом 1.1 Контракта № 46-07/22 подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по строительству объекта капитального строительства: «ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

<

...>, строительство корпуса на 120 мест» (далее - Объект), а также поставить предусмотренное проектной документацией оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации объекта, в соответствии с проектной документацией, и условиями Контракта, передать в соответствии с Контрактом заказчику результаты указанных Работ, а заказчик обязуется принять, оплатить выполненные работы, поставленное технологическое оборудование. Согласно пункту 2.1 Контракта № 46-07/22 стоимость работ составляет 568 988 987,41 руб. Пунктом 3.2.1 Контракта № 46-07/22 предусмотрена выплата аванса в размере 50% от цены каждого этапа.

Перечисление последующих платежей осуществляется после полного подтверждения выполненных работ по каждому этапу на основании первичных учетных документов - документов о приемке (актов о приемке выполненных работ, или универсальных передаточных документов в случае поставки оборудования, далее по тексту - документ о приемке) на сумму перечисленного авансового платежа, в соответствии с постановлением департамента финансов Костромской области от 28.12.2018 №33.

Согласно условиям Контракта № 46-07/22 заказчиком на казначейский счет подрядчика платежными поручениями перечислен аванс в размере 135 426 893,66 руб., а также 46 386 171,51 руб. в счет оплаты выполненных работ. Пунктом 10.1 Контракта № 46-07/22 предусмотрено обеспечение исполнения Контракта в размере 29 178 922,43 руб. путем независимой гарантии. Обеспечение исполнения Контракта осуществлено подрядчиком путем предоставления независимой гарантии от 04.07.2022 № ЭБГ-А5-0000-2022-0264, выданной АО «Солид Банк». В соответствии с пунктом 4.2 Контракта № 46-07/22 начало выполнения работ с даты заключения данного контракта, завершение - 30 сентября 2024 года.

Срок начала строительства Объекта, срок окончания строительства Объекта (конечный срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполнения строительно-монтажных работ. В виду нарушения подрядчиком условий Контракта № 46-07/22 заказчиком на основании пункта 13.3 данного контракта принято решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств от 28.09.2023 № 2877 (вступило в силу 10.10.2023). На момент направления решения от 28.09.2023 № 2877 Общество не приступило к следующим видам работ, отраженным в графике выполнения строительно-монтажных работ: Фундаменты под БМК, Фундаменты под станцию биологической очистки, Наружные сети электроснабжения, Земляные работы под БМК, Земляные работы под станцию биологической очистки, Установка биологической очистки, Лестницы, пандус с ограждением, Наружные сети водоснабжения, Наружные сети канализации (К2, КО), Наружные сети водоотведения (К1), Деформационные швы и вентканалы, Наружные сети связи, Земляные работы по наружным сети водоотведения (К1), Земляные работы по наружным сети водоотведения (К2, КО), Земляные работы по наружным сетям водоснабжения (Bl, В2), Тепловые сети, Земляные работы по наружным сетям освещения, Наружное освещение, Кровля, вентшахты, венткамеры, Окна, витражи, Двери, Тепловой пункт, автоматизация, Подключение приборов КИПиА, Лифтовое оборудование, Прочие работы и затраты, Отопление, Теплоснабжение калориферов, Вентиляция и кондиционирование, Внутренние сети водоснабжения, Внутренние сети канализации, Пожарная сигнализация, СКС и ЛВС, Вертикальная планировка, Охранная сигнализация и СКУД, Система охранного телевидения СОТ, Внутренние сети электроснабжения, Слаботочные системы, Малые архитектурные формы, дорожные знаки, Полы, Внутренняя отделка, Наружная отделка, Входы в подвал, приямки, крыльца № 1-8, Диспетчеризация, Навес и веранда, Заземление и молниезащита, Благоустройство, Озеленение, Ограждение территории, Пусконаладочные работы, Оснащение технологическим оборудованием (поставка предусмотренного проектной документацией оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта).

Частично выполнены следующие виды работ: Фундаменты под ДГУ, Ленточный ж/б фундамент основного здания, ФИО7, Изоляция и утепление фундаментов, Земляные работы (обратная засыпка) фундаментов основного здания, Кладка стен, перегородок с перемычками (ниже 0,000), Армопояс ниже 0.000, Перемычки, опорные подушки (выше 0.000), Перекрытия, Кладка наружных и внутренних стен, Доставка материалов. При этом частично выполненные работы проводились с замечаниями, о чем сообщалось Обществу (исх. от 17.10.2022 № 2405, от 01.11.2022 № 2577, от 24.11.2022 № 2797, от 06.04.2023 № 941, от 02.06.2023 № 1562, от 06.09.2023 № 2628).

В соответствии с календарным планом строительства Проекта организации строительства (проектная документация Стадия Р Лист 2, том 42-11/19-ПОС), выполнение строительно-монтажных работ по возведению здания составляет 15,5 месяцев. На дату расторжения Контракта № 46-07/22 оставшийся срок для выполнения работ в соответствии с графиком строительно-монтажных работ, указанных в данном контракте, составляет 11 месяцев 21 день. Обществом не смонтированы наружные и внутренние инженерные сети и системы, которые в свою очередь, предусматривают срок выполнения данных работ 6 месяцев в соответствии с вышеуказанным календарным планом, а также срок по выполнению работ по благоустройству территории - 3 месяца.

Таким образом, подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства по Контракту № 46-07/22, а выполненные работы на начальном этапе произведены ненадлежащим образом. Также подрядчиком нарушены сроки выполнения отдельных этапов работ.

В ходе инспектирования объекта Учреждением установлены факты ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по Контракту № 46-07/22, отсутствие рабочих на объекте, о чем Общество уведомлялось неоднократно.

В соответствии с пунктами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 Контракта № 46-07/22 заказчиком приняты работы на сумму 91 919 342,31 руб.

При этом в период производства работ по Контракту № 46-07/22 денежные средства в сумме 88 847 322,87 руб. с казначейского счета перечислены на собственные счета Общества и счета подконтрольных организаций. Основанием к перечислению денежных средств с казначейского счета явилось представление подрядчиком договоров поставки, актов выполненных работ. При этом работы, указанные в представленных актах, фактически не выполнены, материалы не поставлены.

Заказчиком 11.10.2023 подрядчику направлены требования о возврате с казначейского счета неосвоенной (неотработанной) суммы аванса в размере 6 347 824,32 руб., а также задолженности в сумме 88 847 322,87 руб., являющейся неосновательным обогащением Общества.

Требования о возврате направлены подрядчику по электронной почте, указанной в Контракте согласно пункту 14.1 Контракта, а также посредством почты России.Срок для возврата неосвоенной (неотработанной) суммы аванса в случае расторжения Контракта № 46-07/22 согласно пункту 3.12 составляет пять рабочих дней со дня получения требования о возврате. Платежным поручением № 250 от 08.11.2023 Общество возвратило Учреждению с казначейского счета аванса в размере 6 347 824,32 руб.

Также 30.10.2023 Учреждением в адрес АО «Солид Банк» направлено требование об осуществлении выплаты денежной суммы по независимой гарантии от 04.07.2022 № ЭБГ-А5-0000-2022-0264 в размере 23 054 748,89 руб. Платежным поручением от 29.11.2023 № 42 АО «Солид Банк» указанные денежные средства перечислены Учреждению.

Таким образом, сумма задолженности Общества перед Учреждением составляет 60 491 149,65 руб.: 181 813 065,17 руб. (сумма аванса и оплаты выполненных работ) - 91 919 342,31 руб. (выполненные работы) - 23 054 748,89 руб. (банковская гарантия) - 6 347 824,32 руб. (денежные средства, возвращенные с казначейского счета). На сумму долга Учреждением в соответствии со статьями 329, 330, 395 ГК РФ, статьей 34 Закона № 44-ФЗ и пунктами 9.6, 9.7 Контракта № 46-07/22 начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 439 212,92 руб. и неустойка в размере 1 213 081,43 руб.

3. Учреждением (заказчик) и Обществом (подрядчик) заключен контракт от 13.03.2023 № 15-03/23 (далее - Контракт № 15-03/23). В соответствии с пунктом 1.1 Контракта № 15-03/23 подрядчик принял на себя обязательство по подготовке проектной документации и выполнению работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Судиславская районная больница» Амбулаторное подразделение». Согласно пункту 2.1. Контракта № 15-03/23 стоимость работ составляет 67 573 061,17 руб. Пунктом 3.2.1. Контракта № 15-03/23 предусмотрена выплата аванса в размере 50% от цены каждого этапа.

Перечисление последующих платежей осуществляется после полного подтверждения выполненных работ по каждому этапу на основании первичных учетных документов - документов о приемке (актов о приемке выполненных работ, или универсальных передаточных документов в случае поставки оборудования, далее по тексту - документ о приемке) на сумму перечисленного авансового платежа, в соответствии с постановлением департамента финансов Костромской области от 28.12.2018 №33. Согласно условиям Контракта № 15-03/23 заказчиком на казначейский счет подрядчика платежными поручениями перечислен аванс в размере 31 070 510,58 руб., а также 1 286 530,59 руб. в счет оплаты выполненных работ. Пунктом 10.1 Контракта № 15-03/23 предусмотрено обеспечение исполнения Контракта в размере 3 378 653,06 руб. путем независимой гарантии. Обеспечение исполнения Контракта № 15-03/23 осуществлено подрядчиком путем предоставления независимой гарантии от 07.03.2023 № 9991-4S1/1214242, выданной ПАО «Банк Уралсиб».

В соответствии с пунктом 4.2 Контракта № 15-03/23 начало выполнения работ со дня заключения данного контракта, завершение - 30.11.2023. При этом подготовка проектной документации (с учетом проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, а также государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства) в соответствии с пунктом 4.2.1 Контракта № 15-03/23 осуществляется со дня заключения Контракта (но не ранее получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия) до 01.06.2023 года (включительно).

Работы по подготовке проектной документации приняты заказчиком по акту от 24.05.2023 № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта в соответствии с пунктом 4.2.2 Контракта № 15-03/23 осуществляется со дня получения от заказчика утвержденной проектной документации до 30.11.2023 (включительно). В виду нарушения подрядчиком условий Контракта № 15-03/23 заказчиком на основании пункта 13.3 данного контракта принято решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств от 21.09.2023 № 2808 (вступило в силу 03.10.2023). На момент направления решения от 21.09.2023 № 2808 Общество не приступило к следующим видам работ: Раскрытие и закладка проемов в стенах и перегородках, ремонт кладки цоколя, Вычинка кладки цоколя, окна, Устройство отверстий в стенах и перекрытиях, двери, Полы, Раскрытие проема, Ремонт перемычек, Вновь выполняемые перекрытие и лестница, Протезирование балки чердачного перекрытия, Утепление чердачного перекрытия, покрытие кровли, Восстановление кровли, Вентшахты и венткамеры, Ограждение лестниц, внутренняя отделка, наружная теплоизоляция, Рама для вентсистем, входы, площадки входа, Тамбур, Пандус, Внутренние сети водопровода и канализации, Сети электроснабжения, Отопление и вентиляция, Система СПС, СОУЭ, Реставрационные работы, в т.ч. вычинка кладки цоколя, Воссоздание ограждения лестницы, Окна, Фасад, Реставрация кровли, Козырьки. За период с 16.06.2023 по дату расторжения Контракта № 15-03/23 Обществом выполнен частичный демонтаж перегородок и коммуникаций первого и второго этажа (1/3 части) исторической части здания. При этом над указанной исторической частью здания раскрыта крыша, которая прикрыта плёнкой, не обеспечивающей сохранность объекта от попадания атмосферных осадков. Неправильно выполненные работы по демонтажу крыши повлеки за собой снос металлического защитного покрытия декоративных парапетов с торцевой части здания, выходящей на тротуар, что явилось угрозой безопасности пешеходов. Также Обществом выполнено частичное погружение строительного мусора из здания.

В ходе инспектирования объекта Учреждением установлены факты ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по Контракту № 15-03/23, отсутствие рабочих на объекте, о чем Общество уведомлялось неоднократно. Отсутствие выполнения работ на объекте также подтверждается письмом ОГБУЗ «Судиславская районная больница» от 08.09.2023 № 598.

Таким образом, подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства по Контракту № 15-03/23, а выполненные работы на начальном этапе произведены ненадлежащим образом.

В соответствии с пунктами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 Контракта № 15-03/23 заказчиком приняты работы на общую сумму 2 573 061,17 руб. (разработка проектной документации). При этом в период производства работ по Контракту № 15-03/23 денежные средства в сумме 29 088 372,70 руб. с казначейского счета перечислены на собственные счета Общества и счета подконтрольных данной организации организаций. Основанием к перечислению денежных средств с казначейского счета явилось представление подрядчиком договоров поставки, актов выполненных работ. При этом работы, указанные в представленных актах, фактически не выполнены, материалы не поставлены. Заказчиком 11.10.2023 подрядчику направлены требования о возврате с казначейского счета неосвоенной (неотработанной) суммы аванса в размере 695 607,30 руб., а также задолженности в сумме 29 088 372,70 руб., являющейся неосновательным обогащением Общества. Срок для возврата неосвоенной (неотработанной) суммы аванса в случае расторжения Контракта № 15-03/23 согласно пункту 3.12 данного контракта составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения требования о возврате. Требования о возврате направлены подрядчику по электронной почте, указанной в Контракте согласно пункту 14.1 Контракта, а также посредством почты России. Платежным поручением № 252 от 08.11.2023 Общество возвратило Учреждению с казначейского счета аванса в размере 695 607,30 руб.

Учреждением 09.11.2023 в адрес ПАО «Банк Уралсиб» направлено требование об осуществлении выплаты денежной суммы по независимой гарантии от 07.03.2023 № 9991-4S1/1214242 в размере 3 368 653,06 руб. Платежным поручением от 24.11.2023 № 296161 ПАО «Банк Уралсиб» указанные денежные средства перечислены Учреждению.

Таким образом, сумма задолженности Общества перед Учреждением составляет 25 719 719,64 руб.: 32 357 041,17 руб. (сумма аванса и оплаты выполненных работ) - 2 573 061,17 (выполненные работы) - 3 368 653,06 руб. (банковская гарантия) - 695 607,30 руб. (денежные средства, возвращенные с казначейского счета). На сумму долга Учреждением в соответствии со статьями 395 ГК РФ, статьей 34 Закона № 44-ФЗ и пунктами 9.6, 9.7 Контракта № 15-03/23 начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 266 172,41 руб.

4. Учреждением (заказчик) и Обществом (подрядчик) заключен контракт от 12.09.2022 № 65-09/22 (далее - Контракт № 65-09/22). В соответствии с пунктом 1.1 Контракта № 65-09/22 подрядчик принял на себя обязательство выполнить капитальный ремонт объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт здания ОГБУК «Костромской областной театр кукол» расположенный по адресу 

<

...>» (далее - Объект), в сроки, установленные Контрактом, в соответствии с проектной документацией и условиями настоящего Контракта. Согласно пункту 2.1 Контракта № 65-09/22 стоимость работ составляет 82 400 381,46 руб. Пунктом 3.2.1 Контракта № 65-09/22 предусмотрена выплата аванса в размере 50% от цены каждого этапа. Перечисление последующих платежей осуществляется после полного подтверждения выполненных работ по каждому этапу на основании первичных учетных документов - документов о приемке (актов о приемке выполненных работ, или универсальных передаточных документов в случае поставки оборудования, далее по тексту - документ о приемке) на сумму перечисленного авансового платежа, в соответствии с постановлением департамента финансов Костромской области от 28.12.2018 №33. Согласно условиям Контракта № 65-09/22 заказчиком на казначейский счет подрядчика платежными поручениями перечислен аванс в размере 40 966 659,40 руб. Пунктом 10.1 Контракта № 65-09/22 предусмотрено обеспечение исполнения Контракта в размере 8 240 038,15 руб. путем независимой гарантии. Обеспечение исполнения Контракта осуществлено подрядчиком путем предоставления независимой гарантии от 02.09.2022 № 10465645, выданной ПАО «Абсолют Банк».

В соответствии с пунктом 4.2 Контракта № 65-09/22 начало выполнения работ с 12.09.2022 (но не ранее даты получения подрядчиком разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия), завершение -30.11.2023 (включительно). Сроки выполнения работ на Объекте определены графиком выполнения строительно-монтажных работ. В виду нарушения подрядчиком условий Контракта № 65-09/22 заказчиком на основании части 2 статьи 715 ГК РФ, части 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, а также пункта 13.3 данного контракта принято решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств от 21.09.2023 № 2807 (вступило в силу 03.10.2023). На момент направления решения от 21.09.2023 № 2807 Общество не приступило к следующим видам работ, отраженным в графике выполнения строительно-монтажных работ: Водосточная система, Вентшахта ВШ-1, Шахта дымоудаления ДУ1, Устройство отверстий для прохождения ВК, Ремонт стен, Шахта дымоудаления ДУ 2, Реставрационные работы, Обогрев кровли, Внутренние сети водопровода, Ремонт и замена ограждения площадки, Реконструкция балкона в зрительном зале, Отмостка, Окна, Перекрытие, Вентиляция, Автоматизация системы вентиляции воздуха, Внутренние сети водоотведения, Внутренние сети электроснабжения, Крепление лебедки для люстры, Крепление занавеса и ламбрекена, Лестницы, Венткамеры, Полы подвала, Отопление, Крыльцо и пандус сечение Г-Г, сечение Д-Д, Двери, Автоматическая система охранной сигнализации, Система охранного телевидения, Сети связи, АУПС и СОУЭ, Наружная отделка фасадов, Благоустройство, Пусконаладочные работы системы внутреннего электроснабжения, Пусконаладочные работы систем вентиляции, Пусконаладочные работы по механизации сцены, Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Вместе с тем такие виды работ как наружная отделка фасадов включают в себя работы по частичному демонтажу штукатурки с последующим восстановлением, а также окраской всего фасада. Выполнение данного вида работ в соответствии с технологической картой (технологическая карта на устройство штукатурных покрытий фасадов 42-03 ТК от 05.06.2003) предусматривает минимальный срок выполнения указанных работ 40 дней. Также подрядчиком не смонтированы внутренние инженерные сети (водоотведение, канализация, электрические и слаботочные сети), которые в свою очередь, с учетом закупки, поставки и монтажа оборудования, предусматривают минимальный срок выполнения данных работ не менее 3-х месяцев. В нарушение проекта подрядчиком выполнено задавливание шпунтового ограждения не доходя до проектных отметок, что влияет на безопасность объекта. В период выполнения капитального ремонта объекта подрядчиком не обеспечивалась должным образом сохранность внутренних помещений от попадания атмосферных осадков, вследствие чего произошла протечка, которая затопила инженерное оборудование, в том числе верхнюю механизацию стены. Также вследствие некачественного монтажа частично демонтированы инженерные сети верхней механизации сцены. Кроме того, в нарушение условий Контракта № 65-09/22 подрядчик не обеспечил сохранность объекта, в связи с чем с объекта похищены изделия, имеющие культурную ценность. В ходе инспектирования объекта Учреждением установлены факты ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по Контракту № 65-09/22, отсутствие рабочих на объекте, о чем Общество уведомлялось неоднократно. Таким образом, подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства по Контракту № 65-09/22, а выполненные работы на начальном этапе произведены ненадлежащим образом. При этом в период производства работ по Контракту № 65-09/22 денежные средства в сумме 40 951 111,08 руб. с казначейского счета перечислены на собственные счета Общества и счета подконтрольных данной организации организаций. Основанием к перечислению денежных средств с казначейского счета явилось представление подрядчиком договоров поставки, актов выполненных работ. При этом работы, указанные в представленных актах, фактически не выполнены, материалы не поставлены.

Заказчиком 11.10.2023 Подрядчику направлены требования о возврате с казначейского счета неосвоенной (неотработанной) суммы аванса в размере 15 548,32 руб., а также задолженности в сумме 40 951 111,08 руб., являющейся неосновательным обогащением Общества. Срок для возврата неосвоенной (неотработанной) суммы аванса в случае расторжения Контракта № 65-09/22 согласно пункту 3.12 данного контракта составляет пять рабочих дней со дня получения требования о возврате. Требования о возврате направлены подрядчику по электронной почте, указанной в Контракте согласно пункту 14.1 Контракта, а также посредством почты России. Платежным поручением № 251 от 08.11.2023 Общество возвратило Учреждению с казначейского счета аванс в размере 15 548,32 руб. Учреждением 07.11.2023 в адрес ПАО «Абсолют Банк» направлено требование об осуществлении выплаты денежной суммы по независимой гарантии от 02.09.2022 № 10465645 в размере 8 230 038,15 руб. Платежным поручением от 13.11.2023 № 4440 ПАО «Абсолют Банк» указанные денежные средства перечислены Учреждению.

Таким образом, сумма задолженности Общества перед Учреждением составляет 32 721 072,93 руб.: 40 966 659,40 руб. (сумма аванса и оплаты выполненных работ) - 8 230 038,15 руб. (банковская гарантия) - 15 548,32 руб. (денежные средства, возвращенные с казначейского счета). На сумму долга Учреждением в соответствии со статьями 395 ГК РФ, статьей 34 Закона № 44-ФЗ и пунктами 9.6, 9.7 Контракта № 65-09/22 начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 329 172,78 руб.

Суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности заявления Учреждения, снизил размер неустойки и процентов.

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Включение требований в реестр требований кредиторов должника в процедуре наблюдения осуществляется по правилам, предусмотренным статьей 100 Закона о банкротстве.

В соответствии со статьей 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд в электронном виде в порядке, установленном процессуальным законодательством, и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

В силу пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2024 N 40 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона от 29 мая 2024 года N 107-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и статью 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 40) при применении положений статей 71 и 100 Закона о банкротстве арбитражному суду следует исходить из того, что в реестр подлежат включению только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом с учетом возражений против указанных требований, заявленных арбитражным управляющим, другими кредиторами или другими лицами, участвующими в деле о банкротстве. Признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

При рассмотрении обособленного спора суд с учетом поступивших возражений проверяет требование кредитора на предмет мнимости или предоставления компенсационного финансирования. При осуществлении такой проверки суды вправе использовать предоставленные уполномоченным и другими органами данные информационных и аналитических ресурсов, а также сформированные на их основе структурированные выписки.

Судом установлено, что неосновательное обогащение Общества вследствие ненадлежащего выполнения контрактов на ремонт и строительство социально значимых объектов составляет 335 151 568,70 руб.

Апелляционный суд отклоняет доводы Ассоциации о том, что представленные в обоснование требования Учреждением документы не являются достаточными для подтверждения задолженности.

Определением суда от 17.03.2025 судом на основании статьи 66 АПК РФ истребована из областного государственного казенного учреждения «Агентство государственных закупок Костромской области» конкурсная документация, явившаяся основанием для заключения государственных контрактов № 46-07/22 от 05.07.2022, № 62-08/22 от 02.09.2022, № 15-03/23 от 13.03.2023, № 65-09/22 от 12.09.2022 между Обществом и Учждением, во исполнение которого представлен исчерпывающий перечень документации.

Кроме того, к заявлению кредитора приложены государственные контракты и дополнительные соглашения на 197 л., копии платежных поручений об оплате аванса на 54 л., копии актов о приемке выполненных работ на 57 л., копии платежных поручений об оплате выполненных работ на 56 л., копии платежных поручений по перечислению денежных средств с казначейского счета на 4 л. и иная документация, необходимая для принятия судом решения о законности предъявляемых требований и их размера.

Документация, копии платежных поручений по перечислению денежных средств с казначейского счета в рамках реализации государственных контрактов, копии платежных поручений, на основании которых определена сумма задолженности (аванс, выполнение), представленные в суд, и являются доказательствами оснований возникновения задолженности.

Вопрос о платежных поручениях № 702 от 17.07.2023, №№ 703-706 от 18.07.2023, № 712 от 20.07.2023, №№ 830, 832 от 07.08.2023, №№ 926-929 от 05.09.2023 и основаниях их оплаты являлись предметом обсуждения в суде первой инстанции. Кредитором по данным платежным поручениям представлены в суд письменные пояснения (письмо от 31.07.2025 № 1959) о том, что расчеты по указанным платежным поручениям осуществлены за фактически выполненные работы и не учитываются в задолженности, указанной в заявлении о включении в реестр требований кредиторов, и рассматриваемой в данном деле, что подтверждается назначением платежей, перечисленных в указанном выше письме. Платежные поручения были осуществлены за выполненные работы по этапам, указанным в таких платежных поручениях. Данная позицию представлена кредитором в суд первой инстанции письмом от 27.06.2025 № 1609.

В рамках дела № А56-62658/2023/тр.56 конкурсным управляющим письмом от 27.06.2025 № ЗОД-27/1 у Учреждения запрошена информация и документы в целях сверки размера требований кредитора. Во исполнение указанного запроса Учреждением в адрес конкурсного управляющего письмом от 09.07.2025 № 1756 направлены интересующие его платежные поручения по государственным контрактам, которыми, в том числе подтверждается, что требования кредитора состоят только из реестровых требований (платежными поручениями оплачены фактически выполненные работы) (прилагается). Сверка размера требований кредитора произведена.

Таким образом, кредитором представлены все необходимые и достаточные документы в подтверждение наличия задолженности в указанном кредитором размере.

Согласно пункту 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В силу пункта 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с частью 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) согласно части 1 статьи 330 ГК РФ признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с указанными нормами Учреждением на сумму долга начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 4 767 601,37 руб., неустойка в размере 15 960 756,48 руб.

Учитывая необходимость соблюдения баланса сторон, период просрочки, правовое положение кредитора, апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции о необходимости на основании статьи 333 ГК РФ уменьшить размера неустойки до 10 000 000 руб.

Суд апелляционной инстанции, проверив представленный Учреждением расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 767 601,37 руб., полагает, что он является верным, в связи с чем требование в указанной части является обоснованным.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" к размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, по общему правилу, положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются (пункт 6 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 6 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи.

Представленный кредитором расчет процентов за пользование чужими денежными средствами произведен на основании пункта 1 статьи 395 ГК РФ, что в силу пункта 6 статьи 395 ГК РФ исключает возможность снизить их ниже установленного размера.

Таким образом, требование Учреждения в части процентов в размере 4 767 601 руб. 37 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

При таких обстоятельствах определение суда от 20.08.2025 подлежит отмене в части отказа в признании требований о процентах за пользование чужими денежными средствами, требование Учреждения в указанной части в размере 4 767 601,37 руб. признается обоснованным. Апелляционная жалоба Ассоциации не подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы Учреждения по уплате государственной пошлины в размере 30 000 руб. относятся на Общество.

Руководствуясь статьей 110, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.08.2025 по делу № А56-62658/2023/тр.56 отменить в части отказа в удовлетворении требования о процентах за пользование чужими денежными средствами.

Признать обоснованным требование областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Костромской области» в размере 4 767 601 руб. 37 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами с удовлетворением в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 137 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В остальной части определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.08.2025 по делу № А56-62658/2023/тр.56 оставить без изменения, апелляционную жалобу ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» - без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Зодчий» в пользу областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Костромской области» 30 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

А.Ю. Слоневская

Судьи

А.Ю. Сереброва

И.Ю. Тойвонен