АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е  Именем Российской Федерации 

 (резолютивная часть)

Дело № А40-118390/23-42-874

г. Москва

10 июля 2024 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

судьи Хайло Е.А., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Крутовой Е.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело, направленное на новое  рассмотрение из Арбитражного суда Московского округа  

по иску ООО "ФНМ "ВЕСЬ МИР" (ИНН: 7710027144) К МИНПРОМТОРГ РОССИИ (ИНН: 7705596339) Об обязании (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ) в заседании приняли участие: 

от истца: Белозеров И.В. по доверенности № 194-04/24 от 10.04.2024 г.; Морозов Ф.В.  по доверенности № б/н от 20.08.2021 г.  

от ответчика: Сушильников И.С. по доверенности № 131760/14 от 06.12.2023 г.  

РЕШИЛ:

Исковое требование удовлетворить. 

Изменить Соглашение от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 — 840 согласно  редакции прилагаемого дополнительного соглашения,  

- внеся изменения в сроки выполнения (начало и окончание) по Приложению   № 1 «План – график реализации инвестиционного проекта» к Соглашению от 20  декабря 2017 года № 020 — 11 — 840,  

- внеся изменения в сроки финансового обеспечения по Приложению № 2  «План – график финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией  инвестиционного проекта» к Соглашению от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 —  840,  

 - обязав МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОМТОРГ) заключить дополнительное  соглашение к Соглашению от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 — 840 между  МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (МИНПРОМТОРГ) и ООО "ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ "ВЕСЬ МИР" в  редакции, предложенной Истцом:  

«Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из  

Федерального бюджета субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и   

опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям  

гражданской промышленности в рамках реализации такими  организациями комплексных инвестиционных проектов г. Москва 

«___»______________ г. № 020-11-840/___ 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, которому как  получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на  предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице  _________________________________, действующего на основании  _________________________________, и Общество с ограниченной ответственностью  «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир», именуемое в дальнейшем «Получатель», в  лице Генерального директора Голубкова Сергея Юрьевича, действующего на основании  Устава, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к  Соглашению от 20.12.2017 г. № 020-11-840 (далее – Соглашение) о нижеследующем.  

 Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 9 марта  2022 г. № 308 «О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей,  пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств».  

 Внести в Соглашение следующие изменения:  

 1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к  настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;  

 1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к  настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.  

 2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью  Соглашения.  

 3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания  лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного  исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.  

 4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,  остаются неизменными.  

 5. Подписи сторон: 

Минпромторг России ООО «ФНМ «Весь Мир»  

_______________/______________ _______________/С.Ю. Голубков  

 Приложение № 1   к Дополнительному Соглашению № ______________   от «____» ___________ 20__ г.   К соглашению    № 020-11-840 от 20.12.2017  

План-график реализации инвестиционного проекта  

«Инновационные нетканые материалы с антибактериальными защитными свойствами, с  повышенными эксплуатационными характеристиками и сорбирующими свойствами для  

защиты экологии» 

Номе 

р 

этапа  

Наименование 

этапа,  

содержание работ  

этапа  

Результат  

Сроки 

выполнени 

я 

(начало и  окончание)  

Контрольные  

события  реализации  

инвестиционн ого проекта  

Целевые  

индикаторы и  

показатели  

эффективност и реализации  инвестиционн 

ого проекта  

Объем  

заемных  

средств  (в случае  

их 

привлече 

ния)  

1 

Создание  

проектной группы  специалистов для  выполнения  

НИОКР. Составление 

плана-графика  

работ по НИОКР.  Выявление  

потребности в  материальных и  трудовых  

ресурсах. Заключение 

договоров на  поставку  

материалов и  необходимого  

оборудования для  осуществления  

НИОКР. 

Утвержден  план-график  

реализации  НИОКР.  

Июль 

2017Октябрь 2017 

Приказ о  создании  

проектной группы 

Договоры на  поставку  

материалов  

Количество  вновь  

созданных  рабочих мест  – 1.  

2 

Фундаментальные  научно-исследовательские  работы.  

Проведение 

исследований  импортных  

образцов 

материалов и  сырья,  

определение 

ключевых физико- 

Результаты  испытаний  импортных  образцов.  

Промежуточн ый научный  

отчет. 

Ноябрь 

2017 –  

Апрель 2018 

Отчет о  результатах  

реализации 12 этапов  инвестиционн 

ого проекта  

Договоры на  поставку тмц,  лабораторного  и опытного  оборудования  

Количество  вновь  

созданных  рабочих мест  – 1.  

Объем 

реализации –  40 млн. руб.  

химических  

свойств новых  материалов.  

Закупка сырья и  материалов для  проведения  

НИОКР. 

3 

Прикладные  

научно-исследовательские работы по разработке 

требований к  сырью и  вспомогательным  

материалам, к  техническим  

условиям 

производства и  технологическому  оборудованию.   

Проработка 

технологий по  выпуску нетканых  материалов,  

испытания, изготовление опытных образцов.  

Проведены  

прикладные  научно-исследователь ские работы,  

разработаны  требования к  

сырью и 

вспомогатель ным  

материалам, к 

техническим  условиям  

производства 

и 

технологичес кому  

оборудовани ю.   

Промежуточный научный отчет 

Получены  

результаты  испытаний  опытных  

образцов.   

Май 2018  – Сентябрь  2018  

Отчет о  результатах  

реализации 3  этапа  

инвестиционн ого проекта.   

Протоколы  

испытаний.  Опытные  

образцы 3-х  инновационны 

х видов  продукции  

согласно ТЗ.   

Технологии  мирового  

уровня, 

переданная в  производство  - 3.  

Объем 

реализации –  80 млн. руб.  

4 

Разработка Технического задания 

Научно-технический  

отчет по  разработке  

инновационн

ых 

материалов с  требованиями  

к сырью,  вспомогатель 

ным 

материалам и  полуфабрикат 

ам. 

Технические задания (ТЗ) 

Октябрь 

2018 –  Март 2019  

Отчет о  результатах  

реализации 4  этапа  

инвестиционн ого проекта.  

Акт о выпуске  произведенно 

й продукции в  рамках  

инвестиционн ого проекта  

Технологии  мирового  

уровня, 

переданная в  производство  - 2.  

Объем 

реализации –  140 млн. руб.  

по 3-м  инновационн 

ым видам  продукции  

5 

Опытно-Конструкторские  (ОКР) и Опытно-Технологические  Работы (ОТР).   

Выпуск и  тестирование  

опытных партий  продукции.   

Разработка  

технологичес 

ких карт на  изделия.   

Выход на  предсерийное  

производство.  Образцы  

включены в  продуктовый  

портфель Компании. Получены отзывы 

клиентов о  продукте.   

Апрель  2019 –  

Сентябрь  2019  

Отчет о  результатах  

реализации 5  этапа  

инвестиционн ого проекта   

Договоры на  поставку  

инновационно й продукции.  

 Акт о  выпуске  

произведенно 

й продукции в  рамках  

инвестиционн ого проекта  

Количество  полученных  патентов - 1;   

Объем 

реализации –  150 млн. руб.  

6 

Инжиниринг,  

сертификация.  Опытно-промышленная эксплуатация.  

Работа с отзывами  клиентов.   

Разработка проекта 

нормативной и  технической  

документации для  промышленного  

производства. Проведение 

мероприятий по  информированию  

потенциальных 

покупателей о  новых  

инновационных продуктах.  

Продукция 

сертифициров ана.  

Проведены  

мероприятия  по  

импортозаме щению.  

Размещена 

информация о  новых  

инновационн ых продуктах  

в СМИ.  

Октябрь 

2019 –  Март 2020  

Отчет о  результатах  

реализации 6  этапа  

инвестиционн ого проекта   

Договоры на  поставку  

инновационно й продукции.  

Акт о выпуске  произведенно 

й продукции в  рамках  

инвестиционн ого проекта  

Количество  

полученных  патентов - 1;   

Объем 

реализации –  100 млн. руб.  

7 

Разработка рабочей документации, инструкций и рекомендаций.  

Разработана  рабочая  

документация  

на изделия.   Обеспечен  

ассортимент  нетканых  

материалов в  соответствии  

Апрель  2020 –  

Сентябрь  2020  

Отчет о  результатах  

реализации 7  этапа  

инвестиционн ого проекта   

Акт о запуске  в  

промышленну 

Количество  вновь  

созданных 

рабочих мест  – 7;  

Количество  полученных  

патентов - 2;   Объем  

с договорами  поставки.   

ю 

эксплуатацию  оборудования.  

реализации – 150 млн. руб.  

8 

Выпуск  

продукции. 

Подготовка и  обучение  

специалистов для  промышленного  

выпуска на вновь  созданных  

рабочих местах в  рамках проекта.   

Выпуск  

инновационн 

ых нетканых  материалов с  выходом на  плановые  

объемы 

реализации  продукции  

Выход на  проектные  

мощности.   Отгрузка  

произведенно 

й продукции в  рамках  

инвестиционн ого проекта.   

Октябрь  2020 –  

Март 2021  

Отчет о  результатах  

реализации 8  этапа  

инвестиционн ого проекта   

Акт о выпуске  произведенно 

й продукции в  рамках  

инвестиционн ого проекта  

Количество  

вновь 

созданных  

рабочих мест  – 6;  

Объем 

реализации –  250 млн. руб.  

9 

Промышленный  

выпуск. 

Подготовка к  серийному  

выпуску 

инновационных  нетканых  

материалов. 

Разработка и  реализация мер по  повышению  

производственных  мощностей.   

Отгрузка  

произведенно й продукции в  

рамках 

инвестиционн ого проекта.   

Апрель  2021 –  

Сентябрь 2021 

Отчет о  результатах  

реализации 9  этапа  

инвестиционн ого проекта   

Акт о выпуске  произведенно 

й продукции в  рамках  

инвестиционн ого проекта  

Объем 

реализации –  300 млн. руб.  

10 

Серийный выпуск  инновационных  

нетканых материалов. 

Подготовка и  обучение  

специалистов для  серийного  

выпуска на вновь  созданных  

рабочих местах в  рамках проекта.   

Отгрузка  

произведенно й продукции в  

рамках 

инвестиционн ого проекта.   

Октябрь  2021 –  

Март 2022  

Отчет о  результатах  

реализации 10  этапа  

инвестиционн ого проекта   

Акт о выпуске  произведенно 

й продукции в  рамках  

инвестиционн ого проекта  

Количество  

вновь 

созданных  

рабочих мест  – 6;  

Объем 

реализации –  400 млн. руб.  

11 

Увеличение объемов 

реализации путем  

Отгрузка 

произведенно й продукции в  

Апрель  2022 –  

Февраль  

Отчет о  результатах  

реализации 11  

Количество  вновь  

созданных  

расширения  

рынка сбыта.  Серийный выпуск  инновационных  

нетканых 

материалов.   

рамках  

инвестиционн ого проекта.   

2023 

этапа  

инвестиционн ого проекта   

Акт о выпуске  

произведенно й продукции в  

рамках 

инвестиционн ого проекта  

рабочих мест  – 7  

Объем 

реализации –  450 млн. руб.  

12 

Выпуск и  реализация  

инновационных  нетканых  

материалов.   

Подготовка отчета  по результатам  инвестиционного  

проекта 

Отгрузка  

произведенно й продукции в  

рамках 

инвестиционн ого проекта.   

Март 2023  – Декабрь  2023  

Отчет о  результатах  

реализации 12  этапа  

инвестиционн ого проекта   

Акт о выпуске  произведенно 

й продукции в  рамках  

инвестиционн ого проекта  

Объем 

реализации –  530 млн. руб.  

Бюджетная  эффективност 

ь КИП – 1,5 

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЯ  Генеральный директор 

ООО «Фабрика Нетканых Материалов 

«Весь Мир» 

__________________________ _______________________С.Ю. ФИО1  

«_____» _______________ 202_ г. «_____» _______________ 202_г. 

М.П. М.П 

 Приложение № 2  

к Дополнительному Соглашению № ______________ 

 от «____» ___________ 20__ г.   К соглашению   от № 020-11-840 от 20.12.2017  

План-график  

финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта  

Номер этапа,  

год 

финансирования  

Дата 

предоставления  

субсидии 

Источники инвестиций в инвестиционный проект  

Собственные 

средства  

Привлеченные  средства 

Бюджетные средства 

(субсидия), 

в т.ч. по статьям затрат  

1 этап 

(Июль 17–  октябрь 17)  

10 000 000  

- 

- 

2 этап 

(ноябрь 17 – 

Апрель 18)  

Декабрь 2017  

15 216 216,88  

- 

94 783 783,12, в том  

числе: - Оплата труда – 

11 229 263,03  - Материальные  

расходы – 69 606 454,10  - Накладные расходы –  

10 633 401,72  - проведение испытаний  

– 288 315 - содержание и 

эксплуатация  оборудования –  

3 026 349,27 

3 этап 

(Май 18 –  Сентябрь 18)  

Июнь 2018 

30 000 000  

- 

24 000 000, в том  

числе: 

- Оплата труда– 15 900  921,85  

- Материальные 

расходы – 4 056 682,07  - Накладные расходы –  4 042 396,08  

4 этап 

(Октябрь 18 – 

Март 19)  

- 

30 000 000  

- 

- 

5 этап 

(Апрель 19 – Сентябрь 19)  

- 

12 000 000  

- 

- 

6 этап 

(Октябрь 19 – 

Март 20)  

- 

13 000 000  

- 

- 

7 этап 

- 

15 000 000  

- 

- 

(Апрель 20 – Сентябрь 20)  

8 этап 

(Октябрь 20 – 

Март 21)  

- 

16 000 000  

- 

- 

9 этап 

(Апрель 21 – Сентябрь 21)  

- 

16 000 000  

- 

- 

10 этап 

(Октябрь 21 – 

Март 22)  

- 

17 000 000  

- 

- 

11 этап 

(Апрель 22 –  Февраль 23)  

- 

27 000 000  

- 

- 

12 этап  (Март 23 – Декабрь 23)  

- 

- 

- 

 МИНПРОМТОРГ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 Генеральный директор  

ООО «Фабрика Нетканых 

Материалов 

«Весь Мир» 

_____________________________________ _______________________С.Ю.  

ФИО1 

«_____» _______________ 202_ г. «_____» _______________ 

М.П. 202_г. 

 М.П. 

Представитель  ООО "ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ "ВЕСЬ МИР"  

_______________________ /_________________/ 

 подпись  "____" июля 2024 г.»  

Взыскать с МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОМТОРГ) в пользу ООО "ФАБРИКА  НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ "ВЕСЬ МИР" 6 000 руб. 00 коп. расходов по оплате  госпошлины по иску.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

 Судья Хайло Е.А.