Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

18.05.2023 г.                                                                                                     Дело № А40-7012/23-43-50     

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

ГБУ "ГОРМОСТ" (ОГРН 

<

***>) к ООО "ТЕХПРОЕКТ" (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 484 400 руб. 00 коп. - неустойки,

без вызова лиц, участвующих в деле,

Изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 484 400 руб. 00 коп. – неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по контрактам № 03732005579210001130001, № 03732005579210001120001, № 03732005579210001140001, № 03732005579210001100001, № 03732005579210001100001.

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 02.02.2023 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 АПК РФ.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление.

Ответчиком заявлено ходатайство о рассмотрения спора по общим правилам искового производства.

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 227 АПК РФ, суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд не установил наличия предусмотренных частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, поскольку заявителем не указано, какие дополнительные доказательства необходимо и следовать суду, какие доказательства необходимо установить. Судом такие обстоятельства не установлены.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает обязательности перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства в случае заявления об этом лица, участвующего в деле, считающего, что данное дело должно быть рассмотрено в этом порядке, а не в порядке упрощенного производства.

При таких обстоятельствах  суд считает, что ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства не подлежит удовлетворению.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

28.03.2023 г. принята резолютивная часть решения в порядке, предусмотренном ст. 229 АПК РФ.

30.03.2023 г. в суд поступило, в установленный ст. 229 АПК РФ срок, заявление истца о составлении мотивированного решения.

Суд, с учётом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела, документами, с учетом возражений со стороны ответчика, пришёл к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

23.04.2021 между ГБУ «Гормост» (Заказчик) и ООО «Техпроект» (Подрядчик) заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 03732005579210001130001.

В рамках данного Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации по созданию безбарьерной среды для инвалидов на надземном пешеходном переходе при новой застройке Боровское шоссе на пересечении с рекой Сетунь (далее - работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (п. 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 1 600 000 руб. (п.2.1 Контракта).

Согласно.п. 3.1 Контракта срок выполнения работ составляет 210 календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 19.11.2021 включительно.

В соответствии с п. 12.1 Контракта срок действия контракта по 30.12.2021г.

По состоянию на 31.12.2021 Подрядчик не исполнил свои обязательства по Контракту в полном объеме.

Ввиду неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчиком принято решение № 118/21-2193 от 23.12.2021 об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В. соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Подрядчик несет ответственность.

Согласно п.7.3 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Подрядчик несет ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» и иным законодательством Российской Федерации.

Согласно п.3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

В соответствии с условиями Банковской гарантии № БС-0028897/21 от 20.04.2021г. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Контракту Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его обязательств, перед Бенефициаром по Контракту, в том числе, обязательств Принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма неустойки по выставленным претензиям составляет 177 200 руб.

Сумма неустойки в размере 80 000 руб. была погашена вышеуказанной банковской гарантией и перечислена в адрес ГБУ «Гормост».

Сумма неустойки в размере 97 200 руб. не погашена банковской гарантией и не оплачена ответчиком.

Таким образом по контракту № 03732005579210001130001 задолженность по оплате неустойки составляет 97 200 руб.

23.04.2021 между ГБУ «Гормост» (Заказчик) и ООО «Техпроект» (Подрядчик) заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 03732005579210001120001.

В рамках данного Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации по созданию безбарьерной среды для инвалидов на путепроводе пешеходном 66 км МКАД (далее - работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (п. 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 1 600 000 руб. (п.2.1 Контракта).

Согласно п. 3.1 Контракта срок выполнения работ составляет 210 календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 19.11.2021 включительно.

В соответствии с п. 12.1 Контракта срок действия контракта по 30.12.2021г.

По состоянию на 31.12.2021 Подрядчик не исполнил свои обязательства по Контракту в полном объеме.

Ввиду неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчиком принято решение № 118/21-2197 от 23.12.2021 об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Подрядчик несет ответственность.

Согласно п.7.3 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

В соответствии с условиями Банковской гарантии № БС-0028900/21 от 20.04.2021г. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Контракту Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по Контракту, в том числе, обязательств Принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма неустойки по выставленным претензиям составляет 177 200 руб.

Сумма неустойки в размере 80 000 руб. была погашена вышеуказанной банковской гарантией и перечислена в адрес ГБУ «Гормост».

Сумма неустойки в размере 97 200 руб. не погашена банковской гарантией и не оплачена Ответчиком.

Таким образом по контракту № 03732005579210001120001 задолженность по оплате неустойки составляет 97 200 руб.

23.04.2021 между ГБУ «Гормост» (Заказчик) и ООО «Техпроект» (Подрядчик) заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 03732005579210001140001.

В рамках данного Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации по созданию безбарьерной среды для инвалидов на путепроводе пешеходном 62 км МКАД (далее - работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (п. 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 1 600 000 руб. (п.2.1 Контракта).

Согласно п. 3.1 Контракта срок выполнения работ составляет 210 календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 19.11.2021 включительно.

В соответствии с п. 12.1 Контракта срок действия контракта по 30.12.2021г.

По состоянию на 31.12.2021 Подрядчик не исполнил свои обязательства по Контракту в полном объеме.

Ввиду неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчиком принято решение № 118/21-2195 от 23.12.2021 об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Подрядчик несет ответственность.

Согласно п.7.3 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

В соответствии с условиями Банковской гарантии № 21777-447-0639143 от 20.04.2021г. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Контракту Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по Контракту, в том числе, обязательств Принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма неустойки по выставленным претензиям составляет 177 200 руб.

Сумма неустойки в размере 80 000 руб. была погашена вышеуказанной банковской гарантией и перечислена в адрес ГБУ «Гормост».

Сумма неустойки в размере 97 200 руб. не погашена банковской гарантией и не оплачена Ответчиком.

Таким образом по контракту № 03732005579210001140001 задолженность по оплате неустойки составляет 97 200 руб.

26.04.2021 между ГБУ «Гормост» (Заказчик) и ООО «Техпроект» (Подрядчик) заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 03732005579210001100001.

В. рамках данного Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по созданию безбарьерной среды для инвалидов на путепроводе пешеходном 2 км МКАД (далее - работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (п. 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 1 600 000 руб. (п.2.1 Контракта).

Согласно п. 3.1 Контракта срок выполнения работ составляет 210 календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 23.11.2021 включительно.

В соответствии с п. 12.1 Контракта срок действия контракта по 30.12.2021г.

По состоянию на 31.12.2021 Подрядчик не исполнил свои обязательства по Контракту в полном объеме.

Ввиду неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчиком принято решение № 118/21-2194 от 23.12.2021 об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Подрядчик несет ответственность.

Согласно п.7.3 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

В соответствии с условиями Банковской гарантии № 9991-ONI/67091 от 21.04.2021г. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Контракту Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по Контракту, в том числе, обязательств Принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма неустойки по выставленным претензиям составляет 176 400 руб.

Сумма неустойки в размере 80 000 руб. была погашена вышеуказанной банковской гарантией и перечислена в адрес ГБУ «Гормост».

Сумма неустойки в размере 96 400 руб. не погашена банковской гарантией и не оплачена Ответчиком.

Таким образом по контракту № 03732005579210001100001 задолженность по оплате неустойки составляет 96 400 руб.

26.04.2021 между ГБУ «Гормост» (Заказчик) и ООО «Техпроект» (Подрядчик) заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 03732005579210001090001.

В рамках данного Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по созданию безбарьерной среды для инвалидов на путепроводе пешеходном 9км Торговый МКАД (далее - работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (п. 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 1 600 000 руб. (п.2.1 Контракта).

Согласно п. 3.1 Контракта срок выполнения работ составляет 210 календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 23.11.2021 включительно.

В соответствии с п. 12.1 Контракта срок действия контракта по 30.12.2021г.

По состоянию на 31.12.2021 Подрядчик не исполнил свои обязательства по Контракту в полном объеме.

Ввиду неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчиком принято решение № 118/21-2196 от 23.12.2021 об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Подрядчик несет ответственность.

Согласно п.7.3 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

В соответствии с условиями Банковской гарантии № RS4421-026525 от 21.04.2021г. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Контракту Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по Контракту, в том числе, обязательств Принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма неустойки по выставленным претензиям составляет 176 400 руб.

Сумма неустойки в размере 80 000 руб. была погашена вышеуказанной банковской гарантией и перечислена в адрес ГБУ «Гормост».

Сумма неустойки в размере 96 400 руб. не погашена банковской гарантией и не оплачена ответчиком.

Таким образом по контракту № 03732005579210001090001 задолженность по оплате неустойки составляет 96 400 руб.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства сторон по договору должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим.

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со ст.405 ГК РФ, должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих своевременное выполнение подрядчиком спорных работ, суд признает представленный расчет взыскиваемой неустойки законным и обоснованным.

Обоснованность требования по взысканию вышеуказанной неустойки подтверждается вступившими в законную силу судебными актами по делу № А40-90304/22.

В рамках данного дела ООО «Техпроект» обратилось с исковым заявлением к ГБУ «Гормост» о взыскании денежных средств за якобы выполненные работы по контрактам № 03732005579210001130001, № 03732005579210001120001, № 03732005579210001140001, № 03732005579210001100001, № 03732005579210001100001 (те же Контракты, что и в настоящем исковом заявлении).

В рамках данного дела судами первой и апелляционной инстанции установлено, что работы не выполнены в срок, указанный в контрактах, в удовлетворении исковых требований ООО «Техпроект» отказано в полном объеме.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 484 400 руб. 00 коп. – законное и обоснованное, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ, относятся на ответчика.

На основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 316, 328, 329-331, 401, 420-425, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720, 740, 746, 753  ГК РФ  ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Ходатайство ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства оставить без удовлетворения.

Взыскать с ООО "ТЕХПРОЕКТ" (ОГРН 

<

***>) в пользу ГБУ "ГОРМОСТ" (ОГРН 

<

***>) 484 400 руб. 00 коп. - неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 12 688 руб. 00 коп.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

 

Судья

ФИО1