АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А78-7279/2021

г.Чита

18 августа 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 августа 2023 года

Решение изготовлено в полном объёме 18 августа 2023 года

 

Арбитражный суд Забайкальского края

в составе судьи Л.В. Бочкарниковой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.О.Карповой

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Интеко-1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании пени в размере 436810 руб. 40 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 05.06.2023 (до перерыва)

от ответчика:  ФИО2, представителя по доверенности от 20.12.2022 (до перерыва)

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом объявлялся перерыв в судебном заседании с 09.08.2023 до 09 час. 30 мин. 11.08.2023.

 

28.07.2021 Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» (далее – истец, Комитет) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Интеко-1» (далее – ответчик, общество, ООО «Интеко-1») о взыскании пени в размере 504923 руб. 20 коп.

Определением суда от 03.08.2021 исковое заявление оставлено без движения.

Определением суда от 23.08.2021 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением от 11.10.2021 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец неоднократно уточнял исковые требования, в окончательной редакции просил взыскать пени в размере 436810 руб. 40 коп. (заявление об уточнении исковых требований от 08.08.2023).

Уточнение исковых требований принято судом к рассмотрению.

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лица участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Учитывая отсутствие возражений со стороны истца и ответчика суд, признав дело подготовленным, протокольным определением от 20.01.2022 завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела по существу в судебном заседании по правилам статьи 137 АПК РФ и в соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 №65 "О подготовке дела к судебному разбирательству".

Представитель истца уточненные исковые требования поддержал в полном объеме, после перерыва не явился.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал по доводам, изложенным в отзывах на иск, после перерыва не явился.

После перерыва, дело рассмотрено в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие истца и ответчика.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения, исследовав письменные доказательства, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между Комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Интеко-1» (Генеральный подрядчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен муниципальный контракт от 24.06.2020 выполнения работ по благоустройству парка «Угольщиков» в г.Чита ИКЗ 203753608837775360100100100024299244 (с учетом дополнительных соглашений от 15.07.2020, от 22.07.2020, 04.09.2020, от 03.04.2021 (л.д.135-138 т.1)), по условиям которого Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по поставке товаров и выполнению работ: Благоустройство парка «Угольщиков» в г. Чита (далее - объект), а Заказчик обязуется принять товар и результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего контракта.

Согласно сведениям с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок муниципальный контракт заключен 09.07.2020.

Работы осуществляются в соответствии с техническим заданием, рабочей и сметной документацией (Приложения № 1 «сметная документация», 2 «рабочая документация», 4 «товары») (пункт 1.2. контракта).

Генеральный подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ, указанный в разделе 1 настоящего контракта, в соответствии с условиями настоящего контракта и документацией электронного аукциона № 0191300010920000009 (пункт 1.3. контракта).

Генеральный подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами комплекс работ в соответствии с техническим заданием, рабочей и сметной документацией (Приложения № 1 «сметная документация», 2 «рабочая документация», 4 «товары»).

Генеральный подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект, полностью соответствующий всем требованиям действующих норм и правил, а также положениям настоящего Контракта (пункт 1.4. контракта).

Работы и поставка товара осуществляется по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, парк «Угольщиков» (кадастровый номер 75:32:040923:19) в границах улиц: Победы, Урульгинская, Маяковского, Иркутская (пункт 1.5. контракта).

Цена контракта составляет 47078280,25 руб., НДС не облагается (*если Генеральный подрядчик по настоящему контракту имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается») (пункт 3.1. контракта).

Цена контракта согласно сведениям с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок муниципальный контракт от 09.07.2020 составляет 51455050,25 руб. (с учетом заключения сторонами дополнительного соглашения от 04.09.2020 к муниципальному контракту (л.д.137 т.1)).

Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом, в полном объеме, стоимость товаров, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по контракту. Цена Контракта включает в себя все издержки, расходы на работы, необходимые для завершения работ и затраты (в том числе и лимитированные затраты, коммунальные платежи, обслуживание, охрана, а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования), которые Генеральный подрядчик может понести в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, а также компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена Контракта, указанная в п. 3.1, определена на весь срок действия настоящего Контракта, является неизменяемой и твердой на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком (пункт 3.2. контракта).

Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту за счёт средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и бюджета города (пункт 3.3. контракта).

Оплата выполненных работ по Контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика (пункт 3.4. контракта).

Основанием для оплаты работ являются оформленные в установленном порядке: акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), а также счета – фактуры (счета на оплату) (пункт 3.5. контракта).

Авансирование не предусмотрено. Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Генерального подрядчика, указанный в Контракте. Денежные средства оплачиваются Заказчиком в течение 30 дней по окончании выполнения всех видов и объемов работ, предусмотренных рабочей и сметной документацией (приложение №1, приложение № 2) в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований, после подписания справки № КС3.

Обязательства Заказчика по оплате контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет (пункт 3.6. контракта).

Превышения Генеральным подрядчиком объемов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. Фактически выполненные работы, не предусмотренные Контрактом, не могут быть предъявлены к оплате (пункт 3.7. контракта).

Генеральный подрядчик не предъявляет Заказчику требования по компенсации удорожания товаров (пункт 4.1. контракта).

Согласно пункту 4.1. контракта сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 1 октября 2020 года, в соответствии со следующим графиком:

Работы по демонтажу, подготовительные работы, земляные работы, вертикальная планировка, работы по сносу зеленых насаждений – с момента заключения контракта – до 20 июля 2020 года. Возможно досрочное выполнение работ. По результатам выполненных работ подрядчик предоставляет КС-2 не позднее 3-х дней с момента срока выполнения работ (пункт 4.1.1. контракта).

Работы по устройству оснований, бетонные, асфальтобетонные работы, сварочные работы, работы по устройству всех видов покрытий, строительные работы, работы по наружному освещению – до 1 сентября 2020 года. Возможно досрочное выполнение работ. По результатам выполненных работ подрядчик предоставляет КС-2 не позднее 3-х дней с момента срока выполнения работ (пункт 4.1.2. контракта).

Монтаж оборудования – МАФ, озеленение – до 1 октября 2020 года. Возможно досрочное выполнение работ. По результатам выполненных работ подрядчик предоставляет КС-2 не позднее 3-х дней с момента срока выполнения работ (пункт 4.1.3. контракта)

В срок не более семи рабочих дней со дня подписания Контракта передать Генеральному подрядчику по акту приема-передачи документы, необходимые для производства работ (пункт 5.1.1. контракта).

Принять и оплатить выполненные Генеральным подрядчиком работы, только если они соответствуют условиям настоящего Контракта, действующим нормативным документам, регламентирующим выполнение такого вида работ (пункт 5.1.2. контракта).

При приемке выполненных работ проверять их объем и качество на соответствие требованиям, установленным Контрактом (пункт 5.1.3. контракта).

Производить расчеты в соответствии с условиями Контракта (пункт 5.1.4. контракта).

В случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Генеральному подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Генерального подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения (пункт 5.1.5. контракта).

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом (пункт 5.1.6. контракта).

Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Генеральный подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным (пункт 5.2.6. контракта).

Выполнить все работы на Объекте в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Объект Заказчику (пункт 5.3.1. контракта).

Производить работы в полном соответствии и строительными нормами и правилами. Обеспечить соблюдение порядка ведения работ, а также нормативными актами. Выполнить работы в соответствии с ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, техническими регламентами, принятыми в установленном порядке, и другой нормативной документацией (пункт 5.3.2. контракта).

Приемка выполненных по Контракту работ осуществляется с учетом Приложений №№ 2, 3, 4 и оформляется актом приемки выполненных работ по форме КС-2, а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100) (пункт 6.1 контракта).

Генеральный подрядчик обязан осуществить проверку результата выполненной работы с участием представителя Заказчика до представления ему отчетных документов, указанных в п.6.1. Контракта (пункт 6.1.1. контракта).

По Акту о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) к Заказчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения подтвержденных работ (пункт 6.1.2. контракта).

Генеральный подрядчик представляет Заказчику: - акты приемки выполненных работ по форме КС-2 на бумажных носителях с отметкой о проверке выполненных объемов работ представителем Заказчика; - сертификаты соответствия на использованные товары, паспорта и документы на установленное и монтируемое оборудование; - журнал учета выполненных работ (Форма КС-6а); - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием стоимостных показателей работ, оборудования и прочих затрат; - общий журнал учёта выполненных работ по форме КС-6; 6 - документа, подтверждающего обеспечение гарантийных обязательств, в соответствии с пунктом 7.2. Контракта (пункт 6.2. контракта).

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Генеральным подрядчиком отчетных документов (п.6.2. Контракта) совместно с уполномоченным представителем Генерального подрядчика рассматривает и согласовывает представленные документы (принимает выполненные работы) или представляет аргументированный отказ (пункт 6.2.2. контракта).

По взаимному согласию стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Заказчиком лица (хотя бы одного лица) в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по настоящему Контракту (пункт 6.2.3. контракта).

Заказчик вправе отказать Генеральному подрядчику в приемке работ к оплате, в том числе, если их объем, стоимость или качество не подтверждается, о чем Генеральному подрядчику выдается мотивированный отказ (пункт 6.3. контракта).

В соответствии с пунктом 6.9. контракта для проверки предоставленных Генеральным подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактнойсистеме.

Гарантийный срок работ и (или) объём предоставления гарантий качества: 5 (пять) лет с даты подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (пункт 7.2. контаркта).

Гарантия качества товара должна составлять: 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Если в период гарантии Объекта обнаружатся дефекты, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика (пункт 7.3. контракта).

При отказе Генерального подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Генерального подрядчика, предъявляются ему в полном объеме (пункт 7.4. контракта).

Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика (пункт 7.5. контракта).

Истец указывает, что по актам приема-передачи результаты работ сданы заказчику с просрочкой (л.д.57-90 т.1).

В муниципальном контракте установлена ответственность за неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта (пункт 8.1 контракта).

Согласно пункту 8.5. контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Истец указал, что в соответствии с пунктом 4.1 контракта установлены этапы исполнения контракта, расчет пени согласно этапам:

Согласно пункту 4.1. контракта сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 1 октября 2020 года, в соответствии со следующим графиком:

(Пункт 4.1.1.) Работы по демонтажу, подготовительные работы, земляные работы, вертикальная планировка, работы по сносу зеленых насаждений - с момента заключения контракта - до 20 июля 2020 года. Возможно досрочное выполнение работ. По результатам выполненных работ подрядчик предоставляет КС-2 не позднее 3-х дней с момента срока выполнения работ.

В акте проверке неверно указана дата первого исполнения обязательств 27 июля 2020 года.

Акт выполненных работ (форма КС-2) от 27.08.2020 года, работы выполнены на 32 дня позже, соответственно расчет пени с 21.07.2020: (856794,80х6х1/300х4,5%=771,12)+(856794,80х26х1/300х4,25%=3155,86)=3926,98 руб.

(Пункт 4.1.2.) Работы по устройству оснований, бетонные, асфальтобетонные работы, сварочные работы, работы по устройству всех видов покрытий, строительные работы, работы по наружному освещению - до 1 сентября 2020 года. Возможно досрочное выполнение работ. По результатам выполненных работ подрядчик предоставляет КС-2 не позднее 3-х дней с момента срока выполнения работ.

Акт выполненных работ (форма КС-2) от 24.12.2020, работы выполнены на 114 дня позже, соответственно расчет пени с 02.09.2020: 27020104,80х114х1/300х,.25% = 436374,69 руб.

(Пункт 4.1.3.) Монтаж оборудования - МАФ, озеленение - до 1 октября 2020 года. Возможно досрочное выполнение работ. По результатам выполненных работ подрядчик предоставляет КС-2 не позднее 3-х дней с момента срока выполнения работ.

Акт выполненных работ (форма КС-2) от 24.12.2020, работы выполнены на 84 дня позже, соответственно расчет пени с 02.10.2020: 5430380,40х84х1/300х4,25%=64621,53 руб.

Итого сумма пени, начисленная ООО «Интеко-1» составляет 504923,20 руб. (3926,98 руб+436374,69 руб.+ 64621,53 руб.)

Истец направил ответчику претензию от 30.10.2020 с требованием  в добровольном порядке в течение 7 дней с момента получения настоящей претензии оплатить пени по реквизитам истца (л.д.30 т.2).

В ответе от 06.11.2020 № 37 ответчик сообщил истцу о том, что по контракту от 09.07.2020 «Благоустройство «Парка Угольщиков» с Комитетом велась переписка, которой ООО «Интеко-1» неоднократно уведомляло о проблемах с проектно-сметной документацией. Решение вопроса затягивалось, в связи с чем, выполнение части работ по благоустройству парка были выполнены с задержкой по вине заказчика (л.д.31 т.2).

Далее, истец направил ответчику претензии от 04.03.2021 (л.д.32 т.2), от 07.07.2021 (л.д.93 т.1) с требованием в добровольном порядке в течение 10 дней с момента получения настоящей претензии оплатить пени.

Претензия ответчиком по погашению образовавшейся задолженности осталась без удовлетворения.

Неисполнение обязательств по выполнению работ в срок установленный контрактом послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ООО «Интеко-1» в пользу Комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» пени в размере 436810 руб. 40 коп. (заявление об уточнении исковых требований от 08.08.2023).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Избранный способ и порядок защиты права должны соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения, а в результате применения соответствующего способа судебной защиты нарушенное право должно быть восстановлено.

Целью судебной защиты является реальное восстановление нарушенных или оспариваемых прав.

Согласно части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

Согласно части 36 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Согласно пункту 3.3. Правил благоустройства территории городского округа "Город Чита", утвержденных решением Думы городского округа город Чита от 20.12.207 N 233 "О принятии Правил благоустройства территории городского округа "город Чита" проектирование зданий, строений и сооружений осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий".

В соответствии с пунктом 3.2 СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» под благоустройством территории понимается комплекс мероприятий по инженерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния участка.

В соответствии с пунктом 4.1 СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» при разработке проектов благоустройства территории следует руководствоваться положениями сводов правил в части общих требований к градостроительным и объемно-планировочным решениям территорий различного функционального назначения по СП 42.13330, СП 53.13330, СП 59.13330, СП140.1333, СП 78.13330.2012, СП 34.13330.2012 и инженерной подготовке территорий при строительстве новых, реконструкции и сносе существующих зданий и сооружений по СП 48.13330.

Правила раздела 4 СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» должны соблюдаться при производстве и приемке работ: по благоустройству территории (подготовка ее к застройке); работы с растительным грунтом; устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, оград, открытых плоскостных спортивных сооружений; оборудование мест отдыха и озеленение.

Правила распространяются на работы по благоустройству территорий и участков размещения объектов жилищно-гражданского, культурно-бытового, рекреационного и промышленно-производственного назначения, а также транспортных и инженерных инфраструктур (пункт 4.2.). Требования к качеству почв и грунтов следует принимать по СанПиН 2.1.7.1287 (пункт 4.3.). Работы по благоустройству территорий должны выполняться в соответствии с проектом благоустройства при соблюдении технологических требований, предусмотренных правилами настоящего раздела и проектами производства работ (пункт 4.4.)

Законодатель определяет свод правил как документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется на добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов (статья 2 Федерального закона "О техническом регулировании").

Муниципальный контракт №09.07.2020 № Ф.2020.0009 выполнение работ по благоустройству парка «Угольщиков» содержит все признаки договора строительного подряда.

Возникшие между сторонами правоотношения по выполнению строительных подрядных работ для муниципальных нужд регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Из материалов дела следует, что правоотношения сторон вытекают из муниципального контракта от 09.07.2020 № Ф.2020.00009, заключенного по итогам аукциона, проведенного в электронной форме.

Контракт заключен между Комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Интеко-1» (Генеральный подрядчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с учетом дополнительных соглашений от 15.07.2020, от 22.07.2020, 04.09.2020, от 03.04.2021 (л.д.135-138 т.1)), по условиям которого Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по поставке товаров и выполнению работ: Благоустройство парка «Угольщиков» в г. Чита (далее - объект), а Заказчик обязуется принять товар и результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего контракта.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с условиями, указанными в параграфе 4 муниципального контракта выполнение работ по благоустройству парка «Угольщиков в г.Чита определен срок окончания выполнения работ.

Согласно параграфу 6 контракта сторонами согласованы условия сдачи - приемки работ.

Параграфом 8 контракта предусмотрена ответственность сторон.

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15 октября 2019 г. N 305-ЭС19-12786, по смыслу пункта 1 статьи 314 и пункта 1 статьи 408 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день, а надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Исходя из положений пункта 1 статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Срок выполнения работы необходимо отличать от срока приемки выполненной работы, который является самостоятельным и может быть установлен в договоре подряда (пункт 1 статьи 720 ГК РФ). Названные сроки разведены в ГК РФ как терминологически, так и с точки зрения применения последствий их нарушения.

При этом, как правило, соблюдение срока выполнения работы зависит от подрядчика, срока приемки - от подрядчика и заказчика.

В соответствии с пунктом 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику и обосновать необходимость немедленных действий в интересах заказчика.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение о необходимости выполнения дополнительных работ в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ (абзац второй пункта 3 статьи 743 ГК РФ).

В силу пункта 4 статьи 743 Кодекса подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

В силу пункта 5 статьи 743 ГК РФ при согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

В пункте 1 статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 1 данной статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы (пункт 2 статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации (пункт 4 статьи 744 ГК РФ).

В пункте 5.3.12. контракта предусмотрена обязанность Генерального подрядчика предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или о возможности возникновения в будущем обстоятельств, которые могут негативно повлиять на качество выполнения работ, или к нарушению сроков выполнения работ. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта (пункт 5.3.13. контракта)

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

В силу пункта 4 статьи 753 Кодекса сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 Кодекса).

В пункте 12 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, указано, что следует учитывать специфику отношений, складывающихся в сфере строительства, которая уже в силу своего существа создает возможность выявления в ходе исполнения обязательства дополнительных работ.

К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком могут быть отнесены те работы, которые, исходя из имеющейся информации на момент подготовки документации и заключения контракта объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

В соответствии с пунктом 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику и обосновать необходимость немедленных действий в интересах заказчика. В силу пункта 5 статьи 743 ГК РФ при согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам. 

По смыслу приведённых норм в случае, если заказчик согласовал действия по проведению дополнительных работ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата, последующий отказ в оплате дополнительных работ создавал бы возможности для извлечения им преимуществ из своего недобросовестного поведения, что противоречит пункту 4 статьи 1 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьями 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей не предоставленному исполнению.

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне (часть 3 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 740 Кодекса по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

На основании пункта 1 статьи 750 Кодекса, если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства законом или договором может быть предусмотрено взимание с должника неустойки (штрафа, пени).

Истцом заявлено уточненное требование о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ в размере 436810 руб. 40 коп.

Истец производит начисление неустойки в соответствии с пунктом 8.5. контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации под неустойкой (штрафом, пеней) следует понимать определенную законом или договором денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Подрядчик настаивал на отсутствии его вины в неисполнении обязательств и нарушении сроков выполнения работ исключительно вследствие выявления недостатков в проектной сметной документации, отсутствием технической документации и неоказания Заказчиком содействия для выполнения работ.

Данные обстоятельства подтверждаются обращениями ответчика к истцу, ответом общества на претензию Комитета, заключением о результатах оценки инженерно-геологических условий на объекте «Парк «Угольщиков» в Черновском районе г.Читы» от 2022 года, заключением специалиста № 102/22 от 25.03.2022, заключением о результатах инженерно-геологических изысканий по объекту от 2022 года, заключением экспертов № 387/22, проведенной на основании постановления старшего следователя отделения по расследованию экономических преступлений СУ УМВД России по г.Чите от 15.05.2022, заключения экспертов № 388/22, проведенной на основании постановления старшего следователя отделения по расследованию экономических преступлений СУ УМВД России по г.Чите от 17.05.2022, письмами ответчика (л.д.106-108, 113, 167 т.1, л.д.5-27, 35-47, 73-87, 88-100, 101-119 т.2, л.д.51-88 т.3).

Согласно пункту 1 статьи 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

В соответствии со статьей 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

В силу статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ).

Таким образом, при наличии условий, препятствующих к выполнению работ по договору, заказчиком должны быть предприняты меры по устранению таких условий.

В муниципальном контракте выделены следующие этапы выполнения работ:

1.      Этап - демонтажные работ подготовительные работы, земляные работы, вертикальная планировка, работы по сносу зеленых насаждений с 09.07.2020 по 27.07.2020 - 19 календарных дней

2.      Этап работы по устройству оснований, бетонные, асфальтобетонные работы, сварочные работы, работы по устройству всех видов покрытий строительные работы по наружному освещению с 09.07.2020 по 01.09.2020 - 55 календарных дней

3.      Этап монтаж оборудования МАФ, озеленение с 09.07.2020 по 01.10.2020 - 85 календарных дней.

Как указывает ответчик, и истец не оспаривает, дополнительным соглашением муниципальному контракту 09.07.2020 № Ф.2020.0009 внесены изменения в объемы выполненных работ, увеличена стоимость работ по муниципальному контракту.

Дополнительные работы включают в себя:

- разработку грунта с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 3 (ФЭР 01-01-013-09)

- перевозку грузов автомобилями - самосвалами (ФССЦпг 03-21-01-001)

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (ФЭР 27-04-001-04)

- щебень из гравия для строительных работ (ФССЦ 02.2.05.04-0052)

- перевозку грузов автомобилями самосвалами (ФССЦпг 03-21-01-001), что подтверждается дефектным актом локальным сметным расчетом 02-01/доп (л.д.38-40 т.3).  актом выполненных работ формы КС-2 № 10 на сумму 4376770 руб. (л.д.87 т.1).

Данные изменения относятся к изменению объёмов следующих видов работ:

- вертикальная планировка (смет 07-01-01) и благоустройство (смета 07-01-02). 

Кроме того, с учетом технологии выполнения работ влияют на сроки выполнения:

- подготовительные работы, работы по сносу зеленых насаждений, работы по устройству оснований, бетонные, асфальтобетонные работы, сварочные работы, работы по устройству всех видов покрытий строительные работы по наружному освещению.

Следовательно, срок начала вышеперечисленных работ следует считать с 04.09.2020 (с момента заключения дополнительного соглашения от 04.09.2020).

Дополнительным соглашением от 03.04.2021 к муниципальному контракту 09.07.2020 № Ф.2020.0009 изменены виды и объемы работ при исполнении муниципального контракта. Стороны пришли к соглашению о выполнении дополнительных видов и объемов работ согласно сопоставительным сметным расчета, а именно: озеленение, земляные работы (под фундамент), общестроительные работы (сцена), фундаменты под ограждения, архитектурно-строительные решения, фундаменты под МАФ, благоустройство, что соответствует видам работ указанным в этапах работы (параграф 4 муниципального контракта) по устройству оснований, бетонные, асфальтобетонные работы, сварочные работы, работы по устройству всех видов покрытий строительные работы по наружному освещению, монтаж оборудования МАФ, озеленение.

 Изменения подтверждаются сопоставительными ведомостями (л.д.147-153 т.1), локальным сметным расчетом № 1 изм (л.д.41-48 т.3), актом выполненных работ формы КС 2 № 11 от 24.12.2020 на сумму 9000819,60 (л.д.88-90 т.1). 

Указанное дополнительное соглашение вступило в силу с момента подписания его сторонами. Следовательно, срок начала выполнения работы по сносу зеленых насаждений, работы по устройству оснований, бетонные, асфальтобетонные работы, сварочные работы, работы по устройству всех видов покрытий строительные работы по наружному освещению, монтаж оборудования МАФ, озеленение считать необходимо с 03.04.2021.

Расчет истца проверен судом и признан методологически неверным.

На основании вышеуказанных обстоятельств суд считает возможным согласиться с контррасчетом ответчика, исправив арифметическую ошибку в расчетах по актам приемки выполненных работ №1 от 21.08.2020 и №2 от 24.12.2020.

Расчет пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту следующий:

1) Акт приемки выполненных работ №1 от 21.08.2020 - демонтажные работы, смета 01-01-01. Сумма выполненных работ 856894,80 руб., количество дней просрочки 25 календарных дней (с 28.07.2020 по 21.08.2020)

856894,8х1/300х25х4,25%= 3034,84 руб.

2) Акт приемки выполненных работ №2 от 24.12.2020 - подготовительные работы смета 01-01-02 сумма выполненных работ 149103,60 руб. Учитывая технологическую взаимосвязь с работами по вертикальной планировке, сроки выполнения работ следует считать с 04.09.2020 по 29.10.2020 (55 календарных дней). Следовательно, просрочка выполнения обязательств составляет 25 календарных дней (30.10.2020 по 23.11.2020)

149103,60х1/300х25х4,25%= 528,08 руб.

3) Акт приемки выполненных работ №3 от 24.12.2020 - архитектурно-строительные решения, смета 02-01-01, сумма выполненных работ 1915390,80 руб. Срок выполнения работ с 26.07.2020 по 23.11.2020. Согласно дополнительному соглашению от 03.04.2021 в смету 02-01-01 внесены изменения в части объема и суммы выполнения работ на основании сопоставительной ведомости. Данное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами. Следовательно, срок начала выполнения работ необходимо считать с 03.04.2021 года. Ответчик сдал работы досрочно, следовательно, неустойка за просрочку выполнения обязательств не начисляется.

4) Акт приемки выполненных работ №4 от 24.12.2020 - наружное освещение смета 04-01-01, сумма выполненных работ 5808795,60 руб. Учитывая технологическую взаимосвязь с работами по вертикальной планировке и благоустройству, сроки выполнения работ следует считать с 04.09.2020 по 29.10.2020 (55 календарных дней). Следовательно, просрочка выполнения обязательств составляет 25 календарных дней (30.10.2020 по 23.11.2020)

5808795,60х1/300х4,25%х25= 20572,82 руб.

5) Акт приемки выполненных работ №5 от 24.12.2020 - вертикальная планировка смета 07-01-01, сумма выполненных работ 1060682,40 руб. В соответствии с дополнительным соглашением от 04.09.2020, сроки выполнения работ следует считать с 04.09.2020 по 29.10.2020 (55 календарных дней). Следовательно, просрочка выполнения обязательств составляет 25 календарных дней (30.10.2020 по 23.11.2020)

1060682,40х1/300х4,25%х25= 3756,58 руб.

6) Акт приемки выполненных работ №6 от 24.12.2020 - благоустройство смета 07-01-02, сумма выполненных работ 19340922 руб. Учитывая дополнительное соглашение от 03.04.2021, сроки начала выполнения работ следует считать с 03.04.2021. Работы ответчиком выполнены досрочно, следовательно, неустойка за просрочку выполнения обязательств не начисляется.

7) Акт приемки выполненных работ №7 от 24.12.2020 - малые архитектурные формы смета 07-01-04, сумма выполненных работ 4955040 руб. Учитывая дополнительное соглашение от 03.04.2021, сроки начала выполнения работ следует считать с 03.04.2021. Работы ответчиком выполнены досрочно, следовательно, неустойка за просрочку выполнения обязательств не начисляется.

8) Акт приемки выполненных работ №8 от 24.12.2020 - подготовка территории, строительство, зеленые насаждения, период выполнения работ с 26.07.2020 по 23.11.2020, сумма 3515291,05 руб. В соответствии с решением Арбитражного суда Забайкальского края от 01.12.2021 и Постановлением Четвертого апелляционного арбитражного суда от 21.02.2022 по делу №А78-4043/2021_ указанные работы являются восстановительной стоимостью по сносу зеленых насаждений в соответствии пунктом 2.13 административного регламента утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Чита» от 16.01.2017 №16 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения» на пересадку деревьев и кустарников» для получения согласования сноса жизнеспособных насаждений, заявитель должен оплатить их восстановительную стоимость, расчет которой производится в соответствии с Порядком. В соответствии с вышеуказанными судебными решениями с ООО «ИНТЕКО-1» взыскана в пользу Комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» сумма в размере 3415291,05 руб., полученную в рамках исполнения контракта №Ф.2020.00009 от 09.07.2020. Ответчик произвел оплату в декабре 2022 года, следовательно, неустойка за просрочку выполнения обязательств не начисляется.

9) Акт приемки выполненных работ №9 от 24.12.2020 – озеленение, смета 07-01-03, сумма выполненных работ 475340,40 руб. Учитывая дополнительное соглашение от 03.04.2021, сроки начала выполнения работ следует считать с 03.04.2021. Работы ответчиком выполнены досрочно, следовательно, неустойка за просрочку выполнения обязательств не начисляется.

10) Акт приемки выполненных работ №10 от 24.12.2020 - дополнительные работы (земляные работы, устройство подстилающих слоев из скальника) сумма 4376770 руб. В соответствии с дополнительным соглашением от 04.09.2020, сроки выполнения работ следует считать с 04.09.2020 по 29.10.2020 (55 календарных дней). Учитывая дополнительное соглашение от 03.04.2021, сроки начала выполнения работ следует считать с 03.04.2021. Работы ответчиком выполнены досрочно, следовательно, неустойка за просрочку выполнения обязательств не начисляется.

11) Акт приемки выполненных работ №11 от 24.12.2020 - дополнительные и неучтенные работы, общая сумма 9000819,60 руб., смета №1/изм. Учитывая дополнительное соглашение от 03.04.2021, сроки начала выполнения работ следует считать с 03.04.2021. Работы ответчиком выполнены досрочно, следовательно, неустойка за просрочку выполнения обязательств не начисляется

Общая сумма неустойки составляет 3034,84 руб. + 528,08 руб. + 20572,82 руб. + 3756,58 руб. = 27892,32 руб.

Согласно пункту 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ответчик ходатайство о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявил.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании пени подлежит частичному удовлетворению в размере 27892,32 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

В силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации Комитет освобожден от уплаты государственной пошлины по настоящему делу.

В соответствии со статьей 333.21 НК РФ размер государственной пошлины по настоящему иску составляет 2000 руб. и подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интеко-1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в сумме 27892 руб. 32 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интеко-1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 2000 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                               Л.В. Бочкарникова