111/2018-40306(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

Дело № А28-2360/2018  (резолютивная часть)  

г.Киров 

Резолютивная часть решения

 объявлена 11 апреля 2018 года  Резолютивная часть решения изготовлена 12 апреля 2018 года  

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Двинских С.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению 

министерства лесного хозяйства Кировской области (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, адрес: 610020, Россия, 

<

...>)  

к федеральному казенному учреждению «Объединение исправительных колоний   № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской  области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 613825,  Россия, Кировская область, Опаринский район, п.Северный)  

о понуждении выполнить лесохозяйственные мероприятия  

при участии в судебном заседании представителей: от истца – ФИО2, по доверенности от 29.09.2017, 

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 05.04.2018.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

требования министерства лесного хозяйства Кировской области  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 610020, 

<

...>) удовлетворить.  

Обязать федеральное казенное учреждение «Объединение исправительных  колоний № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по  Кировской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес:  613825, Россия, Кировская область, Опаринский район, п.Северный) выполнить  лесохозяйственные мероприятия, не исполненные им в 2016 и 2017 годах на лесных  участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование по  распоряжению департамента лесного хозяйства Кировской области от 09.07.2009 №  715 и от 05.10.2012 № 534, а именно:  

Виды мероприятий  

Ед.изм.  

Объем работ 

Срок 

исполнения  

За 2016 год по лесному участку, предоставленному распоряжением № 715  

Создание лесных культур  

га 

4,6 

до 15.06.2018  

Подготовка почвы под лесные  культуры  

га 

10 

до 15.06.2018  

За 2017 год по лесному участку, предоставленному распоряжением № 715  

Создание лесных культур  

га 

10 

до 15.06.2018  

Уход за лесом (прореживание) 

га 

112,3 

до 31.12.2018  

Уход за лесом (проходные рубки)  

га 

47,1 

до 31.12.2018  

Установка предупредительных  аншлагов  

шт. 

1 

до 31.03.2018  

За 2017 год по лесному участку, предоставленному распоряжением № 534  

Уход за лесом (проходные рубки)  

га 

3,8 

до 31.12.2018  

Устройство мест отдыха 

шт. 

1 

до 30.06.2018  

Установка предупредительных  аншлагов  

шт. 

1 

до 30.06.2018  

Огораживание муравейников  

шт. 

1 

до 30.06.2018  

Изготовление и развешивание  искусственных гнездовий  

шт. 

1 

до 30.06.2018  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд  в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа  в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со  статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.  

 Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного  суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в  порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом  случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.  

 Судья С.А.Двинских