141/2023-94181(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-13511/2022

г. Оренбург

12 мая 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе  председательствующего судьи Дубининой С.А., при ведении протокола  судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело  

по исковому заявлению некоммерческой организации "Фонд  модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской  области", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Оренбург,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная  компания № 1", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Республика  Башкортостан, г. Уфа,  

об обязании устранить дефекты работ по договору подряда о взыскании судебной неустойки 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью  «Строительная компания № 1» в срок 60 дней с момента вступления  решения суда в законную силу выполнить работы по устранению  недостатков (дефектов), обнаруженных истцом в течение гарантийного  срока по договору подряда от 17.05.2019 № СМР-126/2019 по  следующим объектам:  

1.Многоквартирный дом по адресу: 

<

...> (фасад), в срок 30 дней с момента  вступления решения суда в законную силу, а именно:  

- провести разборку горизонтальных поверхностей бетонных конструкций по периметру дома;  

- выполнить устройство бетонной подготовки по периметру дома с  применением бетона тяжелого, крупность заполнителя: 20мм, класс  В15 (М200);  

- произвести очистку поверхности фасада от перхлорвиниловых и  масляных красок (цоколь) в объеме 132,7 м2  

- произвести шпатлевку фасада (цоколя) в объеме 132,7 м2 с применением шпатлевки цементной «Волма» «Аквастандарт», цвет белый  в объеме 132,7 м2  

-произвести огрунтовку поверхности фасада (цоколя) в объеме  132,7 м2  

- произвести окраску фасада акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (цоколь) в объеме 132,7 м2;  

- произвести очистку поверхности фасада от перхлорвиниловых и  масляных красок: с люлек (плиты и торец балкона) в объеме 29,6 м2  

- произвести шпатлевку фасада (плиты и торец балкона) в объеме  29,6 м2 с применением шпатлевки цементной «Волма» «Аквастандарт», цвет белый в объеме 29,6 м2  

- произвести огрунтовку поверхности фасада (плиты и торец балкона) в объеме 29,6 м2;  

- провести ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками «Вилатерм», монтажной пеной и  мастикой вулканизирующейся по периметру квартир № 6, 12, 20,  согласно требованиям п. 4.1., п. 4.2. ВСН 19-95/ДС «Инструкция по  технологии заделки стыковых соединений панелей наружных стен  жилых домов и зданий соцкультбыта», а также п. 5 TP 196-08  «Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения  стыков наружных стеновых панелей», а также разделом 3 СНиП  3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».  

2.Многоквартирный дом по адресу: 

<

...> (фасад), а именно:  

- провести ремонт и восстановление герметизации стыков  наружных стеновых панелей прокладками «Вилатерм», монтажной  пеной и мастикой вулканизирующейся по периметру квартир № 39, 86,  9 (со стороны ул. Шоссейной) согласно требованиям п. 4.1., п. 4.2. ВСН  19-95/ДС «Инструкция по технологии заделки стыковых соединений  панелей наружных стен жилых домов и зданий соцкультбыта», а также  п. 5 TP 196-08 «Технические рекомендации по технологии  герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей», а  также разделом 3 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие  конструкции»;  

- произвести очистку поверхности фасада от красок (цоколь),  произвести шпатлевку фасада (цоколя) с применением шпатлевки  цементной «Волма» «Аквастандарт», цвет белый, произвести  огрунтовку поверхности фасада (цоколя) произвести окраску фасада  акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности (цоколь) в  объеме примерно 20 м2 (в местах шелушения и разрушения  окрасочного слоя по всему периметру)  

3.Многоквартирный дом по адресу: 

<

...> (фасад), а именно:  

- провести ремонт и восстановление герметизации стыков  наружных стеновых панелей прокладками «Вилатерм», монтажной  пеной и мастикой вулканизирующейся локально по всему периметру  дома (в том числе по периметру квартир № 1,46,76,56,15,43,44, за  исключением торцевых частей), согласно требованиям п. 4.1., п. 4.2.  ВСН 19-95/ДС «Инструкция по технологии заделки стыковых  соединений панелей наружных стен жилых домов и зданий  соцкультбыта», а также п. 5 TP 196-08 «Технические рекомендации по  технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых  панелей», а также разделом 3 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и  ограждающие конструкции».  

- произвести очистку поверхности фасада от красок (цоколь),  произвести шпатлевку фасада (цоколя) с применением шпатлевки  цементной «Волма» «Аквастандарт», цвет белый, произвести  огрунтовку поверхности фасада (цоколя) произвести окраску фасада  акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности (цоколь) в  объеме примерным 18 м2 (в местах шелушения и разрушения  окрасочного слоя).  

Начислять, в рамках статьи 308.3 Гражданского кодекса  Российской Федерации судебную неустойку, в случае неисполнения  обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания   № 1» после вступления в законную силу, вынесенного судебного акта  по гражданскому делу № А47-13511/2022, в размере 5 000 руб. за  каждый день просрочки исполнения судебного акта, начиная со дня  следующего за днем, установленным решением суда для исполнения  обязательства в натуре.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания № 1» в пользу некоммерческой организации  "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства  Оренбургской области" расходы по оплате госпошлины в размере 6000  руб.  

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статей 319,  320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме)  через Арбитражный суд Оренбургской области.  

Судья С.А. Дубинина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 23.03.2023 2:00:00

 Кому выдана Дубинина Светлана Александровна