Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-125728/2018

26 февраля 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  21 февраля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  26 февраля 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Медгазмонтаж" (адрес:  Россия 196066, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета д.27, пом.87, ОГРН:  1157847049580);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ" (адрес:  Россия 190020, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пер ЛИБАВСКИЙ 5/З/1, ОГРН:  1147847203130);

о взыскании 156 835 руб. 04 коп.

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 10.06.18,

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

установил:

ООО "Медгазмонтаж" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ООО "РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ" о взыскании 156 835 руб. 04 коп. задолженности по договору №01-18 от 29.01.18.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без его участия на основании ст.156 АПК РФ.

Определением от 10.12.18 года суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства на основании статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом установлено:

ООО «МЕДГАЗМОНТАЖ» - подрядчик и ООО «Русский Строительный Дом» -заказчик 29.01.2018 заключили договор №01-18 на выполнение работ (далее - договор), согласно которому Подрядчик принял на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу системы технологических трубопроводов для подачи кислорода в помещениях отделения колопроктологии в осях Г-Ж/17-36 4 этаж (сети медицинского газоснабжения в СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер») (далес - работы), а Заказчик принял на себя обязательства принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями договора на выполнение работ. 14.02.2018 стороны подписали дополнительное соглашение №1 к договору на выполнение работ об увеличении объема работ и их стоимости.

Согласно п. 2.1 договора стоимость работ составляет 253 670 руб. 08 коп. в т.ч. НДС - 18% - 38 695, 44 руб.. и должна быть выплачена в следующем порядке:

- предоплата в размере 96 835  руб. 04 коп. в течение 10 дней после подписания договора на выполнение работ,

- окончательный расчет в размере 156 835  руб. 04 коп. в течение 10 дней после подписания актов по форме КС-2 и КС-3.

Предоплата в размере 96 835 руб. 04 коп. была получена Истцом 30.01.2018.

19.02.2018 после исполнения работ в соответствии с условиями договора Истец и Ответчик подписали акты по форме КС-2 и КС-3. Указанные акты Ответчик подписал без замечаний.

17.05.2018 Истец и Ответчик подписали Акт сверки взаимных расчетов по договору, в котором указана задолженность Ответчика перед Истцом в размере 156 835 руб. 04 коп. с учетом дополнительного соглашения №1. Ответчик оплату не произвел.

В настоящее время задолженность ответчика по оплате работ по договору составляет 156 835 руб. 04 коп.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Медгазмонтаж" 156 835 руб. 04 коп. задолженности и 5 705 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.