Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

 http://tambov.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Тамбов

«15» ноября 2017 года                                   Дело № А64-5617/2017

Резолютивная часть решения объявлена 13 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 15 ноября 2017 года.

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Подольской О.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рязановой Е.И.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи», г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)к Акционерному обществу «ТКС «Электрические сети», г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),о взыскании задолженности  в размере 427430,30 руб.

          при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 21.11.2016.

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи», г.Тамбов обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к Акционерному обществу «ТКС «Электрические сети», г.Тамбов о взыскании задолженности по договорам подряда №П-244 (116-2013/10-081) от 11.10.2013, №П-245 (116-2013/10-082) от 11.10.2013, №П-252 (116-2014/1-002) от 09.01.2014, №П-253 (116-2014/01-015) от 09.01.2014, №П-246 (116-2013/12-088) от 14.12.2013, №П-247 (116-2013/12-086) от 14.12.2013, №П-248 (116-2013/12-087) от 14.12.2013, №П-249 (116-2013/12-085) от 14.12.2013, №П-250 (116-2013/12-089) от 14.12.2013, №П0257 (116-2014/01-009) от 09.01.2014 в размере 427 430,30 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 549 руб.

      Определением арбитражного суда от 03.08.2017 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее _ АПК РФ). Ответчику предложено представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы права, документы в обоснование своих доводов, в случае оплаты, доказательства оплаты задолженности.

      В сроки, установленные арбитражным судом, от ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

      В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу, что имеется основание для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, предусмотренное частью 5 статьи 227 АПК РФ, в связи с необходимостью выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания.

     Определением арбитражного суда от 21.09.2017 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

     Представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме по мотивам, изложенным в исковом заявлении.

    Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, каких-либо ходатайств не заявлено.

    На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителя ответчика по имеющимся материалам.

     В соответствии со ст.163 АПК РФ в судебном заседании был объявлен перерыв до 13 ноября 2017 в 15 час. 30 мин., после перерыва судебное заседание продолжено.

     Представители сторон в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, каких-либо ходатайств не заявлено.

      На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей сторон по имеющимся материалам.

      Рассмотрев материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению, руководствуясь при этом следующим.

       Как следует из материалов дела, 11.10.2013 между Открытым акционерным обществом «Тамбовские коммунальные системы» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) был заключен договор подряда №П-244, в соответствии с условиями которого,  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям: «Жилой дом по ул.Тополиная, 33 в г. Тамбове, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п.1.1. договора).

       Цена за работы составляет 355 535,18 руб., согласно технической (сметной) документации (п.3.1 договора).

        Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:

- не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от цены договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ по договору.

        Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ и только при наличии надлежаще оформленных первичных документов (акта о выполнении работ) (п.3.5, 3.6 договора).

       Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п.11.1 договора).

        В рамках исполнения указанного договора истец  произвел работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям «Жилой дом по ул.Тополиная, 33 в г. Тамбове», а ответчик принял указанные работы на общую сумму  355 535,18 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ №1 от 12.12.2014, справкой о стоимости  выполненных работ и затрат №1 от 12.12.2014 на сумму 355 535,18 руб.

        Работы приняты ответчиком без возражений и замечаний, претензий к срокам и качеству работ также не заявлено.

        В нарушение условий договора, ответчик частично оплатил выполненные работы на общую сумму 155 535,18 руб., задолженность  АО «ТКС «Электрические сети» перед ООО «Тамбовские электропередачи» составляет   200 000 руб.

        11.10.2013 между Открытым акционерным обществом «Тамбовские коммунальные системы» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) был заключен договор подряда №П-245, в соответствии с условиями которого,  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям: «Здание по ул.Киквидзе, 69 в г. Тамбове, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п.1.1. договора).

        Цена за работы составляет 1 089 940,04 руб., согласно технической (сметной) документации (п.3.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 01.12.2014).

        Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:

- не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от цены договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ по договору.

        Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ и только при наличии надлежаще оформленных первичных документов (акта о выполнении работ) (п.3.5, 3.6 договора).

       Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п.11.1 договора).

        В рамках исполнения указанного договора истец  произвел работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям «Здание по ул.Киквидзе, 69 в г. Тамбове», а ответчик принял указанные работы на общую сумму 1 089 940,04 руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ №1 от 24.11.2015, №2 от 24.1.2015, справками о стоимости  выполненных работ и затрат №1 от 24.11.2015 на сумму 842 181,34 руб., №1 от 24.11.2015 на сумму 247 758,70 руб.

        Работы приняты ответчиком без возражений и замечаний, претензий к срокам и качеству работ также не заявлено.

        В нарушение условий договора, ответчик частично оплатил выполненные работы на общую сумму  252 654,40 руб., задолженность  АО «ТКС «Электрические сети» перед ООО «Тамбовские электропередачи» составляет   837 285,64 руб.

         09.01.2014 между Открытым акционерным обществом «Тамбовские коммунальные системы» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) был заключен договор подряда №П-252, в соответствии с условиями которого,  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям: «Жилой дом по ул.Комсомольская, 128 в г. Тамбове, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п.1.1. договора).

        Стоимость работ по договору определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии, которая составляет 624 450,50 руб. (п.3.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 02.11.2015).

        Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:

- не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от цены договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ по договору.

        Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ и только при наличии надлежаще оформленных первичных документов (акта о выполнении работ) (п.3.5, 3.6 договора).

       Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п.11.1 договора).

        В рамках исполнения указанного договора истец  произвел работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям «Жилой дом по ул.Комсомольская, 128 в г. Тамбове», а ответчик принял указанные работы на общую сумму 624 450,50 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ №1 от 24.11.2015, актом сдачи-приемки №2 от 24.11.2015, справкой о стоимости  выполненных работ и затрат №1 от 24.11.2015 на сумму 577 849,54 руб.

       09.01.2014 между Открытым акционерным обществом «Тамбовские коммунальные системы» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) был заключен договор подряда №П-253, в соответствии с условиями которого,  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям: «Гараж №13 в ГСК «Дорожник» в районе ул.Астраханской в г. Тамбове», и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п.1.1. договора).

        Стоимость работ по договору определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии, которая составляет 290 280 руб. (п.3.1 договора).

        Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:

- не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от цены договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ по договору.

        Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ и только при наличии надлежаще оформленных первичных документов (акта о выполнении работ) (п.3.5, 3.6 договора).

       Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п.11.1 договора).

        В рамках исполнения указанного договора истец  произвел работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям «Гараж №13 в ГСК «Дорожник» в районе ул.Астраханской в г. Тамбове», а ответчик принял указанные работы на общую сумму 280 170,16 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ №1 от 24.11.2015, актом сдачи-приемки №2 от 24.11.2015, справкой о стоимости  выполненных работ и затрат №1 от 24.11.2015 на сумму 262 696,32руб.

        Работы приняты ответчиком без возражений и замечаний, претензий к срокам и качеству работ также не заявлено.

        В нарушение условий договора, ответчик  не оплатил выполненные работы, задолженность  АО «ТКС «Электрические сети» перед ООО «Тамбовские электропередачи» составляет   262 696,32 руб.

        14.12.2013  между Открытым акционерным обществом «Тамбовские коммунальные системы» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) был заключен договор подряда №П-246, в соответствии с условиями которого,  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям: «Торгово-офисное здание по ул.Тамбов-4, д.8-А в г. Тамбове», и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п.1.1. договора).

        Цена за работы составляет 872 020 руб. (п.3.1 договора).

        Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:

- не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от цены договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ по договору.

        Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ и только при наличии надлежаще оформленных первичных документов (акта о выполнении работ) (п.3.5, 3.6 договора).

       Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п.11.1 договора).

        В соответствии с п.3.5 договора ответчик перечислил ООО «Тамбовские электропередачи» в качестве аванса 261 606 руб.

        07.06.2016 между АО «ТКС «Электрические сети» (заказчик) и ООО «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) заключено Соглашение о расторжении договора подряда №П-246 от 14.12.2013, согласно которому Подрядчик обязуется возвратить Заказчику неотработанный аванс в размере 264 606 руб. в течение трех календарных дней с момента заключения Соглашения, а также в соответствии с п.8.5 договора подрядчик обязуется уплатить заказчику неустойку в размере 87 202 руб. за нарушение сроков выполнения работ.

      14.12.2013  между Открытым акционерным обществом «Тамбовские коммунальные системы» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) был заключен договор подряда №П-247, в соответствии с условиями которого,  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям: «Здание кафе по ул.Рассказовская, 36 в г. Тамбове», и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п.1.1. договора).

        Цена за работы составляет 293 820 руб. (п.3.1 договора).

        Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:

- не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от цены договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ по договору.

        Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ и только при наличии надлежаще оформленных первичных документов (акта о выполнении работ) (п.3.5, 3.6 договора).

       Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п.11.1 договора).

        В соответствии с п.3.5 договора ответчик перечислил ООО «Тамбовские электропередачи» в качестве аванса 88 146 руб.

       07.06.2016 между АО «ТКС «Электрические сети» (заказчик) и ООО «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) заключено Соглашение о расторжении договора подряда №П-247 от 14.12.2013, согласно которому Подрядчик обязуется возвратить Заказчику неотработанный аванс в размере 88 146 руб. в течение трех календарных дней с момента заключения Соглашения, а также в соответствии с п.8.5 договора подрядчик обязуется уплатить заказчику неустойку в размере 29 382 руб. за нарушение сроков выполнения работ.

        14.12.2013  между Открытым акционерным обществом «Тамбовские коммунальные системы» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) был заключен договор подряда №П-248, в соответствии с условиями которого,  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям: «Котельная по ул.Советская, 89 в г. Тамбове», и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п.1.1. договора).

        Цена за работы составляет  416 540 руб. (п.3.1 договора).

        Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:

- не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от цены договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ по договору.

        Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ и только при наличии надлежаще оформленных первичных документов (акта о выполнении работ) (п.3.5, 3.6 договора).

       Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п.11.1 договора).

        В соответствии с п.3.5 договора ответчик перечислил ООО «Тамбовские электропередачи» в качестве аванса  124 962 руб.

       07.06.2016 между АО «ТКС «Электрические сети» (заказчик) и ООО «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) заключено Соглашение о расторжении договора подряда №П-248 от 14.12.2013, согласно которому Подрядчик обязуется возвратить Заказчику неотработанный аванс в размере  124 962 руб. в течение трех календарных дней с момента заключения Соглашения, а также в соответствии с п.8.5 договора подрядчик обязуется уплатить заказчику неустойку в размере  41 654 руб. за нарушение сроков выполнения работ.

        14.12.2013  между Открытым акционерным обществом «Тамбовские коммунальные системы» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) был заключен договор подряда №П-249, в соответствии с условиями которого,  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям: «Здание по ул.Московская, 14, №3 в г. Тамбове», и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п.1.1. договора).

        Цена за работы составляет 293 820 руб. (п.3.1 договора).

        Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:

- не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от цены договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ по договору.

        Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ и только при наличии надлежаще оформленных первичных документов (акта о выполнении работ) (п.3.5, 3.6 договора).

       Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п.11.1 договора).

        В соответствии с п.3.5 договора ответчик перечислил ООО «Тамбовские электропередачи» в качестве аванса  88 146 руб.

       07.06.2016 между АО «ТКС «Электрические сети» (заказчик) и ООО «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) заключено Соглашение о расторжении договора подряда №П-249 от 14.12.2013, согласно которому Подрядчик обязуется возвратить Заказчику неотработанный аванс в размере 88 146 руб. в течение трех календарных дней с момента заключения Соглашения, а также в соответствии с п.8.5 договора подрядчик обязуется уплатить заказчику неустойку в размере 29 382 руб. за нарушение сроков выполнения работ.

       14.12.2013  между Открытым акционерным обществом «Тамбовские коммунальные системы» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) был заключен договор подряда №П-250, в соответствии с условиями которого,  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести работы по выполнению мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям: «Административное здание по ул.Московской, 27-А в г. Тамбове», и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п.1.1. договора).

        Цена за работы составляет  814 200 руб. (п.3.1 договора).

        Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:

- не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от цены договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ по договору.

        Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ и только при наличии надлежаще оформленных первичных документов (акта о выполнении работ) (п.3.5, 3.6 договора).

       Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п.11.1 договора).

        В соответствии с п.3.5 договора ответчик перечислил ООО «Тамбовские электропередачи» в качестве аванса  244 260 руб.

       07.06.2016 между АО «ТКС «Электрические сети» (заказчик) и ООО «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) заключено Соглашение о расторжении договора подряда №П-250 от 14.12.2013, согласно которому Подрядчик обязуется возвратить Заказчику неотработанный аванс в размере 244 260руб. в течение трех календарных дней с момента заключения Соглашения, а также в соответствии с п.8.5 договора подрядчик обязуется уплатить заказчику неустойку в размере 81 420 руб. за нарушение сроков выполнения работ.

      09.01.2014  между Открытым акционерным обществом «Тамбовские коммунальные системы» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) был заключен договор подряда №П-247, в соответствии с условиями которого,  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести работы по объекту: «Часть здания №3 по ул.Астраханская, д.43-А в г. Тамбове», и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п.1.1. договора).

        Стоимость работ по договору определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии, которая составляет 1 128 080 руб. (п.3.1 договора).

        Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:

- не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от цены договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ по договору.

        Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ и только при наличии надлежаще оформленных первичных документов (акта о выполнении работ) (п.3.5, 3.6 договора).

       Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п.11.1 договора).

        В соответствии с п.3.5 договора ответчик перечислил ООО «Тамбовские электропередачи» в качестве аванса 238 424 руб.

       07.06.2016 между АО «ТКС «Электрические сети» (заказчик) и ООО «Тамбовские электропередачи» (подрядчик) заключено Соглашение о расторжении договора подряда №П-257 от 09.01.2014, согласно которому Подрядчик обязуется возвратить Заказчику неотработанный аванс в размере 238 424 руб. в течение трех календарных дней с момента заключения Соглашения, а также в соответствии с п.8.5 договора подрядчик обязуется уплатить заказчику неустойку в размере 112 808 руб. за нарушение сроков выполнения работ.

      Таким образом, общая задолженность ООО «Тамбовские электропередачи» перед АО «ТКС «Электрические сети» по договорам подряда: №П-246 от 14.12.2013, №П-247 от 14.12.2013, №П-248 от 14.12.2013, №П-249 от 14.12.2013, №П-250 от 09.01.2014, №П-257 от 09.01.2014 составила 1 427 392 руб.

      Общая задолженность АО «ТКС «Электрические сети» перед ООО «Тамбовские электропередачи» по договорам подряда: №П-244 от 11.10.2013, №П-245 от 11.10.2013, №П-252 от 09.01.2014, №П-253 от 09.01.2014 составила 1 854 822,30 руб.

     На основании заявлений АО «ТКС «Электрические» сети», между АО «ТКС «Электрические сети» и ООО «Тамбовские электропередачи» произведен зачет взаимных требований за оказанные услуги на общую сумму 1 427 392 руб. По результатам произведенного взаимозачета задолженность ООО «Тамбовские электропередачи» перед АО «ТКС «Электрические сети» отсутствует, задолженность АО «ТКС «Электрические сети» перед ООО «Тамбовские электропередачи» составляет 427 430,30 руб., что подтверждается актами сверки взаимных расчетов за период: 22.10.2014 – 15.06.2016.

     Направленная в адрес ответчика претензия исх.№17/27 от 27.02.2017 с требованием оплатить имеющуюся задолженность в добровольном порядке, оставлена без удовлетворения.

      Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «Тамбовские электропередачи» в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском.

     В соответствии с частью 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности из договоров.

         Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российский Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.

         В настоящем споре обязательства сторон установлены договорами подряда №П-244 от 11.10.2013, №П-245 от 11.10.2013, №П-252 от 09.01.2014, №П-253 от 09.01.2014.

         В соответствии с частью 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

         Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.  

         В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

         Надлежащее исполнение истцом обязательств по выполнению работ, предусмотренных договорами подряда №П-244 от 11.10.2013, №П-245 от 11.10.2013, №П-252 от 09.01.2014, №П-253 от 09.01.2014, подтверждено подписанными ответчиком без претензий актами о приемке выполненных работ №1 от 12.12.2014, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 12.12.2014 на сумму 355 535,18 руб. (по договору подряда №П-244 от 11.10.2013), актами о приемке выполненных работ №1 от 24.11.2015, №2 от 24.11.2015, справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 24.11.2015 на сумму 842 181,34 руб., №1 от 24.11.2015 на сумму 247 758,70 руб. (по договору подряда №П-245 от 11.10.2013), актом о приемке выполненных работ №1 от 24.11.2015, актом сдачи-приемки №2 от 24.11.2015, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 24.11.2015 на сумму 577 849,54 руб. (по договору подряда №П-252 от 09.01.2014), актом о приемке выполненных работ №1 от 24.11.2015, актом  сдачи-приемки №2 от 24.11.2015, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 24.11.2015 на сумму 262 696,32 руб. (по договору подряда №П-253 от 09.01.2014), а также актами сверки взаимных расчетов за период:22.10.2014 – 15.06.2016.

        Ответчик не оспаривает и материалами дела подтверждается факт принятия им выполненных работ.

        Доказательств оплаты выполненных работ на сумму  427 430,30 руб. ответчиком в суд не представлено.

        Учитывая, что истец исполнил свои обязательства надлежащим образом, а ответчик не оспаривает факт наличия задолженности, требования по иску о взыскании с Акционерного общества «ТКС «Электрические сети» задолженности в размере  427 430,30 руб. по договорам подряда №П-244 от 11.10.2013, №П-245 от 11.10.2013, №П-252 от 09.01.2014, №П-253 от 09.01.2014, соответствуют обязательствам сторон, обоснованны, правомерны и подлежат удовлетворению. 

         В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Исходя из принципа  состязательности сторон, закрепленного в статье 9 названного Кодекса, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

         Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

          Учитывая представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору, суд находит достаточными для разрешения спора по существу. 

          Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнести на ответчика.

          Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  РЕШИЛ: 

     Взыскать с Акционерного общества «ТКС «Электрические сети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Тамбовские электропередачи» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в размере 427 430,30 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 549 руб.

      Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения в мотивированном виде, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.

          Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд Тамбовской области.

 

  Судья                                                                                              О.А. Подольская