Арбитражный суд Хабаровского края 

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 о назначении экспертизы

и приостановлении производства по делу

Дело № А73-7699/2025

г. Хабаровск

02 декабря 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи С.М. Курносовой,

при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи Могильниковым М.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Ваш Дом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680007, 

<

...>, лит. В2, оф. 1-4)

к обществу с ограниченной ответственностью «Быстрый Дом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681021, Хабаровский край, г. Комсомольск-на- Амуре, просп. Октябрьский, д. 33, оф. 345)

о взыскании 1 643 247 руб. 89 коп.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ванинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Хабаровского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, р. 

<

...>).

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 14.10.2024, от ответчика (в режиме «онлайн») – ФИО2 (директор), ФИО3,

представитель по доверенности от 28.05.2025 № 1 (представлен диплом),

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Дом» (далее – истец, ООО «Ваш Дом») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Быстрый Дом» (далее – ответчик, ООО «Быстрый Дом») о взыскании задолженности по договору подряда от 19.09.2024 № 19/24 в размере 1 563 371 руб. 89 коп., неустойки за период с 13.12.2024 по 09.02.2025 в размере 79 876 руб., а также судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 74 297 руб.

Определением суда от 20.05.2025 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании и к судебному разбирательству по существу.

Определением суда от 09.10.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ванинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Хабаровского края

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, р. 

<

...>). У КГБУЗ «Ванинская ЦРБ» судом истребована исполнительная документация по контракту № 1787 от 27.05.2024.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме, заявил ходатайство о проведении по делу судебной экспертизы, проведение которой просил поручить Автономной некоммерческой организации «Центр экспертного, медиативного и юридического сопровождения» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680038, 

<

...>).

На разрешение эксперту предложено поставить следующие вопросы:

1. В каком объеме ООО «Быстрый Дом» выполнены работы по договору подряда от 19.09.2024 № 19/24?

2. Какие из видов работ, предусмотренные договором подряда от 19.09.2024 № 19/24, ООО «Быстрый Дом» не выполнены или выполнены некачественно?

3. Определить стоимость выполненных ООО «Быстрый Дом» работ по договору подряда от 19.09.2024 № 19/24.

Представитель ответчика не возражал в отношении назначения экспертизы, просил поставить перед экспертом следующие вопросы:

1) Установить виды, объем работ, и их стоимость, выполненных ООО "Быстрый Дом" в рамках договора подряда № 19/24 от 19.09.2024 г., заключенного между ООО "Быстрый Дом" и ООО "Ваш Дом" при строительстве объекта фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), расположенного по адресу: пос. Тулучи, Ванинского района, Хабаровского края, ул. Центральная, д. 6?

2) Установить вид, объем дополнительных работ и их стоимость, выполненных ООО "Быстрый Дом" при строительстве объекта, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), расположенного по адресу: пос. Тулучи, Ванинского района, Хабаровского края, ул. Центральная, д. 6?

3) Какие из видов работ, предусмотренные договором подряда от 19.09.2024 № 19/24 ООО "Быстрый Дом" не выполнены или выполнены не в полном объеме?

В качестве судебных экспертов просил рассмотреть ООО "Департамент оценочной деятельности" (ИНН 

<

***>/КПП 246601001, 

<

...>, тел. Тел:+7-963-011-19-74, 8 800 550 2309, E-mail: info@dod-ru.ru).

ООО «Ваш Дом» обеспечено зачисление денежных средств на депозит Арбитражного суда Хабаровского края в размере 130 000 руб., что подтверждается платежным поручением от 14.08.2025 № 388.

Рассмотрев ходатайства лиц, участвующих в деле, о назначении по делу строительно - технической экспертизы, с учетом поступивших ответов от экспертных организаций о возможности проведения экспертизы по делу, заслушав в ходе судебного разбирательства пояснения представителей сторон, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайств лиц, участвующих в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Согласно части 2 статьи 82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04 апреля 2014 года № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» (далее – Постановление № 23) экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации, либо к

экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями, но не являющиеся работниками экспертного учреждения (организации).

В силу пункта 2 Постановления № 23 при назначении экспертизы суд должен руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, а также положениями АПК РФ об обеспечении процессуальных прав лиц, участвующих в деле.

В соответствии с положениями части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 АПК РФ в определении о назначении экспертизы должны быть решены вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами, и по соглашению с экспертом (экспертным учреждением, организацией).

Оценив поступившие данные об экспертных организациях, учреждениях и кандидатурах экспертов, стоимости и сроках, суд пришел к выводу о возможности поручения проведения судебной строительно-технической экспертизы Автономной некоммерческой организации «Центр экспертного, медиативного и юридического сопровождения», эксперту ФИО4.

Оснований для отвода эксперта судом не установлено.

Срок проведения экспертизы с учетом мнения экспертного учреждения суд считает необходимым установить 30 рабочих дней с даты получения экспертом настоящего определения и материалов дела.

На основании пункта 1 статьи 144 АПК РФ производство по делу подлежит приостановлению.

Руководствуясь статьями 82, 144, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Производство по делу № А73-7699/2025 приостановить.

Назначить по делу судебную строительно-техническую экспертизу, проведение которой поручить Автономной некоммерческой организации «Центр экспертного, медиативного и юридического сопровождения» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680038, 

<

...>), эксперту ФИО4.

На разрешение эксперту поставить следующие вопросы:

1) Установить виды, объем и стоимость работ, выполненных ООО "Быстрый Дом" в рамках договора подряда № 19/24 от 19.09.2024, заключенного между ООО "Быстрый Дом" и ООО "Ваш Дом" при строительстве объекта фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), расположенного по адресу: пос. Тулучи, Ванинского района, Хабаровского края, ул. Центральная, д. 6?

2) Установить вид, объем дополнительных работ и их стоимость, выполненных ООО "Быстрый Дом" при строительстве объекта, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), расположенного по адресу: пос. Тулучи, Ванинского района, Хабаровского края, ул. Центральная, д. 6?

3) Возможно ли было достичь результата работ по договору № 19/24 от 19.09.2024 без выполнения дополнительных работ.

4) Какие из видов работ, предусмотренные договором подряда от 19.09.2024 № 19/24 ООО "Быстрый Дом" не выполнены, выполнены не в полном объеме, или выполнены некачественно?

5. Определить итоговую стоимость фактически выполненных ООО «Быстрый Дом» качественных работ по договору подряда от 19.09.2024 № 19/24, имеющих потребительскую ценность для заказчика.

Разъяснить эксперту, что в соответствии с частью 2 статьи 86 АПК РФ, если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

Предупредить эксперта об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения.

Руководителю экспертной организации отобрать у эксперта расписку о предупреждении об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, которую приобщить к заключению эксперта.

В распоряжение экспертного учреждения предоставить материалы дела № А73-7699/2025.

Провести экспертизу и заключение эксперта представить в суд в срок 30 рабочих дней с даты получения материалов дела.

В случае невозможности выполнения экспертизы в установленный срок заблаговременно представить в суд ходатайство о продлении срока проведения экспертизы с обоснованием причин и указанием срока завершения экспертизы.

Необходимые для проведения экспертизы дополнительные документы и материалы истребовать у сторон через арбитражный суд.

Эксперту известить лиц, участвующих в деле, и суд о времени и месте проведения осмотра объекта исследования.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, право присутствовать при проведении экспертом осмотра объекта исследования, не вмешиваясь в ход исследований.

Установить стоимость услуг Автономной некоммерческой организации «Центр экспертного, медиативного и юридического сопровождения» по проведению судебной экспертизы в размере 130 000 руб.

Автономной некоммерческой организации «Центр экспертного, медиативного и юридического сопровождения» для оплаты услуг по выполнению судебной экспертизы оформить акт выполненных работ и счет, которые направить в адрес Арбитражного суда Хабаровского края вместе с заключением эксперта.

Оплату услуг Автономной некоммерческой организации «Центр экспертного, медиативного и юридического сопровождения» произвести в соответствии со статьей 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с депозитного счета арбитражного суда после выполнения экспертом обязанности по даче заключения.

Производство по делу № А73-7699/2025 приостановить на время проведения экспертизы.

Определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его вынесения путем подачи жалобы через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья С.М. Курносова