1710/2020-20881(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-965/2020 

от 12 марта 2020 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное  управление № 2» (ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления  решения в законную силу устранить недостатки работ, выполненных по контракту  

 № 0124200000616002118_246648 от 03.06.2016, а именно: устранить протечки с кровли  здания государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области  «Архангельская областная научная ордена «Знак почета» библиотека имени Н.А.  Добролюбова» в районе приемочной воронки по оси Г (10) и Б (15).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное  управление № 2» (ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казенного  учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства»  (ОГРН 

<

***>) 417 118 руб. 17 коп. штрафа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное  управление № 2» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  

11 342 рубля государственной пошлины. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.А. Козлова