223/2019-16679(2) 

Арбитражный суд Брянской области 

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ  решения

 по делу 

№ А09-1516/2018

город Брянск

05 марта 2019 года

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Матвеевой Н.И., 

при ведении протокола судебного заседания 04 марта 2019 года до перерыва секретарем  судебного заседания ФИО1, после перерыва 04 марта 2019 года и 05 марта 2019  года помощником судьи Баженовой К.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению Администрации Карачевского района, г. Карачев Брянской  области,  

к обществу с ограниченной ответственностью «СтройТоргСервис», г. Брянск,  

об устранении недостатков работ, выполненных по муниципальному контракту, и  взыскании 15 000 руб. расходов по проведению технического обследования,  

при участии в судебном заседании: 

от истца: 04.03.2019 и 05.03.2019 – ФИО2, доверенность от 15.01.2019, ФИО3, доверенность от 09.04.2018;  

от ответчика: 04.03.2019 и 05.03.2019 – ФИО4, доверенность от 14.09.2016;  от АНО «Коллегия судебных экспертов»: 04.03.2019 – эксперт ФИО5;  

руководствуясь ст.ст. 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Администрации Карачевского района, г. Карачев Брянской  области, удовлетворить.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «СтройТоргСервис», г.  Брянск, в срок до 30 апреля 2019 года устранить недостатки работ, выполненных по  муниципальному контракту № 0127300006914000048-0168283-01 от 03.09.2014 на объекте  «Реконструкция центральной площади в г. Карачеве Брянской области», выявленных в  период гарантийной эксплуатации, согласно экспертному заключению экспертов АНО  «Коллегия судебных экспертов» № 542Э/18 от 08.10.2018 выполнить:  

 - демонтаж облицовки гранитными плитами полированными толщиной 28 мм  горизонтальных поверхностей бетонных стен ограждения газонов площадью 164 кв. м;  

 - очистку горизонтальных поверхностей бетонных стен ограждения газонов от  загрязнений площадью 164 кв. м;  

 - демонтаж облицовки гранитными плитами полированными толщиной 18 мм  вертикальных поверхностей бетонных стен ограждения газонов площадью 164 кв. м;  

 - очистку вертикальных поверхностей бетонных стен ограждения газонов от  загрязнений площадью 164 кв. м;  

 - облицовку вертикальных поверхностей бетонных стен ограждения газонов  гранитными плитами полированными толщиной 30 мм площадью 164 кв. м;  

 - облицовку горизонтальных поверхностей бетонных стен ограждения газонов  гранитными плитами полированными толщиной 30 мм площадью 164 кв. м.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройТоргСервис», г.  Брянск, в пользу Администрации Карачевского района, г. Карачев Брянской области,  78 000 руб. судебных расходов, в том числе 15 000 руб. за проведение технического  обследования, 63 000 руб. за проведение судебных экспертиз.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройТоргСервис», г.  Брянск, в доход федерального бюджета Российской Федерации 6 000 руб.  государственной пошлины по иску.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца в Двадцатый арбитражный  апелляционный суд, г. Тула.  

 Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области. 

 Судья Н.И. Матвеева