142/2023-153660(1) 

 Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-76/2023

г. Хабаровск

10 августа 2023 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого,  при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Бетон-сервис» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  относительно предмета спора, акционерное общество «Горизонт»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО2  

об обязании выполнить мероприятия по технологическому  присоединению к сетям энергопринимающего устройства, взыскании  405 265 руб. 72 коп. (с учетом уточнения)  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать открытое акционерное общество «Российские железные  дороги» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) выполнить мероприятия  по технологическому присоединению к своим сетям энергопринимающего  устройства, расположенного на земельном участке общества с ограниченной  ответственностью «Бетон-сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, п. Хасан, кадастровый номер  27:23:0041224:570, в рамках договора об осуществлении технологического  присоединения от 13.05.2022 № 44172-04-22/ДВОСТ в течение 60  календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу.  

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные  дороги» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Бетон-сервис» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) неустойку за неисполнение договора об осуществлении  технологического присоединения от 13.05.2022 № 44172-04-22/ДВОСТ  

за период с 14.11.2022 по 09.08.2023 в размере 405 265 руб. 72 коп., и далее в  размере 1 506 руб. 56 коп. за каждый день просрочки, начиная с 10.08.2023  по день фактического исполнения обязательства, судебные расходы по  оплате государственной пошлины по иску в сумме 8 772 руб.  

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные  дороги» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Бетон-сервис» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 1 500 руб. за каждый день  неисполнения решения суда по истечении 60 дней с даты вступления  решения суда в законную силу и до момента его фактического исполнения.  

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные  дороги» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину по иску в размере 8 333 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд  апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья К.А. Полегкий  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 05.04.2023 4:04:00

Кому выдана Полегкий Кирилл Александрович