АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-15076/2022

г. Владивосток

16 марта 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 марта 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 16 марта 2023 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Плехановой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Первый Контур" (ИНН 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 42 023 233 рублей, 

об обязании выполнить, завершить работы, взыскании неустойки и процентов

при участии в судебном заседании:

от истца (онлайн, до перерыва) - ФИО2, доверенность от 22.12.2022, паспорт, диплом

от ответчика - не явились, извещены,

установил:

акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина"  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Первый Контур" (далее - ответчик) об обязании в течение трёх месяцев со дня вступления решения в законную силу выполнить следующие работы по капитальному ремонту корпуса № 22 АО ААК «Прогресс» и сдать надлежащим образом результат работ АО ААК «Прогресс»: 

1. Устранить замечания к Исполнительной документации раздела «Генеральный план» (подготовительные работы, вертикальная планировка, автодороги и площадки, озеленение, благоустройство) и актам выполненных работ, для чего: завершить в полном объёме строительно-монтажные работы в соответствии с техническим заданием (Приложение N 3 к дополнительному соглашению N б к Договору от 20.06.2016 Х ОК3507) и на основании рабочей документации «Генеральный план» (шифр проекта: 1 86-ГП, 1 86-2-ГП); привести и предоставить в полном объёме подписанную между сторонами исполнительную документацию или иную подтверждающую документацию на основании фактически выполненных работ, в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128), в соответствии с техническим заданием (приложение № 3 к дополнительному соглашению № 6 к договору от 20.06.2016 № 0К3507) и на основании рабочей документации «Генеральный план» (шифр проекта: 1 86-ГП, 186-2-ГП);  после завершения строительно-монтажных работ и предоставления исполнительной документации или иной подтверждающей документации в полном объёме заказчику, предоставить корректировочные акты выполненных работ по форме КС-2 для последующей оплаты или снятия с ранее закрытых форм; принять расценки согласно локальным сметным расчётам № 302-1, № 302-2, № 302-3, Х 302-4, № 302-5, а объёмы работ — согласно фактически выполненным.

2. Устранить замечания к Исполнительной документации раздела «Конструкции железобетонные» и актам выполненных работ, для чего:         привести и предоставить в полном объёме подписанную между сторонами исполнительную документацию или иную подтверждающую документацию на основании фактически выполненных работ, в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128), в соответствии с техническими заданиями (Приложение № 3 к дополнительному соглашению № 6 и Приложение № 2 к дополнительному соглашению № 7 к договору от 20.06.2016 № ОК3507) и на основании рабочей документации «Конструкции железобетонные» (шифр проекта: 186-1 -КЖ); после предоставления исполнительной документации или иной подтверждающей документации в полном объёме заказчику, предоставить корректировочные акты выполненных работ по форме КС-2 для последующей оплаты или снятия с ранее закрытых форм; принять расценки согласно локальному сметному расчёту № 293, а объёмы работ - согласно фактически выполненным.

3. Завершить работы по водоснабжению и канализации, выполнить пусконаладочные работы, передать систему в эксплуатацию, для чего: завершить монтажные работы по сборке насосной станции пожаротушения, доукомплектовать ответные фланцы задвижек и обратных клапанов болтами; установить отборные устройства контрольно-измерительных приборов в количестве 3-х штук;  завершить электромонтажные работы по подключению кабельных линий шкафа управления насосной станции пожаротушения; перенести водонагреватель установленный в участке приготовления красок в осях Л-М/23-24 в проектное место установки малярного отделения «Высокой зоны» в осях Л-М/21-22; провести работы по устройству второго ввода холодной воды в соответствии с проектом; выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию.

4. Завершить работы по монтажу системы воздухоснабжения, выполнить пуско-наладочные работы, передать систему водукоснабжения в эксплуатацию, для чего: в компрессорной № 1 расположенной в осях Л-Н/19/22: установить контрольно-измерительные приборы: отборное устройство для измерения давления, отборное устройство для измерения расхода; установить манометры на ресиверах (3 шт.) в соответствии с п. 340, п. 341 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 

В компрессорной № 2 расположенной в осях Л-Н/19/22:  восстановить работоспособность компрессора GА 15 FF ITJ 057381;  установить контрольно-измерительные приборы: отборное устройство для измерения давления, отборное устройство для измерения расхода;  установить крепления трубопровода на линии подключения фильтров (позиция 2, 3 согласно спецификации К 186-1-ВС). 

Устранить замечания по прокладке трубопроводов воздуха низкого давления в осях А-Н/22-25, для чего: выполнить опознавательную окраску трубопровода сжатого воздуха, смонтированного в помещении в осях Л-М/23-24 в соответствии с ГОСТ 14202-69 от 07.02.1969 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»; установить редуктор давления с манометром в осях К-Л/23-24 (позиция 4 согласно спецификации № 186-1-ВС) в соответствии с проектной документацией; установить манометры на трубопроводе, указанные в проектной документации в осях Б-Г/21-22, Е-Ж/21-22; установить крепление трубопровода в осях К-Л/22; устранить врезку трубопровода в осях Б-Г/21-22 не указанную в проекте, опознавательную окраску трубопровода сжатого воздуха выполнить в соответствии с ГОСТ 14202-69 от 07.02.1969 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки». Устранить замечания к прокладке трубопроводов воздуха низкого давления в осях А-Н/1-12, для чего: установить крепление трубопровода в осях B-Г/5, Г-Д/5, К-Л/5; установить трубопровод с запорной арматурой для сброса конденсата в осях М-Н/5; провести пуско-наладочные работы, передать систему воздухоснабжения в эксплуатацию. 

5. Выполнить пуско-наладочные работы по наружному газоснабжению, передать систему в эксплуатацию, для чего: завершить работы по монтажу электрокабеля для обогрева участка газопровода к газовой горелке П1; выполнить монтаж тепловой изоляции трубками K – FLEX AL CLAD на участке газопровода к газовой горелке П1; выполнить опознавательную окраску на поверхности тепловой изоляции по всему участку газопровода согласно ГОСТ 14202-69 от 07.02.1969 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»; провести пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию. Предоставить исполнительную документацию согласно следующему перечню: документы подтверждающие строительную готовность участка газопровода: акт монтажа приточно-нагревательных установок Janka (4 шт.); акт испытания участка газопровода на плотность и герметичность; акт монтажа участка газопровода; исполнительная схема прокладки газопровода (с указанием установленной арматуры); документацию завода изготовителя на технические устройства (паспорта, инструкции по эксплуатации);  документы подтверждающие качество применяемых технических устройств и материалов (сертификаты качества, декларации о соответствии); строительный паспорт участка газопровода среднего давления; акт монтажа греющего кабеля, акт испытаний греющего кабеля; акт готовности к вводу в эксплуатацию системы пожаротушения («низкой зоны»); акт готовности к вводу в эксплуатацию системы контроля ПДК (предельно допустимой концентрации газов) («низкой зоны»); готовности к вводу в эксплуатацию аварийных вентиляционных систем («низкой зоны»). Документация на проведение пуско-наладочных работ:  программу пуско-наладочных работ; акт о проведении ПНР на каждую горелку Weishaupt; акт комплексного опробования всей системы газоснабжения корпуса. 

6. Поставить технологическое оборудование в полном объёме, передать установленное оборудование в эксплуатацию, выполнить пусконаладочные работы, для чего: выполнить монтаж оборудования - мойки окрасочных пистолетов полуавтоматической DRESTER 3600;  передать в эксплуатацию миксер промышленный универсальный МНУ 150 PALIZH; провести пуско-наладочные работы, передать оборудование в эксплуатацию. 

7. Передать систему теплоснабжения в эксплуатацию. 

8. Завершить работы по устройству отопительной системы, передать систему в эксплуатацию, для чего: восстановить работоспособность и подключить систему отопления помещений в осях 22-25/А-Б (1 этаж и пристройка); восстановить работоспособность и подключить систему отопления помещений в осях 1-3/А-Б (1 этаж и пристройка); подключить регистры отопления в осях 25/Б-К (1 этаж) к системе теплоснабжения в соответствии с проектной документацией, для чего подключить ввод теплоносителя в отопительный прибор к подающему трубопроводу теплоснабжения, подключить выход теплоносителя из отопительного прибора к оборотному трубопроводу теплоснабжения; подключить тепловую завесу У-6а в осях 25/К (1 этаж) к системе теплоснабжения в соответствии с проектной документацией, для чего подключить ввод теплоносителя в тепловую завесу к подающему трубопроводу теплоснабжения, подключить выход теплоносителя из тепловой завесы от оборотного трубопровода теплоснабжения; передать систему в эксплуатацию. 

9. Выполнить пуско-наладочные работы индивидуального теплового пункта, передать систему в эксплуатацию, для чего: обеспечить работу шкафа управления насосной станции в составе 2-х насосов центробежных Wilo-IL 125/150-18.5/2 в автоматическом режиме; обеспечить возможность контроля и управления насосной группой в автоматическом режиме;  предоставить техническую документацию, паспорт, руководство по эксплуатации на шкаф управления насосной станции; обеспечить работу блочного теплового пункта DSE MAXIC индивидуального теплового пункта в автоматическом режиме, для чего: привести в работоспособное состояние узел приготовления горячей воды на блочном тепловом пункте DSE MAXIC индивидуального теплового пункта; подключить к электропитанию насос на блочном тепловом пункте DSE MAXIC индивидуального теплового пункта; заменить отборное устройство контрольно-измерительного прибора (манометр); обеспечить работоспособность узла учёта контрольноизмерительных приборов и аппаратуры - тепло-вычислитель; настроить тепловычислитель Взлёт ТРСВ в индивидуальном тепловом пункте на рабочие параметры теплоносителя; заземлить преобразователь расхода в индивидуальном тепловом пункте; обеспечить возможность обслуживания фильтра сетчатого диаметром 250 мм. - выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию.

10. Завершить работы по устройству вентиляции, тепловых завес, отопительных агрегатов, выполнить пуско-наладочные работы, передать систему вентиляции в эксплуатацию, для чего: в приточной вентиляции:  выполнить перепрограммирование сетевых контроллеров приточных систем П1 - П4 малярное отделение низкая зона, тип установок KLMOD 31 L=23100 м3/ч, вентилятор с электродвигателем 11 кВт 1470 об/мин.;  провести пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию; выполнить монтаж капиллярного датчика температурного реле защиты от замораживания согласно технической документации и руководства по монтажу в приточных системах П5, П6, П7 малярное отделение высокая зона, тип установки KLG 250 L=26200 м3/ч, вентилятор с электродвигателем 11 кВт, 1460 об/мин.; заменить циркуляционный насос приточной системы П8 административно-бытовые помещения, тип установки К1.бО 040 L=2340 м3/ч, вентилятор с электродвигателем 0.46 кВт, 1390 об/мин.; заменить циркуляционный насос приточной системы П9 помещения категории «В» в осях 12-14, тип установки KLG 100 L=1000м3/ч, вентилятор с электродвигателем 4.0 кВт, 1435 об/мин.;  выполнить монтаж магистральных воздуховодов в соответствии с проектной документацией, для чего: перенести воздуховод в помещение электриков, установить противопожарный клапан с электрическим приводом; в помещении генераторной воздуховоды смонтировать в проектном положении, подключить электрический привод противопожарного клапана; установить решётки в помещении загрузки; в помещении МАСК установить решётки в соответствии с проектной документацией, в помещении отдыха маляров установить второй диффузор, а имеющийся диффузор подсоединить к воздуховоду, устранить зажатие кабеля между опорой воздуховода и его опорой. выполнить монтаж капиллярного датчика температурного реле защиты от замораживания согласно технической документации и руководству по монтажу в приточных системах П 10, П 11 ангар доводки изделий, тип установок KLG250 L=28500 м3/ч, вентилятор с электродвигателем 11 кВт, 1460 о6/мин.; в приточной системе П12 гараж, тип установки КLG100 L=9500 м3/ч, вентилятор с электродвигателем 3 кВт, 1410 об/мин., доукомплектовать смесительный узел клапаном регулирования с электроприводом, запорной арматурой, перенести узел регулирования для обеспечения доступа к секциям приточной установки, выполнить монтаж магистральных воздуховодов согласно проектной документации, нанести огнезащитное покрытие воздуховодов согласно проектной документации; в приточной системе П13-13/1 аккумуляторные, тип установки KLG 035 L=9500 м3/ч L=500 м3/ч (резерв), вентилятор с электродвигателем 2.2 кВт, 2840 об/мин 1 кВт 3100 об/мин., доукомплектовать приточную установку водяным калорифером, выполнить монтаж капиллярного датчика температурного реле защиты от замораживания согласно технической документации и руководству по монтажу, установить реле защиты в соответствии со ссылочной документацией, установить смесительный узел, доукомплектовать приточную установку комплектным узлом регулирования, выполнить монтаж магистральных воздуховодов согласно проектной документации; установить балансиры противопожарных обратных клапанов и выполнить регулировку по направлению потока; нанести огнезащитное покрытие воздуховодов; установить электромеханический привод противопожарного клапана; в приточной системе П 14 встроенные помещения в осях 1-4, тип установки KLG 310  L=12300м3/ч, вентилятор с электродвигателем 4.0 кВт, 1435 об/мин., заменить водяной калорифер (теплообменник), доукомплектовать приточную установку воздуха фильтром на входе потока воздуха, доукомплектовать систему автоматизации приборами контроля реле потока воздуха, температурным датчиком приточного воздуха в воздуховоде, температурным датчиком обратного теплоносителя, доукомплектовать щит управления электрическим оборудованием автоматизации и контроллером, завершить электрические подключения, доукомплектовать узел регулирования смесительный клапаном балансировочным, завершить электрические подключения узла регулирования, выполнить монтаж магистральных воздуховодов согласно проектной документации: нанести огнезащитное покрытие воздуховодов, установить дроссель клапан, смонтировать воздуховоды в помещении компрессорной в соответствии с проектным решением; обеспечить доступ к секциям приточной установки; в приточной системе П15 компрессорная в осях 20-21 по ряду Н, тип установки FLG 018 L=1650м3/ч, вентилятор с электродвигателем 1 кВт, 3100 об/мин., обеспечить плотное прилегание температурного датчика обратной воды (при монтаже закрепить хомутами, заизолировать места присоединения); в тепловых завесах У 1.1 - У 1.2 в осях 14-16 ряд А, вентилятор центробежный ВР85-77 L=60000м3/ч, вентилятор с электродвигателем 22 кВт, 750 об/мин., закрепить опорную раму; в тепловых завесах УЗ. 1 - УЗ .2 в осях 4-8 ряд А, вентилятор центробежный ВР 180-55 L=90000 м3/ч, вентилятор с электродвигателем 55 кВт, 1000 об/мин., выполнить монтаж оборудования таким образом, чтобы оси валов вентилятора и электродвигателя находились на одной прямой, выполнить монтаж пружинных виброизоляторов для обеспечения равномерной осадки; в тепловой завесе УЗ .2 заменить электродвигатель, подключить силовой кабель, завершить электромонтажные работы; в тепловых завесах УЗ.З - У3.4 в осях 8-12 ряд А, вентилятор центробежный ВР 180-55 L=90000 м3/ч, вентилятор с электродвигателем 55 кВт, 1000 об/мин., выполнить монтаж пружинных виброизоляторов для обеспечения равномерной осадки, восстановить целостность воздуховода; в тепловых завесах У4.1 - У4.2 в осях 7-9 ряд Н, вентилятор центробежный ВЦ4-70 L=60000 м3/ч, вентилятор с электродвигателем 22 кВт, 750 об/мин., заменить электродвигатель в У4.1, подключить электросиловой кабель, завершить электромонтажные работы, выполнить монтаж оборудования в соответствии со ссылочной документацией и таким образом, чтобы оси валов вентилятора и электродвигателя находились на одной прямой, выполнить монтаж пружинных виброизоляторов для обеспечения равномерной осадки; в воздушной завесе У5 - У5А ворота по оси 25, тип агрегата 1203AdWU L=4500 об/мин., доукомплектовать систему автоматизации шкафом распределительным, термостатом ТА-3, термостатом накладным, выключателем концевым; в воздушной завесе У6 - У6А ворота по ряду Н, L=4500 м3/ч, тип агрегата 1203 AdWU L=4500 мз/ч 0.75 кВт., доукомплектовать систему управления и автоматизации шкафом распределительным, термостатом ТА-3, термостатом накладным, выключателем концевым; завершить электрические подключения систем и электромеханических приводов приточной вентиляции, тепловых завес, отопительных агрегатов. 

Завершить электромонтажные работы; привести в работоспособное состояние электромеханические приводы в количестве 8 шт., установить недостающие 6 шт.; устранить нарушения при проведении монтажных работ по прокладке кабельных линий, для чего закрепить электросиловые кабельные линии, линии управления вентиляционного оборудования, узлы регулирования и магистральные кабельные линии, смонтировать по стенам и тросам таким образом, чтобы они не присоединялись к приточным установкам и системами транзитных воздуховодов; нанести маркировочные этикетки и таблички шкафов управления, пускорегулирующих устройств, частотных преобразователей, контактны датчиков, выполнить работы по маркировке шкафов управления, пускорегулирующих устройств, частотных преобразователей, контактных датчиков согласно проектной документации; выполнить работы по заделке узлов прохода воздуховодов через кирпичные стены и перегородки, каркасные перегородки и сэндвичпанели, выполнить работы по заделке узлов прохода воздуховодов через кирпичные стены и перегородки, каркасные перегородки и сэндвич-панели; выполнить крепление воздуховодов таким образом, что их вес не передавался на гибкие вставки (устранить зажатие и перекосы), опорно-крепёжные системы воздуховодов выполнить в соответствии со ссылочной документацией и устранить передачу веса воздуховодов на гибкую вставку (транзитных воздуховодов); восстановить герметичность магистральных воздуховодов в местах соединения, закрепить воздуховоды на существующих опорных конструкциях и усилить опорные конструкции крепёжными элементами в местах крепления к строительным конструкциям; устранить провисание воздуховодов, доукомплектовать опорнокрепёжные конструкции магистральных воздуховодов; выполнить работы по настройке и регулировке вентиляционного оборудования, выполнить настройку (регулировку по потоку воздуха) прямоточных воздухораспределителей, клапанов противопожарных взрывозащищённых, клапанов обратных взрывозащищённых, клапанов противопожарных с электромеханическим управлением; устранить передачу веса узлов регулирования на теплообменники, обеспечить возможность облуживания узлов регулирования, доукомплектовать смесительные узлы опорно-крепёжными элементами (стойками), чтобы их вес не передавался на водяные калориферы, зафиксировать установленные опорно-крепёжные конструкции к основанию, зафиксировать трубопроводы к существующим опорно-крепёжным конструкциям, нанести теплоизоляцию трубопроводов в полном объёме; выполнить защитное заземление вентиляционного оборудования, шкафов управления, воздуховодов; выполнить отчистку оборудования систем (снаружи и внутри): калориферов водяных нагревателей (алюминиевые пластины засорены плотным наростом грязи), фильтров на входе потока воздуха (засорены); выполнить работы по устройству теплоизоляции (огнезащитной изоляции) согласно проектной документации на техническом этаже вентиляционной камеры отм. + 12,700 в осях 12-14/А-Н; выполнить антикоррозийную обработку опорно-крепёжных конструкций (грунтовка, окраска); убрать строительный мусор на технических этажах и в занимаемых помещениях. 

В вытяжных системах:  в вытяжных системах В 1.1, В 1.2, В 1.3 малярное отделение низкая зона, вентиляторы центробежные ВДП-RU-1000, L=4500 м3/ч, 75 кВт, установка ЯТОГАН 99,0/ФПА/3000/СF (2 рабочих 1 резервный), завершить работы по устранению замечаний согласно гарантийному письму № 06-04-3 от 06.04.2021, а именно: выполнить электрическое подключение электромеханических приводов воздушных заслонок УВЗКэ800 в количестве 3 шт., нанести маркировочные этикетки и таблички шкафов управления, пускорегулирующих устройств, частотных преобразователей, контактных датчиков, укомплектовать напольные решётки краскоулавливающими фильтрами из стекловолокна Point ор, заменить виброизоляторы ВР-230 в количестве 12 шт., заменить гибкую вставку перед заслонкой УВЗКэ800, выполнить монтаж вытяжного воздуховода и зонта ЗТК 1250 в соответствии с проектной документацией, выполнить замену чаш ГРЯ в количестве 5 шт.; в вытяжных системах В2, В3 малярное отделение низкая зона, крышные вентиляторы КРОС6-6,3В L=12100 м3/ч, 4 кВт 1500 об/мин., восстановить систему В2 до работоспособного состояния; в вытяжной системе В4 - В4.1 краскоприготовительная, центробежные вентиляторы ВР85-77В L=4650 м3/ч, 1 .5кВт 1500 об/мин., выполнить поставку и монтаж шкафа управления с частотным регулированием; в вытяжных системах В5 - В9 малярное отделение высокая зона, крышные вентиляторы КРОС9-6.3В L=14300 м3/ч, 4кВт 1000 об/мин., выполнить работы по восстановлению систем (устранить произвольное срабатывание автоматического выключателя по короткому замыканию при включении с пускорегулирующего устройства), произвести монтаж оборудования (закрепить нижнюю рамку вентиляторов к монтажному стакану, закрепить распорные втулки между рамками гибких вставок); в вытяжной системе В 11 служба подготовки, канальный вентилятор KVFU160C L=290м3/ч, 0/105 кВт 2480 об/мин., заменить установленный вентилятор ВКт-160 на соответствующий проектной документации; в вытяжной системе В 13 помещение РСО центробежный вентилятор ВР85-77 L=5750м3/ч, 1.5 кВт 1500 об/мин., выполнить монтаж магистральных воздуховодов согласно проектной документации; в помещении загрузки завершить работы по монтажу воздуховода, установить вентиляционную решётку; в помещении МАСК установить вентиляционную решётку, а установленные решётки заменить на соответствующие проекту. 

Восстановить работоспособность системы; в вытяжной системе В 14 комната отдыха маляров, канальный вентилятор ВКт-315 L=1200 м3/ч, 0.25кВт 2700 об/мин., восстановить работоспособность системы, выполнить работы по регулировке и настройке обратного клапана; в вытяжной системе В 15 санузлы, канальный вентилятор ВКт-200 L=370м3/ч., монтаж системы воздуховодов выполнить в соответствии с проектной документацией, доукомплектовать систему обратным клапаном RSK; в вытяжной системе В 16 генераторная, центробежный вентилятор ВР85-77 L=1400 м3/ч, 0.25 кВт 1500 об/мин., выполнить монтаж магистральных воздуховодов согласно проектной документации; - в вытяжной системе В 17 кладовые, канальный вентилятор ВКт-160 L=290 м3/ч, 0.100 кВт 2700 об/мин., доукомплектовать систему воздуховодов обратным клапаном RSK, восстановить работоспособность и обеспечить безаварийную работу вентилятора, устранить шум при включении электродвигателя; в вытяжной системе В 18 Душевые, канальный вентилятор ВКт-250 L=550 м3/ч, 0.180 кВт 2600 об/мин., доукомплектовать систему воздуховодов обратным клапаном RSK, установить крышку клемной коробки электрического подключения электродвигателя для защиты от поражения электрическим током; в вытяжной системе В 19 шкафчики в гардеробе, канальный вентилятор ВКт-200 L=350 м3/ч, 0.145 кВт 2650 об/мин., доукомплектовать систему воздуховодов обратным клапаном RSK, восстановить работоспособность и обеспечить безаварийную работу вентилятора, устранить шум при включении электродвигателя; в вытяжной системе В20-В22 ангар доводки, крышные вентиляторы ВКР-6.3 L=9500м3/ч, 1 .5кВт 1000 об/мин., выполнить монтаж магистральных воздуховодов согласно проектной документации (установить гибкую вставку), восстановить работоспособность системы В22, восстановить работоспособность электродвигателя системы В20; в вытяжной системе В23, В24 ангар доводки нижняя зона, центробежный вентилятор ВР85-77 L=14250 м3/ч, 4кВт 1000 об/мин., доукомплектовать систему воздуховодов В24 опорно-крепёжными конструкциями магистрального воздуховода (вертикальном участке подъём до отм. +20.600); в вытяжной системе В25-В25.1 (основной-резервный) спецкомната центробежный вентилятор ВР85-77 L=1500 м3/ч, 0.37кВт 1500 об/мин., доукомплектовать опорную раму виброизоляторами в количестве 2 шт.; в вытяжной системе В27 помещение ПРИН, выполнить регулировку обратного клапана канального вентилятора ВРКн-3.15-4 L=1300 м3/ч, 0.25 кВт 1500 об/мин.; в вытяжной системе В30 ГСМ местный отсос, выполнить регулировку обратного клапана центробежного вентилятора ВР85-77 L=7500 м3/ч, 5.5кВт 1500 об/мин.; в вытяжной системе В31 (на лето) ГСМ осевой вентилятор В06-300 L=3500 м3/ч, 0.37кВт 1500 об/мин., выполнить регулировку вентилятора (совместить геометрический центр вала и центр массы); в вытяжной системе В32, В32.1 заменить эжектор аккумуляторных щелочных центробежных вентиляторов ВР85-77 L=2000 м3/ч, 1.1 кВт 3000 об/мин., выполнить монтаж эжектора согласно технической документации и руководству по монтажу, выполнить монтаж магистральных воздуховодов согласно проектной документации, а именно: установить защитные решётки AIR 30 для вентиляторов ЕСК - 2шт.; установить фланец опорный; установить обратные клапаны - 2шт.; в вытяжной системе В33, В33.1 заменить эжектор аккумуляторных кислотных центробежных вентиляторов ВР85-77 L=4000 м3/ч, 2.2 кВт 4000 об/мин., выполнить монтаж эжектора согласно технической документации и руководству по монтажу, выполнить монтаж магистральных воздуховодов согласно проектной документации, а именно: установить защитные решётки AIR 30 для вентиляторов ECR - 2 шт.; установить фланец опорный; установить обратные клапаны -2 шт.; в вытяжной системе В36 компрессорная в осях 2-3 по ряду А, канальный вентилятор KVFU160C L=290 мз/ч, 0.105 кВт 2480 об/мин., завершить электромонтажные работы по электроподключению электродвигателя.; в вытяжной системе дымоудаления ДУ 1 помещение УЗУ центробежный вентилятор ВР85-77 ДУ L=7300 м3/ч, 4 кВт 1500 об/мин., выполнить монтаж магистральных воздуховодов согласно проектной документации, привести в соответствие с проектной документацией воздухораспределительную камеру на отм. + 6,700; в вытяжной системе дымоудаления ДУ2 помещение генераторной центробежный вентилятор ВР85-77 ДУ L=8900 мз/ч, 4 кВт 1500 об/мин., произвести монтаж воздуховодов в соответствии с проектной документацией, установить клапан дымовой с электромеханическим приводом, выполнить регулировку огнезадерживающего обратного клапана; завершить электромонтажные работы по подключению вытяжных систем вентиляции и электромеханических приводов; заменить электромеханические приводы вытяжных систем вентиляции в количестве 5 шт., установить 1 шт.; закрепить электросиловые кабельные линии, линии управления вентиляционного оборудования, узлов регулирования, а также магистральные кабельные линии, смонтированные по стенам и тросам таким образом, чтобы они не присоединялись к приточным установкам и системам транзитных воздуховодов; выполнить работы по маркировке шкафов управления, пускорегулирующих устройств, частотных преобразователей, контактных датчиков согласно проектной документации; выполнить работы по заделке узлов прохода воздуховодов через кирпичные стены и перегородки, каркасные перегородки и сэндвичпанели; выполнить крепление воздуховодов таким образом, чтобы их вес не передавался на гибкие вставки (гибкие вставки зажаты, перекошены); восстановить герметичность магистральных воздуховодов в местах соединения, закрепить воздуховоды на существующих опорных конструкциях, усилить опорные конструкции крепёжными элементами в местах крепления к строительным конструкциям; доукомплектовать опорно-крепёжные конструкции магистральных воздуховодов для устранения провисания; выполнить настройку (регулировку по потоку воздуха) прямоточных воздухораспределителей, клапанов противопожарных взрывозащищённых, клапанов обратных взрывозащищённык, клапанов противопожарных с электромеханическим управлением; выполнить защитное заземление вентиляционного оборудования, шкафов управления, и сети магистральных воздуховодов; выполнить отчистку оборудования от загрязнения; завершить работы по монтажу систем воздуховодов согласно проектной документации, выполнить работы по устройству огнезащитной изоляции согласно проектной документации на отм. + 15,410 и на техническом этаже вентиляционной камеры отм. + 12,700 в осях 12-14/А-Н; выполнить антикоррозийную обработку опорно-крепёжных конструкций (грунтовка, окраска); выполнить приёмо-сдаточные испытания систем с оформлением исполнительной документацию систем ОВиК. 

Предоставить исполнительную документацию согласно следующему перечню: общий журнал работ и специальные журналы: общий журнал работ; журнал сварочных работ; журнал антикоррозийной защиты сварных соединений;  журнал входного контроля; Исполнительные схемы систем отопления и систем вентиляции. 

Акты освидетельствования скрытых работ: монтаж систем отопления и крепления к конструкциям здания; монтаж систем вентиляции и крепления к конструкциям здания; антикоррозийная обработка трубопроводов (грунтовка, покраска); устройство теплоизоляции систем отопления и вентиляции; устройство огнезащитной изоляции систем вентиляции; устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и перегородки (гильзы, герметизация). 

Акты испытаний приёмки: акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения; акт на промывку тепловой сети; акт теплового испытания систем отопления на эффект действия; акт индивидуального испытания оборудования; акт проверки приборов и средств автоматизации; ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации; акт приёмки в эксплуатацию систем автоматизации; акт об окончании монтажных работ; акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения; Паспорт систем вентиляции. инструкции по эксплуатации. 

Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарногигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. Документы согласования отступлений от проекта при строительстве; выполнить пуско-наладочные работы, передать системы в эксплуатацию. 

11. Выполнить пуско-наладочные работы системы кондиционирования, передать систему в эксплуатацию, для чего выполнить пусконаладочные работы сплит-системы генераторная К 1 в составе нар. блок RZQ200 С, внутр. блок FAQ100 В-2шт., диспетчерской К2 в составе нар. блок, внутр. RXS25EVM, блок FTX25EVM, серверной К3-К4 в составе нар. блок RYN25L, внутр. блок FTYN25L, передать системы в эксплуатацию. 

12. Завершить работы по устройству охранной сигнализации, выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию, для чего: установить аккумуляторные батареи в кол-ве 2 шт. в помещении гаража пожарных машин; выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию. 

13. Завершить работы по устройству структурной кабельной сети, по телефонизации, выполнить пуско-наладочные работы, передать системы в эксплуатацию, для чего: 

В аппаратно-коммутационной комнате (АКК) в осях 13-14/В-Г Шкаф 1ABD: провести маркировку волоконно-оптического кабеля, указать марку кабеля, длину, дату монтажа и тестирования;  закрыть металлический лоток, зачистить заусенцы в месте отреза лотка, которые могут повредить кабельные линии; провести маркировку шкафа 1 ABD, нанести номера кабелей на порты патчпанелей, провести маркировку магистральных телефонных кабелей, указать марку кабеля, длину, дату монтажа и тестирования; убрать строительный мусор, убрать не промаркированные кабели; убрать мусор после установки кондиционеров в АКК, закрыть кабельканал. 

В помещении генераторной Оси: 12-14/Е-Ж: установить заглушку и тройник на кабельканал. 

В помещении ИРКа Оси: 12-13/В-Д: установить тройник, закрыть пустой порт в суппорте, все кабельные трассы уложить в кабельканал; все кабельные линии терминировать в информационные розетки. 

В кабинете Оси: 13 -14/Л-М: установить заглушку и тройник; закрепить кабель-канал, все кабельные трассы уложить в кабельканал. 

В кладовой инвентаря Оси: 12-14/Ж-И: установить накладку на стык крышки для устранения появившейся щели; закрыть свободный порт в суппорте, очистить кабельканал от строительного мусора. 

В помещении МАСК Оси: 13-14/Б-В: установить заглушки и тройники, закрыть порт в суппорте, снять защитную плёнку с кабельканала; установить внутренний угол, закрыть крышку кабельканала, установить накладку на стык кабельканала;  закрыть порт в суппорте, установить заглушку. 

В помещении ПРОСК Оси:12-13/Б-В: установить заглушку и внутренний угол, закрыть свободный порт в суппорте; установить накладку на стык крышки, установить внутренний угол; установить заглушку, установить внутренний угол. 

В производстве цеха № 116: установить накладку на стык кабельканала, установить накладку на стык крышки, закрыть свободный порт в суппорте. 

В шкафу 2АВО. Оси: 3-4В: промаркировать шкаф 2АВО, нанести номера кабелей на порты патчпанелей; идентифицировать волоконно-оптический кабель, указать марку кабеля, длину, дату монтажа и тестирования, промаркировать магистральный телефонный кабель, указать марку кабеля, длину, дату монтажа и тестирования;  зафиксировать волоконно-оптический кабель. 

В комнате отдыха Оси: 1-2/Ж-И:  установить заглушку, закрыть свободный порт в суппорте; снять защитную плёнку с кабельканала. 

В оружейной Оси: 1-3/Б-Г: установить заглушку, снять защитную плёнку с кабельканала, убрать строительный мусор; закрыть свободный порт в суппорте, установить заглушку, закрыть свободный порт в суппорте. 

В помещении ПДБ Оси: 1-3/Б-В: установить накладки на стык кабельканала и стык крышки, закрыть свободный порт в суппорте; установить накладки на стык кабельканала и стык крышки, закрыть свободный порт на суппорте. 

В слесарной оси: 1-3В-Д:  установить плоский угол, заглушки и тройник, закрыть свободный порт в суппорте. 

В производстве цеха № 116. 

Колонна в осях: 4/Б: установить заглушки, тройник, угол внешний, закрыть свободный порт в суппорте. 

В шкафу 3АВО Оси: 22/А-Б: промаркировать шкаф 3АВD, нанести номера кабелей на порты патчпанелей; промаркировать волоконно-оптический кабель, указать марку кабеля, длину, дату монтажа и тестирования, промаркировать магистральный телефонный кабель, указать марку кабеля, длину, дату монтажа и тестирования; демонтировать силовой кабель, не относящийся к данному шкафу. 

В малярной камере Оси: 18-19/Б-В:  завести кабельные линии КL97, КL98, КL99 в информационную розетку. 

В помещении службы подготовки Оси: 23-25/А-Б: восстановить целостность трубы ПВХ; уложить в кабельканал кабельные линии; закрыть кабельканал, установить заглушку, закрыть свободный порт. 

Устранить замечания по Исполнительной документации, а именно: привести в соответствие требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации» предоставленную Исполнительную документацию; дополнить состав Исполнительной документации: титульным листом с указанием объекта строительства, подписями, датами; ведомостью рабочих чертежей;  ведомостью ссылочных и прилагаемых документов; общими данными;  схемами компоновки коммутационных шкафов 1АВD, 2АВD, 3АВD;  структурной схемой подключения внешних кабельных линий, активного оборудования и информационных розеток; протоколами тестирования волоконно-оптических кабелей; протоколами тестирования телефонных кабелей; протоколами поверки на тестер медных кабельных линий и тестер оптических линий. 

Переместить данные листа 1 Исполнительной документации, АКТ освидетельствования скрытых работ (2 шт.), в раздел «Прилагаемые документы»; переместить данные листов 3-15 Исполнительной документации, сертификаты соответствия и приложения к ним (23 шт.), в раздел «Прилагаемые документы», заполнить данные листов 16-30 Исполнительной документации, кабельный журнал, о марке, количестве кабелей, длине и т.д. по проложенным кабельным линиям согласно выполненным тестам кабельных линий; удалить данные на листе 16 о кабеле КF1, поскольку работы по его монтажу не проводились; удалить данные на листе 17 Исполнительной документации о кабелях КF2, КF3-Hyperline FO-D-IN\OUT-503-8-HFFR 8х50/125 мкм., внести данные о марке, числе и сечении жил, длине кабельных линий, смонтированных вместо них одномодовых волоконнооптических кабелях; указать номера патчпанелей, номера портов патчпанелей в коммутационных шкафах 1ABD, 2АВD, 3АВD на которые терминировались кабельные линии кабели связи проводные, кабельные линии КL 1-КL 108; заполнить данные (марка, кол-во кабелей и т.д., длина) по проложенным кабельным линиям согласно выполненным тестам кабельных линийна листе 30 Исполнительной документации исключить запись о кабельной линии Кi109 как не относящейся к структурированной кабельной системе в корпусе 22. удалить данные на листе на листе 31 Исполнительной документации, Схема внешних подключений, о кабелях КF2, КF3-Hyperline FO-DIN\OUT-503-8-HFFR 8х50/125 мкм., внести данные о марке, числе и сечении жил, длине кабельных линий, смонтированных вместо них одномодовьх волоконно-оптических кабелях. исправить данные в рамке из Рабочей документации.переместить данные листа 33 Исполнительной документации, Сведения об акте освидетельствования скрытых работ (1 шт.), в раздел «Прилагаемые документы». исключить листы 34-44 Исполнительной документации; переместить данные листов 45-46 Исполнительной документации, Декларация о соответствии, в раздел «Прилагаемые документы». на листах 47-50 Исполнительной документации привести в соответствие с фактически выполненными работами данные о телефонизации, кабельного журнала. Удалить данные о кабеле КВПЭф-5е, поскольку он не использовался, предоставить данные о магистральных телефонных кабелях ПТС 1, ПТС4, ПТС 13 (маркакабеля, число и сечении жил, длина кабельной трассы), привести в соответствие данные в Исполнительной документации и выполненных работ в корпусе 22; оформить Лист 51 Телефонизация Схема структурная Исполнительной документации в соответствии с выполненными работами; на листе 52 Исполнительной документации Исполнительная схема М 27. Телефонизация: привести данные в соответствие с выполненными работами в корпусе 22, переместить данные листа 53 Исполнительной документации, акт освидетельствования скрытых работ, в раздел «Часофикация», исключить данные на листах 55-57 Исполнительной документации о сертификатах, исключить данные на листах 59-62 Исполнительной документации о сертификатах, исключить данные на листах 63-68 Исполнительной документации, электрочасофикация. Кабельный журнал, схема структурная, исполнительная схема М 28,  заполнить данные об объекте и исполнителе на листе 69 Исполнительной документации: Протокол проверки горизонтальных кабельных линий: указать реальные данные о дате и времени проведения теста; указать реальные длины кабельных линий, заполнить данные об объекте и исполнителе на листе 70 Исполнительной документации: Протокол проверки горизонтальных кабельных линий: указать реальные данные о дате и времени проведения теста; указать реальную длину кабельной линии; устранить ошибки в схеме разводки кабеля и протестировать кабельные линии: КLЗ, КL13, КL26, КL27, КL32, К149, КL50, КL58, КL76, КL80, КL84, КL85, КL88, КL89, выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию. 

14. Завершить работы по радиофикации, выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию, для чего: завершить работы по монтажу оборудования согласно проектной документации и техническому заданию, выполнить электромонтажные работы по прокладке и электро-подключению коммутационных устройств; выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию.

15. Завершить работы по электрочасофикации, выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию, для чего: завершить электромонтажные работы по электро-подключению коммутационных устройств; выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию. 

16. Завершить работы по автоматизации технологических процессов, выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию, для чего: установить оборудование согласно проектной документации и технического задания, укомплектовать шкаф КиП АР 1; завершить электромонтажные работы по прокладке и электроподключению коммутационных устройств; выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию.

17. Завершить работы по автоматизации систем отопления и вентиляции, выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию, для чего: завершить электромонтажные работы по прокладке и электроподключению коммутационных устройств;  обеспечить работоспособность в автоматическом режиме системы контроля, измерения параметров, так же выдачи импульсов в схемы управления электроприводами систем: ИТП, отопительных агрегатов А 1-А25, воздушно-тепловых завес У 1-У4, узла учёта тепловой энергии;  выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию. 

18. Завершить работы по устройству силового электрооборудования (ЭМ 1, ЭМ 2, ЭМ 3), по устройству внутреннего и наружного электроосвещения, передать систему в эксплуатацию, для чего:  установить трансформаторы СНН 220/36 в соответствии с проектом: по оси 12 установить четвёртую единицу, перенести одну единицу из помещения аккумуляторной; демонтировать дополнительные розетки напряжением 220 В от трансформаторов СНН, устроить освещение на отметке на 2 и 3 этажах, в щитах по оси 12: ЩОА-1, ЯУОА-1-1, ЯУОА-1-2, ЯУОА-1-3, ЯУО-1- 1, ЩО-1, ЩАП, ПР-5 ввод кабелей выполнить с уплотнениями, устранить механическое воздействие на изоляцию, предоставить схему ПР-11, закрыть болтовые соединения открытых токоведущих частей, - в А12Я РУСМ, ЩАП-3, ПР-3 ввод кабелей выполнить с уплотнением, устранить механическое воздействие на изоляцию; в щитах по оси 3-4: РУСМ по оси А-Б нанести маркировочные этикетки, ввод кабелей выполнить с уплотнением, устранить механическое воздействие на изоляцию, установить перемычку заземления дверцы; в ЩОА-4, ЩО-4, ЯТП нанести маркировочные этикетки; в А6Я РУСМ, ПР-7 установить перемычки заземления дверцы, выполнить в трубах прокладку кабелей розеток через АВ-25А на наружные стены здания через стеновые панели; в ПР-8 ввод кабелей выполнить с уплотнением, устранить механическое воздействие на изоляцию; ПР-9 ввод кабелей выполнить с уплотнением, устранить механическое воздействие на изоляцию; ЩАП-2 ввод кабелей выполнить с уплотнением, устранить механическое воздействие на изоляцию; - в щитах на отметке (2 этаж): У4 IЯ ввод кабелей выполнить с уплотнением, устранить механическое воздействие на изоляцию; в У42Я ввод кабелей выполнить с уплотнением, устранить механическое воздействие на изоляцию; в ЩОА-8, ЩО-8, А14Я, ПРВ-6 закрыть болтовые соединения открытых токоведущих частей; в А 17Я, ц 1.2Я, ЯТП, РУСИ У-1 изменить обозначение на проектное, указать назначение щита, закрыть болтовые соединения открытых токоведущих частей; в РУСИ У-3.3 указать назначение; в У1.1Я РУСИ, ПРВ-7 закрыть болтовые соединения открытых токоведущих частей, заземлить металлорукава; закрепить лотки, устранить провисы креплений кабелей по всему помещению, прокладку кабелей через стеновые панели выполнить в трубах; установить крышки на кабельных коробах, уложить кабели в лотки, демонтировать кабель, выходящий с ТП-20 через пол, кабель до ПРВ-7 защитить от механических повреждений, в щитах на отметке (3 этаж) А22Я, А23Я, ПРВ-8, ДУ1Я установить перемычки заземления дверцы; в В13Я, ЩО-10, ЩО-9 на вводе заменить АВ 25А на АВ 32А; подключить щиты;  установить крышки на кабельных лотках; подключить 11 взрывозащищённых светильников малярного отделения низкой зоны. В щитах наружного освещения тамбура ЯУО №1, ЯУО № 3, ЯУОНМ ввод кабелей выполнить с уплотнением, устранить механическое воздействие на изоляцию; в щитах по оси 14 (помещение цеха № 112) ЩОА-5, ЩО-5, ЯТП, ЯЛ 1-1 установить перемычку заземления дверцы, подключить щиты ЯА1-2, ЩО-2, ЯУО-2-1, ЯУО-2-2, ЯУО-2-3; пронумеровать щиты ЯУОА2-1, ЯУОА2-2, ЯУОА2-3, ЩОА; в щитах ПРВ-3, У2.2Я, У2.1Я ввод кабелей выполнить с уплотнением, устранить механическое воздействие на изоляцию; в щитах ЩУ-СЭО-1, ЩУ-СЭО-2, ЯТП компрессорной проложить кабели через стеновые панели с применением труб, закрыть кабельные лотки крышками; в ЯТП-1, ПР-12 закрыть болтовые соединения открытых токоведущих частей. На все щиты нанести надписи по принадлежности и назначению с полной расшифровкой; установить на щиты предупреждающие знаки; по всему периметру помещений корпуса нанести полосы контура заземления чёрного цвета, заземлить металлоконструкции, вентиляционные короба, токопроводящие части электроустановок и электрооборудования; заземлить кабельные лотки, установить перемычки между стыками; нанести надписи значений напряжения на установленных розетках; установить крышки на кабельных лотках; нанести маркировку на светильниках аварийного освещения, дежурного освещения, светомаскировки; разделить сети аварийного освещения и рабочего освещения на разные лотки или трубы и нанести обозначения; в ЩО указать распределение рабочих групп по секторам; в щитах управления освещением, вентиляцией указать рабочие группы по назначению; предоставить исполнительную документацию по проекту 186-1-ЭН наружное освещение; предоставить в полном объёме протоколы испытания сопротивления изоляции кабелей, в протоколах указать марки кабелей; предоставить протоколы испытаний сопротивления контура заземления, сопротивления металлосвязи (в том числе молниеотвода), полного сопротивления петли «фаза-ноль»; предоставить исполнительные схемы контура заземления с привязкой к корпусу; укомплектовать паспорта ЩОА, ЯУО (ЯУАО); внести фактические данные в паспорта типа РУСМ5111-3074, выполнить пуско-наладочные работы наружного освещения световой маскировки в режимах частичного и полного погашения согласно проектной документации, передать систему в эксплуатацию. 

19. Завершить работы по монтажу автоматической установки порошкового пожаротушения в технологической и электротехнической части, выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию, для чего: прописать программное обеспечение средств автоматизации, для выдачи импульсов в схемы управления средств пожаротушения; выполнить пуско-наладочные работы, завершить работы по электро-подключению средств пожаротушения; порошковые модули МГН « ОПАН-100» подключить к системе «АСПТ», подготовить систему порошкового пожаротушения к эксплуатации.

20. Завершить работы по монтажу автоматической установки газового пожаротушения в технологической и электротехнической части, выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию, для чего: установить оборудование согласно проектной документации и техническому заданию; выполнить электромонтажные работы по прокладке и электроподключению коммутационных устройств и средств пожаротушения; выполнить пусконаладочные работы, передать систему в эксплуатацию.

21. Завершить работы по монтажу пожарной сигнализации, охранной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполнить пусконаладочные работы, передать систему в эксплуатацию, для чего:  завершить работы по электро-подключению, подключить 12В к приборам приёмно-контрольным пожарной сигнализации правой половины «Ангара» цеха № 116 корпуса № 22; выполнить восстановление кабельной линии шкафа ПС 1, заменить приёма-контрольный прибор шкафа ПС 3; в пожарных щитах ЩПС пожарной сигнализации закрыть крышки приборов приёмно-контрольных, подписать кабели, уложить в лоток и закрепить;  по всему объекту пожарный кабель уложить в кабель-канал и закрыть крышками; приборы пронумеровать по адресам прибора системы «АСПТ» и «ОПС», предоставить распечатку по шлейфам и разделам системы, инструкцию по пользованию пожарной сигнализацией, инструкцию по пользованию «АСПТ», инструкцию по пользованию ОС; распределительные коробки закрыть крышками в малярном цехе № 112 корпуса № 22; выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию. 

22. Завершить работы по монтажу системы контроля учёта доступа, диспетчеризации выполнить пуско-наладочные работы, передать системы в эксплуатацию, для чего: завершить работы по монтажу дверных доводчиков; - выполнить монтаж шкафа автоматизации Ш31, выполнить электромонтажные работы по прокладке и электро-подключению;  установить программное обеспечение «Орион Про» средств автоматизации для выдачи импульсов в схемы управления; выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию.

23. Завершить работы по устройству автоматизации инженерных систем, выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию, для чего: выполнить электромонтажные работы по подключению блоков управления клапанами «БУОК - 4» в количестве 23 штук; выполнить электромонтажные работы по подключению кабельных линий управления для отключения вентиляционного оборудования приточной, вытяжной вентиляции, открытия клапанов дымоудаления и отключения технологического оборудования при пожаре согласно проектной документации; выполнить пуско-наладочные работы, передать систему в эксплуатацию.

24. Устранить замечания к Исполнительной документации раздела ОБС «Обследование строительных конструкций» (усиление строительных конструкций) и актам выполненных работ, для чего: предоставить в полном объёме подписанную между сторонами исполнительную документацию или иную подтверждающую документацию на основании фактически выполненных работ, в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.15.2006 № 1128), в соответствии с техническими заданиями (Приложение к 3 к дополнительному соглашению №6 к Договору ) 0К3507 от 20.06.2016) и на основании рабочей документации «Конструкции железобетонные» (шифр проекта: 186-1-ОБС); после предоставления исполнительной документации или иной подтверждающей документации в полном объёме заказчику, предоставить корректировочные акты выполненных работ по форме КС-2 для последующей оплаты или снятия с ранее закрытых форм, принять расценки согласно локальным сметным расчётам ЛСР № 271, а объёмы - согласно фактически выполненным работам. 

25. Устранить замечания к Исполнительной документации раздела КМ «Конструкции металлические» и актам выполненных работ, для чего: предоставить в полном объёме подписанную между сторонами исполнительную документацию или иную подтверждающую документацию на основании фактически выполненных работ, в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения» (утв. приказом Федеральной службы поэкологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128), в соответствии с техническими заданиями (Приложение № 3 к дополнительному соглашению № 6 к Договору № ОК3507 от 20.06.2016) и на основании рабочей документации «Конструкции железобетонные» (шифр проекта: 186-1-КМ); после предоставления исполнительной документации или иной подтверждающей документации в полном объёме заказчику, предоставить корректировочные акты выполненных работ по форме КС-2 для последующей оплаты или снятия с ранее закрытых форм; принять расценки согласно локальным сметным расчётам ЛСР № 304, а объёмы - согласно фактически выполненным работам.

26. Устранить замечания к актам выполненных работ АР «Архитектурные решения», для чего: из предоставленной заказчику исполнительной документации с номерами актов скрытых работ №№ 1 -715 выбрать объёмы работ, относящиеся к рабочей документации «Архитектурные решения» (шифр проекта: 186-1-АР); предоставить корректировочные акты выполненных работ по форме КС-2 для последующей оплаты или снятия с ранее закрытых форм; принять расценки согласно локальным сметным расчётам ЛСР № 308- 1, а объёмы- согласно фактически выполненным работам.

В случае неисполнения должником обязательства по выполнению работ в трёхмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу, истец просит  присудить в пользу Акционерного общества «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» неустойку в размере 0,01 % за каждый день просрочки, начисляемую на общую стоимость работ в размере 393 631 744 рублей (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 АПК РФ), а также истец просит взыскать с ответчика, 2 660 058 рублей 80 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на излишне перечисленную денежную сумму в размере 41 805 473 рубля за период с 15.05.2020 по 27.07.2020, и начисленных на сумму неотработанного аванса 16 069 711 рублей 05 копеек за период с 01.06.2019 по 31.12.2020,  39 363 174 рубля 40 копеек неустойки, начисленной за период с 01.06.2019 по 30.03.2022.

Ответчик о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в заседание суда не явился. В соответствии со статьей 156 АПК РФ судебное заседание проведено в его отсутствие.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме, мотивировав их ненадлежащим исполнением ответчиком обязанностей по оплате работ, выполненных по договору подряда.

Ответчик исковые требования не оспорил,  отзыв на иск не представил.

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 13 часов 00 минут 09.03.2023, по окончанию которого заседание продолжено в отсутствие представителей сторон.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

20.06.2016 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор № ОКЗ507 на выполнение функций подрядчика (далее договор), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по капитальному ремонту корпуса 22 (далее - работы), в соответствии с техническим заданием (приложение № 3 к договору) рабочей документацией, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации и передать результат работ заказчику, заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и оплатить подрядчику их стоимость в соответствии с условиями договора.

Результатом работ подрядчика по договору является отремонтированный и подготовленный к эксплуатации объект - корпус 22, расположенный на земельном участке по адресу: 

<

...> (пункт 3.2 договора). 

В соответствии с пунктом 6.15 договора (дополнительное соглашение № 1 от 29.07.2016) заказчик в течение 30 дней с даты подписания договора сторонами, перечисляет в качестве авансового платежа на расчётный 2 счёт подрядчика 40 % от цены договора, что составляет 182 298 420 рублей, в том числе НДС 18 % на основании выставленного подрядчиком счёта. 

Согласно пункту 6.1 договора, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 29.07.2016, оплате подлежат только фактически выполненные подрядчиком надлежащим образом работы. Платежи подрядчику за выполненные работы осуществляются заказчиком на основании подписанных сторонами документов формы КС-2 и КС-3, подтверждающих выполнение работ за отчётный период, с учётом удержания ранее выплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных работ. 

В соответствии с дополнительным соглашением № 7 от 17.10.2019 подрядчик обязуется, в течение 15 дней с момента подписания дополнительного соглашения, перечислить на расчетный счет заказчика излишне перечисленные денежные средства в размере 41 359 010 рублей 60 копеек с учетом НДС 18% (пункт 9).

Срок выполнения подрядчиком работ установлен до 31.05.2019 включительно (график производства работ (приложение № 2 к дополнительному соглашению № 5 к договору). 

Пунктом 6 дополнительного соглашения от 17.10.2019 № 7 к договору, в редакции протокола согласования разногласий от 03.02.2020, общая стоимость работ установлена в размере 393 631 744 рублей.

Согласно пункту 3 дополнительного  соглашения № 10 от 01.12.2021 к договору, стоимость работ составляет 2 827 440 рублей, в том числе НДС.

В соответствии с пунктом 4 дополнительного  соглашения №10 от 01.12.2021 окончание выполнения работ: 30.12.2021.

В силу пункта 3.3 договора оплата выполненных подрядчиком работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ, соответствующего дополнительного соглашения, счёта и предоставления данных документов заказчику.

Обязанность заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета заказчика (пункт 3.4 договора).

Платёжными поручениями от 15.06.2016 № 40302, от 18.11.2016 № 44720, от 27.02.2017 № 2929 истец перечислил на счёт ответчика аванс на общую сумму 182 298 420 рублей. 

Как следует из иска, ответчиком частично выполнены работы на сумму 373 227 038 рублей 95 копеек. Задолженность в виде неотработанного аванса, составила 16 069 711 рублей 05 копеек.

15.12.2020 выявлен ряд замечаний, о чём был составлен акт осмотра выполненных работ № 1-к.22, подписанный ответчиком без возражений. Срок устранения замечаний до 30.03.2021 (включительно), выявленные замечания не устранены.

Письмами от 24.01.2020 № 548/08-43, от 27.01.2020 № 548/08-41, от 05.02.2020 № 548/08-70, от 25.06.2020 № 548/08- 364, от 12.12.2020 548-0615, от 05.03.2021 № 572/ДТПМ-0140, от 25.03.2021 № 548-0189, от 04.06.2021 № 572/ДТПМ-0373, от 02.09.2021 № 572/ДТПМ0571, от 03.09.2021 № 572/ДТПМ-0583, от 09.09.2021 № ДТПМ-0594, от 25.10.2021 № 572/ДТПМ-0687 истец направлял ответчику требования о выполнении полного объёма работ, а также просил устранить выявленные замечания.

24.03.2021 № 2 572/ДТПМ-0182 истец в адрес ответчика направил претензию с требованиями об уплате неустойки за невыполнение обязательств по завершению и сдаче результата работ на сумму 16 069 711 рублей 05 копеек, о возврате излишне перечисленных денежных средств в размере 41 805 473 рублей и выплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Однако данная претензия осталась без исполнения.

Письмом от 25.03.2021 истец в адрес ответчика направил повторное требование об устранении замечаний, оставленное подрядчиком без исполнения. 

02.06.2021 сторонами совместно проведен осмотр выполненных работ, в ходе которого выявлен ряд замечаний, о чём составлен акт осмотра выполненных работ от 02.06.2021 № 22-01, подписанный ответчиком без возражений. 

03.06.2021 истец в адрес ответчика направил претензию № 572/ДТПМ-0366 с требованием об устранении замечаний (дефектов) к выполненным работам, отражённых в акте осмотра выполненных работ от 15.12.2020 № 1-к.22, которая оставлена подрядчиком без исполнения. 

В материалах дела представлено письмо истца от 31.12.2021 № 572/УД-910, содержащее  заявление о прекращении взаимных обязательств  по договору  зачетом на сумму 82 045 775 рублей 22 копейки. Между тем, доказательств направления указанного письма  ответчику в материалах дела не представлено.

В связи с  ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств  по договору, начислив неустойку за просрочку выполнения работ и проценты, истец, соблюдая претензионный порядок, обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению в силу следующего.

   Между сторонами сложились правоотношения по договору на выполнение подрядных работ, которые подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (подряд).

   Согласно статье 740  Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик (подрядчик) обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Обязанность заказчика оплатить выполненные подрядчиком работы установлена статьями 702, 711 ГК РФ.  

               В соответствии с пунктом 1  статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

   В соответствие со статьей 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»). 

В силу статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Истцом заявлено требование  о взыскании 39 363 174 рубля 40 копеек неустойки, начисленной за период с 01.06.2019 по 30.03.2022.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ надлежащее исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

            В соответствии с пунктом 14.4 договора в случае невыполнения подрядчиком обязательств по завершению и сдаче результата работ, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего договора, в сроки, предусмотренные графиком производства работ (приложение № 2 к договору), заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты пени в размере 1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости работ, указанной в п. 4.1. настоящего договора. 

Поскольку факт нарушения ответчиком сроков производства работ, подтвержден материалами дела, принимая во внимание, что соглашение о неустойке и ее размере сторонами достигнуто,  к подрядчику подлежит применению ответственность согласно условиям договора. 

Расчет судом проверен и признан методологически и арифметически верным.

Поскольку ответчиком в нарушение требований статьи 65 АПК РФ доказательств выполнения работ в установленный  договором срок в материалы дела не представлено, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований истца о взыскании неустойки в сумме  39 363 174 рубля 40 копеек.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика  1 185 630 рублей 62 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 15.05.2020 по 31.12.2020 на сумму, подлежащую возврату, как излишне перечисленные денежные средства на основании  дополнительного соглашения № 7 от 17.10.2019.

Статьей 395 ГК РФ установлено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Поскольку судом установлено нарушение ответчиком обязательств по договору, признав обоснованным начисление процентов за пользование чужими денежными средствами данное требование признается обоснованным и удовлетворяется судом.

  Как указал истец, задолженность ООО "Первый Контур" перед АО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина" по договору № ОКЗ507 от 20.06.2016 в виде неотработанного аванса, составила 16 069 711 рублей 05 копеек. 

В силу статьи 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

 Между тем, несмотря на  предложение суда представить акты выполненных  работ, с целью соотнесения платежей по договору с  имущественным предоставлением ответчика, истец данные документы не представил,  в материалах дела также отсутствуют доказательства расторжения договора.

 Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Виду изложенного суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения исковых требований в сумме 1 474 428 рублей 18 копеек в части взыскания процентов, начисленных на сумму неотработанного аванса 16 069 711 рублей 05 копеек за период с 01.06.2019 по 31.12.2020.

Иные требования истца сводятся к обязанию представить исполнительную документацию, устранить замечания к ней, обязанию ответчика выполнить или завершить работы.

Суд не усматривает основания для удовлетворения указанных требований в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 8.1.46 договора при передаче заказчику для согласования документов по формам КС-2 и КС-3, подрядчик обязан предъявлять полный комплект исполнительной документации по выполненным работам.

Императивных норм, устанавливающих обязанность подрядчика передать заказчику исполнительную документацию, а также определяющих состав исполнительной документации, подлежащей передаче подрядчику, нормы действующего законодательства не содержат.

Исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, с учетом распределения бремени доказывания, проанализировав условия заключенного договора и действия сторон по его исполнению и установив, что ответчик передал истцу результат работ, при этом истец не представил доказательств того, что без истребуемой исполнительной документации, невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре, при этом, перечень исполнительной документации, подлежащий передаче подрядчиком заказчику, ни договором ни иным соглашением сторон не определен,   принимая во внимание, то истец не обосновал необходимость предоставления документации, суд  пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в указной части.

Право заказчика понудить подрядчика к исполнению обязательства в натуре действующим законодательством не предусмотрено.       

Положения статьи 12 ГК РФ, предусматривающую защиту гражданских прав, в том числе, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре, необходимо применять в совокупности с положениями статьи 397 Гражданского кодекса Российской Федерации и специальными нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими отношения сторон по договору подряда.

Статья 715 ГК РФ предусматривает право заказчика во всякое время проверять ход и качество выполняемой подрядчиком работы и отказаться от исполнения договора с возмещением убытков за счет заказчика в случае невыполнения подрядчиком работы в установленный срок или выполнения работы ненадлежащим образом.

Данная норма корреспондируется с положениями статьи 397 ГК РФ о праве кредитора в случае неисполнения должником обязательства выполнить для кредитора определенную работу, поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить ее своими силами и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

Право заказчика понудить подрядчика к исполнению обязательства в натуре действующим законодательством не предусмотрено. Решение об удовлетворении иска о понуждении к выполнению работ по настоящему спору не будет обладать признаком исполнимости судебного акта, что противоречит статье 16 АПК РФ.

Право требовать от подрядчика исполнения договорных обязательств в натуре не предусмотрено ни нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, ни условиями договоров.

Эффективными способами защиты прав кредитора в нетоварных и неденежных обязательствах является разрешение исполнения за счет должника самим кредитором либо третьим лицом, взыскание убытков, расторжение контракта, взыскание штрафных санкций. Исключение составляют случаи незаменимости должника в обязательстве.

Суд отмечает, что истец, заявляя требование о понуждении к исполнению обязательства, не ссылается на то, что данные подрядные работы могут быть выполнены исключительно ответчиком (единственным подрядчиком (исполнителем),  доказательства данного обстоятельства в материалы дела не представлены.

Согласно части 1 статьи 16 АПК РФ, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает конкретный объем работ, их вид, идентификационные признаки, лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Таким образом, судебные акты по требованиям о понуждении совершить определенные действия должны быть исполнимыми.

Отказывая в иске в указанной части,  суд также исходит из того, что истец, в нарушение статьи 65 ГК РФ  не представил доказательств, того, что требование об обязании выполнить и завершить работы связано исключительно с необходимостью устранения  недостатков ранее выполненных работ, в том числе,  потому, что акты  о приемке выполненных работ при рассмотрении спора истцом не представлены.

В связи с отказом  судом в части требований об обязании выполнить, завершить работы и о предоставлении исполнительной документации, суд отказывает в присуждении неустойки за неисполнение судебного акта в указанной части.

Расходы по оплате государственной пошлины  относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд                     

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Первый Контур" в пользу   акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина" 39 363 174 рубля 40 копеек   неустойки и  1 185 630 рублей  62 копейки  процентов, а также  192 983 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с  акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина" в доход федерального бюджета  6 000 рублей государственной пошлины по иску.

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

Судья                                                                                                    Плеханова Н.А.