Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

26. 05. 2017 года.                                              Дело № А40-41605/17-126-378

Резолютивная часть решения объявлена 11. 05. 2017 года.

Решение изготовлено в полном объеме 26. 05. 2017 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО « Геоника » (ОГРН 

<

***>)

к ООО « ЦентрИнжЭнергоПроект » (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 3 796 713 руб. 38 коп. – долга,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность б/н от 01.02.2017 г., от ответчика – ФИО2, доверенность № б/н от  02.05.2017 г.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителей, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 3 796 713 руб. 38 коп. – долга, на основании статей 309, 310, 758, 762 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал предъявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении; представил истребованные судом документы; не заявил о том, что располагает какими-либо иными документами, подтверждающими предъявленный иск, кроме имеющихся в материалах дела; не возражал против рассмотрения дела по существу в данном судебном заседании; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик направил представителя в судебное заседание, который представил отзыв на исковое заявление (письменные пояснения), в которых сообщил о том, что не имеет возможности произвести оплату выполненных истцом работ в связи с возникшими финансовыми затруднениями; истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил; расчет истца не оспорил; каких-либо ходатайств не заявил.

Суд, с учётом изложенных истцом и ответчиком обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела, документами, пришёл к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Геоника» (ООО «Геоника, Истец, Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЦентрИнжЭнергоПроект» (ООО «ЦИЭП», Ответчик, Заказчик) был заключен ряд договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

1. Договор №11/15 от 10.04.2015.

10.04.2015 между ООО «Геоника» и ООО «ЦИЭП» заключен Договор № 11/15 (Договор подряда № 1) о проведении инженерно-геологических изысканий на объекте: «Сооружение кабельных заходов на ПС «Медведевская» для нужд ОАО «НИИЦ МРСК».

Согласно п. п. 6.1, 6.2 Договора подряда № 1 по завершении работ по каждому виду изысканий Исполнитель предоставляет Заказчику или его представителю акт сдачи-приемки работ и Технический отчет о результатах инженерных изысканий. Работы считаются принятыми после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

Готовность изыскательской документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки.

Работы по Договору подряда № 1 выполнены Истцом в полном объеме и приняты Ответчиком без замечаний, что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ № 33 от 30.06.2015, подписанным обеими сторонами.

При этом каких-либо претензий по объему, стоимости либо срокам выполнения работ по договору со стороны Ответчика в адрес Истца не поступало.

В соответствии с п. п. 3.1-3.4 Договора подряда № 1 стоимость работ по договору составляет 3 236 384,35 руб.

Оплата работ Заказчиком, за исключением 10-процентного удержания до прохождения Заказчиком экспертизы, производится в течение 30 банковских дней от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки каждого вида работ.

Окончательная оплата 10% от стоимости работ Заказчиком производится в течение 30 банковских дней от даты получения положительного заключения экспертизы проектной документации в части проведения работ, выполняемых Подрядчиком, но не позднее 180 календарных дней от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки этапов работ.

Поскольку после подписания сторонами акта сдачи приемки работ по Договору подряда № 1 на данный момент прошло уже более 1 года, работы должны быть оплачены Заказчиком в полном объеме.

Тем не менее, ООО «ЦИЭП» оплачена только часть общей стоимости выполненных работ по Договору подряда № 1 в размере 1 402 370,97 руб., что подтверждается выпиской по расчетному счету ООО «Геоника» и Актом сверки взаимных расчетов между ООО «ЦИЭП» и ООО «Геоника» за период январь 2015 г. -февраль 2017 года.

Таким образом, задолженность по оплате стоимости выполненных работ по Договору подряда № 1 составляет 1 834 013,38 руб. (3 236 384,35 руб. - 1 402 370,97 руб.).

2. Договор №41/15 от 06.10.2015.

06.10.2015 между ООО «Геоника» и ООО «ЦИЭП» заключен Договор № 41/15 (Договор подряда № 2) о проведении инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Реконструкция ПС Алабушево».

Согласно п. 6.1 Договора подряда № 2 по завершении выполнения работ Исполнителем оформляется акт сдачи-приемки выполненных работ и передается Заказчику вместе с отчетными материалами.

Работы по Договору подряда № 2 выполнены Истцом в полном объеме и приняты Ответчиком без замечаний, что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ № 8 от 05.02.2016, подписанным обеими сторонами.

При этом каких-либо претензий по объему, стоимости либо срокам выполнения работ по договору со стороны Ответчика в адрес Истца не поступало.

В соответствии с п. п. 3.1-3.5 Договора подряда № 2 стоимость работ по договору составляет 140 000,00 руб.

Оплата работ Заказчиком, за исключением 10-процентного удержания до прохождения Заказчиком экспертизы, производится в течение 60 банковских дней от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Окончательная оплата 10% от стоимости работ Заказчиком производится в течение 30 банковских дней от даты получения положительного заключения экспертизы проектной документации в части проведения работ, выполняемых Подрядчиком, но не позднее 180 календарных дней от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки этапов работ.

Поскольку после подписания сторонами акта сдачи приемки работ по Договору подряда № 2 прошло уже более 1 года, работы должны быть оплачены Заказчиком в полном объеме.

Тем не менее, ООО «ЦИЭП» оплачена только часть общей стоимости выполненных работ по Договору подряда № 2 в размере 126 000,00 руб., что подтверждается выпиской по расчетному счету ООО «Геоника» и Актом сверки взаимных расчетов между ООО «ЦИЭП» и ООО «Геоника» за период январь 2015 г. -февраль 2017 года.

Таким образом, задолженность по оплате стоимости выполненных работ по Договору подряда № 2 составляет 14 000,00 руб. (140 000,00 руб. - 126 000,00 руб.).

3. Договор №43/15 от 06.10.2015.

06.10.2015 между ООО «Геоника» и ООО «ЦИЭП» заключен Договор № 43/15 (Договор подряда № 3) о проведении инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Реконструкция ПС 35кВ № 524 «Молчаново».

Согласно п. 6.1 Договора подряда № 3 по завершении выполнения работ Исполнителем оформляется акт сдачи-приемки выполненных работ и передается Заказчику вместе с отчетными материалами.

Работы по Договору подряда № 3 выполнены Истцом в полном объеме и приняты Ответчиком без замечаний, что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ № 61 от 30.12.2015. подписанным обеими сторонами.

При этом каких-либо претензий по объему, стоимости либо срокам выполнения работ по договору со стороны Ответчика в адрес Истца не поступало.

В соответствии с п. п. 3.1-3.5 Договора подряда № 3 стоимость работ по договору составляет 120 000,00 руб.

Оплата работ Заказчиком, за исключением 10-процентного удержания до прохождения Заказчиком экспертизы, производится в течение 60 банковских дней от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Окончательная оплата 10% от стоимости работ Заказчиком производится в течение 30 банковских дней от даты получения положительного заключения экспертизы проектной документации в части проведения работ, выполняемых Подрядчиком, но не позднее 180 календарных дней от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки этапов работ.

Поскольку после подписания сторонами акта сдачи приемки работ по Договору подряда № 1 прошло уже более 1 года, работы должны быть оплачены Заказчиком в полном объеме.

Тем не менее, ООО «ЦИЭП» оплачена только часть общей стоимости выполненных работ по Договору подряда № 3 в размере 108 000,00 руб., что подтверждается выпиской по расчетному счету ООО «Геоника» и Актом сверки взаимных расчетов между ООО «ЦИЭП» и ООО «Геоника» за период январь 2015 г. -февраль 2017 года.

Таким образом, задолженность по оплате стоимости выполненных работ по Договору подряда № 3 составляет 12 000,00 руб. (120 000,00 руб. - 108 000,00 руб.).

4. Договор №31/15 от 09.10.2015.

09.10.2015 между ООО «Геоника» и ООО «ЦИЭП» заключен Договор № 31/15 (Договор подряда № 4) о проведении инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Реконструкция транзита 110 кВ Чоботы - Теплый Стан - Марьино - Лесная с увеличением пропускной способности».

Согласно п. 6.1 Договора подряда № 4 по завершении выполнения работ Исполнителем оформляется акт сдачи-приемки выполненных работ и передается Заказчику вместе с отчетными материалами.

Работы по Договору подряда № 4 выполнены Истцом в полном объеме и приняты Ответчиком без замечаний, что подтверждается Актами сдачи-приемки работ № 58 от 30.12.2015. № 59 от 30.12.2015. № 60 от 30.12.2015. подписанными обеими сторонами.

При этом каких-либо претензий по объему, стоимости либо срокам выполнения работ по договору со стороны Ответчика в адрес Истца не поступало.

В соответствии с п. п. 3.1-3.5 Договора подряда № 4 общая стоимость работ по договору составляет 4 892 000,00 руб.

Оплата работ Заказчиком, за исключением 10-процентного удержания до прохождения Заказчиком экспертизы, производится в течение 60 банковских дней от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Окончательная оплата 10% от стоимости работ Заказчиком производится в течение 30 банковских дней от даты получения положительного заключения экспертизы проектной документации в части проведения работ, выполняемых Подрядчиком, но не позднее 180 календарных дней от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки этапов работ.

Поскольку после подписания сторонами актов сдачи приемки работ по Договору подряда № 4 прошло уже более 1 года, работы должны быть оплачены Заказчиком в полном объеме.

Тем не менее, ООО «ЦИЭП» оплачена только часть общей стоимости выполненных работ по Договору подряда № 4 в размере 2 990 900,00 руб., что подтверждается выпиской по расчетному счету ООО «Геоника» и Актом сверки взаимных расчетов между ООО «ЦИЭП» и ООО «Геоника» за период январь 2015 г. -февраль 2017 года.

Таким образом, задолженность по оплате стоимости выполненных работ по Договору подряда № 4 составляет 1 901100,00 руб. (4 892 000,00 руб. - 2 990 900,00 руб.).

5. Договор №46/15 от 15.10.2015.

15.10.2015 между ООО «Геоника» и ООО «ЦИЭП» заключен Договор № 46/15 (Договор подряда № 5) о проведении инженерно-геологических изысканий на объекте: «Реконструкция ПС 110 кВ № 20 «Алабушево РПБ».

Согласно п. п. 6.1, 6.2 Договора подряда № 5 по завершении работ по каждому виду изысканий Исполнитель предоставляет Заказчику или его представителю акт сдачи-приемки работ и Технический отчет о результатах инженерных изысканий. Работы считаются принятыми после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

Готовность изыскательской документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки.

Работы по Договору подряда № 5 выполнены Истцом в полном объеме и приняты Ответчиком без замечаний, что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ № 14 от 23.06.2016. подписанным обеими сторонами.

При этом каких-либо претензий по объему, стоимости либо срокам выполнения работ по договору со стороны Ответчика в адрес Истца не поступало.

В соответствии с п. п. 3.1-3.5 Договора подряда № 5 общая стоимость работ по договору составляет 276 000,00 руб.

Оплата работ Заказчиком, за исключением 10-процентного удержания до прохождения Заказчиком экспертизы, производится в течение 60 банковских дней от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Окончательная оплата 10% от стоимости работ Заказчиком производится в течение 30 банковских дней от даты получения положительного заключения экспертизы проектной документации в части проведения работ, выполняемых Подрядчиком, но не позднее 180 календарных дней от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки этапов работ.

Поскольку после подписания сторонами акта сдачи приемки работ по Договору подряда № 5 на данный момент прошло уже более 8 месяцев, работы должны быть оплачены Заказчиком в полном объеме.

Тем не менее, ООО «ЦИЭП» оплачена только часть общей стоимости выполненных работ по Договору подряда № 5 в размере 248 400,00 руб., что подтверждается выпиской по расчетному счету ООО «Геоника» и Актом сверки взаимных расчетов между ООО «ЦИЭП» и ООО «Геоника» за период январь 2015 г. -февраль 2017 года.

Таким образом, задолженность по оплате стоимости выполненных работ по Договору подряда № 5 составляет 27 600,00 руб. (276 000,00 руб. - 248 400,00 руб.).

6.  Договор №05/16 от 15.02.2016.

05.02.2016 между ООО «Геоника» и ООО «ЦИЭП» заключен Договор № 05/16 (Договор подряда № 6) о проведении инженерных изысканий на объекте: «Реконструкция ПС 35кВ «Молчаново».

Согласно п. п. 6.1, 6.2 Договора подряда № 6 по завершении работ по каждому виду изысканий Исполнитель предоставляет Заказчику или его представителю акт сдачи-приемки работ и Технический отчет о результатах инженерных изысканий. Работы считаются принятыми после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

Готовность изыскательской документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки.

Работы по Договору подряда № 6 выполнены Истцом в полном объеме и приняты Ответчиком без замечаний, что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ № 12 от 17.03.2016. подписанным обеими сторонами.

При этом каких-либо претензий по объему, стоимости либо срокам выполнения работ по договору со стороны Ответчика в адрес Истца не поступало.

В соответствии с п. п. 3.1-3.4 Договора подряда № 6 общая стоимость работ по договору составляет 80 000,00 руб.

Оплата работ Заказчиком, за исключением 10-процентного удержания до прохождения Заказчиком экспертизы, производится в течение 50 банковских дней от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Окончательная оплата 10% от стоимости работ Заказчиком производится в течение 30 банковских дней от даты получения положительного заключения экспертизы проектной документации в части проведения работ, выполняемых Подрядчиком, но не позднее 180 календарных дней от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки этапов работ.

Поскольку после подписания сторонами акта сдачи приемки работ по Договору подряда № 6 на данный момент прошло уже более 11 месяцев, работы должны быть оплачены Заказчиком в полном объеме.

Тем не менее, ООО «ЦИЭП» оплачена только часть общей стоимости выполненных работ по Договору подряда № 6 в размере 72 000,00 руб., что подтверждается выпиской по расчетному счету ООО «Геоника» и Актом сверки взаимных расчетов между ООО «ЦИЭП» и ООО «Геоника» за период январь 2015 г. -февраль 2017 года.

Таким образом, задолженность по оплате стоимости выполненных работ по Договору подряда № 6 составляет 8 000,00 руб. (80 000,00 руб. - 72 000,00 руб.).

Всего задолженность составляет 3 796 713 руб. 38 коп., что ответчиком не оспаривается.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает пли позволяет определить день его исполнения пли период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Требование истца о взыскании долга в сумме 3 796 713 руб. 38 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика  в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720, 758, 762 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 155, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО « ЦентрИнжЭнергоПроект » (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО « Геоника » (ОГРН 

<

***>) 3 796 713 руб. 38 коп. – долга и расходы по уплате госпошлины в сумме 41 984 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья                                                           О.В. Романов