1315/2018-293899(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 

22 ноября 2018 года Дело № А33-18746/2018  

Красноярск 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 19 ноября 2018 года. В полном объёме решение изготовлено 22 ноября 2018 года. 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в  

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Стабильная  

строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 

к обществу с ограниченной ответственностью "КрасСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

1162468062998, г. Красноярск) о расторжении договоров субподряда, в присутствии: от истца: ФИО1 – представителя по доверенности от 06.02.2018, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2  

В.В. (до перерыва), секретарем судебного заседания ФИО3 (после перерыва), 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Стабильная строительная компания" (далее  – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с  ограниченной ответственностью "КрасСтрой" (далее – ответчик) о расторжении договора  субподряда от 01.04.2017 № 02/04-2017; о расторжении договора субподряда от 07.04.2017  

 № 03/04-2017КШ. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 19.07.2018  возбуждено производство по делу.  

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен  надлежащим образом.  

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, судебное заседание проводится в отсутствие ответчика.  

Истец пояснил суду о невозможности урегулирования спора путем заключения мирового  соглашения в связи с неподписанием мирового соглашения стороной ответчика.  

12.11.2018 в материалы дела от ответчика поступило ходатайство об отложении  судебного разбирательства в связи с возможностью заключения мирового соглашения. В  представленном ходатайстве ответчик указывает на поступление в адрес последнего проекта  мирового соглашения без подписи уполномоченного лица стороны истца.  

Истец не возражает против урегулирования спора в рамках объявления перерыва в  судебном заседании.  

С учетом ходатайств сторон, в судебном заседании 12.11.2018, в соответствии со статьей  163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до  15 час. 00 мин. 19.11.2018 в целях урегулирования спора, о чем вынесено протокольное  определение.  

Сведения о перерыве в судебном заседании размещены на официальном сайте  Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет.  

После перерыва судебное заседание продолжено 19.11.2018 в 15 час. 00 мин. с участием  того же представителя истца.  

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, судебное заседание проводится в отсутствие ответчика.  

Представитель истца пояснила, что мировое соглашение не будет подписано сторонами.  

Представитель ответчика до объявления перерыва представил ходатайство об отложении  судебного разбирательства.  

В соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации суд определил отказать в удовлетворении ходатайства ответчика, поскольку  судом не установлено оснований для отложения судебного разбирательства.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для  рассмотрения спора, обстоятельства.  

Как следует из иска, между обществом с ограниченной ответственностью «КрасСтрой»  (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Стабильная Строительная  Компания» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 02/04-2017 от 01.04.2017 (далее -  договор субподряда № 02/04-2017), в соответствии с пунктом 1.1. которого и приложениями к  нему субподрядчик обязуется своими силами, инструментами и опалубкой и расходными  материалами в соответствии с ведомостью договорной цены (Приложение № 1) на объекте:  «Многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением по адресу: г. Красноярск,  Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Караульная (дом № 4)», выполнить следующие  работы: устройство монолитных конструкций. Конкретный перечень и объем поручаемых  работ, а также требования к их выполнению уточняются проектной рабочей документацией.  

Согласно пункту 2.1. договора субподряда № 02/04-2017 общая договорная стоимость  работ (цена договора) составляет 9 271 950 руб.  

В соответствии с пунктом 2.6. договора субподряда № 02/04-2017 расчет за выполненные  субподрядчиком и принятые подрядчиком работы за отчетный период (календарный месяц)  осуществляется подрядчиком ежемесячно, в сумме, определяемой как разница между  суммой, указанной в подписанных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и частью суммы  удерживаемого аванса (в случае его получения субподрядчиком), в течение 15 дней с  момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, а  также надлежащим образом оформленного счета-фактуры.  

Согласно пункту 2.8. договора субподряда № 02/04-2017 окончательная цена договора  определяется на основании всего фактически выполненного субподрядчиком объема работ,  проверенного и подписанного подрядчиком, в сумме, определяемой на основании  подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о  стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  

Пунктом 3.1. договора субподряда № 02/04-2017 определены сроки выполнения работ:  дата начала работ - 01.04.2017. Дата окончания работ - 31.08.2017.  

В соответствии с пунктом 5.2. договора субподряда № 02/04-2017 отчетным периодом  для сдачи-приемки выполненных субподрядчиком работ является календарный месяц.  

Пунктом 5.3. договора субподряда № 02/04-2017 предусмотрено, что подрядчик вправе  отказаться от подписания документов, указанных в настоящем разделе, в также иных  документов, свидетельствующих о приемке работ, при наличии обоснованных претензий к  указанным документам и/или выполненным работам. В этом случае подрядчик в течение  пяти рабочих дней с момента получения документов направляет субподрядчику  мотивированный отказ от их подписания с указанием недостатков в выполненных работах и  сроков их исправления, которые являются обязательными для субподрядчика. Подрядчик  вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных субподрядчиком работ в случае  

обнаружения отступлений от строительных норм и правил, проектной документации, а также  указаний подрядчика.  

Согласно п. 5.4. договора субподряда № 02/04-2017 работы считаются принятыми с  момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) без  замечаний и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

В соответствии с п. 9.3. договора субподряда № 02/04-2017 в случае нарушения  подрядчиком сроков оплаты, предусмотренных в разделе 2 договора, субподрядчик вправе  предъявить подрядчику требование об уплате неустойки в размере, определяемой по  правилам ст. 395 ГК РФ.  

Согласно абз. 2 п. 10.1. договора субподряда № 02/04-2017 претензионный порядок  урегулирования спора до момента обращения в суд обязателен. Срок рассмотрения  претензии десять календарных дней с момента получения стороной договора  соответствующей претензии.  

В соответствии с п. 12.1. договора субподряда № 02/04-2017 настоящий договор вступает  в силу с момента его подписания сторонами (дате подписания договора соответствует дата,  указанная в правом верхнем углу на первом листе настоящего текста) и действует до  выполнения сторонами принятых обязательств.  

ООО «ССК» в подтверждение выполнения работ на общую сумму 7 740 740 руб.  представило акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 №№ 1 от 30.04.2017, 2 от  31.05.2017, 3 от 30.06.2017, 4 от 31.07.2017, 5 от 31.08.2017, 6 от 30.09.2017, 7 от 31.10.2017,  8 от 30.11.2017, 9 от 31.12.2017,10 от 31.03.2018; справки о стоимости выполненных работ и  затрат по форме КС-3 №№ 1 от 30.01.2017, 2 от 31.05.2017, 3 от 30.06.2017, 4 от 31.07.2017, 5  от 31.08.2017, 6 от 30.09.2017, 7 от 31.10.2017, 8 от 30.11.2017, 9 от 31.12.2017,10 от  31.03.2018, подписанные субподрядчиком в одностороннем порядке.  

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1-9, справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1-9, счета-фактуры №№ 4 от 30.04.2017, 6/3 от  31.05.2017, 11 от 30.06.2017, 15 от 31.07.2017, 18 от 31.08.2017, 23 от 30.09.2017, 33 от  31.10.2017, 36 от 30.11.2017, 41 от 31.12.2017, были переданы ООО «КрасСтрой» реестрами  от 30.04.2017, 31.05.2017, 30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 30.09.2017, 31.10.2017,  30.11.2017, 10.01.2018.  

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 10 от 31.03.2018, справка о  стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 10 от 31.03.2018, счет-фактура   № УТ-1 от 31.03.2018 направлен в адрес ООО «КрасСтрой» 12.04.2018 почтовым  отправлением (почтовая квитанция РПО 66002142718917).  

Обязательство по оплате выполненных работ ООО «КрасСтрой» исполнило частично, на  сумму 6 656 178,13 руб.  

Задолженность по оплате выполненных работ составляет 1 084 561,87 руб., в  соответствии с актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 9 от 31.12.2017, № 10  от 31.03.2018.  

Между обществом с ограниченной ответственностью «КрасСтрой» (подрядчик) и  обществом с ограниченной ответственностью «Стабильная Строительная Компания»  (субподрядчик) заключен договор субподряда № 03/04-2017КШ от 07.04.2017 на капитальное  строительство многоэтажного жилого дома (далее - договор субподряда № 03/04-2017КШ), в  соответствии с п. 1.1. которого и приложениями к нему субподрядчик обязуется своими  силами, инструментами и опалубкой и расходными материалами в соответствии с  Ведомостью договорной цены (Приложение № 1) на объекте: «Многоэтажный жилой дом с  инженерным обеспечением по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул.  Караульная (дом № 1)», выполнить следующие работы: - устройство монолитных  конструкций. Конкретный перечень и объем поручаемых работ, а также требования к их  выполнению уточняются проектной рабочей документацией.  

Согласно п. 2.1. договора субподряда № 03/04-2017КШ общая договорная стоимость  работ (цена договора) составляет 16 950 680 рублей.  

В соответствии с п. 2.6. договора субподряда № 03/04-2017КШ расчет за выполненные  субподрядчиком и принятые подрядчиком работы за отчетный период (календарный месяц)  осуществляется подрядчиком ежемесячно, в сумме, определяемой как разница между  суммой, указанной в подписанных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и частью суммы  удерживаемого аванса (в случае его получения субподрядчиком), в течение 15 дней с  момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, а  также надлежащим образом оформленного счета-фактуры.  

Согласно п. 2.8. договора субподряда № 03/04-2017КШ окончательная цена договора  определяется на основании всего фактически выполненного субподрядчиком объема работ,  проверенного и подписанного подрядчиком, в сумме, определяемой на основании  подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о  стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  

Пунктом 3.1. договора субподряда № 03/04-2017КШ определены сроки выполнения  работ: дата начала работ - 10.04.2017. Дата окончания работ - 31.05.2018.  

В соответствии с п. 5.2. договора субподряда № 03/04-2017КШ отчетным периодом для  сдачи-приемки выполненных субподрядчиком работ является календарный месяц.  

Пунктом 5.3. договора субподряда № 03/04-2017КШ предусмотрено, что подрядчик  вправе отказаться от подписания документов, указанных в настоящем разделе, в также иных  документов, свидетельствующих о приемке работ, при наличии обоснованных претензий к  указанным документам и/или выполненным работам. В этом случае подрядчик в течение  пяти рабочих дней с момента получения документов направляет субподрядчику  мотивированный отказ от их подписания с указанием недостатков в выполненных работах и  сроков их исправления, которые являются обязательными для субподрядчика. Подрядчик  вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных субподрядчиком работ в случае  обнаружения отступлений от строительных норм и правил, проектной документации, а также  указаний подрядчика.  

Согласно п. 5.4. договора субподряда № 03/04-2017КШ работы считаются принятыми с  момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) без  замечаний и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

В соответствии с п. 9.3. договора субподряда № 03/04-2017КШ в случае нарушения  подрядчиком сроков оплаты, предусмотренных в разделе 2 договора, субподрядчик вправе  предъявить подрядчику требование об уплате неустойки в размере, определяемой по  правилам ст. 395 ГК РФ.  

Согласно абз. 2 п. 10.1. договора субподряда № 03/04-2017КШ претензионный порядок  урегулирования спора до момента обращения в суд обязателен. Срок рассмотрения  претензии десять календарных дней с момента получения стороной договора  соответствующей претензии.  

В соответствии с п. 12.1. договора субподряда № 03/04-2017КШ договор вступает в силу  с момента его подписания сторонами (дате подписания договора соответствует дата,  указанная в правом верхнем углу на первом листе настоящего текста) и действует до  выполнения сторонами принятых обязательств.  

ООО «ССК» в подтверждение выполнения работ на общую сумму 6 366 990 руб. в  материалы дела представило акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 №№ 1 от  31.05.2017, 2 от 30.06.2017, 3 от 31.07.2017, 4 от 31.08.2017, 5 от 31.08.2017, 6 от 30.09.2017,  7 от 31.10.2017, 8 от 30.11.2017, 9 от 31.12.2017,10 от 31.03.2018; справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 №№ 1 от 31.05.2017, 2 от 30.06.2017, 3 от  31.07.2017, 4 от 31.08.2017, 6 от 30.09.2017, 7 от 31.10.2017, 8 от 30.11.2017, 8 от  31.12.2017,10 от 31.03.2018, подписанные субподрядчиком в одностороннем порядке.  

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1-9, справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1-8, счета-фактуры №№ 6/1 от 31.05.2017, 9 от  30.06.2017, 17 от 31.07.2017, 20 от 31.08.2017, 24 от 30.09.2017, 32 от 31.10.2017, 35 от  

30.11.2017, 40 от 31.12.2017, переданы ООО «КрасСтрой» реестрами от 31.05.2017,  30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 30.09.2017, 31.10.2017, 30.11.2017,10.01.2018.  

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 10 от 31.03.2018, справка о  стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 10 от 31.03.2018, счет-фактура   № УТ-2 от 31.03.2018 направлен в адрес ООО «КрасСтрой» 12.04.2018 почтовым  отправлением (почтовая квитанция РПО 66002142718917).  

Обязательство по оплате выполненных работ ООО «КрасСтрой» исполнило частично, на  сумму 2 185 080 руб. Задолженность по оплате выполненных работ составила 4 181 910 руб.  

13.06.2018 (РПО 66011224002288) ООО «ССК» направило ООО «КрасСтрой»  уведомление о зачете встречных однородных требований (исх. № 45 от 08.06.2018), согласно  которому обязательства ООО «ССК» перед ООО «КрасСтрой» на сумму 3 256 370 руб. по  возврату излишне уплаченных денежных средств по договору субподряда № 01/04-2017 от  01.04.2017, по оплате поставленного товара, согласно товарным накладным №№ 389 от  15.11.2017, 442 от 30.11.2017, прекращены полностью на основании ст. 410 ГК РФ, зачетом  однородных встречных требований; обязательство ООО «КрасСтрой» прекращено частично,  на сумму 3 256 370 руб. на основании ст. 410 ГК РФ, зачетом однородных встречных  требований.  

С учетом зачета встречных однородных требований, истец числит за ответчиком  задолженность в размере 925 540 руб.  

В связи с длительным неисполнением ООО «КрасСтрой» обязательств по договору  субподряда № 02/04-2017 от 01.04.2017, договору субподряда № 03/04-2017КШ от 07.04.2017  на капитальное строительство многоэтажного жилого дома, в части оплаты выполненных и  принятых работ, ООО «ССК» письмом от 11.04.2018 (исх. № 36) предложило ООО  «КрасСтрой» расторгнуть договор субподряда № 02/04-2017 от 01.04.2017, договор  субподряда № 03/04-2017КШ от 07.04.2017, погасить имеющуюся задолженность.  

Предложение о расторжении спорных договоров субподряда оставлено ответчиком без  удовлетворения, отказ от расторжения договора не направлен.  

Полагая нарушение подрядчиком условий договоров субподряда № 02/04-2017 от  01.04.2017, № 03/04-2017КШ от 07.04.2017 существенным, истец обратился в арбитражный  суд с настоящим иском.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в  деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские  права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными  правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не  предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского  законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские  права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных  законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не  противоречащих ему.  

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства  одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное  действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в  совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного  действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда,  вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в  настоящем Кодексе.  

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в  соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий  не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими  законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).  

Правоотношения сторон подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского  кодекса Российской Федерации.  

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда  одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат  работы и оплатить его.  

Основания для расторжения договора предусмотрены в статье 450 Гражданского кодекса  Российской Федерации, согласно которой, по требованию одной из сторон договор может  быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении  договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом  Российской Федерации, другими законами или договором. Существенным признается  нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что  она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при  заключении договора.  

Требование о расторжении договора может быть заявлено только после получения  отказа другой стороны на предложение о его расторжении либо неполучении ответа в срок,  указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии  - в тридцатидневный срок (пункт 2 статьи 452 ГК РФ).  

Порядок расторжения договора, установленный пунктом 2 статьи 452 Гражданского  кодекса Российской Федерации, истцом соблюден.  

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может  быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении  договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,  другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из  сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени  лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.  

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик  обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный  объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику  необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить  обусловленную цену.  

В соответствии со статьями 746 и 753 ГК РФ заказчик обязан оплатить выполненную  подрядчиком работу после сдачи результатов работ в сроки и в порядке, предусмотренные  условиями договора строительного подряда.  

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его  заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из  сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой  стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан  судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны  им обоснованными.  

Как следует из материалов дела, в рамках договора 

В соответствии с п. 12.1. договора субподряда № 02/04-2017 ООО «ССК» выполнило  работы на общую сумму 7 740 740 руб., в подтверждение чего представлены акты о приемке  выполненных работ по форме КС-2 №№ 1 от 30.04.2017, 2 от 31.05.2017, 3 от 30.06.2017, 4 от  31.07.2017, 5 от 31.08.2017, 6 от 30.09.2017, 7 от 31.10.2017, 8 от 30.11.2017, 9 от  31.12.2017,10 от 31.03.2018; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС- 3 №№ 1 от 30.01.2017, 2 от 31.05.2017, 3 от 30.06.2017, 4 от 31.07.2017, 5 от 31.08.2017, 6 от  30.09.2017, 7 от 31.10.2017, 8 от 30.11.2017, 9 от 31.12.2017,10 от 31.03.2018, подписанные  субподрядчиком в одностороннем порядке.  

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1-9, справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1-9, счета-фактуры №№ 4 от 30.04.2017, 6/3 от  31.05.2017, 11 от 30.06.2017, 15 от 31.07.2017, 18 от 31.08.2017, 23 от 30.09.2017, 33 от  31.10.2017, 36 от 30.11.2017, 41 от 31.12.2017, были переданы ООО «КрасСтрой» реестрами  от 30.04.2017, 31.05.2017, 30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 30.09.2017, 31.10.2017,  30.11.2017, 10.01.2018.  

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 10 от 31.03.2018, справка о  стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 10 от 31.03.2018, счет-фактура   № УТ-1 от 31.03.2018 направлен в адрес ООО «КрасСтрой» 12.04.2018 почтовым  отправлением (почтовая квитанция РПО 66002142718917).  

В рамках договора субподряда № 03/04-2017КШ ООО «ССК» выполнило работы на  общую сумму 6 366 990 руб., в подтверждение чего в материалы дела представлены акты о  приемке выполненных работ по форме КС-2 №№ 1 от 31.05.2017, 2 от 30.06.2017, 3 от  31.07.2017, 4 от 31.08.2017, 5 от 31.08.2017, 6 от 30.09.2017, 7 от 31.10.2017, 8 от 30.11.2017,  9 от 31.12.2017,10 от 31.03.2018; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 №№ 1 от 31.05.2017, 2 от 30.06.2017, 3 от 31.07.2017, 4 от 31.08.2017, 6 от 30.09.2017, 7  от 31.10.2017, 8 от 30.11.2017, 8 от 31.12.2017,10 от 31.03.2018, подписанные  субподрядчиком в одностороннем порядке.  

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1-9, справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1-8, счета-фактуры №№ 6/1 от 31.05.2017, 9 от  30.06.2017, 17 от 31.07.2017, 20 от 31.08.2017, 24 от 30.09.2017, 32 от 31.10.2017, 35 от  30.11.2017, 40 от 31.12.2017, переданы ООО «КрасСтрой» реестрами от 31.05.2017,  30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 30.09.2017, 31.10.2017, 30.11.2017,10.01.2018.  

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 10 от 31.03.2018, справка о  стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 10 от 31.03.2018, счет-фактура   № УТ-2 от 31.03.2018 направлен в адрес ООО «КрасСтрой» 12.04.2018 почтовым  отправлением (почтовая квитанция РПО 66002142718917).  

Согласно расчету истца, с учетом частичных оплат подрядчика и зачета встречных  однородных требований, истец числит за ответчиком задолженность в размере 925 540 руб.  

Истец, ссылаясь на длительное неисполнение ООО «КрасСтрой» обязательств по оплате  выполненных по договорам субподряда № 02/04-2017 от 01.04.2017, № 03/04-2017КШ от  07.04.2017 работ, а также на статьи 450, 719 ГК РФ, просит расторгнуть договор субподряда   № 02/04-2017 от 01.04.2017, договор субподряда № 03/04-2017КШ от 07.04.2017.  

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ, на который ссылается истец, по требованию одной  из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при  существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных  настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается  нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что  она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при  заключении договора.  

В силу пункта 1 статьи 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке,  предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении  работы.  

На основании пункта статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе отказаться от исполнения  договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение заказчиком своих  обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования,  технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует  исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно  свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в  установленный срок (статья 328 Кодекса).  

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам  статьи 71 АПК РФ, условия договоров субподряда, руководствуясь положениями статей 450,  

452, 702, 711, 740, 753 ГК РФ, принимая во внимание существо подрядных отношений,  наличие у субподрядчика права требовать исполнения подрядчиком денежного  обязательства по оплате выполненных работ в судебном порядке, суд приходит к выводу, что  приведенные истцом доводы о допущенных ответчиком нарушениях условий договора (не  оплата ответчиком выполненных работ) применительно к обстоятельствам настоящего дела  не свидетельствуют о существенном нарушении договора, влекущем его расторжение в  судебном порядке.  

Суд также принимает во внимание, что по условиям договоров субподряда исполнение  обязательства субподрядчиком по выполнению работ не ставится в зависимость от оплаты  подрядчиком работ (статья 328 ГК РФ).  

Таким образом, наличие оснований для расторжения договоров субподряда № 02/04-2017  от 01.04.2017, договор субподряда № 03/04-2017КШ от 07.04.2017 между сторонами по  пункту 2 статьи 450 ГК РФ субподрядчиком не доказано.  

В удовлетворении иска следует отказать. 

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы по уплате государственной пошлины, с учетом результата рассмотрения  иска, подлежат отнесению на истца.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,  участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети  «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).   

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска отказать.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  

в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  

арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  

Красноярского края. 

Судья С.А. Красовская