Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980 

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-7474/2024

04 октября 2024 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Ивашина Д.И., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению акционерного общества Специализированный Застройщик «Республиканское ипотечное агентство» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 09.08.2024 к общества с ограниченной ответственностью "Сахалид" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 509 010,33 руб., без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество Специализированный Застройщик «Республиканское ипотечное агентство» обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Сахалид" о взыскании неустойки по государственному контракту № 081650000062301336 от 19.07.2023 за период с 31.08.2023 по 22.02.2024 в размере 509 010,33 руб.

Истцом представлено ходатайство об увеличении исковых требований, в котором просит взыскать неустойку по государственному контракту № 081650000062301336 от 19.07.2023 за период с 31.08.2023 по 18.03.2024 в размере 581 312,94 руб.

Представленное уточнение принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Расчет пени судом проверен, признан неправильным ввиду неверного определения даты расторжение контракта, по которую подлежит начислению неустойка.

В п. 13 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" указано, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно п. 12.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Поскольку решение истца об одностороннем отказе от контракта размещено в единой информационной системе 05.03.2024, то датой расторжения контракта, по которую подлежит начислению неустойка, является 15.03.2024.

Судом произведен самостоятельный расчет неустойки, размер которой составил 572 636,63 руб. за период с 31.08.2023 по 15.03.2024.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

5 422 695,32

31.08.2023

Новая задолженность на 5 422 695,32 руб.

5 422 695,32

31.08.2023

15.03.2024

198

16

5 422 695,32 ? 198 ? 1/300 ? 16%

572 636,63 р.

Сумма основного долга: 5 422 695,32 руб.

Сумма неустойки: 572 636,63 руб.

 

Истцом уплачена государственная пошлина в размере 13 180 руб.

При уточненной цене иска размер государственной пошлины составил 14 626 руб.

С учетом размера удовлетворенных требований размер государственной пошлины составляет 14 408 руб.

Согласно п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.

При таких обстоятельствах, по смыслу п. 16  Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 180 руб.; с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 1 228 руб.; с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 218 руб.

Руководствуясь статьями 49, 110, 170, 228, 229 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сахалид" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества Специализированный Застройщик «Республиканское ипотечное агентство» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по государственному контракту                           № 081650000062301336 от 19.07.2023 в размере 572 636,63 руб. за период с 31.08.2023 по 15.03.2024; расходы по уплате юридических услуг 13 180 руб.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сахалид" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 228 руб.

Взыскать с акционерного общества Специализированный Застройщик «Республиканское ипотечное агентство» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 218 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

 

Судья                                                                                                               Д.И. Ивашин