Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, Смольного ул.,  дом 6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-80351/2022

14 февраля 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 07 февраля 2023 года. Полный текст решения изготовлен 14 февраля 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Орловой Е.А.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Садоводческое некоммерческое товарищество "Импульс",

(адрес: 188268, Ленинградская область, Лужский район, Мшинская поселок, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Ленсеть",

(адрес: 195273, Санкт-Петербург, Руставели улица, дом 31А, литер А, офис 22, ОГРН: 

<

***>);

о понуждении к исполнению обязательства в натуре и о присуждении судебной неустойки,

при участии:

от истца:  не явился, извещен,

от ответчика:  представитель ФИО2 по дов. от 23.12.2020 г. №б/н,

установил:

Истец – Садоводческое некоммерческое товарищество «Импульс», обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью «Ленсеть», об обязании ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств СНТ «Импульс» (44 дома) в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями объекта, в том числе по обеспечению гот ройств; также истец просил взыскать неустойку за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу в размере 1.000 рублей.

Надлежащим образом извещенный по всем представленным в арбитражный суд адресам истец в судебное заседание не явился, что не препятствует рассмотрению дела в его отсутствии по имеющимся в материалах дела доказательствам в соответствии со статьями 123, 156  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

 Ответчик против удовлетворения иска возражал, поддержал доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя ответчика, арбитражный суд установил, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

Арбитражный суд установил:

Между Истцом и Ответчиком заключен договор технологического присоединения №55-ТП/20 от 08.12.2020г.

Пунктом 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее Правила) в отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с настоящими Правилами не подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах)( далее Правила) мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 N334. от 24.09.2010 N759)

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласнообязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включаяосуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее – Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.08.2018 N937, от 10.03.2020 N262. от 02.03.2021 N299)

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных впунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, еслитехнологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителейосуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организациейтехнических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 N542, от 10.03.2020 N262, от 02.03.2021 N299)

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

(пп. "д(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)

д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности);

(пп. "д(2)" введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

е)- ж) утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 07.05.2017 N 542.Истец является заявителем предусмотренным пунктом 12 Правил.

Согласно пункту 81 Правил проверка выполнения технических условий проводится в отношении каждых технических условий, выданных заявителям и проверка выполнения технических условий осуществляется в соответствии с пунктами 82-90 настоящих Правил.

В соответствии с п.82 Проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не требуется согласование технических условий с субъектом оперативнодиспетчерского управления, осуществляется сетевой организацией и включает следующие мероприятия:

а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования(устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленныхзаявителем в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, требованиям техническихусловий;

б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя,построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, насоответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическомуприсоединению техническим условиям и представленной заявителем проектнойдокументации, а в случаях, если в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации неявляется обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в техническихусловиях.

Пунктом 85 Правил предусмотрено, для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудованиеподлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной техническойдокументации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения осертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих техническиерешения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения посхеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производствуэлектрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, иобосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевуюорганизацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления овыполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

Истец уведомление о выполнении технических условий, с приложением документов, не представлял.

Учитывая изложенное, у Ответчика не возникло обязанности закончить процедуру технологического присоединения, предусмотренную договором и Правилами.

Пунктом 5 Договора №55-ТП/20 от 08.12.2020года предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Истец, в указанный период, в нарушение условий договора и пункта 85 Правил не представил в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением документов. В связи с чем, Ответчик не мог проверить выполнение технических условий Истцом и завершить процедуру технологического присоединения.

Согласно пункту 4 Договора №55-ТП/20 от 08.12.2020года о технологическом присоединении срок действия технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора, составляет два года. Исходя из этого технические условия совершения присоединения закончились 08.12.2022г..

Учитывая завершение срока выполнения мероприятий технологического присоединения и срока действия технических условий на сегодняшний день выполнение технических условий и принятие выполнения, а также выполнение процедуры технологического присоединения по договору №55-ТП/20 от 08.12.2020г года невозможно.

Согласно пункта 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

На основании изложенного, исковые требования не подлежат удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

Расходы по оплате госпошлины в размере 6.000 руб. оставить на истце.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                        Орлова Е.А.