Дело № А43-20642/2022

19 мая 2023 года

г. Владимир

 

Резолютивная часть постановления объявлена 16.05.2023.

Постановление

 изготовлено в полном объеме   19.05.2023.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Тарасовой Т.И., 

судей Насоновой Н.А., Назаровой Н.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Профтехстрой-НН» на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 16.02.2023  по делу                            № А43-20642/2022 по иску Прокуратуры Нижегородской области в интересах муниципального образования г. Нижний Новгород в лице администрации города Нижнего Новгорода (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к муниципальному  казенному учреждению «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и к обществу  с  ограниченной  ответственностью «Профтехстрой-НН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  признании  недействительной  сделкой  соглашения  от  23.09.2021  № 2  об  изменении условий контракта № 5-2021 от 30.06.2021, в отсутствие сторон.

Прокуратура Нижегородской области в интересах муниципального образования г. Нижний Новгород в лице администрации города Нижнего Новгорода (далее – истец) обратилась в арбитражный суд с иском к муниципальному казенному учреждению «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - учереждение) и к обществу  с  ограниченной  ответственностью «Профтехстрой-НН» (далее – ООО «Профтехстрой-НН») о признании недействительной сделкой соглашения от 23.09.2021 №2 об изменении условий контракта № 5-2021 от 30.06.2021.

Решением от 16.02.2023 суд первой инстанции признал недействительным дополнительное соглашение от 23.09.2021 №2 к муниципальному контракту от 30.06.2021 №5-2021.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Профтехстрой-НН» обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить на основании статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оспаривая законность принятого по делу судебного акта, заявитель указывает следующее: суд не учел, что законом предусмотрена возможность однократного изменения срока исполнения контракта; необходимость в продлении срока обусловлена объективными причинами, не зависящими от сторон контракта ( не все жильцы  дома предоставили доступ в квартиры, не был готов склад для хранения вещей жильцов).

          Прокурор, стороны явку представителей в суд апелляционной инстанции не обеспечили.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие названных лиц, надлежащим образом уведомленного о времени и месте судебного разбирательства.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся  доказательствам. 

Повторно рассмотрев дело, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены судебного акта.

Как усматривается из материалов дела, Прокуратурой Нижегородской области проведена проверка исполнения законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд, в ходе которой установлено, что между МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (заказчик) и ООО «Профтехстрой-НН» (подрядчик) заключен муниципальный контракт от 30.06.2021 № 52021 на выполнение контраварийных мероприятий в доме № 17 по ул. Краснодонцев г. Н. Новгорода.

Согласно пункту 4.1 контракта срок выполнения работ - 3 месяца с даты заключения контракта, то есть - 30.09.2021.

23.09.2021 между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение к контракту № 2, в соответствии с которым срок выполнения работ продлен на 30 дней - до 30.10.2021.

По мнению Прокуратуры, условия заключенного сторонами дополнительного соглашения не соответствуют требованиям исключительности случаев, позволяющих изменить срок исполнения контракта.

При заключении соглашения о продлении срока исполнения контракта вопреки обязанности, возложенной на заказчика законом, фактически им совершены действия, направленные на освобождение подрядчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, как в виде взыскания штрафа, так и в виде возможного включения сведений о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с этим действиями сторон контракта нарушен публичный интерес.

Таким образом, Прокуратура, полагая, что указанная сделка совершена с нарушением предусмотренных в статье 95 Федерального закона № 44-ФЗ требований, противоречит существу законодательного регулирования соответствующего вида правоотношений и предписанному им порядку действий, нарушает требования закона и публичный интерес, выразившийся в необходимости неукоснительного соблюдения правопорядка в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях удовлетворения потребностей неопределенного круга лиц, обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с настоящим исковым заявлением.

Разрешая настоящий спор, суд исходил из следующего.

Абзацем 3 части 1 статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации закреплено право прокурора на предъявление иска о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации,   органами   государственной   власти   субъектов   Российской   Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований.

Отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и специальным законодательным актом - Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Из норм части 5 статьи 9, части 10 статьи 41.12 Закона № 94-ФЗ следует, что при заключении и исполнении контракта не допускается изменение условий, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об аукционе.

Согласно части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается.

Правоотношения, регулируемые Законом № 44-ФЗ, направлены, в том числе и на защиту публичных интересов, что следует, в частности, из норм статьи 1 данного закона.

Из содержания взаимосвязанных положений указанных выше норм следует, что при заключении и исполнении контракта не допускается изменение любых условий, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об аукционе (в том числе и условия о сроке исполнения сторонами обязательств по контракту).

Недопустимость изменения сроков выполнения работ следует из положений Закона N 44-ФЗ.

Согласно пункту 1 статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Пунктом 2 этой статьи предусмотрено, что сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Муниципальным контрактом, заключенным в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 91 Закона №44-ФЗ, установлен срок выполнения работ - по 30.09.2021.

Дополнительным соглашением от 23.09.2021 №2 стороны  изменили срок выполнения работ до 30.10.2021.

При этом мотивы продления срока выполнения работ в указанном соглашении не приведены.

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона.

Пунктами 74, 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 25) предусмотрено, что договор, условия которого противоречат существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания на его ничтожность. Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы.

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, отраженной в определении от 27.09.2018 № 2359-0, исходя из особенностей регулируемых отношений, пункт 1 части 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ направлен на обеспечение эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, участия физических и юридических лиц в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд на условиях добросовестной конкуренции и предотвращение злоупотреблений.

Указанные нормы определяют правовой механизм размещения государственного (муниципального) заказа, реализация которого направлена на создание гарантий защиты иных государственных (муниципальных) заказчиков, с одной стороны, и защиты добросовестной конкуренции - с другой.

В соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных указанным законом.

Пунктом 9 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлено, что если контракт, предусмотренный частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона, контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

Вопреки доводам ответчиков и в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации последние не доказали, что согласованный предмет контракта подпадает под ограниченный перечень работ, отраженный в пункте 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, а именно выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

Таким образом, доводы ответчиков о возможности изменения условий контракта со ссылкой на положения пункта 9 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ являются несостоятельными и не подлежат применению в рассматриваемом случае.

Кроме того, как указала Прокуратура, по факту заключения дополнительного соглашения с нарушением требований закона прокуратурой города в отношении МКУ «ГлавУКС г. Н. Новгорода» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.

Постановлением о назначении административного наказания УФАС России по Нижегородской области от 18.04.2022 №052/04/7.32-957/2022 МКУ «ГлавУКС г. Н. Новгорода» признано виновным в совершении правонарушения, постановление вступило в законную силу.

В пункте 9 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017 (далее - Обзор от 28.06.2017) отражено, что стороны не вправе дополнительным соглашением изменять сроки выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту, если иное не установлено законом и заключенным в соответствии с ним контрактом.

В абзаце 10 пункта 9 Обзора от 28.06.2017 разъяснено, что дополнительное соглашение, предусматривающие изменение сроков исполнения контракта, является ничтожным (пункт 2 статьи 168 ГК РФ, часть 2 статьи 8, пункт 2 статьи 34, пункт 1 статьи 95 Закона о контрактной системе).

Исходя из того, что с учетом изложенного выше изменение сторонами заключения контракта условия о сроке выполнения работ нарушало предусмотренный Законом N 44-ФЗ запрет на изменение условий контракта, заключенное сторонами дополнительное соглашение N 2 23.09.2021 в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации является ничтожным и, соответственно не порождает правовых последствий.

При таких обстоятельствах суд иск удовлетворил.

Повторно оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приведенные  доводы, суд апелляционной инстанции считает выводы суда первой инстанции правильными.

          Исходя из предмета контракта (работы по проведению контраварийных мероприятий в многоквартирном доме), суд первой инстанции правомерно счел, что оснований для вывода о том, что согласованный предмет контракта подпадает под ограниченный перечень работ, отраженный в пункте 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, а именно выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, не имеется.

         При этом следует отметить, что приведенные апеллянтом обстоятельства нельзя отнести к независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в понимании названной нормы, но  могут быть заявлены при предъявлении к подрядчику  соответствующих требований о взыскании штрафных санкций.

        При таких обстоятельствах оснований для отмены   судебного акта по доводам апелляционной жалобы не имеется.        

Судебный акт соответствует нормам материального права, изложенные в нем выводы – установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела апелляционным судом не установлено.        

 Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 16.02.2023  по делу № А43-20642/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Профтехстрой-НН» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

 

Председательствующий судья 

    Т.И. Тарасова

 

Судьи

             Н.А. Насонова

 

Н.А. Назарова