Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«20» апреля  2021 года

Дело №А12-2504/2021

Резолютивная часть оглашена 14 апреля 2021 года

Полный текст изготовлен 20 апреля 2021 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрел в  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Волгостроймаш» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании задолженности, штрафа, третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

В судебном заседании участвовали представители:

от истца –  ФИО1, по доверенности от 01.12.2020,

от ответчика – извещены, не явились,

от третьего лица – извещены, не явились.

Общество с ограниченной ответственностью «Волгостроймаш» (далее ООО «ВСМ», истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой» (далее ООО «ЮгСтрой», ответчик) о взыскании задолженности по договору субподряда №ЮС/50/2019 от 03.6.2019 в размере 376 073 руб. 60 коп., неустойки в соответствии с  п. 6.2 договора в размере 540 000 руб. за период с 22.10.2019 по 14.04.2021 и по день фактической оплаты долга (с учетом увеличения исковых требований, принятых судом к рассмотрению).

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания  извещался в соответствии с требованиями АПК РФ.

Выслушав  истца, исследовав материалы дела, суд

установил:

Между  ООО «ВСМ» (Субподрядчик)  ООО «ЮгСтрой» (Подрядчик) заключен договор субподряда № ЮС/50/2019 от 03.06.2019 г.  (далее Договор), в соответствии с которым   Субподрядчик принимает на себя обязательство по заданию Подрядчика на выполнение полного комплекса работ по проектам (этапам) наобъекте «Техническое перевооружение котельной 4-х Связистов, расположенной по адресу 

<

...>», в сроки и по стоимости, установленные требованиями Договора, а Подрядчик обязуется принять фактически выполненные работы и произвести оплату в соответствии с условиями Договора.

Срок выполнения работ определяется, согласно п. 2.2 Договора, Графикомпроизводства работ (Приложение № 1 к Договору): начало выполнения работв течении 5-ти календарных дней с момента получения авансового платежа на расчетный счет Субподрядчика и поставки Подрядчиком  оборудования и материалов на объект (п. 2.1 Договора).

Стоимость работ, в соответствии с п. 3.1 Договора, составляет 20 550 000 рублей.

Оплата работ производится в следующем порядке: Подрядчик осуществляетавансовые платежи согласно Графика финансирования работ; выплата авансапроизводится в течении 5 дней с момента письменной заявки Субподрядчика (п. 3.2.1Договора). Оставшуюся сумму стоимости работ по всем этапам Подрядчик выплачиваетСубподрядчику после окончания всех работ, подписания Акта приемки законченногостроительством объекта  в течение 10 рабочих дней (п. 3.2.1договора).

В соответствии с п. 1.3 Договора, работы выполняются силами Субподрядчика.Оборудование и материалы для работ поставляет Подрядчик по заявке Субподрядчика сосроками предоставления согласно Графика производства работ. 

В соответствии с условиями Договора, ООО «ВСМ» выполнило работына указанном объекте на общую сумму 1 488 234 (один миллион четыреста восемьдесятвосемь тысяч двести тридцать четыре) рубля, 14 (четырнадцать) копеек.

Соответствующие работы выполнены в рамках предусмотренных п. 1.1 Договораэтапов (проектов): № 2 Электроосвещение, проект 1208/пр-17-ЭО; № 5 Системагазопотребления, проекты 1208/пр-17-ГСВ Газоснабжение внутреннее, 1208/пр-17-ГСНГазоснабжение наружное, 1208/пр-17-ГСН.АС Строительная часть для наружногогазоснабжения.

Стоимость работ по конкретным этапам составила, соответственно  составила 612 160 рублей 64 копейки за выполнение работ в рамках I этапа ремонта системыгазоснабжения (отчетный период с 05.09.2019 по 02.10.2019) и 876 073 рубля 60 копеек завыполнение работ в рамках проекта электроосвещения (отчетный период с 15.08.2019 по02.10.2019).

Выполнение работ по Договору в соответствующих объемах и на вышеуказанныесуммы подтверждается актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкамиоб объеме выполненных работ и затрат по форме КС-3, отчетами об использованиидавальческих материалов, подписанными как со стороны ООО «ВСМ», так и со стороныООО «ЮгСтрой».

Работы ответчиком оплачены не в полном объеме, остаток задолженности составляет  размере 376 073  руб. 60 коп. Доказательств обратного суду не предоставлено.

  В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

 На основании ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производитсязаказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Исходя из вышеизложенного, требования истца о взыскании задолженности подлежат удовлетворению.  

На основании п. 6.2 Договора, в случае нарушения Подрядчиком сроковоплаты работ, согласованных Сторонами в п.п. 3.2.1 - 3.2.2. Договора, Подрядчикуначисляется штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки домомента оплаты Подрядчиком выполненных работ. Штрафные санкции начисляются запериод с пятого календарного дня просрочки от срока оплаты, согласованного Сторонамив п.п. 3.2.1 - 3.2.2 Договора, по день (включительно) проведения оплаты.

На основании ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Расчет неустойки судом проверен и принят.

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Волгостроймаш» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере  376 073,60 руб., штрафные санкции в размере 540 000 руб. за период с 22.10.2019 по 14.04.2021, государственную пошлину в размере 20 081,46 руб. Всего  936 155,06 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Волгостроймаш» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) штрафные санкции из расчета 1 000 руб. в день с  15.04.2021 до момента фактической оплаты долга в размере 376 073,60 руб.

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 1 240 руб.

Решение может быть обжаловано в течение  одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                                   Т.В.Попова