79_6451747  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-72729/17

14 ноября 2017 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  

председательствующий судья Н.А. Кондратенко ,при ведении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО  "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" к ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС"  

об обязании внести изменения в договор 

При участии в судебном заседании- согласно протоколу  

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Внести изменения в пункты 3.2, 3.4 Государственного контракта № 472015 от 19.11.2015 г., заключенного между ООО  "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" и ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС",  а также в графике производства работ, являющегося неотъемлемой частью  контракта (Приложение № 1 к Контракту), а именно:  

Пункт 3.2. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в  эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных  работ, выполнения которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта,  составляет: 31 месяц.  

Пункт 3.4. работы по контракту должны быть завершены не позднее 31  месяца с момента начала выполнения работ.  

В дату завершения работ включены: 

- сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком по Акту  приемки объекта капитального строительства;  

- передача Подрядчиком документов согласно пп.4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6,  4.2.2.7, 4.2.2.8 Контракта.  

Взыскать с ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ в пользу ООО  «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» 6 000 руб. расходов по государственной