Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980 

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-7216/2022

15 марта 2024 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 05.03.2024

Мотивированное решение изготовлено 15.03.2024

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Семёновой У. Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Васильевой Т.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества Холдинговая компания "Якутуголь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 01.09.2022 № 12.3-4/4258 к обществу с ограниченной ответственностью "СГТ-Восток" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 59 894 рублей долга.

В  судебное заседание явились представители:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: ФИО1 по доверенности от 19.12.2022 №20, паспорт, диплом (посредством веб-конференции);

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество Холдинговая компания "Якутуголь" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением от 05.09.2022 № 12.3-4/4299 к обществу с ограниченной ответственностью "СГТ-Восток"  о взыскании 59 894 рублей неустойки на основании пункта 8.2. договора на оказание комплекса услуг от 21.12.2017 № 3004.

Определением суда от 14.09.2022 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства, без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением от 03.11.2022 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Суд руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил рассмотреть дело в отсутствие представителей истца, извещенных о времени и месте проведения судебного заседания.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

21.12.2017 между Акционерным обществом холдинговой компанией «Якутуголь» (далее - заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Современные горные технологии» (далее - исполнитель) заключен договор на оказание комплекса услуг № 3004 (далее - договор), в соответствии с условиями которого Исполнитель обязуется по заданию Заказчика с использованием необходимой техники и оборудования (буровые установки, экскаваторы, автосамосвалы и пр., далее по тексту – Техника) выполнять работы по бурению взрывных скважин и оказывать услуги по выемке – погрузке и перевозке горной массы (вскрышных пород, навалов) и складированию их в отвалы, содержанию дорог и отвалов, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результаты выполненных работ и оказанные услуги.

В соответствии с п. 1.2. Договора, выполняемые Исполнителем по договору работы и оказываемые им услуги включают и себя (далее по тексту при совместном упоминании все выполняемые по договору работы и оказываемые услуги именуются «Услуги»):

1.2.1. работы по бурению взрывных скважин на соответствующий месяц (по форме приложения №1 к договору, далее по тексту – Заявк-1) для выполнения объема взорванной горной массы 6 820 тыс.куб.м. в 2018 году и 18 000 тыс.куб.м. в последующие годы при диаметре бурения от 215, 9 мм до 311 мм со средним выходом взорванной горной массы (ВГМ) с одного погонного метра по филиалу АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»: 

- для d = 215,9 мм – выход 30,75 м3/п.м.

- для d = 250 мм - выход 43,47 мЗ/п.м.

- для d = 279 мм - выход 53,38 мЗ/п.м.

- для d = 311 мм - выход 65,88 мЗ/п.м.;

1.2.2. услуги по выемке - погрузке горной массы (вскрышных пород, навалов, далее по тексту также именуются «грузы») экскаватором (минимальный объем ковша выемочной единицы – 12 куб.м.) в карьерные самосвалы согласно паспорта экскаваторного забоя в карьерные самосвалы грузоподъемностью от 90 до 220 тонн (далее по тексту – услуги по экскавации) и по дальнейшей перевозке горной массы автосамосвалами в отвал (далее по тексту – услуги по перевозке) в объемах, указанных в Плане развития Горных работ на календарный год (приложение №2 к договору, далее по тексту – План развития Горных работ).

1.2.3. услуги по содержанию технологических автодорог и отвалов в месте оказания Услуг (далее по тексту – услуги по содержанию дорог и отвалов), оказываемые Исполнителем в соответствии с Положением о взаимодействии при оказании комплекса услуг в пределах горного и земельного отвода филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез Нерюнгринский (далее по тексту – Положение о взаимодействии).

Согласно п. 1.3. Договора, место оказания Услуг: горный и земельный отвод Разреза «Нерюнгринский», расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри.

В соответствии с п. 1.4. Договора, Исполнитель обязуется оказывать Услуги по договору в следующие сроки:

- начало оказания Услуг – в сроки, указанные в графике запуска оборудования Исполнителя (приложения №14 к договору);

- окончания оказания Услуг – 31 декабря 2022 года.

Согласно п. 3.1.4. Договора, исполнитель обязан своевременно и в полном объеме выполнять буровые работы в соответствии с Заявкой – 1, согласованной Сторонами на месяц. Своими силами производить подготовку блоков под бурение. 

По п. 3.1.5. Договора, исполнитель обязан своевременно и в полном объеме оказывать услуги по экскавации и услуги по перевозке в соответствии с Планом развития Горных работ, а также заявкой Заказчика на плановый объем выемки – погрузки и перевозки горной массы в отвал на соответствующий месяц (по форме приложения №3 к договору, далее по тексту – Заявка-2), согласованной Сторонами на месяц. Своими силами производить зачистку подъезда и содержание рабочей площадки экскаватора.

В соответствии с п. 3.1.7 Договора, исполнитель обязан не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения от Заказчика Заявки-1 и Заявки-2 рассмотреть их, подписать со своей стороны и направить обратно Заказчику.

Согласно п. 3.3.2 Заказчик обязуется предоставить Исполнителю сведения об условиях выполненных буровых работ за 35 дней до начала планируемого месяца в форме Заявки-1.

Заказчик обязуется предоставить исполнителю сведения об условиях оказания услуг по экскавации и услуг по перевозке за 35 дней до начала планируемого месяца в форме Заявки-2. Предоставлять планы развития горных работ не позднее пяти календарных дней до начала месяца оказания Услуг (п. 3.3.3 Договора).

Согласно п. 6.2. Договора, Стоимость буровых работ за соответствующий отчетный период (месяц) рассчитывается Исполнителем исходя из фактически выполненных объемов бурения взрывных скважин и стоимости выполнения буровых работ за 1 куб.м., установленной в приложении №6 к настоящему договору.

Приемка выполненных буровых работ за отчетный период (месяц) осуществляется на основании сводного месячного Акта выполненных буровых работ (по форме приложения №7 к настоящему договору), составленного на основании промежуточных Актов приёма-передачи готовых скважин на блоке, подписанных Сторонами в соответствии с Положением о взаимодействии, утвержденным ими согласно п. 2.1. настоящего договора.

В соответствии с п. 6.3. Договора, Стоимость услуг по экскавации за соответствующий отчетный период (месяц) рассчитывается Исполнителем исходя из фактически выполненных объемов по выемке и погрузке горной массы и стоимости оказанных услуг по экскавации за 1 куб.м., установленной в приложении №6 к настоящему договору.

Объем вынутой за отчетный период (месяц) горной массы в целике определяется как по производимой совместной маркшейдерской съемке Заказчика и Исполнителя с разбивкой на объёмы, погруженные в собственные самосвалы Исполнителя и самосвалы Заказчика, так и по данным оперативного учета с последующей корректировкой по маркшейдерскому замеру, и оформляется Актом оказанных услуг по экскавации (по форме приложения №8 к настоящему договору), подписанным Сторонами.

Согласно п. 6.4. Договора, Стоимость услуг по перевозке за отчетный период (месяц) рассчитывается Исполнителем исходя из фактически выполненных объемов перевозки грузов и стоимости оказания услуг по перевозке за 1 м3 (один кубометр), установленной в приложении № 6 к настоящему договору.

Объем услуг по перевозке за отчетный период (месяц) определяется:

1)           при загрузке самосвалов Исполнителя экскаваторами Исполнителя - по производимой совместной маркшейдерской съемке Заказчика и Исполнителя;

2)           при загрузке самосвалов Исполнителя экскаваторами Заказчика - по данным оперативного учета, опирающихся на паспорт загрузки самосвала и количество выполненных самосвалом рейсов, с последующей корректировкой по маркшейдерскому замеру;

3)           при загрузке самосвалов Заказчика экскаваторами Исполнителя - по данным оперативного учета, опирающихся на паспорт загрузки самосвала и количество выполненных самосвалом рейсов, с последующей корректировкой по маркшейдерскому замеру,

и оформляется Актом оказанных услуг по перевозке (по форме приложения №9 к настоящему договору), подписанным Сторонами.

В соответствии с п. 6.5. Договора, Стоимость услуг по содержанию дорог и отвалов за соответствующий отчетный период (месяц) рассчитывается Исполнителем исходя из фактически выполненного объёма горных работ комплексом Исполнителя и стоимости оказания услуг за 1 куб.м., установленной в приложении № 6 к настоящему договору, и оформляется Актом оказанных услуг по содержан и отвалов (по форме приложения №10 к настоящему договору), подписанным Сторонами.

Пунктом 8.2. Договора установлено, что в случае неисполнения Исполнителем согласованного ежемесячного объема буровых работ согласно Заявки-1, объемов услуг по экскавации и услуг по перевозке согласно Плану развития Горных работ и Заявки-2, Исполнитель обязуется по заявленному Заказчиком требованию уплатить неустойку в размере 0,03% от стоимости соответствующих неуказанных Услуг, но не более 5% от общей стоимости согласованного объема Услуг. Исполнитель освобождается от ответственности по данному пункту договора если докажет, что ежемесячный объем соответствующих Услуг не был выполнен не по его вине.

При невыполнении Исполнителем установленного месячного объема Услуг менее чем на 10% от согласованного Сторонами Исполнитель вправе восполнить невыполненные в отчетном месяце объемы соответствующих Услуг в следующем месяце, при этом общие объемы соответствующих Услуг за все месяцы должны быть полностью выполнены Исполнителем не позднее последнего месяца текущего года без применения к нему штрафных санкций.

02.11.2018 между заказчиком и исполнителем подписано дополнительное соглашение №3, согласно которому внесены следующие изменения в договор:

1.           Изложить п. 1.2.1. договора в следующей редакции:

«1.2.1. работы по бурению взрывных скважин (далее по тексту - буровые работы) по заявке Заказчика на плановый объем бурения взрывных скважин на соответствующий месяц (по форме приложения № 1 к договору, далее по тексту - Заявка-1) для выполнения объема взорванной горной массы 11 000 тыс.мЗ в 2018 году, 19 600 тыс.мЗ в 2019 году и 21 000 тыс.мЗ в последующие годы при диаметре бурения от 215,9 мм до 311 мм со средним выходом взорванной горной массы (ВГМ) с одного погонного метра по филиалу АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»:

- для d = 215,9 мм - выход 30,75 мЗ/п.м.

- для d = 250 мм - выход 43,47 мЗ/п.м.

- для d = 279 мм - выход 53,38 мЗ/п.м.

- для d = 311 мм - выход 65,88 мЗ/п.м.;»

2.           Изложить п.3.1.12 договора в следующей редакции:

«3.1.12. Обеспечить надлежащее состояние и комплектацию Техники в соответствии с п.п. 203, 429 «Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» (ПБ 05-619-03), в том числе: машинным кабелем и приключательным пунктом, оборудованным счетчиком учета электроэнергии (в случае работы Техники на электроприводе), предоставляемыми Заказчиком безвозмездно.

Вводимую Технику Исполнитель обязуется за 5 дней до начала запуска в работу, но не позднее 31.12.2018г., оборудовать собственными силами и за свой счет: средствами радиосвязи, топливными емкостными датчиками, бортовым оборудованием системы контроля загрузки и топлива (СКЗиТ для автосамосвалов), бортовым оборудованием системы контроля топлива (в случае работы Техники на ДВС), бортовым оборудованием Автоматизированных систем диспетчеризации (АСД) с учетом возможности интеграции в системе используемой в АО ХК «Якутуголь».

Технику, которая работает без необходимого оборудования на момент заключения договора, Исполнитель также обязан оснастить указанным выше оборудованием за свой счет.

Оборудование, предоставленное Заказчиком Исполнителю, после окончания срока действия договора возвращается Исполнителем Заказчику в технически исправном состоянии.»

3.           Изложить п. 3.1.13. договора в следующей редакции:

«3.1.13. Исполнитель обязуется за 5 дней до начала запуска в работу, но не позднее 31.12.2018г., оборудовать и обеспечить надлежащее состояние и комплектацию тракторно-бульдозерной техники собственными силами и за свой счет в соответствии с п.203 «Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» (ПБ 05-619-03), в том числе: средствами радиосвязи, топливными емкостными датчиками, датчиками контроля учета времени работы, датчиками позиционирования, а также бортовым оборудованием Автоматизированных систем диспетчеризации (АСД) с учетом возможности интеграции в системы используемые в АО ХК «Якутуголь».

4.           Изложить п. 8.2. договора в следующей редакции:

«8.2. В случае неисполнения Исполнителем согласованного ежемесячного объема буровых работ согласно Заявки-1, объёмов услуг по экскавации и услуг по перевозке согласно Плану развития Горных работ и Заявки-2, Исполнитель обязуется по заявленному Заказчиком требованию уплатить неустойку в размере 5% от стоимости соответствующих неоказанных Услуг. Исполнитель освобождается от ответственности по данному пункту договора если докажет, что ежемесячный объем соответствующих Услуг не был выполнен не по его вине.

При невыполнении Исполнителем установленного месячного объема Услуг менее чем на 10% от согласованного Сторонами Исполнитель вправе восполнить невыполненные в отчетном месяце объемы соответствующих Услуг в следующем месяце, при этом общие объемы соответствующих Услуг за все месяцы должны быть полностью выполнены Исполнителем не позднее последнего месяца текущего года без применения к нему штрафных санкций.»

5.                  Приложение № 2 к договору изменить и утвердить в новой редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению.

7.           Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон по исполнению договора начиная с 01.01.2019.

20.03.2020 стороны подписали дополнительное соглашение №5 об утверждении Положения №2 к договору в новой редакции. Установили действия дополнительного соглашения с момента подписания сторонами, распространение действия на отношения сторон по исполнению договора начиная с 01.01.2020. 

28.12.2018 между Акционерным обществом холдинговой компанией «Якутуголь», обществом с ограниченной ответственностью «Современные горные технологии», обществом с ограниченной ответственностью «СГТ-Восток» заключено соглашение о замене стороны по Договору № 3004 от 21.12.2017 на оказание комплекса услуг, заключенному между ООО «Современные горные технологии» и АО ХК «Якутуголь».

Согласно п. 1 Соглашения, ООО «Современные горные технологии» добровольно и с согласия двух других Сторон настоящего Соглашения передает, а ООО «СГТ-Восток» принимает на себя по истечении 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения в полном объеме все права и обязанности по выполнению Договора №3004 на оказание комплекса услуг от 21.12.2017, заключенного между ООО «Современные горные технологии» и АО ХК «Якутуголь», и вместо ООО «Современные горные технологии» становятся стороной по данному Договору (Исполнителем).

Заказчиком составлены заявки на плановый объем выемки – погрузки и перевозки горной массы в отвал на декабрь 2019 г., январь 2020 г., март 2020 г., апрель 2020 г., заявки на плановый объем бурения взрывных скважин на декабрь 2019 г., январь 2020 г., март 2020 г., апрель 2020 г.

Сторонами подписаны акты выполненных буровых работ № 115 от 31.12.2019, № 116 от 31.12.2019, № 117 от 31.12.2019, №118 от 31.12.2019, № 2 от 31.01.2020, № 5 от 31.10.2020, №1 от 31.01.2020, № 2 от 31.01.2020, №16 от 31.03.2020, № 17 от 31.03.2020, №18 от 31.03.2020, №19 от 31.03.2020, №29 от 30.04.2020, №30 от 30.04.2020, № 31 от 30.04.2020, №28 от 30.04.2020.

Истец указывает, что в нарушение условий договора услуги Исполнителем были оказаны не в полном объеме.

Всего размер неустойки, начисленной за неисполнение согласованных сторонами объемов работ по договору № 3004 за декабрь 2019г., январь 2020г., март 2020г., апрель 2020г. составляет 59 894 руб., исходя из следующего расчета:

 

Наименование услуги

План   по

договору,

мЗ

Факт, мЗ

+/-

Неустойка,  руб.   (0,03%  от стоимости    не    оказанных услуг)

Перевозка

1 665 000

1 483 839

-181 161

4 801

Содержание отвалов и дорог

1 665 000

1 526 639

- 138 361

522

Бурение взрывных скважин

1 665 000

1 245 566

-419 434

1 748

Экскавация

1 665 000

1 526 639

- 138 361

1784

ИТОГО:

 

 

8 855

 

Наименование услуги

План   по

договору,

мЗ

Факт, мЗ

+/-

Неустойка,  руб,   (0,03%  от стоимости    не    оказанных

услуг)

Перевозка

800 000

617 376

- 182 624

3 6077

Содержание отвалов и дорог

800 000

634 400

- 165 600

625

Бурение       взрывных скважин

501 225

541 169

39 944

- 166

Экскавация

800 000

634 400

- 165 600

2 135

ИТОГО:

 

 

6 201

 

Наименование услуги

План    по

договору,

мЗ

Факт, мЗ

+/-

Неустойка,  руб.   (0,03%   от стоимости    не    оказанных услуг)

Перевозка

2 201 667

1 627 055

-574 612

15 313

Содержание отвалов и дорог

2 201 667

1 794 467

- 407 199

1 537

Бурение       взрывных скважин

2 062 667

1 401 227

-661 618

2 757

Экскавация

2 201 667

1 794 467

-407 199

5 250

ИТОГО:

 

 

24 857

 

Наименование услуги

План    по

договору,

мЗ

Факт, мЗ

+/-

Неустойка,  руб.   (0,03%   от стоимости    не    оказанных услуг)

Перевозка

1 950 758

1 457 552

- 493 206

13 020

Содержание отвалов и дорог

1 950 758

1 622 462

328 296

1 239

Бурение       взрывных скважин

1 892 349

1 535 102

- 357 248

1489

Экскавация

1 950 758

1 622 462

- 328 296

4 233

ИТОГО:

19 981

 

В целях досудебного урегулирования спора истец направил ответчику претензию №21.11-4/5526 от 16.07.2020. Согласно отчету об отслеживании почтового отправления № 80090050348203, претензия вручена адресату почтальоном 29.07.2020.

Истец, указывая, что ответчиком не исполнены принятые на себя обязательства, обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик заявленные требования не признает в полном объеме, поскольку работы в спорный период выполнялись своевременно и в полном объеме, в соответствии с поданными заявками.

Суд, изучив и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

Правовая квалификация возникших между истцом и ответчиком правоотношений относится к договору возмездного оказания услуг.

Согласно части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Согласно п. 8.2. Договора, в случае неисполнения Исполнителем согласованного ежемесячного объема буровых работ согласно Заявки-1, объёмов услуг по экскавации и услуг по перевозке согласно Плану развития Горных работ и Заявки-2, Исполнитель обязуется по заявленному Заказчиком требованию уплатить неустойку в размере 5% от стоимости соответствующих неоказанных Услуг. Исполнитель освобождается от ответственности по данному пункту договора если докажет, что ежемесячный объем соответствующих Услуг не был выполнен не по его вине.

При невыполнении Исполнителем установленного месячного объема Услуг менее чем на 10% от согласованного Сторонами Исполнитель вправе восполнить невыполненные в отчетном месяце объемы соответствующих Услуг в следующем месяце, при этом общие объемы соответствующих Услуг за все месяцы должны быть полностью выполнены Исполнителем не позднее последнего месяца текущего года без применения к нему штрафных санкций

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой названной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. 

По смыслу данной нормы права буквальное значение содержащихся в договоре слов и выражений (буквальное толкование) определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. 

При этом условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, другими положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения. 

Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. 

Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Исходя из пунктов 3.3.2, 3.3.3 Договора, Заказчик обязуется предоставить Исполнителю сведения об условиях выполненных буровых работ, сведения об условиях оказания услуг по экскавации и услуг по перевозке за 35 дней до начала планируемого месяца в форме Заявки-1 и Заявки-2, а также предоставлять планы развития горных работ не позднее пяти календарных дней до начала месяца оказания Услуг.

В соответствии с п. 3.1.7 Договора, исполнитель обязан не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения от Заказчика Заявки-1 и Заявки-2 рассмотреть их, подписать со своей стороны и направить обратно Заказчику.

Между тем, сведения об условиях выполненных буровых работ, сведения об условиях оказания услуг по экскавации и услуг по перевозке, заявки ответчиком не получены. 

Представленные истцом в суд заявки составлены в одностороннем порядке, при этом, истцом также не представлены в материалы дела доказательства, подтверждающие направление ответчику заявки или иного документа, подтверждающего волеизъявление на оказание услуг.

Доказательств, подтверждающих направление ответчику, как и получение подписанных ответчиком заявок, в нарушение статьи 65 АПК РФ, истцом не представлено.

Кроме того, виды услуг, указанные в заявках, в приложении №2 к договору, плане, не соответствуют видам услуг за которое взыскивается неустойка по п. 8.2. Договора.

На основании изложенного, в удовлетворении иска судом отказано.

Истцом при предъявлении иска уплачена государственная пошлина в размере 2 396 рублей, что подтверждается платежным поручением № 11641 от 05.09.2022.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина по делу относится на истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований, отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

 

Судья

Семёнова У. Н.