РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-272450/23-143-2103

г. Москва

13 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения вынесена 30 января 2024 года

Мотивировочная часть решения изготовлена 13 февраля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Судья О.С. Гедрайтис

рассмотрев материалы дела в порядке упрощенного судопроизводства по иску

ППК «ВСК» (ИНН 

<

***>)

к ОАО «БАМСТРОЙПУТЬ» (ИНН 

<

***>)

о взыскании штрафа по Договору от 11.01.2022 в размере 100 000 руб. 00 коп.,

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

ППК «ВСК» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ОАО «БАМСТРОЙПУТЬ» о взыскании штрафа по Договору от 11.01.2022 в размере 100 000 руб. 00 коп.

По всем имеющимся и указанным адресам арбитражным судом было направлено определение о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства по делу. Указанное определение сторонами получено. 

Лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного производства, считаются извещенными надлежащим образом, если ко дню принятия решения арбитражный суд располагает сведениями о получении стороной копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

В установленные определением суда от 28.11.2023 сроки для представления сторонами дополнительных доказательств и документов в порядке ч. 3 ст. 228 АПК РФ, ответчик представил отзыв на иск, согласно которому заявленные требования оспорил.

01.02.2024г. и 02.02.2024г. (согласно штампу канцелярии) в Арбитражный суд г. Москвы поступили заявления Истца и  Ответчика о составлении мотивировочного решения.

Рассмотрев представленные документы, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 11.01.2022 между ППК «Военно-строительная компания» (Истец, Генподрядчик) и ОАО «Бамстройпуть» (Ответчик, Субподрядчик) заключен договор субподряда № 2123187378042554164000000/15/2022 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Строительство научно-исследовательских объектов» ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России» (Московская область, город Сергиев Посад-6) (шифр объекта 46-21-К), по условиям которого Генподрядчик осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а Субподрядчик выполняет работы по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, разработку проектной и рабочей документации, строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Договора.

По требованию Генподрядчика Субподрядчик обязан представлять отчет о расходовании каждого транша полученного авансового платежа, оформленного по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору 1 раз за каждый транш полученного авансового платежа (пункт 4.19 Договора).

Согласно пункту 8.3.1 Договора Субподрядчик обязан предоставлять не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, ежемесячные отчеты об остатке денежных средств на отдельном расчетном счете на первое число текущего месяца и отчет об использовании денежных средств (в том числе полученного аванса и средств, полученных за выполненные работы), за истекший месяц по форме, указанной в приложении № 4 к Договору, с приложением подтверждающих документов.

Вместе с отчетом в обязательном порядке Субподрядчик обязан направить в адрес Генподрядчика копии платежных поручений, копии заключенных договоров на поставку материалов, оборудования, субподрядные договоры, договоры на оказание услуг строительных машин и механизмов, а также прочие договоры, заключенные Субподрядчиком с третьими лицами в связи выполнением обязательств по настоящему Договору.

В адрес Субподрядчика неоднократно направлялись письма от 10.10.2022 № ОП 6/27908, от 15.11.2022 № ОП-6/33819, 25.05.2023 № ЦФО/22446 и от 27.07.2023        № ЦФО/33835 с требованием предоставления отчетов об использовании денежных средств.

По настоящее время отчеты об использовании денежных средств, с приложением подтверждающих документов, Субподрядчик в адрес Генподрядчика не предоставил.

В соответствии с пунктом 18.10 Договора в случае нарушения Субподрядчиком требований о предоставлении отчётов, указанных в пункте 8.3 Договора и включенных в него подпунктах, предоставления неполных, недостоверных отчётов, не приложения к отчётам необходимых документов, а равно нарушения сроков предоставления отчётов, Генподрядчик вправе потребовать, а Субподрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 руб. 00 коп. за каждый факт нарушения.

Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия, которая последним оставлена без удовлетворения, в связи с чем, Истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчик с исковыми требованиями не согласился, представил отзыв на исковое заявление в соответствии, с которым просил суд отказать в удовлетворении исковых требований, в связи с тем, что, по мнению Ответчика, отсутствуют основания начисления штрафа по спорному Договору.

Доводы ответчика судом отклоняются, так как, противоречат представленным в материалы дела доказательствам.

При заключении Договора Ответчик был осведомлен о наличии определенных предпринимательских рисков. Являясь субъектом предпринимательской деятельности, Ответчик, в соответствии со ст. 2 ГК РФ осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, а, следовательно, должен и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с неисполнением принятых по договору обязательств. Являясь субъектом гражданских правоотношений, Ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (п. 1 ст. 9 ГК РФ).

Договором, заключенным между Сторонами, предусмотрена ответственность Ответчика за ненадлежащее выполнение своих обязательств, таким образом, подписанием Договора Ответчик подтвердил, что будет нести ответственность в случае нарушения его условий.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, кроме случаев прямо предусмотренных в законе или договоре.

Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключение договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункт 4 статьи 421 ГК РФ).

Ответчик, заключая договор, согласился на его условия, в том числе касающиеся сроков (промежуточных и окончательного) выполнения работ и ответственности за их нарушение.

Предложений об изменении условий Договора в части ответственности Сторон в адрес Истца от Ответчика не поступало ни при заключении Договора, ни при его

Таким образом, доводы Ответчика о злоупотреблении правом со стороны Истца несостоятельны.

Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что исковые требования полежат удовлетворению в указанной выше части, так как, Истцом представлены в материалы дела доказательства в обоснование позиции по спору.

Иные доводы Ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление, судом отклоняются, так как, являются необоснованными и противоречат представленным в материалы дела доказательством и судебной практики.

Кроме того, ходатайство Ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения подлежит отклонению, так как, в материалы дела представлены доказательства соблюдения истцом претензионного порядка, в том числе  претензией от 04.04.2023.

Судебные расходы относятся на Ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 307- 310, 401, 965, 1064   ГК РФ,  ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОАО «БАМСТРОЙПУТЬ» в пользу ППК «ВСК» 100 000 руб. 00 коп. штрафа, 4 000 руб. 00 коп. расходов по уплате госпошлины по иску.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья                                                                                     О.С. Гедрайтис