АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-2468/2024

город Саранск

30 октября 2025 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЛИГА"  

к обществу с ограниченной ответственностью Производственная фирма "Жилкоммунстрой"  

с привлечением в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, председателя совета многоквартирного дома № 26 по ул. Красноармейской г. Саранска ФИО2, ФИО3,  

об обязании устранить недостатки выполненных работ, при участии представителей:  

от истца: ФИО4, по доверенности № 1-03/24 от 11.03.2024 г., от ответчика: ФИО5, по доверенности от 10.02.2025 г., от третьих лиц: не явились, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма "Жилкоммунстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 календарных дней со дня вступления настоящего решения в законную силу  

устранить недостатки строительных работ в многоквартирном доме № 26 по ул. Красноармейская, г. Саранска, а именно:  

устранить дефекты отделочного слоя цоколя по всему периметру дома (отслоение окрасочного слоя и цементно-песчаной штукатурки, отслоение армирующей ленты в швах) на площади 55 м2;  

устранить дефекты в виде трещин, растрескивания, выкрашивания бетонного покрытия отмостки по всему периметру на площади 58,7м2;  

устранить дефекты бетонного покрытия в виде выкрашивания тротуара в виде трещин на площади 4,35 м2;  

устранить отслоение кровельного покрытия в местах примыканий на площади 10 м2;  

установить частично отсутствующие фартуки парапетов на кровле 10 шт. - 0,75м х 2,4м.;  

устранить на техническом этаже следы протечки кровли на площади 6 м2, трещины в месте заделки межплитных швов на площади 4 м2, восстановить местами стяжку пола на площади 5 м2.; смонтировать фановую трубу стояка канализации с выходом на кровлю, восстановить наружный слой гермитизации по периметру дверного блока выхода на кровлю;  

устранить застой воды вследствие отсутствия уклона на кровле на площади 6 м2, устранить контруклон (конец водоотводящего лотка к воронке выше части крыши на 19 мм);  

устранить причины поступления грунтовых и сточных вод в подвальное помещение.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

2. Установить для общества с ограниченной ответственностью Производственная фирма "Жилкоммунстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЛИГА" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на случай неисполнения в установленный срок настоящего решения в размере 1000руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственная фирма "Жилкоммунстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЛИГА" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) госпошлину в размере 6000руб.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.А. Кшняйкин