143/2024-21966(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-19625/2022

г. Хабаровск

21 февраля 2024 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи С.М. Курносовой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1 (до перерыва), ФИО2 (после перерыва)  

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной  ответственностью управляющая компания «Северный округ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680033, 

<

...>)  

к некоммерческой организации «Региональный оператор - фонд  капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680030, 

<

...>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ, 

третьи лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно  предмета спора: общества с ограниченной ответственностью «Фаворит  Фортуны» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680031,  

<

...>),  общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680033, 

<

...>),  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать некоммерческую организацию «Региональный оператор - фонд  капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН  

<

***>) в срок 60 календарных дней с даты вступления решения в  законную силу устранить недостатки работ, выполненных в рамках договора  от 16.04.2019 № 202250000011900035 при проведении капитального ремонта  

крыши МКД по ул. Трехгорная, д. 58 в г. Хабаровске, выполнив работы с  соблюдением технического регламента завода изготовителя жидкой резины  «Технопрок» по подготовке основания, в т.ч.:  

- произвести разборку покрытия кровли - 1 824 м2, - обеспылить поверхность - 1 824 м2, - нанести жидкое теплоизоляционное покрытие - 1 824 м2, 

- нанести гидроизоляционное систему Технопрок в два слоя, общей  толщиной слоя 3 мм. 1 824 м2 с нанесением грунтовочного слоя.  

 Взыскать c некоммерческой организации «Региональный оператор -  фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»  (ОГРН 

<

***>) государственную пошлину по иску в размере 6 000  руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

 Судья С.М. Курносова