АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-15276/18

06 сентября 2018 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 сентября 2018 г.  Полный текст решения изготовлен 06 сентября 2018 г.  

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Новожиловой М.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления  специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в  Южном федеральном округе (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Федеральному  государственному унитарному предприятию «Атэкс» Федеральной службы охраны  Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о понуждении к  исполнению обязательств по устранению недостатков строительно – монтажных работ, и  гарантийных обязательств.  

в отсутствие лиц, участвующих в деле 

установил:

Управления специальной связи и информации Федеральной службы  охраны Российской Федерации в Южном федеральном округе обратилось с иском к  Федеральному государственному унитарному предприятию «Атэкс» Федеральной службы  охраны Российской Федерации о понуждении к исполнению обязательств по устранению  недостатков строительно – монтажных работ и гарантийных обязательств.  

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о  времени и месте его проведения извещены надлежащим образом, в связи с чем исковое  заявление рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации в их отсутствие.  

В ходе рассмотрения спора истцом в порядке статьи 49 АПК РФ заявлено об  уточнении исковых требований.  

В силу положений статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до  принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу,  изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых  требований.  

Уточнения приняты к рассмотрению. 

Предметом рассмотрения являются требования истца к ответчику об обязании в  

течение шестидесяти календарных дней с момента вступления решения суда в законную  

силу 

1. Устранить недостатки строительно-монтажных работ и исполнительной  

документации, указанные в Акте Государственной комиссии по приёмке законченных  

строительством объектов № 9/4/23/1/1-966 от 31 октября 2015 г. (Приложение № 2 к Акту):  по базовой станции БС 6119 (Новоалександровка): передать исполнительную  

документацию на комплектную трансформаторную подстанцию (КТПН); 

по базовой станции БС 9369 (Курганинск): передать градостроительный план,  

передать исполнительную документацию на комплектную трансформаторную  

подстанцию (КТПН); 

по базовой станции БС 9315 (Комсомольский, Сечевая):  

контргайки на рёбрах 1, 7 яруса АМС и на уголковых рёбрах выполнить из  

высокопрочной стали; передать коврик диэлектрический; передать схему расположения геодезических знаков; 

передать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы;  передать градостроительный план;  

кабели к наружным датчикам движения выполнить в защитном исполнении; по базовой станции БС 9326 (Елизаветинская): установить внешнюю боковую решётку отсека ДГУ; передать градостроительный план; 

передать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы;  по базовой станции БС 9371 (Воскресенск):  

передать коврик диэлектрический; 

передать исполнительную документацию на комплектную трансформаторную  

подстанцию (КТПН); 

передать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы;  

передать акт освидетельствования работ по обратной засыпке пазух котлована и  

освидетельствования ответственных конструкций фундаментов АМС; передать градостроительный план; по базовой станции БС 9368 (Великовечное): привести в соответствии с проектом ограждение нижней площадки АМС; 

в отсеке ДГУ установить жалюзи системы охлаждения;  

передать исполнительную документацию на комплектную трансформаторную  

подстанцию (КТПН); 

передать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы;  передать градостроительный план;  

по базовой станции БС 9314 (Березовый): 

контргайки на рёбрах 1, 7 яруса АМС и на уголковых рёбрах выполнить из  

высокопрочной стали; передать коврик диэлектрический; передать градостроительный план; 

по базовой станции БС 9370 (Су-Псех, Анапа): передать 3 комплекта ключей от  

блок-контейнера мобильного (БКМ); 

по базовой станции БС 9372 (Новороссийск): передать 3 комплекта ключей от  

блок-контейнера мобильного (БКМ); 

по ретранслятору PC 9373 (Верхнебаканская): передать протокол приёмосдаточных  

испытаний электроустановок потребителей; 

по объекту Новороссийск-Центр: передать акт (протокол) индивидуальных  

испытаний аккумуляторов; по базовой станции БС 0110 (Дондуковская): 

передать исполнительную документацию на комплектную трансформаторную  подстанцию (КТПН);  

передать градостроительный план; по базовой станции БС 0111 (Майкоп): передать журнал монтажных работ. 

2. Устранить недостатки строительно-монтажных работ и исполнительной  документации, указанные предписаниях Отдела государственного строительного надзора  Службы инженерно-технического обеспечения ФСО России № 2 от 1 июля 2015 г. и № 3  от 16 декабря 2015 г.:  

по базовой станции БС 9369 (Курганинск): 

выполнить установку шайб в болтовых соединениях металлических конструкций  вертикальных связей 1 и 7 яруса АМС в соответствии с требованиями проектной  документации;  

выполнить установку контргаек в монтажных соединениях фланцев антенно- мачтового сооружения (АМС) на высокопрочных болтах;  

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  требованиями проектной документации;  

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации  выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  требованиями проектной документации;  

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  льда, в соответствии с требованиями проектной документации;  

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  проектная документация альбом 12-6101-9369-ЭГ)  

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9369-КЖ);  

-исполнительную схему фундамента трансформаторной подстанции КТПН (п. 6.13  СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы  в строительстве»)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  оказывающих влияние на безопасность объекта;  

по базовой станции БС 9326 (Елизаветинская): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  требованиями проектной документации;  

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации  установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения льда, в  соответствии с требованиями проектной документации;  

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  проектная документация альбом 12-6101-9326-ЭГ)  

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9326-КЖ)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  

оказывающих влияние на безопасность объекта; 

по базовой станции БС 9315 (Комсомольский, Сечевая):  

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  

антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  

соответствии с требованиями проектной документации; 

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  

территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  

льда, в соответствии с требованиями проектной документации; 

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- 

мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  

проектная документация альбом 12-6101-9315-ЭГ) 

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  

засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9315-КЖ)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  

оказывающих влияние на безопасность объекта; по базовой станции БС 9314 (Березовый): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  

антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  

соответствии с требованиями проектной документации; 

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  

территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации  

выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  

льда, в соответствии с требованиями проектной документации; 

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- 

мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  

проектная документация альбом 12-6101-9314-ЭГ) 

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  

засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9314-КЖ)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  

оказывающих влияние на безопасность объекта; по базовой станции БС 9368 (Великовечное): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  

антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  

соответствии с требованиями проектной документации; 

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  

территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации  

выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  

льда, в соответствии с требованиями проектной документации; 

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- 

мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  

проектная документация альбом 12-6101-9368-ЭГ) 

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  

засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9368-КЖ) 

- исполнительную схему фундамента трансформаторной подстанции КТПН  (п. 6.13 СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84  «Геодезические работы в строительстве»)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  

оказывающих влияние на безопасность объекта; по базовой станции БС 9371 (Воскресенск): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  

антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  

соответствии с требованиями проектной документации; 

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  

льда, в соответствии с требованиями проектной документации; 

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- 

мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  

проектная документация альбом 12-6101 -9371-ЭГ) 

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  

засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9371-КЖ)  

- исполнительную схему фундамента трансформаторной подстанции КТПН (п.  

6.13 СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические  

работы в строительстве») 

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  

оказывающих влияние на безопасность объекта; по базовой станции БС 0110 (Дондуковская): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  

антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  

соответствии с требованиями проектной документации; 

выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  

льда, в соответствии с требованиями проектной документации; 

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- 

мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  

проектная документация альбом 12-6101-0110-ЭГ); 

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  

засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-0110-КЖ),  

. - свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  

оказывающих влияние на безопасность объекта. 

3. Устранить недостатки, выявленные в период гарантийного срока, в сооружениях,  инженерных системах, оборудовании, материалах, работах и указанные в следующих  рекламационных актах:  

по объекту ЦКУ в Ростовской области: 

произвести ремонт радиостанции носимой STP9040 (после окончания процесса  программирования радиостанция не выходит из инженерного режима),  

рекламационный акт № 9/4/23/10/1-366 от 16.06.2016, 

произвести ремонт радиостанции носимой STP9040 (не осуществляется  программирование радиостанции программатором Entry Level Radio Manager 2),  рекламационный акт № 9/4/23/10/1-367 от 16.06.2016,  

произвести ремонт радиостанции носимой STP9040 (после окончания процесса  программирования радиостанция не выходит из инженерного режима),  

рекламационный акт № 9/4/23/10/1-368 от 16.06.2016; 

по базовой станции БС 6113 (Родионово-Несветайская): произвести ремонт дизель- генераторной установки SDMO-T16K (неисправность перепускного клапана, течь топлива  из-под клапана, наличие масляных потёков на выпускном коллекторе и выхлопной трубе),  рекламационный акт № 9/4/23/10/1-372 от 16.06.2016;  

по базовой станции БС 6119 (Новоалександровка): 

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (неисправность  перепускного клапана, течь топлива из под клапана), рекламационный акт № 9/4/23/10/1- 371 от 16.06.2016,  

произвести ремонт реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП- 310 вводного щита телекоммуникационного блок контейнера (блокировка реле РНПП-301  при наличии на входе напряжения с параметрами в пределах допустимых характеристик),  рекламационный акт № 9/4/23/10/1-429 от 21.07.2016;  

по базовой станции БС 6120 (Новоперсиановка): произвести ремонт дизель-  генераторной установки SDMO-T16K (неисправность перепускного клапана, течь топлива  из-под клапана, течь антифриза), рекламационный акт № 9/4/23/10/1-370 от 16.06.2016;  

по базовой станции БС 6121 (Батайск): произвести ремонт дизель-генераторной  установки SDMO-T16K (неисправность перепускного клапана, течь топлива из под  клапана, течь антифриза), рекламационный акт № 9/4/23/10/1-369 от 16.06.2016;  

по базовой станции БС 9314 (Березовый): 

произвести ремонт системы кондиционирования - сплит-системы MitsubishiHeavy  SRC (при включении сплит- системы не запускается компрессор), рекламационный акт №  9/4/23/13/1-558 от 11.03.2016;  

устранить отклонение от вертикали антенно-мачтового сооружения (АМС)  (отклонение от геометрии АМС превышает допуск СНиП), рекламационный акт   № 9/4/23/13/1-1453 от 18.08.2016;  

по базовой станции БС 9369 (Курганинск): 

произвести ремонт системы распределения электропитания БС (при подаче  управляющего напряжения на реле KL2, KL4 не происходит включения цепи  электропитания оборудования БС), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-163 от 21.01.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (нарушена  герметичность датчика перекачки дизельного топлива основного бака, при запуске ДГУ  происходит выдавливание масла через трубу отвода выхлопных газов), рекламационный  акт № 9/4/23/13/1-735 от 04.04.2016;  

произвести ремонт блока заряда «СКАТ» (отсутствие напряжения на выходе блока  заряда «СКАТ», что привело к глубокому разряду и выхода из строя АКБ),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-736 от 04.04.2016;  

произвести ремонт воздушных клапанов в отсеке ДГУ (при запуске ДГУ не  открываются воздушные клапаны в отсеке ДГУ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1268  от 08.07.2016;  

произвести ремонт системы резервного электропитания БС Flatpack (неисправны  АКБ стойки питания Eltek SBS 190F, полный разряд АКБ стойки питания при штатной  работе оборудования БС происходит за 20 минут), рекламационный акт № 9/4/23/13/1- 1269 от 08.07.2016;  

произвести ремонт ОПС «АРКАН» (не подключается программное обеспечение к  плате контроллера для управления ОПС «АРКАН», выгорание платы контроллера),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1270 от 08.07.2016;  

произвести ремонт реле № 10 блока вывода аварий и состояний работы РЩ,  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1448 от 17.08.2016;  

устранить осадку фундаментов опор башни связи PC 9369 (осадка превышает  допуск СНиП), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1455 от 18.08.2016;  

произвести ремонт неуправляемого коммутатора MOXA-EDS-P205A (не работают  порты 4, 5 неуправляемого коммутатора MOXA-EDS-P205A), рекламационный акт №  9/4/23/13/1-1479 от 22.08.2016;  

по базовой станции БС 9315 (Комсомольский Сечевая,): 

произвести ремонт системы электропитания БКМ (не включаются управляемые  розетки в отсеках БКМ по температуре), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-471 от  24.02.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (не включается  ТЭН двигателя ДГУ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-472 от 24.02.2016;  

произвести ремонт системы распределения электропитания БС (неисправны реле  KL2, KL3 в распределительном щите РЩ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1240 от  03.07.2016;  

устранить отклонение от вертикали антенно-мачтового сооружения (АМС)  (отклонение от геометрии АМС превышает допуск СНиП), акт № 9/4/23/13/1 -1454 от  18.08.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (неисправна АКБ  с ДГУ, саморазряд АКБ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1784 от 12.10.2016;  

произвести ремонт системы видеонаблюдения (неисправен жесткий диск Seageate  Barracuda 2000 GB s/n Z1F2S93R, диск не определяется сетевым хранилищем NetGear)  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-919 от 10.06.2018;  

по базовой станции БС 9368 (Великовечное): 

произвести ремонт системы резервного электропитания ДГУ (нарушена  герметичность датчика перекачки дизельного топлива основного бака, неисправны  микропереключатели открытия и закрытия датчика перекачки дизельного топлива  основного бака), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-165 от 22.01.2016;  

произвести ремонт системы кондиционирования (не включается блок управления  (ротации) ССМ-33-0.0), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1709 от 01.11.2017;  

по базовой станции БС 9370 (Су-Псех, Анапа): 

произвести ремонт системы резервного электропитания ДГУ (нарушена  герметичность датчика перекачки дизельного топлива основного бака, неисправны  микропереключатели открытия и закрытия датчика перекачки дизельного топлива  основного бака), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-392 от 01.02.2016;  

восстановить работу радиорелейного интервала PC 9370 (Су-псех) - PC 9373  (Верхнебаканская) (разъюстировка радиорелейных антенн, уровень приёма PC 9373  Верхнебаканская -57dBm, периодическое пропадание приёма), рекламационный акт   № 9/4/23/13/1-928 от 13.05.2016;  

произвести ремонт системы охранно-пожарной сигнализации «АРКАН» (не  подключается программное обеспечение к плате контроллера для управления ОПС  «АРКАН»), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1708 от 01.11.2017;  

по базовой станции БС 9371 (Воскресенск): 

произвести ремонт системы распределения электропитания БС (отсутствие  

напряжения на выходе блока заряда «СКАТ», не втягивается магнитный пускатель QS1),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-162 от 21.01.2016,  

произвести ремонт системы резервного электропитания ДГУ (нарушена  герметичность датчика перекачки дизельного топлива основного бака, неисправны  микропереключатели открытия и закрытия датчика перекачки дизельного топлива  основного бака) рекламационный акт № 9/4/23/13/1-164 от 21.01.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (не заводится  ДГУ, на панели управления ДГУ высвечивается индикация «Авария», не включается ТЭН  двигателя ДГУ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-393 от 01.02.2016;  

произвести ремонт системы электропитания БКМ (не включаются управляемые  розетки в отсеках БКМ по температуре), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-470 от  24.02.2016;  

устранить отклонение от вертикали антенно-мачтового сооружения (АМС)  (отклонение от геометрии АМС превышает допуск СНиП), устранить осадку фундаментов  опор (осадка превышает допуск СНиП), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1456 от  18.08.2016;  

произвести ремонт системы электропитания БКМ (неисправны реле HLS-MK3P 5  штук в распределительном щите, местами деформированы позиционные места реле),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1785 от 12.10.2016;  

по базовой станции БС 9372 (Новороссийск): 

произвести ремонт системы резервного электропитания БС, ДГУ (нарушена  герметичность системы перекачки дизельного топлива основного бака, неисправны  микропереключатели датчика перекачки, нарушена герметичность системы охлаждения,  отсутствует охлаждающая жидкость), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1374 от  01.08.2016;  

произвести ремонт системы распределения электропитания БС (отсутствие  напряжения на выходе блока заряда «СКАТ»), рекламационный акт № 9/4/23/13/1 -1707 от  01.11.2017;  

по базовой станции БС 9326 (Елизаветинская): произвести ремонт системы  электропитания БС (неисправно реле № 10 блока вывода аварий и состояний работы РЩ),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1457 от 18.08.2016;  

произвести ремонт установки резервного электропитания ДГУ № 13003277  (выдавливание охлаждающей жидкости через предпусковой электроподогреватель ТЭН  ДГУ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1 -118 от 22.01.2018;  

произвести ремонт системы кондиционирования - сплит-системы MitsubishiHeavy  SRK40HG-S/ s/n 210916536RE (ошибка связи с внешним блоком, не запускается  компрессор), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1034 от 10.07.2018;  

произвести ремонт системы кондиционирования - сплит-системы MitsubishiHeavy  SRK40HG-S/ s/n 128607235RE (ошибка связи с внешним блоком, не запускается  компрессор), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1033 от 10.07.2018.  

по базовой станции БС 0110 (Дойдуковская): 

произвести ремонт изделия БКМ РО/012 ССИ 036 (при падении уровня топлива в  основном баке ДГУ не срабатывает клапан перекачки топлива из резервного в основной  бак), акт № 9/4/23/11-2150 от 23.06.2017,  

устранить разность опорных узлов антенно-мачтового сооружения АМС PC 0110  (максимальная разность составляет 12 мм, что превышает предельные значения СП  70.13330.12 (5 мм), акг № 9/4/23/11-3323 от 06.10.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (неисправен ТЭН  жидкости в дизельном двигателе № Т16К13003364), рекламационный акт № 9/4/23/11- 3340 от 06.10.2016;  

по базовой станции БС 0111 (Майкоп): произвести ремонт базовой станции TETRA  BS-400T/430T/470T (не калибруется плата MPU более 500 Гц), рекламационный акт  

 № 9/4/23/11-3322 от 06.10.2016.  

по ЦССИ ФСО России в Краснодарском крае: 

произвести ремонт радиостанции носимой Sepura STP9040 № 1PR301329G8134N  

(сбой при программировании радиостанции), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-119 от  22.01.2018;  

произвести ремонт радиостанции носимой Sepura STP9040 № 1PR301329G8133Q  

(сбой при программировании радиостанции), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-120 от  22.01.2018.  

Как следует из материалов дела 14.12.2012 г. между Управлением специальной  связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Южном  федеральном округе (далее по тексту - УССИ ФСО России в ЮФО, управление, заказчик,  истец) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Атэкс» (далее по  тексту - ФГУП «Атэкс», подрядчик, ответчик) был заключён государственный контракт   № 176 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для создания  системы конфиденциальной подвижной радиосвязи специального назначения стандарта  TETRA на территории Южного федерального округа (увеличение зоны обслуживания и  

повышение функциональной устойчивости системы конфиденциальной подвижной  радиосвязи специального назначения стандарта TETRA на территории Южного  федерального округа).  

В соответствии с условиями контракта, заказчик - УССИ ФСО России в ЮФО —  передаёт, а подрядчик - ФГУП «Атэкс» - принимает на себя выполнение строительно- монтажных и пуско-наладочных работ для создания объектов системы конфиденциальной  подвижной радиосвязи специального назначения стандарта TETRA на территории  Южного федерального округа (п. 1.1. контракта). Подрядчик принял на себя обязательства  произвести строительство системы связи, выполнить пуско-наладочные работы на  законченных строительством объектах, завершить строительство и сдать объекты,  готовые к эксплуатации, в установленном порядке и в сроки, согласованные сторонами и  указанные в графике производства работ (п. 1.2, 1.3, 4.1.1, 4.1.2 контракта).  

Общие календарные сроки выполнения работ были определены сторонами в  пункте 3.1 контракта: начало выполнения работ: с даты заключения контракта; окончание  работ: 10 декабря 2013 г.  

В ходе исполнения контракта подрядчиком было построено либо  реконструировано (модернизировано) всего 26 объектов системы связи, в том числе  осуществлено капитальное строительство 11 базовых станций с антенно-мачтовыми  сооружениями.  

Приёмка выполненных работ в целом произведена заказчиком в два этапа:  31.10.2015 г. актом Государственной комиссии по приёмке законченных строительством  объектов № 9/4/23/1/1-966 принято 25 объектов, в приёмке базовой станции БС-6113  (Родионово-Несветайская) комиссией отказано, так как объект признан не  соответствующим проекту, не отвечающим строительным нормам, правилам и  государственным стандартам.  

После устранения выявленных недостатков, объект БС-6113 принят заказчиком  отдельно по акту приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией   № 9/4/23/1/1-1458 от 25.12.2015 г.  

При приёмке выполненных работ, в акте государственной комиссии по приёмке  законченных строительством объектов № 9/4/23/1/1 -966 от 31.10.2015 г., в приложении   № 2 к акту, указаны отдельные недостатки по строительно-монтажным работам и  недостатки по исполнительной документации, выявленные комиссией в ходе приёмки, но  не влияющие на функционирование системы связи в целом.  

Пунктом 5 решения государственной комиссии подрядчику (ФГУП «Атэкс»)  установлен срок до 15.12. 2015 г. для устранения недостатков, указанных в приложении №  2 к акту.  

Ответчик акт приёмки государственной приёмочной комиссии № 9/4/23/1/1-966 от  31.10.2015 г. подписал без замечаний, с выводами комиссии согласился.  

Как указано в иске, в течение 2016-2017 годов ответчик принимал меры по  устранению указанных в акте недостатков, однако до настоящего времени ряд  недостатков не устранён на базовых станциях БС 9369 (Курганинск), БС 9315  (Комсомольский), БС 9368 (Великовечное), БС9314 (Березовый), БС0110 (Дондуковская).  

Кроме того, в ходе осуществления государственного строительного надзора  инспектором отдела государственного строительного надзора службы инженерно- технического обеспечения ФСО России (ОГСН СИТО ФСО России) вынесены  предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте объекта капитального строительства в отношении отдельных объектов  капитального строительства (базовых станций).  

В предписаниях № 2 от 01.07.2015 г. и № 3 от 16.12.2015 г. указаны недостатки  строительно-монтажных работ и исполнительной документации, требующие устранения  ответчиком в отношении базовых станций БС 9369 (Курганинск), БС 9326  (Елизаветинская), БС 9315 (Сечевая), БС 0110 (Дондуковская), БС 9314 (Березовый), БС  9368 (Великовечное), БС 9371 (Воскресенск).  

Письмом № 9/4/23/1 /1 -60 от 18.01.2016 истец просил ответчика устранить  недостатки, указанные в предписаниях ОГСН СИТО ФСО России до 15.02.2016,  направлен полный перечень нарушений.  

Письмом № 9/4/23/1/0-339 от 10.06.2016 истец повторно сообщал ответчику о том,  что нарушения, выявленные при строительстве объектов ОГСН СИТО ФСО России, а  также указанные в акте приемки не устранены, просил в кратчайшие сроки устранить  нарушения.  

Письмом № 9/5/А-4619 от 16.09.2016 ответчик сообщал, что субподрядчик АО  «Радиотел», которому было поручено устранение недостатков, уклоняется от выполнения  обязательств, в связи с чем, ФГУП «Атэкс» принимаются меры по выбору другой  подрядной организации для выполнения таких работ, просил определить необходимый  объем работ.  

Письмом № 9/4/23/10/1-526 от 07.10.2016 истец направил ответчику перечень и  объемы работ по устранению недостатков.  

Письмом № 9/5/А-603 от 14.03.2017 ответчик повторно сообщил, что не устранил  недостатки в связи с отказом субподрядной организации АО «Радиотел», а также указал,  что для выполнения работ по результатам тендерных процедур выбрана подрядная  организация ООО «Техстроймонтаж», к письму приложен график устранения недостатков  и перечень недостатков, устранение которых поручено новому субподрядчику. Согласно  графику работы должны быть проведены по всем объектам в апреле-мае 2017 г.  

Письмом № 9/4/23/10/0-227 от 15.06.2017 истец сообщил ответчику, что работы  ООО «Техстроймонтаж» в установленные графиком сроки не проводились, требовал в  кратчайшие сроки устранить недостатки на объектах системы связи.  

27.10.2017 истцом ответчику направлена претензия об устранении выявленных  нарушений, в которой истец повторно сообщает, что недостатки, указанные в акте  приемки и предписаниях госстройнадзора не устранены, предупреждает, что в случае  неудовлетворения претензии будет обращаться в суд.  

На претензию ответчик письмом № 9/5/А-3107 от 21.12.2017 сообщил, что  недостатки не устранены по вине субподрядных организаций, планируется проведение  конкурсных процедур для выбора исполнителя для устранения недостатков в весенне- летний период.  

Изложенное послужило основанием для обращения истца в суд с требованиями об  устранении недостатков выполненных работ, выявленных в пределах гарантийного срока.  

Сложившиеся между сторонами правоотношения регулируются положениями  Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда (гл. 37 ГК РФ)и  

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее –  Закон № 44-ФЗ).  

Согласно пункту 1 статьи 740 Кодекса по договору строительного подряда  подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется  создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и  уплатить обусловленную цену.  

Согласно пункту 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации  качество выполненной работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при  отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к  работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в пределах  разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если  такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования  результата работы такого рода.  

Пунктом 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено: в  случае, когда для результата работы предусмотрен гарантийный срок, результат работы  должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве  (пункт 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы предусмотрена в  статье 723 Гражданского кодекса Российской Федерации. В пункте 1 названной правовой  нормы установлено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями  от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,  которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, либо  при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного  использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по  своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в  разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения  своих расходов на устранение.  

В силу пункта 3 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования,  связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного  срока.  

Бремя доказывания того, что недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах  гарантийного срока, произошли вследствие нормального износа, неправильной  эксплуатации объекта, неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных  самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта  объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами,  возлагается на подрядчика (пункт 2 статьи 755 ГК РФ).  

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,  должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.  

Согласно пункту 4.1.2 спорного контракта, ответчик принял на себя обязательства  обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией  строительными нормами и правилами, техническими условиями и ГОСТ, а также  обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке  работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, если обязанность по их  устранению возложена на подрядчика.  

Согласно пунктам 6.2, 6.4 контракта гарантии качества распространяются на все  конструктивные элементы и работы на объекте, выполненные подрядчиком, а также  работы по монтажу и пуско-наладке монтируемого оборудования. Если в период  гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине  подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с  

заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования  порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не  позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в  этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.  

Пунктом 6.2 Государственного контракта № 176 от 14 .12.2012 г. установлено, что  гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него построенных  сооружений, инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 36  месяцев, с даты подписания сторонами акта государственной комиссии о приемке в  эксплуатацию законченного строительством объекта.  

Акт государственной комиссии № 9/4/23/1/1-966 подписан 31.10. 2016 г. 

В ходе эксплуатации построенной по государственному контракту системы связи, в  течение гарантийного срока истцом был выявлен ряд недостатков строительно- монтажных и пуско-наладочных работ, а также неисправность аппаратуры связи,  инженерных системах и оборудовании. Указанные выше недостатки, выявленные в  строительно-монтажных работах, были известны ответчику, как на момент выполнения  строительно-монтажных работ, так и при приемке выполненных работ государственной  комиссией, что подтверждается материалами дела.  

Ответчику направлены рекламационные акты № 9/4/23/10/1-366, 367 — 372, №  9/4/23/10/1-429, всего - 8; по базовой станции БС 9314 (Березовый) всего - 2; по базовой  станции БС 9369 (Курганинск) - 9; по базовой станции БС 9315 (Комсомольский) — 5; по  базовой станции БС 9368 (Великовечное) — 3; по базовой станции БС 9370 (Анапа) - 3; по  базовой станции БС 9371 (Воскресенск) - 7; по базовой станции БС 9372 (Новороссийск)  — 2; по базовой станции БС 9326 (Елизаветинская) — 1; по БС 0111 (Майкоп) - 5.  

Ответчик рекламационные акты получил, возражения на них не представил. 

Как видно из материалов дела. в ходе переписки сторон в 2016-2017 годах по  вопросам исполнения гарантийных обязательств ответчиком неоднократно направлялся  перечень подлежащих устранению недостатков письмами № 9/4/23/10/1-526 от 07.10.2016,   № 9/4/23/10/1-128 от 16.03.2017. Кроме того, истцом направлялись претензии с  требованием устранить недостатки № 9/4/23/10/0-227 от 15.06.2017, № 9/4/23/10/0-485 от  27.10.2017.  

Из полученных ответов № 9/5/А-603 от 14.03.2017 и № 9/5/А-3107 от 21.12.2017  следует, что ответчик согласен устранить недостатки, указанные в рекламационных актах,  однако недостатки не устранены по вине субподрядных организаций, планируется  привлечение нового субподрядчика.  

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих  требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею  прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных  доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа  заявленных требований.  

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения  или несовершения ими процессуальных действий.  

Соответственно факт ненадлежащего исполнения со стороны ответчика принятых  на себя в рамках спорного договора обязательств по выполнению работ подтвержден  имеющимися в материалах дела доказательствами, ответчиком в установленном законом  порядке не оспорен.  

Доказательства устранения выявленных недостатков в материалы деда не  представлены.  

Соответственно требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме. 

По правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации расходы по уплате государственной пошлины в сумме 18000 руб. подлежат  отнесению на ответчика с взысканием соответствующей суммы в доход федерального  бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.  

Обязать федеральное государственное унитарное предприятие «Атэкс»  

Федеральной службы охраны Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в течение шестидесяти календарных дней с момента вступления решения  

суда в законную силу 

1.Устранить недостатки строительно-монтажных работ и исполнительной  

документации, указанные в Акте Государственной комиссии по приёмке законченных  

строительством объектов № 9/4/23/1/1-966 от 31 октября 2015 г. (Приложение № 2 к Акту):  по базовой станции БС 6119 (Новоалександровка): передать исполнительную  

документацию на комплектную трансформаторную подстанцию (КТПН); 

по базовой станции БС 9369 (Курганинск): передать градостроительный план,  

передать исполнительную документацию на комплектную трансформаторную  

подстанцию (КТПН); 

по базовой станции БС 9315 (Комсомольский, Сечевая):  

контргайки на рёбрах 1, 7 яруса АМС и на уголковых рёбрах выполнить из  

высокопрочной стали; передать коврик диэлектрический; передать схему расположения геодезических знаков; 

передать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы;  передать градостроительный план;  

кабели к наружным датчикам движения выполнить в защитном исполнении; по базовой станции БС 9326 (Елизаветинская): установить внешнюю боковую решётку отсека ДГУ; передать градостроительный план; 

передать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы;  по базовой станции БС 9371 (Воскресенск):  

передать коврик диэлектрический; 

передать исполнительную документацию на комплектную трансформаторную  

подстанцию (КТПН); 

передать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы;  

передать акт освидетельствования работ по обратной засыпке пазух котлована и  

освидетельствования ответственных конструкций фундаментов АМС; передать градостроительный план; по базовой станции БС 9368 (Великовечное): привести в соответствии с проектом ограждение нижней площадки АМС; 

в отсеке ДГУ установить жалюзи системы охлаждения;  

передать исполнительную документацию на комплектную трансформаторную  

подстанцию (КТПН); 

передать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы;  передать градостроительный план;  

по базовой станции БС 9314 (Березовый): 

контргайки на рёбрах 1, 7 яруса АМС и на уголковых рёбрах выполнить из  

высокопрочной стали;  

передать коврик диэлектрический; передать градостроительный план; 

по базовой станции БС 9370 (Су-Псех, Анапа): передать 3 комплекта ключей от  блок-контейнера мобильного (БКМ);  

по базовой станции БС 9372 (Новороссийск): передать 3 комплекта ключей от  блок-контейнера мобильного (БКМ);  

по ретранслятору PC 9373 (Верхнебаканская): передать протокол приёмосдаточных  испытаний электроустановок потребителей;  

по объекту Новороссийск-Центр: передать акт (протокол) индивидуальных  испытаний аккумуляторов;  

по базовой станции БС 0110 (Дондуковская): 

передать исполнительную документацию на комплектную трансформаторную  подстанцию (КТПН);  

передать градостроительный план; по базовой станции БС 0111 (Майкоп): передать журнал монтажных работ. 

2. Устранить недостатки строительно-монтажных работ и исполнительной  документации, указанные предписаниях Отдела государственного строительного надзора  Службы инженерно-технического обеспечения ФСО России № 2 от 1 июля 2015 г. и № 3  от 16 декабря 2015 г.:  

по базовой станции БС 9369 (Курганинск): 

выполнить установку шайб в болтовых соединениях металлических конструкций  вертикальных связей 1 и 7 яруса АМС в соответствии с требованиями проектной  документации;  

выполнить установку контргаек в монтажных соединениях фланцев антенно- мачтового сооружения (АМС) на высокопрочных болтах;  

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  требованиями проектной документации;  

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации  выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  требованиями проектной документации;  

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  льда, в соответствии с требованиями проектной документации;  

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  проектная документация альбом 12-6101-9369-ЭГ)  

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9369-КЖ);  

-исполнительную схему фундамента трансформаторной подстанции КТПН (п. 6.13  СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы  в строительстве»)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  оказывающих влияние на безопасность объекта;  

по базовой станции БС 9326 (Елизаветинская): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  требованиями проектной документации;  

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации  установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения льда, в  соответствии с требованиями проектной документации;  

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  проектная документация альбом 12-6101-9326-ЭГ)  

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9326-КЖ)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  оказывающих влияние на безопасность объекта;  

по базовой станции БС 9315 (Комсомольский, Сечевая):  

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  требованиями проектной документации;  

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  требованиями проектной документации;  

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  льда, в соответствии с требованиями проектной документации;  

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  проектная документация альбом 12-6101-9315-ЭГ)  

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9315-КЖ)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  оказывающих влияние на безопасность объекта;  

по базовой станции БС 9314 (Березовый): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  требованиями проектной документации;  

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации  

выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  требованиями проектной документации;  

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  льда, в соответствии с требованиями проектной документации;  

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  проектная документация альбом 12-6101-9314-ЭГ)  

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  

засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9314-КЖ)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  

оказывающих влияние на безопасность объекта; по базовой станции БС 9368 (Великовечное): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  

антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  

соответствии с требованиями проектной документации; 

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  

территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации 

выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  

льда, в соответствии с требованиями проектной документации; 

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- 

мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  

проектная документация альбом 12-6101-9368-ЭГ) 

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  

засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9368-КЖ) 

- исполнительную схему фундамента трансформаторной подстанции КТПН  (п. 6.13 СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84  «Геодезические работы в строительстве»)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  

оказывающих влияние на безопасность объекта; по базовой станции БС 9371 (Воскресенск): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  

антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  

соответствии с требованиями проектной документации; 

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  

льда, в соответствии с требованиями проектной документации; 

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- 

мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  

проектная документация альбом 12-6101 -9371-ЭГ) 

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  

засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9371-КЖ)  

- исполнительную схему фундамента трансформаторной подстанции КТПН (п.  

6.13 СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические  

работы в строительстве») 

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  

оказывающих влияние на безопасность объекта; по базовой станции БС 0110 (Дондуковская): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  

антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  

соответствии с требованиями проектной документации; 

выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  требованиями проектной документации;  

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  льда, в соответствии с требованиями проектной документации;  

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  проектная документация альбом 12-6101-0110-ЭГ);  

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-0110-КЖ),  

. - свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  оказывающих влияние на безопасность объекта.  

3. Устранить недостатки, выявленные в период гарантийного срока, в сооружениях,  инженерных системах, оборудовании, материалах, работах и указанные в следующих  рекламационных актах:  

по объекту ЦКУ в Ростовской области: 

произвести ремонт радиостанции носимой STP9040 (после окончания процесса  программирования радиостанция не выходит из инженерного режима),  

рекламационный акт № 9/4/23/10/1-366 от 16.06.2016, 

произвести ремонт радиостанции носимой STP9040 (не осуществляется  программирование радиостанции программатором Entry Level Radio Manager 2),  рекламационный акт № 9/4/23/10/1-367 от 16.06.2016,  

произвести ремонт радиостанции носимой STP9040 (после окончания процесса  программирования радиостанция не выходит из инженерного режима),  

рекламационный акт № 9/4/23/10/1-368 от 16.06.2016; 

по базовой станции БС 6113 (Родионово-Несветайская): произвести ремонт дизель- генераторной установки SDMO-T16K (неисправность перепускного клапана, течь топлива  из-под клапана, наличие масляных потёков на выпускном коллекторе и выхлопной трубе),  рекламационный акт № 9/4/23/10/1-372 от 16.06.2016;  

по базовой станции БС 6119 (Новоалександровка): 

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (неисправность  перепускного клапана, течь топлива из под клапана), рекламационный акт № 9/4/23/10/1- 371 от 16.06.2016,  

произвести ремонт реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП- 310 вводного щита телекоммуникационного блок контейнера (блокировка реле РНПП-301  при наличии на входе напряжения с параметрами в пределах допустимых характеристик),  рекламационный акт № 9/4/23/10/1-429 от 21.07.2016;  

по базовой станции БС 6120 (Новоперсиановка): произвести ремонт дизель-  генераторной установки SDMO-T16K (неисправность перепускного клапана, течь топлива  из-под клапана, течь антифриза), рекламационный акт № 9/4/23/10/1-370 от 16.06.2016;  

по базовой станции БС 6121 (Батайск): произвести ремонт дизель-генераторной  установки SDMO-T16K (неисправность перепускного клапана, течь топлива из под  клапана, течь антифриза), рекламационный акт № 9/4/23/10/1-369 от 16.06.2016;  

по базовой станции БС 9314 (Березовый): 

произвести ремонт системы кондиционирования - сплит-системы MitsubishiHeavy  SRC (при включении сплит- системы не запускается компрессор), рекламационный акт №  9/4/23/13/1-558 от 11.03.2016;  

устранить отклонение от вертикали антенно-мачтового сооружения (АМС)  (отклонение от геометрии АМС превышает допуск СНиП), рекламационный акт   № 9/4/23/13/1-1453 от 18.08.2016;  

по базовой станции БС 9369 (Курганинск): 

произвести ремонт системы распределения электропитания БС (при подаче  

управляющего напряжения на реле KL2, KL4 не происходит включения цепи  электропитания оборудования БС), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-163 от 21.01.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (нарушена  герметичность датчика перекачки дизельного топлива основного бака, при запуске ДГУ  происходит выдавливание масла через трубу отвода выхлопных газов), рекламационный  акт № 9/4/23/13/1-735 от 04.04.2016;  

произвести ремонт блока заряда «СКАТ» (отсутствие напряжения на выходе блока  заряда «СКАТ», что привело к глубокому разряду и выхода из строя АКБ),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-736 от 04.04.2016;  

произвести ремонт воздушных клапанов в отсеке ДГУ (при запуске ДГУ не  открываются воздушные клапаны в отсеке ДГУ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1268  от 08.07.2016;  

произвести ремонт системы резервного электропитания БС Flatpack (неисправны  АКБ стойки питания Eltek SBS 190F, полный разряд АКБ стойки питания при штатной  работе оборудования БС происходит за 20 минут), рекламационный акт № 9/4/23/13/1- 1269 от 08.07.2016;  

произвести ремонт ОПС «АРКАН» (не подключается программное обеспечение к  плате контроллера для управления ОПС «АРКАН», выгорание платы контроллера),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1270 от 08.07.2016;  

произвести ремонт реле № 10 блока вывода аварий и состояний работы РЩ,  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1448 от 17.08.2016;  

устранить осадку фундаментов опор башни связи PC 9369 (осадка превышает  допуск СНиП), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1455 от 18.08.2016;  

произвести ремонт неуправляемого коммутатора MOXA-EDS-P205A (не работают  порты 4, 5 неуправляемого коммутатора MOXA-EDS-P205A), рекламационный акт №  9/4/23/13/1-1479 от 22.08.2016;  

по базовой станции БС 9315 (Комсомольский Сечевая,): 

произвести ремонт системы электропитания БКМ (не включаются управляемые  розетки в отсеках БКМ по температуре), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-471 от  24.02.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (не включается  ТЭН двигателя ДГУ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-472 от 24.02.2016;  

произвести ремонт системы распределения электропитания БС (неисправны реле  KL2, KL3 в распределительном щите РЩ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1240 от  03.07.2016;  

устранить отклонение от вертикали антенно-мачтового сооружения (АМС)  (отклонение от геометрии АМС превышает допуск СНиП), акт № 9/4/23/13/1 -1454 от  18.08.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (неисправна АКБ  с ДГУ, саморазряд АКБ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1784 от 12.10.2016;  

произвести ремонт системы видеонаблюдения (неисправен жесткий диск Seageate  Barracuda 2000 GB s/n Z1F2S93R, диск не определяется сетевым хранилищем NetGear)  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-919 от 10.06.2018;  

по базовой станции БС 9368 (Великовечное): 

произвести ремонт системы резервного электропитания ДГУ (нарушена  герметичность датчика перекачки дизельного топлива основного бака, неисправны  микропереключатели открытия и закрытия датчика перекачки дизельного топлива  основного бака), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-165 от 22.01.2016;  

произвести ремонт системы кондиционирования (не включается блок управления  (ротации) ССМ-33-0.0), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1709 от 01.11.2017;  

по базовой станции БС 9370 (Су-Псех, Анапа): 

произвести ремонт системы резервного электропитания ДГУ (нарушена  

герметичность датчика перекачки дизельного топлива основного бака, неисправны  микропереключатели открытия и закрытия датчика перекачки дизельного топлива  основного бака), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-392 от 01.02.2016;  

восстановить работу радиорелейного интервала PC 9370 (Су-псех) - PC 9373  (Верхнебаканская) (разъюстировка радиорелейных антенн, уровень приёма PC 9373  Верхнебаканская -57dBm, периодическое пропадание приёма), рекламационный акт   № 9/4/23/13/1-928 от 13.05.2016;  

произвести ремонт системы охранно-пожарной сигнализации «АРКАН» (не  подключается программное обеспечение к плате контроллера для управления ОПС  «АРКАН»), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1708 от 01.11.2017;  

по базовой станции БС 9371 (Воскресенск): 

произвести ремонт системы распределения электропитания БС (отсутствие  напряжения на выходе блока заряда «СКАТ», не втягивается магнитный пускатель QS1),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-162 от 21.01.2016,  

произвести ремонт системы резервного электропитания ДГУ (нарушена  герметичность датчика перекачки дизельного топлива основного бака, неисправны  микропереключатели открытия и закрытия датчика перекачки дизельного топлива  основного бака) рекламационный акт № 9/4/23/13/1-164 от 21.01.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (не заводится  ДГУ, на панели управления ДГУ высвечивается индикация «Авария», не включается ТЭН  двигателя ДГУ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-393 от 01.02.2016;  

произвести ремонт системы электропитания БКМ (не включаются управляемые  розетки в отсеках БКМ по температуре), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-470 от  24.02.2016;  

устранить отклонение от вертикали антенно-мачтового сооружения (АМС)  (отклонение от геометрии АМС превышает допуск СНиП), устранить осадку фундаментов  опор (осадка превышает допуск СНиП), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1456 от  18.08.2016;  

произвести ремонт системы электропитания БКМ (неисправны реле HLS-MK3P 5  штук в распределительном щите, местами деформированы позиционные места реле),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1785 от 12.10.2016;  

по базовой станции БС 9372 (Новороссийск): 

произвести ремонт системы резервного электропитания БС, ДГУ (нарушена  герметичность системы перекачки дизельного топлива основного бака, неисправны  микропереключатели датчика перекачки, нарушена герметичность системы охлаждения,  отсутствует охлаждающая жидкость), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1374 от  01.08.2016;  

произвести ремонт системы распределения электропитания БС (отсутствие  напряжения на выходе блока заряда «СКАТ»), рекламационный акт № 9/4/23/13/1 -1707 от  01.11.2017;  

по базовой станции БС 9326 (Елизаветинская): произвести ремонт системы  электропитания БС (неисправно реле № 10 блока вывода аварий и состояний работы РЩ),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1457 от 18.08.2016;  

произвести ремонт установки резервного электропитания ДГУ № 13003277  (выдавливание охлаждающей жидкости через предпусковой электроподогреватель ТЭН  ДГУ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1 -118 от 22.01.2018;  

произвести ремонт системы кондиционирования - сплит-системы MitsubishiHeavy  SRK40HG-S/ s/n 210916536RE (ошибка связи с внешним блоком, не запускается  компрессор), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1034 от 10.07.2018;  

произвести ремонт системы кондиционирования - сплит-системы MitsubishiHeavy  SRK40HG-S/ s/n 128607235RE (ошибка связи с внешним блоком, не запускается  компрессор), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1033 от 10.07.2018.  

по базовой станции БС 0110 (Дойдуковская): 

произвести ремонт изделия БКМ РО/012 ССИ 036 (при падении уровня топлива в  основном баке ДГУ не срабатывает клапан перекачки топлива из резервного в основной  бак), акт № 9/4/23/11-2150 от 23.06.2017,  

устранить разность опорных узлов антенно-мачтового сооружения АМС PC 0110  (максимальная разность составляет 12 мм, что превышает предельные значения СП  70.13330.12 (5 мм), акг № 9/4/23/11-3323 от 06.10.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (неисправен ТЭН  жидкости в дизельном двигателе № Т16К13003364), рекламационный акт № 9/4/23/11- 3340 от 06.10.2016;  

по базовой станции БС 0111 (Майкоп): произвести ремонт базовой станции TETRA  BS-400T/430T/470T (не калибруется плата MPU более 500 Гц), рекламационный акт  

 № 9/4/23/11-3322 от 06.10.2016. по ЦССИ ФСО России в Краснодарском крае: 

произвести ремонт радиостанции носимой Sepura STP9040 № 1PR301329G8134N  

(сбой при программировании радиостанции), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-119 от  22.01.2018;  

произвести ремонт радиостанции носимой Sepura STP9040 № 1PR301329G8133Q  

(сбой при программировании радиостанции), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-120 от  22.01.2018.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Новожилова М.А.