АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

 

20 ноября 2023 года

 

Дело № А33-22161/2023

 

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения «Служба заказчика Краснотуранского района» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Провод групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации - 03.03.2016, адрес: 656038, 

<

...>) в пользу муниципального казенного учреждения «Служба заказчика Краснотуранского района» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации - 17.03.2017, адрес: 662660, Красноярский край, 

<

...>)

727 347,60 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту № 9/2020 на разработку проектной документации на объект «Строительство очистных сооружений канализации производительностью 800 м3 в сутки в с. Крснотуранск» от 11.09.2020 за период с 27.10.2020 по 21.11.2022, исходя из расчета: 3 848 400 руб. (цена контракта) х 7,5% (ключевая ставка Банка России, действующая на дату расторжения контракта) х 1/300 х 756 дней просрочки,

17 404 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины платежным поручением № 882058 от 19.07.2023.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать в связи с необоснованным применением истцом ключевых ставок Банка России, действующих в соответствующие периоды просрочки.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

 

Судья

ФИО1