АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е  (резолютивная часть)

Дело № А03-9947/2024

28 октября 2024 г.

г. Барнаул

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сосина Е.А., при ведении  протокола секретарем судебного заседания Мутылиной О.В., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Арена»  (ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 

<

***>/222201001), место нахождения: 656065,  

<

...>, помещ. 76) к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительная компания» (ОГРН 

<

***> ИНН/КПП  

<

***>/222101001), место нахождения: 656053, Алтайский край, г.о. город Барнаул, 

<

...>) об обязании устранить недостатки в выполненных работах и  передать исполнительную документацию, а также о взыскании судебной неустойки,  

при участии в заседании: от истца: ФИО1 - представителя по доверенности; от ответчика: не явился, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» в  течение 10 рабочих дней со дня вступления настоящего решения в законную силу:  

- устранить недостатки в работах, выполненных по договорам подряда № 10-02 от  10.02.2021 и № 03-09 от 03.09.2021 на объекте: Федеральное государственное  образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет  при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), г. Москва.  Строительство здания спортивного комплекса с универсальным игровым залом и  плавательным бассейном по адресу: 

<

...> (ИГК  0000000030319530004)», допущенные при монтаже металлических конструкций в осях  

7-16/Г-Р, путем: очищения от коррозии; восстановления антикоррозийного покрытия  металлических конструкций; выполнения антикоррозийного покрытия металлических  конструкций, где оно отсутствовало; добавления контргаек; протяжки болтовых  соединений с обеспечением наличия выступов не менее двух витков резьбы над гайкой;  очищения от шлака дефектного сварного соединения с последующей покраской;  

- передать обществу с ограниченной ответственностью «Арена» исполнительную  документацию: Журнал работ по монтажу строительных конструкций; Журнал  выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением; Акт  

освидетельствования ответственных конструкций; Исполнительную геодезическую схему;  Акты визуального и измерительного контроля; Заключения по неразрушающему контролю  сварных соединений; Документ о качестве стальных строительных конструкций; Журнал  антикоррозионной защиты сварных соединений; Акты освидетельствования скрытых  работ; Паспорта и сертификаты на применённые материалы - шайбы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания»  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Арена» в случае неисполнения в  срок решения суда судебную неустойку в размере 50 000 руб. за каждую неделю до  момента исполнения решения суда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания»  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Арена» 6 000 руб. в счет  возмещения расходов на оплату государственной пошлины  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Е.А. Сосин