ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дело № А40-42617/2023

резолютивная часть объявлена 30.01.2024г.

изготовлено в полном объеме 13.02.2024г.

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.,

судей Бодровой Е.В., Семикиной О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.10.2023г. (резолютивная часть от 22.09.2023г.)

по делу № А40-42617/2023

по спору с участием:

истец ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (ОГРН 

<

***>)

ответчик ООО «СпецМонтажУниверсал» (ООО «СМУ») (ОГРН 

<

***>),

третье лицо Министерство обороны Российской Федерации (ОГРН 

<

***>)

о взыскании,

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по дов. от 03.07.2023г.,

от ответчика: ФИО3 по дов. от 07.02.2023г.,

от третьего лица: неявка, 

 

УСТАНОВИЛ:

ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (заказчик) предъявило ООО «СпецМонтажУниверсал» (подрядчик) иск о взыскании по Госконтракту от 27.03.2019г. № 1920187375492554164000000/1903-15-СМР(СУБ):

- неосновательного обогащения (неотработанного аванса) в размере 41 828 194,50руб. и начисленных на него по ст. 395 ГК РФ процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.01.2023г. по 27.02.2023г. в размере 266 439,87руб. и далее с 28.02.2023г. по день оплаты, а также начисленных на него по п. 4.22 Контракта и ст. 823 ГК РФ процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом за период с 03.04.2019г. по 10.08.2021г. в размере 23 581 456,33руб. (из расчета 0,01% средней установленной ЦБ РФ ставки по коммерческим кредитам от невозвращенного аванса за каждый день просрочки);

- неустойки по п. 18.4. Контракта за просрочку в работе за период с 16.05.2020г. по 10.08.2021г. в размере 25 072 858,55руб. (из расчета 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки).

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 22.09.2023г., изготовленным в полном объеме 03.10.2023г. (т. 8 л.д. 75-80), иск удовлетворен.

На решение Ответчиком подана апелляционная жалоба.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Ответчик требования и доводы жалобы поддержал, Истец по ним возражал, неявившееся третье лицо уведомлено о времени и месте рассмотрения дела посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте суда в сети Интернет.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Условиями заключенного между ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (заказчик, генподрядчик) и ООО «СМУ» (подрядчик) Госконтракта от 27.03.2019г. № 1920187375492554164000000/1903-15-СМР(СУБ) предусмотрено выполнение полного комплекса работ по объекту: «Обеспечение водоснабжением зданий учебного корпуса, детского сада и солдатского общежития, расположенных в в/г № 71 с. Сергеевка Приморского края» (шифр объекта В-42/19-6), в т.ч. выполнение инженерных изысканий, обследований и обмеров для подготовки проектной документации, разработка проектной и рабочей документаций, строительно-монтажные работы, ведение авторского надзора и ввод объекта в эксплуатацию (возведение объекта «под ключ»).

Отношения сторон являются субподрядными.

Вышестоящим заказчиком является Минобороны России (Госконтракт от 15.03.2019г. № 1920187375492554164000000).

Цена Контракта согласована равной 55 470 926руб. (в ред. ДС от 19.11.2020г. № 2).

Работы подлежали завершению в срок не позднее 15.05.2020г.

Заказчик уплатил подрядчику аванс в размере 41 828 194,50руб. по п/п от 01.04.2019г. № 3427, от 31.12.2019г. № 3564.

Соглашением от 10.08.2021г. (т. 1 л.д. 94-95) Контракт расторгнут.

Соглашением о расторжении удостоверено, что подрядчик получил от заказчика денежные средства в размере 41 828 194,50руб., и что подрядчиком работы не предъявлялись; по результатам инвентаризации с участием МО РФ выявлены не принятые объемы работ; подрядчик обязуется в месячный срок представить документы, предусмотренные Контрактом и необходимые для приемки работ, выполненных по Контракту до заключения Соглашения о расторжении.

Заказчик указывает, что ни в установленный срок, ни в последующем подрядчик так и не предъявил заказчику результат работы.

Подрядчик, возражая, указывает, что частично выполнил работы; наименование, объем, стоимость выполненных работ подрядчик отразил в Актах КС-2 от 21.04.2023г. №№ 1-15 (т. 2 л.д. 32-113), которые направил заказчику письмом исх. от 28.04.2023г. № 143 (т. 2 л.д. 28-29), т.е. в ходе судопроизводства.

Заказчик письмом исх. от 01.03.2023г. № 96 (т. 2 л.д. 23-24) указал мотивы отказа от подписания вышеуказанных Актов КС-2 №№ 1-15.

Подрядчик полагает, что полученный им аванс подлежит сальдированию на стоимость работ и затрат, поименованных в Актах КС-2 №№ 1-15.

В связи с чем подрядчиком в суде первой и апелляционной инстанции было заявлено ходатайство о проведении по делу судебной экспертизы для определения объема и стоимости выполненных им работ.

Возражения подрядчика признаны необоснованными и в назначении экспертизы отказано в силу следующего.

Подрядчик не заявил встречный иск в порядке ст. 132 ГК РФ, в рамках возражений на который заказчик был бы вправе заявить о пропуске срока исковой давности.

В силу ст. 411 ГК РФ не допускается зачет требований, по которым истек срок исковой давности.

В порядке ст. 6 ГК РФ данная норма подлежит применению и к сальдируемым требованиям.

Следовательно, аванс может быть сальдирован на стоимость работ и затрат, поименованных в Актах КС-2 №№ 1-15, если по требованию подрядчика об оплате их стоимости не истек срок исковой давности.

Однако по требованию подрядчика об оплате стоимости работ и затрат по Актам КС-2 №№ 1-15 предусмотренный ст. 196 ГК РФ 3-летний срок исковой давности истек.

Установлено, что все работы/ затраты в рамках Контракта были выполнены/ понесены подрядчиком в 2019г.; в 2020г. подрядчик работы не выполнял.

Подрядчиком в материалы дела представлены Акты освидетельствования скрытых работ:

- по водозабору «Приозерный»:

АОСР от 25.08.2020г. № 1НВ, дата окончания работ: 11.06.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 2),

АОСР от 25.08.2020г. № 1АД, дата окончания работ: 20.05.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 9-10),

АОСР от 25.09.2019г. № НЛЭП/1.19, дата окончания работ: 25.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 13-14),

АОСР от 25.08.2020г. № 3ЭС-1, дата окончания работ: 15.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 19),

АОСР от 25.08.2020г. № 3ЭС-2, дата окончания работ: 10.12.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 20),

АОСР от 25.08.2020г. № 3ЭС-3, дата окончания работ: 11.12.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 21),

АОСР от 25.08.2020г. № 3ЭС-4, дата окончания работ: 11.12.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 22),

АОСР от 25.08.2020г. № 4ЭС-1, дата окончания работ: 12.12.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 59),

АОСР от 25.08.2020г. № 1ЭС, дата окончания работ: 15.10.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 63),

АОСР от 25.08.2020г. № 2ЭС, дата окончания работ: 15.10.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 64),

АОСР от 25.09.2019г. № ПП/1.19, дата окончания работ: 25.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 82),

АОСР от 25.09.2019г. № НЛЭП/1.19, дата окончания работ: 25.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 83),

АОСР от 19.08.2020г. № 1ГП, дата окончания работ: 25.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 85),

АОСР от 19.08.2020г. № АС/1П-1, дата окончания работ: 12.08.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 86),

АОСР от 19.08.2020г. № АС/1П-2, дата окончания работ: 13.08.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 87),

АОСР от 19.08.2020г. № АС/1П-3, дата окончания работ: 13.08.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 88),

АОСР от 19.08.2020г. № ВК/1П-1, дата окончания работ: 06.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 89),

АОСР от 20.08.2020г. № ЭС/1П-1, дата окончания работ: 06.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 91-92),

АОСР от 20.08.2020г. № ЭС/1П-2, дата окончания работ: 06.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 93),

АОСР от 20.08.2020г. № ЭС/1П-3, дата окончания работ: 06.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 94),

АОСР от 19.08.2020г. № АС/2П-1, дата окончания работ: 12.08.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 95),

АОСР от 19.08.2020г. № АС/2П-2, дата окончания работ: 13.08.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 96),

АОСР от 19.08.2020г. № АС/2П-3, дата окончания работ: 13.08.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 97),

АОСР от 19.08.2020г. № ВК/2П-1, дата окончания работ: 06.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 98),

АОСР от 20.08.2020г. № ЭС/2П-1, дата окончания работ: 06.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 99),

АОСР от 20.08.2020г. № ЭС/1П-2, дата окончания работ: 06.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 100),

АОСР от 20.08.2020г. № ЭС/2П-3, дата окончания работ: 06.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 101),

АОСР от 19.08.2020г. № АС/3П-1, дата окончания работ: 12.08.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 102),

АОСР от 19.08.2020г. № АС/3П-2, дата окончания работ: 13.08.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 103),

АОСР от 19.08.2020г. № АС/3П-3, дата окончания работ: 13.08.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 104),

АОСР от 19.08.2020г. № ВК/3П-1, дата окончания работ: 06.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 105),

АОСР от 20.08.2020г. № ЭС/3П-1, дата окончания работ: 06.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 106),

АОСР от 20.08.2020г. № ЭС/3П-2, дата окончания работ: 06.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 107),

АОСР от 20.08.2020г. № ЭС/3П-3, дата окончания работ: 06.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 108),

АОСР от 31.08.2020г. № 4АД, дата окончания работ: 11.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 125),

АОСР от 31.08.2020г. № 5АД, дата окончания работ: 12.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 126),

АОСР от 13.06.2019г. № ЗП/1.19, дата окончания работ: 13.06.2019г. (т. 11 л.д. 68-оборот-69),

АОСР от 14.06.2019г. № ЗП/2.19, дата окончания работ: 14.06.2019г. (т. 11 л.д. 70),

АОСР от 15.06.2019г. № ЗП/3.19, дата окончания работ: 15.06.2019г. (т. 11 л.д. 72),

АОСР от 21.06.2019г. № ЗП/4.19, дата окончания работ: 21.06.2019г. (т. 11 л.д. 74-оборот-75),

АОСР от 21.06.2019г. № ЗП/5.19, дата окончания работ: 21.06.2019г. (т. 11 л.д. 76),

АОСР от 25.06.2019г. № ЗП/6.19, дата окончания работ: 25.06.2019г. (т. 11 л.д. 81-оборот-82),

АОСР от 21.06.2019г. № ЗП/7.19, дата окончания работ: 25.06.2019г. (т. 11 л.д. 83),

АОСР от 26.06.2019г. № ЗП/8.19, дата окончания работ: 26.06.2019г. (т. 11 л.д. 84-оборот-85),

АОСР от 04.06.2019г. № 2П/1.19, дата окончания работ: 04.06.2019г. (т. 11 л.д. 113-оборот-114),

АОСР от 04.06.2019г. № 2П/2.19, дата окончания работ: 04.06.2019г. (т. 11 л.д. 115),

АОСР от 04.06.2019г. № 2П/3.19, дата окончания работ: 05.06.2019г. (т. 11 л.д. 117),

АОСР от 05.06.2019г. № 2П/4.19, дата окончания работ: 05.06.2019г. (т. 11 л.д. 119-оборот-120),

АОСР от 04.06.2019г. № 2П/5.19, дата окончания работ: 06.06.2019г. (т. 11 л.д. 121),

АОСР от 07.06.2019г. № 2П/6.19, дата окончания работ: 07.06.2019г. (т. 11 л.д. 131),

АОСР от 11.06.2019г. № 2П/7.19, дата окончания работ: 11.06.2019г. (т. 11 л.д. 136-оборот-137),

АОСР от 12.06.2019г. № 2П/8.19, дата окончания работ: 12.06.2019г. (т. 11 л.д. 138),

АОСР от 13.06.2019г. № 2П/9.19, дата окончания работ: 13.06.2019г. (т. 11 л.д. 139-оборот-140),

АОСР от 13.04.2019г. № 1П/1.19, дата окончания работ: 13.04.2019г. (т. 12 л.д. 59-оборот-60),

АОСР от 18.04.2019г. № 1П/2.19, дата окончания работ: 18.04.2019г. (т. 12 л.д. 61),

АОСР от 22.04.2019г. № 1П/3.19, дата окончания работ: 22.04.2019г. (т. 12 л.д. 63),

АОСР от 26.04.2019г. № 1П/4.19, дата окончания работ: 26.04.2019г. (т. 12 л.д. 66-оборот-67),

АОСР от 29.04.2019г. № 1П/5.19, дата окончания работ: 29.04.2019г. (т. 12 л.д. 68),

АОСР от 03.05.2019г. № 1П/6.19, дата окончания работ: 03.05.2019г. (т. 12 л.д. 71),

АОСР от 06.05.2019г. № 1П/7.19, дата окончания работ: 06.05.2019г. (т. 12 л.д. 72-оборот-73),

АОСР от 08.05.2019г. № 1П/8.19, дата окончания работ: 06.05.2019г. (т. 12 л.д. 74),

АОСР от 13.04.2019г. № 1П/1.19, дата окончания работ: 13.04.2019г. (т. 14 л.д. 2-3),

АОСР от 18.04.2019г. № 1П/2.19, дата окончания работ: 18.04.2019г. (т. 14 л.д. 5-6),

АОСР от 22.04.2019г. № 1П/3.19, дата окончания работ: 22.04.2019г. (т. 14 л.д. 9-10),

АОСР от 26.04.2019г. № 1П/4.19, дата окончания работ: 26.04.2019г. (т. 14 л.д. 16-17),

АОСР от 29.04.2019г. № 1П/5.19, дата окончания работ: 29.04.2019г. (т. 14 л.д. 19-20),

АОСР от 03.05.2019г. № 1П/6.19, дата окончания работ: 03.05.2019г. (т. 14 л.д. 25-26),

АОСР от 06.05.2019г. № 1П/7.19, дата окончания работ: 06.05.2019г. (т. 14 л.д. 28-29),

АОСР от 08.05.2019г. № 1П/8.19, дата окончания работ: 06.05.2019г. (т. 14 л.д. 31-32),

АОСР от 13.06.2019г. № 3П/1.19, дата окончания работ: 13.06.2019г. (т. 14 л.д. 67-68),

АОСР от 14.06.2019г. № 3П/2.19, дата окончания работ: 14.06.2019г. (т. 14 л.д. 70-71),

АОСР от 15.06.2019г. № 3П/3.19, дата окончания работ: 15.06.2019г. (т. 14 л.д. 74-75),

АОСР от 21.06.2019г. № 3П/4.19, дата окончания работ: 21.06.2019г. (т. 14 л.д. 79-80),

АОСР от 21.06.2019г. № 3П/5.19, дата окончания работ: 21.06.2019г. (т. 14 л.д. 82-83),

АОСР от 25.06.2019г. № 3П/6.19, дата окончания работ: 25.06.2019г. (т. 14 л.д. 93-94),

АОСР от 25.06.2019г. № 3П/7.19, дата окончания работ: 25.06.2019г. (т. 14 л.д. 96-97),

АОСР от 26.06.2019г. № 3П/8.19, дата окончания работ: 26.06.2019г. (т. 14 л.д. 99-199),

АОСР от 04.06.2019г. № 2П/1.19, дата окончания работ: 04.06.2019г. (т. 15 л.д. 12-13),

АОСР от 04.06.2019г. № 2П/2.19, дата окончания работ: 04.06.2019г. (т. 15 л.д. 15-16),

АОСР от 04.06.2019г. № 2П/3.19, дата окончания работ: 05.06.2019г. (т. 15 л.д. 19-20),

АОСР от 05.06.2019г. № 2П/4.19, дата окончания работ: 05.06.2019г. (т. 15 л.д. 24-25),

АОСР от 06.06.2019г. № 2П/5.19, дата окончания работ: 06.06.2019г. (т. 15 л.д. 27-28),

АОСР от 07.06.2019г. № 2П/6.19, дата окончания работ: 07.06.2019г. (т. 15 л.д. 47-48),

АОСР от 11.06.2019г. № 2П/7.19, дата окончания работ: 11.06.2019г. (т. 15 л.д. 58-59),

АОСР от 12.06.2019г. № 2П/8.19, дата окончания работ: 12.06.2019г. (т. 15 л.д. 61-62),

АОСР от 13.06.2019г. № 2П/9.19, дата окончания работ: 13.06.2019г. (т. 15 л.д. 64-65);

- по водозабору «Пржевальский»:

АОСР от 31.08.2020г. № 2АД, дата окончания работ: 30.06.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 11-12),

АОСР от 31.08.2020г. № 6АД, дата окончания работ: 09.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 10 л.д. 127),

АОСР от 10.08.2019г. № 1ПР/1.19, дата окончания работ: 10.08.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 12 л.д. 107-оборот-108),

АОСР от 10.08.2019г. № 1ПР/2.19, дата окончания работ: 10.08.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 12 л.д. 109),

АОСР от 13.08.2019г. № 1ПР/3.19, дата окончания работ: 13.08.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 12 л.д. 110-оборот-111),

АОСР от 20.09.2019г. № 1ПР/4.19, дата окончания работ: 20.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 12 л.д. 113),

АОСР от 26.09.2019г. № 1ПР/5.19, дата окончания работ: 26.09.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 12 л.д. 114-оборот-115),

АОСР от 08.10.2019г. № 1ПР/6.19, дата окончания работ: 08.10.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 12 л.д. 115-оборот-116),

АОСР от 09.10.2019г. № 1ПР/7.19, дата окончания работ: 09.10.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 12 л.д. 117),

АОСР от 09.10.2019г. № 1ПР/8.19, дата окончания работ: 09.10.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 12 л.д. 118-оборот-119),

АОСР от 14.10.2019г. № 1ПР/9.19, дата окончания работ: 14.10.2019г., подписи застройщика, технического заказчика, заказчика отсутствуют (т. 12 л.д. 120-оборот-121).

В общем журнале работ (т. 16 л.д. 62-89) указан период выполнения работ с 12.04.2019г. по 21.09.2019г.

Таким образом, поскольку на момент предъявления заказчиком 03.03.2023г. настоящего иска о взыскании неотработанного аванса истек срок исковой давности по требованиям подрядчика об оплате работ/ затрат, выполненных/ понесенных в 2019г., то ни зачет, ни сальдирование по таким взаимным требованиям невозможно.

В т.ч. по этой причине в проведении по делу судебной экспертизы для определения стоимости работ/ затрат подрядчика, поскольку они выполнены/ понесены в 2019г., нет необходимости.

При этом на настоящее время заказчик на объекте строительства не находится, т.к. Госконтракт от 15.03.2019г. № 1920187375492554164000000 между вышестоящим заказчиком Минобороны России и ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» расторгнут по Соглашению от 23.09.2021г.

После чего Минобороны России заключило Госконтракт от 23.09.2021г. № 2122187376412554164000000 с новым генподрядчиком Публично-правовой компанией «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК»), который привлек нового подрядчика ООО «Запсибгазпром-Газификация» (т. 8 л.д. 22-67).

Законченный строительством объект: «Обеспечение водоснабжением здания учебного корпуса, детского сада и солдатского общежития», расположенного в военном городке № 71 с. Сергеевка Приморского края, 2 этап (водозабор «Пржевальский») (шифр объекта В-42/19-6)» принят приемочной комиссией по Акту от 29.12.2022г. (т. 8 л.д. 68-69) у нового генподрядчика ППК «ВСК» и нового подрядчика ООО «Запсибгазпром-Газификация».

По водозабору «Приозерный» большая часть АОСР, как указано выше, не подписаны застройщиком, техническим заказчиком, заказчиком (генподрядчиком).

Как указывает заказчик, им вышестоящему заказчику не были предъявлены к приемке и к оплате какие-либо из работ/ затрат, о выполнении которых заявляет подрядчик в настоящем деле.

Указанные обстоятельства также свидетельствуют об отсутствии оснований для проведения по делу судебной экспертизы для определения стоимости работ/ затрат прежнего подрядчика.

Довод подрядчика о разработке им проектной документации со ссылкой на Положительное заключение Государственной экспертизы Минобороны России от 09.07.2021г. № 25-1-4-0005-21 является необоснованным.

Так, из Положительного заключения Государственной экспертизы Минобороны России от 09.07.2021г. № 25-1-4-0005-21 следует, что объект государственной экспертизы (проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий) по объекту капитального строительства: «Обеспечение водоснабжением зданий учебного корпуса, детского сада и солдатского общежития», расположенного в военном городке № 71 с. Сергеевка Приморского края. Водозабор «Приозерный». Шифр В-42/19-6. 1 этап.» (т. 16 л.д. 2-18), был разработан лицами иными, нежели ООО «СпецМонтажУниверсал» (соответствующие лица перечислены в п. 3.1. Положительного заключения (т. 16 л.д. 3, 3-оборот).

Доказательств передачи подрядчиком заказчику результата работ по разработке проектной документации в материалах дела не содержится.

При таких обстоятельствах суды пришли к выводу об обоснованности и удовлетворении на основании ст.ст. 309, 310, 330, 382, 395, 1105 ГК РФ требования заказчика о взыскании с подрядчика всего аванса как неотработанного и начисленных на него процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование коммерческим кредитом, а также неустойки за просрочку в работе.

Проценты по ст. 395 ГК РФ на неотработанный аванс добровольно исчисляются заказчиком не ранее даты получения подрядчиком претензии от 30.12.2022г. № 38/10541-дсп о возврате неотработанного аванса, – что прав подрядчика не нарушает.

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ не установлено.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03.10.2023г. по делу № А40-42617/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий судья                                                      Кузнецова Е.Е.

 

Судьи                                                                                                           Бодрова Е.В.

 

                                                                                                          Семикина О.Н.