Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-75352/2019

02 декабря 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  28 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  02 декабря 2019 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДЕКС" 

ответчик: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗ-СТРОЙ"

о взыскании 25 990,57 руб.

при участии

- от истца: не явился, извещен

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Истец - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДЕКС" обратился в суд с иском к ответчику - ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СОЮЗ-СТРОЙ" о взыскании 25 990,37 руб. неустойки.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве, в установленном порядке извещен о слушании дела, не явился. В соответствии с п. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что 20.04.2016 между ЗАО «Союз-Строй» и ООО «НОРДЕКС» был заключен договор подряда № 4/78-С (Договор) по условиям которого ООО «НОРДЕКС» обязался в срок до 31.05.2016 выполнить комплекс работ.

Пунктом 3.4.1. Договора предусмотрено, что оплата выполненных работ производится Генподрядчиком в течение пяти банковских дней дня со дня выставления счета, который в свою очередь выставляется на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счета-фактуры. Генподрядчик не позднее срока указанного в настоящем подпункте обязан уплатить Подрядчику сумму, указанную в счете за выполненные работы, при этом Подрядчик выставляет счет на оплату выполненных работ в размере 90% от суммы, указанной в подписанном за соответствующий месяц Акте по форме КС-2.

Окончательный акт приема-передачи подписан 31.05.2016.

В соответствии с п. 3.1 Договора стоимость работ по Договору составляет 1 528 187,12 руб. Согласно пункту 3.4.2.2. Договора 31.05.2016 по данному договору произведен взаимозачет услуг генподряда в размере 4% от полной стоимости работ на сумму 61 127,49 руб. 

После выставления претензии Ответчику добровольно было оплачено 1 100 000,00 руб.

Оставшаяся сумма была взыскана через суд. Решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.02.2017 по делу А56-87565/2016 требования Истца были удовлетворены, с Ответчика было взыскано 367 059,00 руб. задолженности по договору подряда № 4/78-С от 20.04.2016. Инкассовым поручением 09.03.2017 сумма долга в размере 367 059,00 руб. списана с расчетного счета Ответчика на счет Истца.

Согласно п. 9.3 договора при нарушении Подрядчиком сроков оплаты Субподрядчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежавшей перечислению за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.

В соответствии с расчетом истца размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 25 990,57 руб.

ЗАО «Союз-строй» не согласно с исковыми требованиями по следующим основаниям.

Настоящим ЗАО «Союз-строй» заявляет, что ООО «Нордекс» пропустило срок исковой давности по взысканию пени в размере 4 737,38 руб. за период с 06.06.2016 по 29.06.2016.

В соответствии с пунктом 1 статьи 196 Гражданского кодекса РФ срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

О нарушении сроков оплаты за период с 06.06.2016 по 29.06.2016 истец узнал 29.06.2016 года, а исковое заявление подал 01.07.2019 года. Срок исковой давности истек 30.06.2019 года

Истцом представлен расчет неустойки в нарушения порядка оплаты, предусмотренного п.п. 3.4.1. и 3.4.2. Договора.

Сроки оплаты выполненных работ по Договору № 4/78-С от 20.04.2016 года, заключенного между ЗАО «Союз-строй» (генподрядчик) и ООО «Нордекс» (подрядчик) установлены пунктами 3.4.1. и 3.4.2.

В соответствии с пунктом 3.4.1. Договора оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение пяти банковских дней дня со дня выставления счета, который в свою очередь выставляется на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счета-фактуры. Заказчик не позднее срока указанного в настоящем подпункте обязан уплатить Подрядчику сумму, указанную в счете за выполненные работы, при этом Подрядчик выставляет счет на оплату выполненных работ в размере 90% от суммы, указанной в подписанном за соответствующий месяц Акте по форме КС-2.

Пунктом 3.4.2. Договора предусмотрено, что оставшаяся часть суммы (10 %) за все выполненные работы по договору, принятые и отраженные в ежемесячных Актах по форм КС-2 выплачиваются в следующем порядке:

3.4.2.1.    8 (восемь) % - в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания окончательного Акта приема-передачи всех работ согласно п. 6.5.1. Договора.

3.4.2.2.    2 (два) % - в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания окончательного Акта приема-передачи всех работ согласно п. 6.5.1. Договора.

В расчете неустойки истец указываете неверные сроки оплаты для 2 % от стоимости выполненных работ.

При этом 30 563,74 руб. должны были быть оплачены в срок до 06.12.2016. А истец в расчете неустойки считает пени на эту сумму с 31.05.2016, то есть истец неправомерно рассчитывает пени на сумму 30 536,74 руб. в период с 31.05.2016 по 06.12.2016.

Доводы ответчика суд отклоняет, поскольку, как правомерно указано истцом, соблюдение обязательного претензионного порядка продлевает срок исковой давности на соответствующий период.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с ООО "СОЮЗ-СТРОЙ" (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «НОРДЕКС» (ОГРН 

<

***>) 25 990,57 руб. неустойки, а также 2 000,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Виноградова Л.В.